83/2023-256500(1) 

 

Арбитражный суд Тамбовской области  

392020 г. Тамбов, ул. Пензенская, 67/12 http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А64-1053/2023

28 июля 2023года

г. Тамбов

 Резолютивная часть решения объявлена 26.07.2023г. В полном объеме решение изготовлено 28.07.2023г. 

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Н.Ю. Макаровой  

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи  секретарем судебного заседания ФИО1  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску  

Комитета дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова  

Тамбовской области, г.Тамбов (ИНН 

<

***>) к АО УМ «Тамбовагропромдорстрой», г.Тамбов (ИНН 

<

***>) о взыскании 122 861,44 руб. при участии в судебном заседании: от истца: ФИО2, доверенность от 05.10.2022г. № 50-40-855/ю; от ответчика: не явились, извещены 

УСТАНОВИЛ:

Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова  Тамбовской области, г.Тамбов (ИНН 

<

***>) обратился в Арбитражный суд  Тамбовской области с исковым заявлением к АО УМ «Тамбовагропромдорстрой»,  г.Тамбов (ИНН 

<

***>) о взыскании 122 861,44 руб.  

Определением суда от 07.02.2023 дело назначено к рассмотрению в порядке  упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 АПК РФ.  Определением от 06.04.2023 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам  искового производства.  

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного  заседания по настоящему делу, своего представителя в судебное заседание не направил.  

Согласно ст. 156 АПК РФ судебное разбирательство проводится в отсутствие  представителя ответчика по имеющимся в деле доказательствам.  

Рассмотрев материалы дела, суд установил. 

Между муниципальным казенным учреждением «Дирекция городских дорог»  (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Тамбовагропромдорстрой»,  (подрядчик) заключен муниципальный контракт от 14.09.2021 № 20/21 на выполнение  работ для муниципальных нужд городского округа - город Тамбов по ремонту  автомобильной дороги по ул. Ореховой на участке от ул. Чичерина до ул. Агапкина в  городе Тамбове.  

В соответствии с постановлением администрации города Тамбова Тамбовской  области от 18.05.2022 № 3032 «Об исполнении решения Тамбовской городской Думы  Тамбовской области от 30.03.2022 № 498 «О внесении изменений в решение Тамбовской  городской Думы Тамбовской области от 25.12.2019 № 1204 «Об утверждении Положений  об органах администрации города Тамбова Тамбовской области с правами юридического  

лица и признании утратившими силу отдельных решений Тамбовской городской Думы  Тамбовской области» и на основании Дополнительного соглашения № 1 от 01.06.2022 к  муниципальному контракту от 14.09.2021 № 20/21 правопреемником МКУ «Дирекция  городских дорог» по данному контракту является комитет дорожного хозяйства и  транспорта, администрации города Тамбова Тамбовской области (далее - комитет).  

16 января 2023 года в адрес ООО «Тамбовагропромдорстрой» была направлена  претензия № 50-40-42/23 о взыскании неустойки в рамках муниципального контракта.  

Согласно п. 1.1 Контракта Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить и  передать работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.  

Согласно пункту 5.2. Контракта сроки выполнения работ: с 01.05.2022 по  01.10.2022. Календарные сроки выполнения работ по Объекту определяются графиком  строительно-монтажных работ. Срок выполнения работ включает в себя срок сдачи  приемки выполненных работ.  

В соответствии с п. 5.3. Контракта, дата окончания работ, определяемая исходя из  пункта 5.2. настоящего Контракта, в том числе даты окончания отдельных видов работ,  определенные графиком строительно-монтажных работ, является исходным для  определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.  

На основании пункта 10.3 Контракта в случае просрочки исполнения Подрядчиком  обязательств (в том числе Гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а  также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование  об уплате неустоек (штрафов, пеней).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком  (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со  дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения  обязательства.  

Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка РФ от цены Контракта, отдельного этапа исполнения контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных  Контрактом, соответствующим отдельным этапом исполнения контракта и фактически  исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).  

Акт о приемке выполненных работ № 1 от 26.07.2022 на сумму 6 034 349,57 руб.  подписан Заказчиком 26.07.2022.  

Акт о приемке выполненных работ № 2 от 14.09.2022 на сумму 214 171,78 руб.  подписан Заказчиком 14.09.2022.  

По состоянию на 02.10.2022 обязательства по Контракту не исполнены  Подрядчиком на сумму 11711 760,13 руб.  

Акт о приемке выполненных работ № 3 от 21.10.2022 на сумму 6 605 834,73 руб.  подписан Заказчиком 27.10.2022.  

Акт о приемке выполненных работ № 4 от 21.11.2022 на сумму 4 032 520,63 руб.  подписан Заказчиком 29.11.2022.  

Акт о приемке выполненных работ № 5 от 07.12.2022 на сумму 251 967,22 руб.  подписан Заказчиком 07.12.2022.  

19 декабря 2022 года между Заказчиком и Подрядчиком заключено Соглашение о  расторжении контракта на сумму 821 437,55 руб.  

Обязательства Подрядчиком исполнены в полном объеме 19.12.2022, с нарушением  срока предусмотренного Контрактом.  

Истец рассчитал ответчику пени следующим образом: Срок выполнения работ согласно п. 5.2 Контракта по 01.10.2022. Цена контракта 17 960 281,48 руб. Ставка рефинансирования Центрального банка РФ с 19.09.2022 - 7,5%. 

До 01.10.2022 работы выполнены на сумму 6 248 521,35 руб., согласно актам о  приемке выполненных работ № 1 от 26.07.2022, № 2 от 14.09.2022.  

1. С 02.10.2022 по 27.10.2022 просрочка исполнения обязательств составляет 26  дней.  

17 960 281,48 - 6 248 521,35 = 11711760,13 руб. - стоимость работ не выполненных  в срок предусмотренный контрактом.  

11 711 760,13 *26 дн.*7,5%* 1/300=76 126,44 руб. 

Акт о приемке выполненных работ № 3 от 21.10.2022 на сумму 6 605 834,73 руб.  подписан Заказчиком 27.10.2022.  

2. С 28.10.2022 по 29.11.2022 просрочка исполнения обязательств составляет 33  дня.  

17 960 281,48 - 6 248 521,35- 6 605 834,73 = 5 105 925,4 руб. - стоимость работ не  выполненных в срок предусмотренный контрактом.  

5 105 925,4 *33дн*7,5%* 1/300=42 123,88 руб. 

Акт о приемке выполненных работ № 4 от 21.11.2022 на сумму 4 032 520,63 руб.  подписан Заказчиком 29.11.2022.  

3. С 30.11.2022 по 07.12.2022 просрочка исполнения обязательств составляет 8  дней.  

17 960 281,48 - 6 248 521,35- 6 605 834,73 - 4 032 520,63 = 1 073 404,77 руб. -  стоимость работ не выполненных в срок предусмотренный контрактом.  

1 073 404,77*8 дн.*7.5 %* 1/300= 2 146,81 руб. 

Акт о приемке выполненных работ № 5 от 07.12.2022 на сумму 251 967,22 руб.  подписан Заказчиком 07.12.2022.  

4. С 08.12.2022 по 19.12.2022 - просрочка исполнения обязательств  составляет 12 дней.  

17 960 281,48 - 6 248 521,35- 6 605 834,73 - 4 032 520,63 - 251967,22 = 521437,55стоимость работ не выполненных в срок предусмотренный (онтрактом.  

821 437,55 *12 дн.*7,5%* 1/300=2 464,31 руб. 

Таким образом, неустойка за нарушение сроков выполнения работ за период с  02.10.2022 по 19.12.2022 составляет 122 861,44 рублей.  

Претензия истца ответчиком не исполнена. Истец обратился в Арбитражный суд Тамбовской области с настоящим иском. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд считает заявленные  требования подлежащими удовлетворению. При этом суд руководствовался следующим.  

В силу части 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- также Гражданский кодекс РФ, ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из  оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий  граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими  актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают  гражданские права и обязанности.  

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в  силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица  (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу,  оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо  воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника  исполнения его обязанности  

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких  условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми  требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее  изменение его условий не допускаются.  

Обязательства сторон возникают из муниципального контракта от 14.09.2021 №  20/21 на выполнение работ.  

Исходя из правовой природы отношений, вытекающих из Контракта, к  возникшему спору подлежат применению нормы главы 37 Гражданского кодекса РФ о  договорах подряда, а также Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд».  

В соответствии с п. 8 ст. 3 Федерального закона N 44-ФЗ (в редакций,  действовавшей на момент спорных правоотношения), под государственным или  муниципальным контрактом понимается договор, заключенный от имени Российской  Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт),  муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или  муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд,  муниципальных нужд.  

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных  работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить  строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов  производственного и непроизводственного характера работы и передать их  государственному или муниципальному заказчику, а государственный или  муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или  обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

К отношениям по государственным или муниципальным контрактам на  выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, не  урегулированной Кодексом, применяется закон о подрядах для государственных или  муниципальных нужд (статья 768 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору  подряда одна сторона (подрядчик) обязуется по заданию другой стороны (заказчика)  выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется  принять результат и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд,  строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ,  подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим  параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об  этих видах договорах.  

В соответствии с п. 1 ст. 740 ГК РФ, по договору строительного подряда  подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика  определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется  создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и  уплатить обусловленную цену.  

Статьей 746 ГК РФ установлено, что оплата выполненных подрядчиком работ  производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке,  которые установлены законом или договором строительного подряда.  

На основании части 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и  приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.  

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации  взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного права.  

В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации  исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием  имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими  способами, предусмотренными залогом или договором.  

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации  неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная  

сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.  

Неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств,  средством возмещения кредитору потерь, вызванных нарушением должником своих  обязательств.  

В соответствии со статьями 329 - 331 Гражданского кодекса РФ ответственность в  виде неустойки за нарушение обязательств наступает в случае, если неустойка  предусмотрена условиями договора или законом. При этом соглашение о применении  неустойки должно быть достигнуто в письменном виде.  

Согласно пункту 5.2. Контракта сроки выполнения работ: с 01.05.2022 по  01.10.2022. Календарные сроки выполнения работ по Объекту определяются графиком  строительно-монтажных работ. Срок выполнения работ включает в себя срок сдачи  приемки выполненных работ.  

В соответствии с п. 5.3. Контракта, дата окончания работ, определяемая исходя из  пункта 5.2. настоящего Контракта, в том числе даты окончания отдельных видов работ,  определенные графиком строительно-монтажных работ, является исходным для  определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.  

На основании пункта 10.3 Контракта в случае просрочки исполнения Подрядчиком  обязательств (в том числе Гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а  также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование  об уплате неустоек (штрафов, пеней).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком  (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со  дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения  обязательства.  

Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка РФ от цены Контракта, отдельного этапа исполнения контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных  Контрактом, соответствующим отдельным этапом исполнения контракта и фактически  исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).  

Факт исполнения обязательств Подрядчиком 19.12.2022, с нарушением срока  предусмотренного Контрактом, материалами дела доказан и ответчиком не оспорен.  

Расчет неустойки судом проверен и признан арифметически верным.  Ответчиком документы, опровергающие доводы истца, не представлены.  

Доказательств полной либо частичной оплаты суммы долга в материалы дела не  представлено.  

Ответчик, расчет неустойки не оспорил, контррасчет не представил.  

Ходатайство о снижении суммы взыскиваемой неустойки ответчиком заявлено не  было. Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем  интересе (статья 1 ГК РФ), неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333  ГК РФ только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.  

В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по  своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и  непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает  относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также  достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.  

В соответствии с ч.2 ст. 65 АПК РФ обстоятельства, имеющие значение для  правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании  требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими  применению нормами материального права. Представленные по делу и исследованные  

судом доказательства и установленные обстоятельства, согласно заявленных оснований,  предмета иска, суд находит достаточными для разрешения спора по существу.  

По изложенным обстоятельствам и на основании указанных норм закона  требования по иску правомерны.  

Согласно ст. 110 АПК РФ госпошлина подлежит взысканию с ответчика в доход  федерального бюджета.  

 Руководствуясь статьями 102, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

СУД РЕШИЛ: 

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ  "ТАМБОВАГРОПРОМДОРСТРОЙ", 

<

...> (ОГРН 

<

***>, дата регистрации 11.08.1998, ИНН 

<

***>) в пользу  КОМИТЕТА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Тамбовская область, г. Тамбов,  Коммунальная улица, 6 (ОГРН 

<

***>, дата регистрации 19.01.2006, ИНН  

<

***>) неустойку по контракту от 14.09.2021г. № 20/21 за период с 02.10.2022г. по  19.12.2022г. в размере 122 861,44руб.,  

в доход федерального бюджета госпошлину в размере 4686руб.  

Истцу (по заявлению), налоговому органу выдать исполнительные листы после  вступления решения в законную силу.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тамбовской  области.  

Копии решения на бумажном носителе выдаются лицам, участвующим в деле, по заявлению. 

Судья Макарова Н.Ю.  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 05.04.2023 3:26:00

 Кому выдана МАКАРОВА НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА