АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-9615/2023

г. Ярославль

31 августа 2024 года

Резолютивная часть решения оглашена  15 августа 2024 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Шадриновой Л.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Светловой Е.О.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью строительная компания "Элит-Строй" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "ТГК-2 ЭНЕРГОРЕМОНТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 259091.79  руб.,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

 

при участии

от истца- не явились

от ответчика- не явились

от третьих лиц- не явились 

 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью строительная компания "Элит-Строй" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ТГК-2 ЭНЕРГОРЕМОНТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании с учетом уточнения умму гарантийного удержания по договору подряда № 000823-1701/ДогР20/03- 17/ДогР20 от 08.04.2021г. в размере 184 293, 20 руб.; сумму процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ за период: 02.10.2022г. по 28.11.2023г. включительно по Договору подряда № 3 000823-1701/ДогР20/03-17/ДогР20 на производство работ от 08.04.2021г. в размере 19 204, 36 руб. 36 коп., продолжая далее начисление в размере ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующие периоды, за каждый день просрочки на сумму долга до даты фактической оплаты; сумму процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ за период: 02.10.2022г. по 21.07.2023г. включительно по Договору подряда № 000979-1201/ДогР20/03-2 на производство работ от 23.06.2020г. в размере 55 594, 23 руб. 23 коп., в части требования о взыскании 683 244 руб. 44 коп. задолженности заявлен отказ от иска.

В судебное заседание стороны представителей не направили.

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Требования истца основаны на договоре подряда № 000823-1701/ДогР20/03-17/ДогР20 от 08.04.2021 года и Договоре подряда № 000979-1201/ДогР20/03-2 на производство работ от 23.06.2020.

В соответствии с п. 1.1. Договора № 000823-1701/ДогР20/03-17/ДогР20 от 08.04.2021 года Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Генподрядчика строительно-монтажные работы по реконструкции квартальных участков Костромских тепловых сетей: участок распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры 2Н-19 (инвентарные номера участков согласно Приложению N 8) и сдать их результат Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену. По письменному требованию Генподрядчика может составляться Проект производства работ.

В соответствии с п. 1.2 Договора № 000823-1701/ДогР20/03-17/ДогР20 от 08.04.2021 года Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, в соответствии с Техническим заданием и Сводной таблицей стоимости работ, определяющими объем, содержание, цену работ, используемые материалы и срок производства работ, а также Проектом производства работ (в случае его составления), являющимися Приложениями N 1,2 к настоящему Договору и его неотъемлемыми частями.

За период: 31.12.2020г.- по 31.03.2022г. Подрядчиком были выполнены работы согласно Актам о выполненных работах по форме КС-2, Справке о стоимости работ и затрат по форме КС-2, представленным в материалы дела.

По п. 5.1. Договора Расчет за выполненные работы производится Генподрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок, не позднее 40 календарных дней с даты подписания акта формы КС-2 и после получения справки формы КС-3 (в установленных действующим законодательством случаях) с гарантированным удержанием в размере 5% от суммы акта, при условии получения от Подрядчика счета на оплату и налогового счета-фактуры (не требуется при использовании УСН), оформленных в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ.

В соответствии с п. 1.1. Договора № 000979- 1201/ДогР20/03-2 на производство работ от 23.06.2020г. Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика комплекс работ по реконструкции участков тепломагистралей ЯТС ПАО «ТГК-2» (т/м «Р», т/м «Г»), и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

По письменному требованию Заказчика может составляться Проект производства работ.

В соответствии с п. 1.2 Договора Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, в соответствии с Техническими заданиями и Сводной таблицей стоимости работ с Локальными сметными расчетами, определяющими объем, содержание, цену работ, используемые материалы и срок производства работ, а также Проектом производства работ (в случае его составления), являющимися Приложениями N 1.1-1.8, ,2 2.1-2.8 к настоящему Договору и его неотъемлемыми частями.

За период: 31.07.2020г.- по 31.03.2021г. Подрядчиком были выполнены работы по Актам о выполненных работах по форме КС-2, Справке о стоимости работ и затрат по форме КС-3, представленным в материалы дела.

В связи с тем, что ответчик не уплатил задолженность в полном объеме, истец обратился в суд с рассматриваемым иском.

Оценив представленные документы в порядке ст. 71 АПК РФ, суд полагает, что требования истца подлежат удовлетворению частично по следующим основаниям.

В соответствии с ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или договором.

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Наличие оплаты по договорам в полном объеме, однако, с нарушением срока оплаты задолженности подтверждается представленными в дело доказательствами, соответствует контррасчету ответчика, требование о взыскании процентов судом признается обоснованным (статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации), требование о взыскании задолженности в размере 184 293, 20 руб. в связи с оплатой подлежит оставлению без удовлетворения.

Производство по делу в части требования о взыскании 683 244 руб. 45 коп. долга задолженности подлежит прекращению в силу отказа истца от иска в данной части и принятия его судом.

Расходы по оплате государственной пошлины суд относит на ответчика в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (ч.1 ст.177 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТГК-2 ЭНЕРГОРЕМОНТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью строительная компания "Элит-Строй" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  7 008 руб. 54 коп. процентов, 55 594 руб. 23 коп. процентов, 21 564 руб. 57 коп. в возмещение расходов по уплате госпошлины.

В части требования о взыскании 683 244 руб. 45 коп. долга производство по делу прекратить.

В остальной части иска отказать.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью строительная компания "Элит-Строй" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 5 093 руб. 43 коп. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 31.05.2023 года № 20. Исполнение судебного акта в части возврата государственной пошлины производится по ходатайству плательщика государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, - через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

 

Судья

Л.А. Шадринова