﻿﻿

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА

Пушкина ул., дом 45, г. Хабаровск, 680000, официальный сайт: www.fasdvo.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ Ф03-4923/2019

11 декабря 2019 года

г. Хабаровск

Резолютивная часть постановления объявлена 04 декабря 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 декабря 2019 года.

Арбитражный суд Дальневосточного округа в составе:

Председательствующего судьи: Кондратьевой Я.В.

Судей: Барбатова А.Н., Камалиевой Г.А.

при участии:

от ООО «Стройподрядчик»: Степанова С.М., представителя по доверенности от 04.08.2019; Сосновского А.В., представителя по доверенности от 04.08.2019

от ООО «С Технология»: Романчича А.С., представителя по доверенности от 29.11.2019; Дергачевой Е.Г., представителя по доверенности от 16.09.2016 № 28 АА 0783253; Куликовой Е.Л., представителя по доверенности                      от 16.09.2016 № 28 АА 0783255

от акционерной компании с ограниченной ответственностью источника энергии «Мэн Лань СинХэ»: Дергачевой Е.Г., представителя по доверенности от 25.12.2018; Куликовой Е.Л., представителя по доверенности                      от 25.12.2018

от Хэйхэская компания торгово-промышленного развития «Сириус»: Дергачевой Е.Г., представителя по доверенности от 15.09.2018;                      Куликовой Е.Л., представителя по доверенности от 15.09.2016

рассмотрев в судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью «С Технология», акционерной компании с ограниченной ответственностью источника энергии «Мэн Лань СинХэ», Хэйхэской компании торгово-промышленного развития «Сириус»

на решение от 11.04.2019, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2019

по делу №  А04-5589/2016 Арбитражного суда Амурской области

по иску общества с ограниченной ответственностью «Стройподрядчик»

к обществу с ограниченной ответственностью «С Технология»

о взыскании 74 866 802 руб. 12 коп.

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью                             «С Технология»

к обществу с ограниченной ответственностью «Стройподрядчик» 

о взыскании 86 226 324 руб. 72 коп. 

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Премиум Групп», общество с ограниченной ответственностью «Амурэлектромонтаж» 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройподрядчик»    (ОГРН 1032800297320, ИНН  2816007847, адрес: 675000, Амурская область,                        г. Благовещенск, ул. Студенческая, д. 21/1; далее – ООО «Стройподрядчик») обратилось в Арбитражный суд Амурской области к обществу с ограниченной ответственностью «С Технология» (ОГРН 1112801007329, ИНН 2801164533, адрес: 676925, Амурская область, Ивановский район,                      с. Березовка, ул. Новая, д. 65; далее – ООО «С Технология») с иском о взыскании 64 309 255 руб. 45 коп. задолженности по оплате работ по договорам подряда: б/н от 20.02.2013, № 3/2013 от 31.07.2013, № 4/2013                 от 31.07.2013, № 7/2013 от 04.07.2013, № 6/2013 от 21.06.2013, № 1/2013                    от 21.05.2013, № 2/2013 от 15.06.2013, № 8/2013 от 26.08.2013, № 11/2014                  от 24.03.2014, № 12/2014 от 02.06.2014, № 17/2014 от 13.08.2014, № 16/2014               от 13.08.2014, № 14/2014 от 13.08.2014, № 20/2014 от 29.09.2014, № 18/2014           от 17.09.2014, № 19/2014 от 01.09.2014, № 15/2014 от 13.08.2014, № 13/2014             от 13.08.2014, № 11/1/2014 от 01.04.2014, № 10/2014 от 13.03.2014, № 9/2014    от 24.03.2014, № 1/2015 от 01.01.2015, № 21/2014 от 01.11.2014, № 11/2/2014  от 01.04.2014, № 3/2015 от 11.06.2015, № 11/3/2014 от 01.04.2014,                          № 21/2/2014 от 01.11.2014, № 7/3/2013 от 01.09.2013, 7 087 270 руб. 07 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленные за период с 26.03.2013 по 30.05.2016, 3 470 276 руб. 60 коп. процентов за пользование денежными средствами в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) за период с 16.06.2015 по 06.06.2016. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Амурэлектромонтаж»                  (ОГРН 1132801002993, ИНН 2801183744, адрес: 675000, Амурская область,                    г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 198, корп. 4, оф. 2; далее –                            ООО «Амурэлектромонтаж»).

Определением от 16.11.2016 судом по ходатайству                                     ООО «С Технология» назначена судебная строительно-техническая экспертиза, проведение которой поручено обществу с ограниченной ответственностью Бизнес-центр «Ресфин».

Определением от 15.11.2017 судом принято к производству встречное исковое заявление ООО «С Технология» к ООО «Стройподрядчик» о  взыскании неосновательного обогащения в размере 75 303 039 руб. 64 коп., процентов за период с 30.06.2017 по 25.02.2019 в размере 9 762 032 руб.                   12 коп., всего – 85 065 071 руб. 76 коп. (с учетом уточнения требований, заявленных в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; далее – АПК РФ).

 К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Премиум Групп» (ОГРН 1137746101635, ИНН 7717744983, адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 301, оф. 351; далее –                ООО «СК «Премиум Групп»).

Определением суда от 31.01.2018 по ходатайству                                        ООО «Стройподрядчик» назначена повторная судебная строительно-техническая экспертиза, проведение которой поручено обществу с ограниченной ответственностью «ПромСтройПроект».

В последствии ООО «Стройподрядчик» заявлено ходатайство об уточнении исковых требований о взыскании с ООО «С Технология»: по договору б/н от 20.02.2013 неустойки за период с 22.08.2013 по 10.09.2013 в размере 90 410 руб. 96 коп.; по договору от 21.05.2013 № 1/2013 неустойки за период с 28.06.2013 по 23.10.2014 в размере 1 123 014 руб. 08 коп.; по договору от 15.06.2013 № 2/2013 процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 08.10.2013 по 01.06.2015 в размере                  1 358 775 руб. 30 коп.; по договору от 31.07.2013 № 3/2013 неустойки за период с 28.09.2013 по 30.04.2014 в размере 69 703 руб. 30 коп.; по договору от 31.07.2013 № 4/2013 неустойки за период с 26.05.2014 по 24.12.2014 в размере 61 853 руб. 94 коп.; по договору от 21.06.2013 № 6/2013  неустойки за период с 01.10.2013 по 14.01.2014 в размере 189 478 руб. 08 коп.; по договору от 01.09.2013 № 7/3/2013 процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 08.10.2013 по 13.03.2014 в размере                 24 217 руб. 08 коп.; по договору от 26.08.2013 № 8/2013 неустойки за период с 06.11.2013 по 11.06.2015 в размере 754 759 руб. 66 коп.; по договору от 24.03.2014 № 9/2014 неустойки за период с 10.05.2014 по 24.07.2014 в размере 167 812 руб. 86 коп.; по договору от 13.03.2014 № 10/2014 неустойки за период с 26.08.2014 по 10.10.2014 в размере 35 296 руб. 56 коп.; по договору от 01.04.2014 № 11/2/2014 процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 22.04.2014 по 04.06.2015 в размере            58 049 руб. 05 коп.; по договору от 01.04.2014 № 11/3/2014 процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.07.2014 по 17.12.2014 в размере 191 092 руб. 05 коп.; по договору от 02.06.2014                      № 12/2014 неустойки за период с 26.08.2014 по 17.12.2014 в размере                   92 015 руб. 12 коп.; по договору от 13.08.2014 № 13/2014 неустойки за период с 09.12.2014 по 25.12.2014 в размере 18 783 руб. 98 коп.; по договору от 13.08.2014 № 14/2014 неустойки за период с 09.12.2014 по 04.06.2015 в размере 84 081 руб. 14 коп.; по договору от 13.08.2014 № 15/2014 неустойки за период с 10.11.2014 по 24.12.2014 в размере 44 383 руб. 16 коп.; по договору от 13.08.2014 № 16/2014 неустойки за период с 26.08.2014 по 19.02.2015 в размере 285 983 руб. 44 коп.; по договору от 13.08.2014                     № 17/2014 сумму основного долга в размере 21 005 703 руб. 36 коп., неустойки за период с 26.08.2014 по 04.04.2019 в размере 16 635 246 руб.         02 коп.; по договору от 01.09.2014 № 19/2014 основной долг в размере              1 718 272 руб., неустойку за период с 13.10.2014 по 04.04.2019 в размере                 1 317 467 руб. 08 коп.; по договору от 17.09.2014 № 18/2014 основной долг в размере 2 048 443 руб., неустойку за период с 13.10.2014 по 04.04.2019 в размере 1 577 270 руб. 14 коп.; по договору от 29.09.2014 № 20/2014 основной долг в размере 3 632 057 руб., неустойку за период с 10.11.2014 по 04.04.2019 в размере 2 558 673 руб. 92 коп.; по договору от 01.11.2014                    № 21/2014 основной долг в размере 2 835 820 руб. 35 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 07.04.2015 по 04.04.2019 в размере 978 958 руб. 10 коп.; по договору от 01.11.2014                       № 21/2/2014 проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 09.12.2014 по 17.12.2014 в размере 5 559 руб. 33 коп.; по договору от 01.01.2015 № 1/2015 основной долг в размере 409 063 руб. 23 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 07.04.2015 по 04.04.2019 в размере 153 416 руб. 86 коп.; по договору                    от 11.06.2015 № 3/2015 основной долг в размере 9 626 302 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 13.10.2015 по 04.04.2019 в размере 2 834 931 руб. 02 коп., проценты за пользование денежными средствами по правилам статьи 317.1 ГК РФ за период с 13.10.2015 по 04.04.2019 в размере 2 978 395 руб. 41 коп. 

Решением суда от 11.04.2019, оставленным без изменения постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2019, первоначальный иск удовлетворен, с ООО «С Технология» в пользу                    ООО «Стройподрядчик» взыскано 74 965 288 руб. 58 коп., включая                               41 275 660 руб. 94 коп. основного долга, 25 106 233 рубля 44 коп. пени,                   2 978 395 руб. 41 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 2 500 000 руб. судебных расходов по оплате экспертизы. В удовлетворении встречного иска отказано.

В кассационной жалобе ООО «С Технология», ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права, просит решение от 11.04.2019, постановление апелляционного суда от 29.07.2019 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Амурской области. В обоснование жалобы заявитель приводит доводы о том, что экспертное заключение ООО «ПромСтройПроект» не может быть принято в качестве допустимого доказательства по делу, поскольку выполнено с нарушением норм процессуального права и не соответствует фактическим обстоятельствам дела. Указывает на то, что в основу выводов экспертов положено исследование, проведенное лицами, которым проведение экспертизы не поручалось, а именно ООО «Кади». Считает, что эксперты ООО «ПромСтройПроект» завысили объемы земляных работ, выполненные ООО «Стройподрячик», а также включили в объемы выполненные последним, объемы земляных работ, выполненные ООО «СК Премиум Групп». Также заявитель жалобы считает, что выводы экспертов ООО «ПромСтройПроект» противоречат результатам исследований. Также обращает внимание суда кассационной инстанции на то, что показатели в расчетах объемов фактически выполненных работ у двух экспертных учреждений, проводивших исследование, существенно различаются. В этой связи полагает, что суд должен был поставить на обсуждение сторон вопрос о проведении третьей экспертизы.

Также в суд округа с кассационной жалобой в порядке                              статьи 42 АПК РФ обратились акционерная компания с ограниченной ответственностью источника энергии «Мэн Лань СинХэ», Хэйхэская компания торгово-промышленного развития «Сириус», ООО «АС Компания» в которой они просят решение от 11.04.2019, постановление апелляционного суда от 29.07.2019 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Амурской области, в том числе для проведения новой экспертизы. 

В обоснование доводов жалоб заявители указывают на то, что финансирование строительства объекта осуществлялось на основании инвестиционного контракта от 31.05.2013 и договора от 15.03.2013, заключенных между акционерной компанией с ограниченной ответственностью источника энергии «Мэн Лань СинХэ» (инвестор 1), Хэйхэской компании торгово-промышленного развития «Сириус» (инвестор 2) и ООО «АС Компания» (инвестор 3) и ООО «С Технолония». Поскольку в Арбитражном суде Амурской области рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве) ООО «С Технология», то в случае банкротства общества и недостаточности имущества последнего для погашения долга ООО «Стройподрядчик» может требовать уплаты долга в порядке субсидиарной ответственности от участников (инвесторов) должника, поэтому решение по настоящему спору может повлиять на права и обязанности инвесторов в будущем.

До рассмотрения кассационных жалоб от ООО «АС Компания» поступил отказ от кассационной жалобы, который принят судом кассационной инстанции и определением от 04.12.2019 производство по кассационной жалобе ООО «АС Компания» прекращено.

В судебном заседании кассационной инстанции представители                 ООО «С Технология»,  акционерная компания с ограниченной ответственностью источника энергии «Мэн Лань СинХэ», Хэйхэская компания торгово-промышленного развития «Сириус», поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе, дав по ним пояснения.

Представители ООО «Стройподрядчик» выразили несогласие с доводами жалоб, считают обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о месте и времени судебного разбирательства, явку своих представителей в судебное заседание кассационной инстанции не обеспечили.

В отзывах на кассационные жалобы ООО «Стройподрядчик», выразив несогласие относительно доводов, изложенных в них, просило решение от 11.04.2019, постановление апелляционного суда от 29.07.2019 оставить без изменения, кассационные жалобы ООО «С Технология», акционерной компании с ограниченной ответственностью источника энергии «Мэн Лань СинХэ», Хэйхэской компании торгово-промышленного развития «Сириус», ООО «АС Компания» – без удовлетворения.

Обсудив доводы кассационных жалоб, проверив в порядке и пределах статей 284, 286 АПК РФ правильность применения судами обеих инстанций норм материального права и соблюдение норм процессуального права, Арбитражный суд Дальневосточного округа пришел к выводу о том, что производство по кассационным жалобам акционерной компании с ограниченной ответственностью источника энергии «Мэн Лань СинХэ», Хэйхэской компании торгово-промышленного развития «Сириус» следует прекратить, обжалуемые решение  и постановление апелляционной инстанции оставить без изменения в силу нижеследующего.

В соответствии со статьей 42 АПК РФ лица, не участвовавшие в деле, о правах и об обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт, вправе обжаловать этот судебный акт, а также оспорить его в порядке надзора по правилам, установленным названным Кодексом. Такие лица пользуются правами и несут обязанности лиц, участвующих в деле.

Согласно пункту 4 части 4 статьи 288 АПК РФ основаниями для отмены решения, постановления арбитражного суда в любом случае является принятие судом решения, постановления о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» (далее - постановление Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 N 36), лица, не участвующие в деле, как указанные, так и не указанные в мотивировочной и (или) резолютивной части судебного акта, вправе его обжаловать в порядке апелляционного производства в случае, если он принят об их правах и обязанностях, то есть данным судебным актом непосредственно затрагиваются их права и обязанности, в том числе создаются препятствия для реализации их субъективного права или надлежащего исполнения обязанности по отношению к одной из сторон спора.

Пунктом 2 постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 № 36 определено, что в случае, когда жалоба подается лицом, не участвовавшим в деле, суду надлежит проверить, содержится ли в жалобе обоснование того, каким образом оспариваемым судебным актом непосредственно затрагиваются права или обязанности заявителя. При отсутствии соответствующего обоснования апелляционная жалоба возвращается на основании пункта 1 части 1 статьи 264 АПК РФ.

Если после принятия апелляционной жалобы будет установлено, что заявитель не имеет права на обжалование судебного акта, то применительно к пункту 1 части 1 статьи 150 АПК РФ производство по жалобе подлежит прекращению.

Аналогичные положения подлежат применению к кассационной жалобе, поданной лицом, не участвующим в деле.

Для возникновения права на обжалование судебных актов у лиц, не привлеченных к участию в деле, необходимо, чтобы оспариваемые судебные акты не просто затрагивали права и обязанности этих лиц, а были приняты непосредственно об их правах и обязанностях.

Из обжалуемых судебных актов усматривается, что предметом рассмотрения по настоящему делу являются требования подрядчика о взыскании с заказчика задолженности за выполненные по договорам подряда работы. 

Судебные акты о правах и обязанностях акционерной компании с ограниченной ответственностью источника энергии «Мэн Лань СинХэ», Хэйхэской компании торгово-промышленного развития «Сириус» в рамках рассмотрения настоящего дела не принимались.

Доводы жалоб о том, что в Арбитражном суде Амурской области рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве) ООО «С Технология», и в случае банкротства общества и недостаточности имущества последнего для погашения долга ООО «Стройподрядчик» может требовать уплаты долга в порядке субсидиарной ответственности от участников (инвесторов) должника,               судом округа отклоняются, поскольку носят предположительный характер. Кроме того, суд округа учитывает, что в кассационных жалобах инвесторов доводов о несогласии с выводами судов по существу заявленных требований, кроме доводов о необходимости проведения третьей экспертизы по делу, не приведено.

В этой связи у суда кассационной инстанции отсутствуют основания считать, что обжалуемые судебные акты суда затрагивают права и обязанности акционерной компании с ограниченной ответственностью источника энергии «Мэн Лань СинХэ», Хэйхэской компании торгово-промышленного развития «Сириус».

При этом их заинтересованность в исходе спора не создает правовых оснований для обжалования принятых по делу судебных актов.

Поскольку данные заявители кассационных жалоб не относятся к лицам, указанным в статье 42 АПК РФ, не подтвердили наличие у них права на обжалование принятых по делу судебных актов, производство по кассационным жалобам акционерной компании с ограниченной ответственностью источника энергии «Мэн Лань СинХэ», Хэйхэской компании торгово-промышленного развития «Сириус», подлежит прекращению применительно к пункту 1 части 1 статьи 150 АПК РФ.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, между ООО «С Технология» (заказчик) и                                   ООО «Стройподрядчик» (подрядчик) заключены ряд договоров. 

13.03.2014 между ООО «Стройподрядчик» (подрядчик) и ООО «С Технология» (заказчик) заключен договор подряда № 10/2014 на выполнение общестроительных и отделочных работ 2 этап основное производство. Склад хранения клинкера. Производство по переработке цементного клинкера в м. Березовка Амурской области, по условиям которого подрядчик обязателся по заданию заказчика выполнить следующие работы: общестроительные и отделочные на объекте заказчика – 2 этап Основное производство - склад хранения клинкера, производство по переработке цементного клинкера в м. Березовка Амурской области, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Виды и стоимость работ, необходимые материалы определены сторонами в локальном сметном расчете стоимости строительства далее Приложение №1, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. Сроки выполнения работ: начальный срок выполнения работ – 13.03.2014; конечный срок выполнения работ – 30.09.2014. Общая стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору (цена договора) определяется по фактически выполненному объему работ на основании Приложения № 1 к настоящему договору. Оплата производится заказчиком в следующем порядке: заказчик выплачивает подрядчику по фактически выполненному объему работ в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Оформление акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) возлагается на подрядчика, и производится последним, каждые 10 календарных дней. Согласование, проверка и подписание форм КС-2, КС-3 производиться заказчиком в течение двух дней с момента оформления документов подрядчиком. За нарушение заказчиком договорных обязательств он уплачивает подрядчику за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы – пеню в размере 0,1% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки. Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств (пункты 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 5.1.2 договора) 

21.06.2013 между ООО «С Технология» (заказчик) и                                     ООО «Стройподрядчик» (подрядчик) заключен договор подряда № 6/2013 на выполнение общестроительных и отделочных работ 1 этап вспомогательные здания и сооружения. Административное здание. Производство по переработке цементного клинкера в м. Березовка Амурской области, по условиям которого подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить следующие работы: общестроительные и отделочные на объекте заказчика – 1 этап вспомогательные здания и сооружения - административное здание. Производство по переработке цементного клинкера в м. Березовка Амурской области, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Виды и стоимость выполнения работ, необходимые материалы определены сторонами в локальном сметном расчете стоимости строительства (№ 02-02) далее Приложение № 1, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. Сроки выполнения работ: начальный срок выполнения работ – 22.06.2013; конечный срок выполнения работ – 30.10.2014. общая стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору (цена договора) определяется по фактически выполненному объему работ на основании Приложения № 1 к настоящему договору. Оплата производится заказчиком в следующем порядке: сумму в размере пятьдесят процентов от общей стоимости материалов (согласно приложению №1), но не более                        50 000 000 руб., подрядчик привлекает за счет собственных средств до начала производства работ, ввиду производственной необходимости комплектации объекта строительства всеми материалами для непрерывности строительного цикла. Заказчик выплачивает подрядчику по фактически выполненному объему работ в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Оформление акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) возлагается на подрядчика, и производится последним, каждые 10 календарных дней. Согласование, проверка и подписание форм КС-2,               КС-3 производится заказчиком в течение двух дней с момента оформления документов подрядчиком. За нарушение заказчиком договорных обязательств он уплачивает подрядчику за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы – пеню в размере 0,5% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки. Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. 26.12.2013 (пункты 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 5.1.2 договора).

 

30.10.2014 стороны подписали дополнительные соглашения к договору от 21.06.2013№ 6/2013, по условиям которых стороны внесли изменения в данный договор, в том числе внесли изменения в подпункт второй пункта 5.1.2, а именно со слов «пеню в размере 0,1%». 

31.07.2013 между ООО «С Технология» (заказчик) и                                  ООО «Стройподрядчик» (подрядчик) заключен договор подряда № 4/2013 на выполнение общестроительных и отделочных работ насосная станция 1 подъема; трансформаторная подстанция 10(б)/0.4В с 2-мя трансформаторами мощностью до 100 кВА с камерами КСО-202 производства ОАО «ЧЭАЗ». Производство по переработке цементного клинкера в м. Березовка Амурской области, по условиям которого подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить следующие работы: общестроительные и отделочные на объекте заказчика – насосная станция 1 подъема; трансформаторная подстанция 10(б)/0.4В с 2-мя трансформаторами мощностью до 100 кВА с камерами КСО-202 производства ОАО «ЧЭАЗ». Производство по переработке цементного клинкера в м. Березовка Амурской области, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Виды и стоимость выполнения работ, необходимые материалы определены сторонами в локальном сметном расчете стоимости строительства (№ 04-01-01 и № 06-03-01) (далее Приложение № 1, № 2), которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. Сроки выполнения работ: начальный срок выполнения работ – 01.08.2013; конечный срок выполнения работ – 30.11.2013. Общая стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору (цена договора), определяется по фактически выполненному объему работ на основании Приложения № 1, № 2 к настоящему договору. Оплата производится заказчиком в следующем порядке: сумму в размере пятьдесят процентов от общей стоимости материалов (согласно приложениям №1, 2), но не более             50 000 000 руб., подрядчик привлекает за счет собственных средств до начала производства работ, ввиду производственной необходимости комплектации объекта строительства всеми материалами для непрерывности строительного цикла. Заказчик выплачивает подрядчику по фактически выполненному объему работ в течение 3 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Оформление акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) возлагается на подрядчика, и производится последним, каждые 10 календарных дней. Согласование, проверка и подписание форм  КС-2,   КС- 3 производиться заказчиком в течение двух дней с момента оформления документов подрядчиком. За нарушение заказчиком договорных обязательств он уплачивает подрядчику за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы – пеню в размере 0,5% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки. Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств (пункты 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 5.1.2 договора).

14.10.2013, 26.12.2013 сторонами подписаны дополнительные соглашения к договору подряда от 31.07.2013 № 4/2013, по условиям которых стороны внесены изменения в данный договор, в том числе пунктом 1.8 дополнительного соглашения внесли изменения подпункт второй пункта 5.1.2, а именно со слов «пеню в размере 0,1%, а также установили конечный срок выполнения работ до 30.09.2014.

31.07.2013 между ООО «С Технология» (заказчик)                                 ООО «Стройподрядчик» (подрядчик) заключен договор подряда № 3/2013 на выполнение общестроительных и отделочных работ насосная станция 2-го подъема; резервуары для хранения пожарного запаса воды 100м3х3 Производство по переработке цементного клинкера в м. Березовка Амурской области, по условиям которого подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить следующие работы: общестроительные и отделочные на объекте заказчика – насосная станция 2-го подъема; резервуары для хранения пожарного запаса воды 100м3х3 Производство по переработке цементного клинкера в м. Березовка Амурской области, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Виды и стоимость выполнения работ, необходимые материалы определены сторонами в локальном сметном расчете стоимости строительства (№ 06-01-01 и № 06-02-01) РФ далее Приложение №1, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. Сроки выполнения работ: начальный срок выполнения работ – 20.07.2013; конечный срок выполнения работ – 30.09.2013. Общая стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору (цена договора) определяется по фактически выполненному объему работ на основании Приложения № 1 к настоящему договору. Оплата производится заказчиком в следующем порядке: сумму в размере пятьдесят процентов от общей стоимости материалов (согласно приложению №1), но не более                          50 000 000 руб., подрядчик привлекает за счет собственных средств до начала производства работ, ввиду производственной необходимости комплектации объекта строительства всеми материалами для непрерывности строительного цикла. Заказчик выплачивает подрядчику по фактически выполненному объему работ в течение 3 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Оформление акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) возлагается на подрядчика, и производится последним, каждые 10 календарных дней. Согласование, проверка и подписание форм КС-2, КС-3 производиться заказчиком в течение двух дней с момента оформления документов подрядчиком. За нарушение заказчиком договорных обязательств он уплачивает подрядчику за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы – пеню в размере 0,5% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки. Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств (пункты 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 5.1.2 договора).

20.09.2013 к договору подряда от 20.07.2013 № 3/2013 сторонами подписано дополнительное соглашение № 1, в котором стороны внесли изменения, в том числе в пункт 1.3 договора, а именно: установили конечный срок выполнения работ до 30.09.2014. 23.03.2015 между сторонами подписано дополнительное соглашение №1 к договору подряда №3/2013 от 20.07.2013, по условиям которого, в том числе, стороны внесли изменения в пункт 1.3 договора, а именно: установили конечный срок выполнения работ до 31.10.2015. 

26.12.2013 к договору подряда от 20.07.2013 № 3/2013 сторонами подписано дополнительное соглашение № 2, в котором стороны внесли изменения, в том числе, в абзац второй пункта 2.3, а именно: «Заказчик выплачивает подрядчику по фактически выполненному объему работ в течение 10 календарных дней», а также в подпункт второй пункта 5.1.2, а именно со слов «пеню в размере 0,1%».

13.08.2014 между ООО «С Технология» (заказчик) и                                ООО «Стройподрядчик» (подрядчик) заключен договор подряда № 17/2014, по условиям которого подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить общестроительные работы по «Отделению хранения и перегрузки клинкера» на «Производстве по переработке цементного клинкера в м. Березовка, Ивановского района, Амурской области в соответствии с проектно-сметной документацией (ПСД), а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Сроки выполнения работ: начальный срок выполнения работ – 13.08.2014; конечный срок выполнения работ – 30.11.2014. Общая стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору (цена договора) определяется по фактически выполненному объему работ на основании Приложения № 1 к настоящему договору. Оплата производится заказчиком в следующем порядке: заказчик выплачивает подрядчику по фактически выполненному объему работ в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Оформление акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) возлагается на подрядчика, и производится последним, каждые 10 календарных дней. Согласование, проверка и подписание форм КС-2, КС-3 производиться заказчиком в течение двух дней с момента оформления документов подрядчиком. За нарушение заказчиком договорных обязательств он уплачивает подрядчику за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы – пеню в размере 0,5% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки. Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств (пункты 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 5.1.2 договора).

28.11.2014 к договору подряда от 13.08.2014 № 17/2014 сторонами подписано дополнительное соглашение № 1, в котором стороны внесли изменения в пункт 1.3 договора, а именно: продлить срок выполнения срок работ до 01.08.2015 на объекте указанном в п. 1.1 договора №17/2014 на выполнение общестроительных работ по отделению хранения и перегрузки клинкера.

23.03.2015 к договору подряда от 13.08.2014 № 17/2014 сторонами подписано дополнительное соглашение № 1, в котором стороны внесли изменения в пункт 1.3 договора, а именно: установить конечный срок выполнения работ – не позднее 31.10.2015., а также изложить пункт 2.1 договора в следующей редакции: общая стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору (цена договора), определяется по фактически выполненному объему работ на основании локальной сметы №1 (локальный сметный расчет), согласованной сторонами в дату подписания настоящего дополнительного соглашения и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

21.05.2013 между ООО «С Технология» (заказчик) и                                  ООО «Стройподрядчик» (подрядчик) заключен договор подряда № 1/2013 на выполнение работ по строительству вспомогательное задание для временного проживания, работающих вахтовым методом, КПП в с. Березовка Ивановского района, по условиям которого подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить следующие работы: на объекте заказчика – производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области: вспомогательное задание для временного проживания, работающих вахтовым методом, КПП, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Сроки выполнения работ: начальный срок выполнения работ – 30.05.2013; конечный срок выполнения работ – 30.08.2013. Общая стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору (цена договора), определяется по фактически выполненному объему работ на основании Приложения №1 к настоящему договору. Оплата производится заказчиком в следующем порядке: аванс в размере пятьдесят процентов от общей стоимости материалов (согласно приложению № 1) перечисляется заказчиком подрядчику до начала производства работ, в виду производственной необходимости комплектации объекта строительства всеми материалами для непрерывности строительного цикла. Оставшаяся сумма выплачивается по фактически выполненному объему работ в течение 3 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Оформление акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) возлагается на подрядчика, и производится последним, каждые 10 календарных дней. Согласование, проверка и подписание форм КС-2, КС-3 производиться заказчиком в течение двух дней с момента оформления документов подрядчиком. За нарушение заказчиком договорных обязательств он уплачивает подрядчику за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы – пеню в размере 0,5% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки. Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств (пункты 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 5.1.2 договора).

30.08.2013, 22.12.2013, 29.09.2014, 23.03.2015 к договору подряда                  от 21.05.2013 № 1/2013 сторонами подписаны дополнительные соглашения № 1, № 2, № 2, № 1, в которых стороны внесли изменения, в том числе в пункт 1.3 договора, а именно: установили конченый срок выполнения работ – не позднее 31.10.2015, а также исключили абзац второй пункта 2.3, а именно со слов «сумму в размере пятьдесят процентов от общей стоимости материалов (согласно приложения №1), но не более 50 000 000 руб., подрядчик привлекает за счет собственных средств до начала производства работ, в виду производственной необходимости комплектации объекта строительства всеми материалами для непрерывности строительного цикла», в абзац второй пункта 2.3 внесли изменения, а именно: «заказчик выплачивает подрядчику по фактически выполненному объему работ в течение 10 календарных дней». 

Кроме того, в дополнительном соглашении от 26.12.2013 № 2 стороны внесли изменения в подпункт второй пункта 5.1.2, а именно со слов «пеню в размере 0,1%».

24.03.2014 между ООО «С Технология» (заказчик) и                                   ООО «Стройподрядчик» (подрядчик) и заключен договор подряда № 9/2014 на выполнение общестроительных и отделочных работ 2 этап Основное производство. Отделение фасовки и погрузки цемента. Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области, по условиям которого, подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить следующие работы: общестроительных и отделочных работ 2 этап Основное производство. Отделение фасовки и погрузки цемента. Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Сроки выполнения работ: начальный срок выполнения работ – 25.03.2014; конечный срок выполнения работ – 30.09.2014. Общая стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору (цена договора), определяется по фактически выполненному объему работ на основании Приложения № 1 к настоящему договору. Оплата производится заказчиком в следующем порядке: Заказчик выплачивает подрядчику по фактически выполненному объему работ в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Оформление акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) возлагается на подрядчика, и производится последним, каждые 10 календарных дней. Согласование, проверка и подписание форм КС-2, КС-3 производится заказчиком в течение двух дней с момента оформления документов подрядчиком. За нарушение заказчиком договорных обязательств он уплачивает подрядчику за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы – пеню в размере 0,1% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки. Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств (пункты 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 5.1.2 договора).

29.09.2014 между ООО «С Технология» (заказчик) и                                   ООО «Стройподрядчик» (подрядчик) заключен договор подряда № 20/2014 на выполнение общестроительных работ выгреб 350 м³. Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области, по условиям которого, подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить следующие работы: общестроительные на объекте заказчика – выгреб 350 м³. Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Сроки выполнения работ: начальный срок выполнения работ – 01.10.2014; конечный срок выполнения работ – 21.12.2014. Общая стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору (цена договора), определяется по фактически выполненному объему работ на основании Приложения № 1 к настоящему договору. Оплата производится заказчиком в следующем порядке: Заказчик выплачивает подрядчику по фактически выполненному объему работ в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Оформление акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) возлагается на подрядчика, и производится последним, каждые 10 календарных дней. Согласование, проверка и подписание форм КС-2, КС-3 производится заказчиком в течение двух дней с момента оформления документов подрядчиком. За нарушение заказчиком договорных обязательств он уплачивает подрядчику за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы – пеню в размере 0,1% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки. Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств (пункты 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 5.1.2 договора).

01.11.2014 между ООО «С Технология» (заказчик) и                                   ООО «Стройподрядчик» (подрядчик) заключен договор подряда № 21/2014 на выполнение общестроительных работ по ограждению территории. Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области, по условиям которого, подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить следующие работы: общестроительные работы по ограждению территории. Производство по переработке цементного клинкера в                            с. Березовка Амурской области, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Сроки выполнения работ: начальный срок выполнения работ – 01.11.2014; конечный срок выполнения работ – 31.03.2015. Общая стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору, определяется в локальной смете и составляет 5 757 231 руб. 23 коп., в том числе НДС. Оплата по настоящему договору производится заказчиком в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в порядке, установленном разделом 4 настоящего договора. Стороны руководствуются и несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия договора установлен сторонами на период выполнения работ, указанный в пункте 1.3 настоящего договора (пункты 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 5.1, 6.1 договора).

01.11.2014 между ООО «С Технология» (заказчик) и                                   ООО «Стройподрядчик» (подрядчик) заключен договор подряда № 21/2/2014 на выполнение СМР: подвал административного корпуса. Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области, по условиям которого подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить следующие работы – СМР: подвал административного корпуса на объекте заказчика: Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Сроки выполнения работ: начальный срок выполнения работ – 01.11.2014; конечный срок выполнения работ – 28.11.2014. Общая стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору (цена договора), определяется по фактически выполненному объему работ на основании Приложения № 1 к настоящему договору. Оплата по настоящему договору производится заказчиком в течение 5 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в порядке, установленном разделом 4 настоящего договора путем перечисления денежных средств на р/с подрядчика, указанный в реквизитах настоящего договора. Стороны руководствуются и несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия договора установлен сторонами на период выполнения работ, указанный в пункте 1.3 настоящего договора (пункты 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 5.1, 6.1 договора).

20.02.2013 между ООО «С Технология» (заказчик) и                                   ООО «Стройподрядчик» (подрядчик) заключен договор подряда на выполнение земляных работ. Цементный завод в с. Березовка Ивановского района, по условиям которого, подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить следующие работы: земляные работы по отчиске площадей от снега погрузчиком, срезка плодородного слоя почвы бульдозером, устройство подсыпки строительной площадки гравием на объекте заказчика - Цементный завод в с. Березовка, Ивановского района, Амурской области, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Сроки выполнения работ: начальный срок выполнения работ – 22.02.2013; конечный срок выполнения работ – 30.04.2013. Общая стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору (цена договора), определяется по фактически выполненному объему работ на основании Приложения №1 к настоящему договору. Оплата по настоящему договору производится заказчиком в следующем порядке: аванс в размере 30% от общей стоимости работ по настоящему договору перечисляется заказчиком до начала производства работ. Оставшаяся сумма выплачивается по фактически выполненному объему работ в течение 7 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) с учетом вычета авансового платежа в первом выполнении. В случае задержки платежа заказчиком последний, выплачивает неустойку в размере 0,1% от невыплаченной суммы. Стороны руководствуются и несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств (пункты 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 5.1, 8.1 договора).

30.04.2013 к договору от 20.02.2013 сторонами подписано дополнительное соглашение, в котором стороны определили, что подрядчик обязуется осуществить дополнительные земляные работы (устройство подсыпки дороги гравием) на объекте: Амурская область Ивановский район с. Березовка, подрядчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в порядке, предусмотренном договором. Цена за единицу дополнительных работ составляет 600 руб. за одну тонну. Субподрядчик обязуется выполнить работы по объектам указанным в пункте 1.1 дополнительного соглашения, в следующие сроки: начало работ: 30.04.2013; окончание работ: 15.08.2013 (пункты 1.1, 1.2 дополнительного соглашения, пункты 2.2, 3.1 договора).

24.03.2014 между ООО «С Технология» (заказчик) и                                   ООО «Стройподрядчик» (подрядчик) заключен договор подряда № 11/2014 на выполнение общестроительных и отделочных работ 2 этап Основное производство. Мельничное отделение. Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области, по условиям которого, подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить следующие работы: общестроительные и отделочные на объекте заказчика – 2 этап Основное производство. Мельничное отделение. Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Сроки выполнения работ: начальный срок выполнения работ – 25.03.2014; конечный срок выполнения работ – 30.09.2014. Общая стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору (цена договора), определяется по фактически выполненному объему работ на основании Приложения №1 к настоящему договору. Оплата производится заказчиком в следующем порядке: Заказчик выплачивает подрядчику по фактически выполненному объему работ в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Оформление акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) возлагается на подрядчика, и производится последним, каждые 10 календарных дней. Согласование, проверка и подписание форм КС-2, КС-3 производится заказчиком в течение двух дней с момента оформления документов подрядчиком. За нарушение заказчиком договорных обязательств он уплачивает подрядчику за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы – пеню в размере 0,3% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки. Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств (пункты 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 5.1.2 договора). 

25.03.2014, 29.09.2014, 23.03.2015 к договору 24.03.2014 № 11/2014 сторонами подписаны дополнительные соглашения № 1, № 2, № 1, которыми сторонами внесены изменения в пункт 1.3 договора, а именно: установили конечный срок выполнения работ – не позднее 31.10.2015. Общая стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору (цена договора), определяется по фактически выполненному объему работ на основании локальной сметы № 1 (локальный сметный расчет), согласованной сторонами в дату подписания настоящего дополнительного соглашения и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 2.1 дополнительного соглашения).

26.08.2013 между ООО «С Технология» (заказчик) и                                  ООО «Стройподрядчик» (подрядчик) заключен договор подряда № 8/2013 на выполнение общестроительных и отделочных работ 2 этап Основное производство. Склад хранения цемента. Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области, по условиям которого подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить следующие работы: общестроительные и отделочные на объекте заказчика - 2 этап Основное производство. Склад хранения цемента. Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Сроки выполнения работ: начальный срок выполнения работ – 26.08.2013; конечный срок выполнения работ – 30.12.2013. Общая стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору (цена договора), определяется по фактически выполненному объему работ на основании Приложения № 1 к настоящему договору. Оплата производится заказчиком в следующем порядке: сумму в размере пятьдесят процентов от общей стоимости материалов (согласно приложениям №№ 1, 2), но не более                       50 000 000 руб., подрядчик привлекает за счет собственных средств до начала производства работ, ввиду производственной необходимости комплектации объекта строительства всеми материалами для непрерывности строительного цикла. Заказчик выплачивает подрядчику по фактически выполненному объему работ в течение 3 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Оформление акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) возлагается на подрядчика, и производится последним, каждые 10 календарных дней. Согласование, проверка и подписание форм КС-2,                 КС- 3 производится заказчиком в течение двух дней с момента оформления документов подрядчиком. За нарушение заказчиком договорных обязательств он уплачивает подрядчику за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы – пеню в размере 0,5% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки. Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств (пункты 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 5.1.2 договора).

26.12.2013, 30.12.2013, 23.03.2015 сторонами к договору от 26.08.2013 № 8/2013 подписаны дополнительные соглашения № 1, № 2, № 3, № 3, в которых внесли изменения в пункт 1.3 договора, а именно: установлен конечный срок выполнения работ – не позднее 31.10.2015. Пункт 2.1 договора изложили в следующей редакции: «Общая стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору (цена договора), определяется по фактически выполненному объему работ на основании локальной сметы №1 (локальный сметный расчет), согласованной сторонами в дату подписания настоящего дополнительного соглашения и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2 дополнительного соглашения). Дополнительным соглашением № 1 стороны исключили абзац второй пункта 2.3, а именно со слов «сумму в размере пятьдесят процентов от общей стоимости материалов (согласно приложения №1), но не более                      50 000 000 руб., подрядчик привлекает за счет собственных средств до начала производства работ, в виду производственной необходимости комплектации объекта строительства всеми материалами для непрерывности строительного цикла», в подпункт второй пункта 5.1.2 внесли изменения, а именно слова «пеню в размере 0,1%».

13.08.2014 между ООО «С Технология» (заказчик) и                                     ООО «Стройподрядчик» (подрядчик) заключен договор подряда № 13/2014 на выполнение общестроительных и отделочных работ 2 этап Основное производство противопожарный водопровод В-2. Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области, по условиям которого подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить следующие работы: общестроительные и отделочные на объекте заказчика - 2 этап Основное производство противопожарный водопровод В-2. Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Сроки выполнения работ: начальный срок выполнения работ – 15.08.2014; конечный срок выполнения работ – 20.09.2014. Общая стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору (цена договора), определяется по фактически выполненному объему работ на основании Приложения № 1 к настоящему договору. Оплата производится заказчиком в следующем порядке: Заказчик выплачивает подрядчику по фактически выполненному объему работ в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Оформление акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) возлагается на подрядчика, и производится последним, каждые 10 календарных дней. Согласование, проверка и подписание форм КС-2, КС-3 производится заказчиком в течение двух дней с момента оформления документов подрядчиком. За нарушение заказчиком договорных обязательств он уплачивает подрядчику за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы – пеню в размере 0,1% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки. Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств (пункты 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 5.1.2, 8.1 договора).

11.06.2015 между ООО «С Технология» (заказчик) и                                  ООО «Стройподрядчик» (подрядчик) и заключен договор подряда № 3/2015 на выполнение строительно-монтажных работ по устройству кирпичного забора, по условиям которого подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить следующие работы: строительно-монтажные работы по устройству кирпичного забора (из облицовочного кирпича с одной  стороны) на объекте заказчика: Производство по переработке цементного клинкера в        с. Березовка Амурской области, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Сроки выполнения работ: начальный срок выполнения работ – 19.06.2015; конечный срок выполнения работ – 20.07.2015. Общая стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору (цена договора), определяется по фактически выполненному объему работ на основании Приложений (локальных смет) к настоящему договору. Оплата по настоящему договору производится заказчиком в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в порядке, установленном разделом 4 настоящего договора путем перечисления денежных средств на р/с подрядчика, указанный в реквизитах настоящего договора. Срок действия настоящего договора установлен сторонами на период выполнения работ, указанный в пункте 1.3 настоящего договора (пункты 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 6.1 договора).

01.01.2015 между ООО «С Технология» (заказчик) и                                    ООО «Стройподрядчик» (подрядчик) заключен договор подряда № 1/2015 на выполнение общестроительных работ 1 этап вспомогательного здания и сооружения. Здание весовой. Автовесы. Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области, по условиям которого подрядчик принимает на себя обязательство по заданию заказчика выполнить следующие работы: общестроительные работы на объекте заказчика 1 этап вспомогательные здания и сооружения - здание весовой. Автовесы. Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы (пункт 1.1 договора). Согласно пункту 1.3 соглашением сторон установлены следующие сроки выполнения работ: начальный срок выполнения работ – 01.01.2015; конечный срок выполнения работ – 30.03.2015. Пунктом 2.1 договора предусмотрено, что общая стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору (цена договора), определяется в локальной смете и составляет 1 181 100 руб. 94 коп., в том числе НДС. Оплата по настоящему договору производится заказчиком в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в порядке, установленном разделом 4 настоящего договора путем перечисления денежных средств на р/с подрядчика, указанный в реквизитах настоящего договора (пункт 2.2 договора). Срок действия настоящего договора установлен сторонами на период выполнения работ, указанный в пункте 1.3 настоящего договора (пункты 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 6.1 договора).

17.09.2014 между ООО «С Технология» (заказчик) и ООО «Стройподрядчик» (подрядчик) заключен договор подряда № 18/2014 на выполнение общестроительных работ наружная канализация. Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области, по условиям которого подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить следующие работы: общестроительные работы на объекте заказчика – наружная канализация. Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Сроки выполнения работ: начальный срок выполнения работ – 22.09.2014; конечный срок выполнения работ – 31.12.2014. Общая стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору (цена договора), определяется по фактически выполненному объему работ на основании Приложения №1 к настоящему договору. Оплата производится заказчиком в следующем порядке: Заказчик выплачивает подрядчику по фактически выполненному объему работ в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС3). Оформление акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) возлагается на подрядчика, и производится последним, каждые 10 календарных дней. Согласование, проверка и подписание форм КС-2, КС-3 производится заказчиком в течение двух дней с момента оформления документов подрядчиком. За нарушение заказчиком договорных обязательств он уплачивает подрядчику за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы – пеню в размере 0,1% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки. Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств (пункты 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 5.1.2, 8.1 договора). 

13.08.2014 между ООО «С Технология» (заказчик) и                                   ООО «Стройподрядчик» (подрядчик) заключен договор подряда № 14/2014 на выполнение общестроительных и отделочных работ 2 этап Основное производство, Дождевая канализация. Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области, по условиям которого подрядчик принимает на себя обязательство по заданию заказчика выполнить следующие работы: общестроительные и отделочные работы 2 этап Основное производство – дождевая канализация. Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Сроки выполнения работ: начальный срок выполнения работ – 15.08.2014; конечный срок выполнения работ – 20.09.2014. Общая стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору (цена договора), определяется по фактически выполненному объему работ на основании Приложения №1 к настоящему договору. Оплата производится заказчиком в следующем порядке: Заказчик выплачивает подрядчику по фактически выполненному объему работ в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС3). Оформление акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) возлагается на подрядчика, и производится последним, каждые 10 календарных дней. Согласование, проверка и подписание форм КС-2, КС-3 производится заказчиком в течение двух дней с момента оформления документов подрядчиком. За нарушение заказчиком договорных обязательств он уплачивает подрядчику за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы – пеню в размере 0,1% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки. Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств (пункты 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 5.1.2, 8.1 договора).

19.09.2014 сторонами подписано дополнительное соглашение к данному договору от 13.08.2014 № 14/2014, в котором внесены изменения в пункт 1.3 договора, продлили срок выполнения работ до 10.06.2015. 

01.09.2014 между ООО «С Технология» (заказчик) и ООО «Стройподрядчик» (подрядчик) заключен договор подряда № 19/2014 на выполнение общестроительных работ выгреб 50 м³. Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области, по условиям которого подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить следующие работы: общестроительные на объекте заказчика – выгреб 50 м³. Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Сроки выполнения работ: начальный срок выполнения работ – 01.09.2014; конечный срок выполнения работ – 31.12.2014. Общая стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору (цена договора), определяется по фактически выполненному объему работ на основании Приложения № 1 к настоящему договору. Оплата производится заказчиком в следующем порядке: Заказчик выплачивает подрядчику по фактически выполненному объему работ в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Оформление акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) возлагается на подрядчика, и производится последним, каждые 10 календарных дней. Согласование, проверка и подписание форм КС-2, КС-3 производится заказчиком в течение двух дней с момента оформления документов подрядчиком. За нарушение заказчиком договорных обязательств он уплачивает подрядчику за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы – пеню в размере 0,1% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки. Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств (пункты 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 5.1.2, 8.1 договора).

01.04.2014 между ООО «С Технология» (заказчик) и ООО «Стройподрядчик» (подрядчик) заключен договор подряда № 11/2/2014 на выполнение общестроительных работ: вертикальная планировка (1 этап). Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области, по условиям которого подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить следующие работы: общестроительные работы – вертикальная планировка (1 этап). Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Сроки выполнения работ: начальный срок выполнения работ – 01.04.2014; конечный срок выполнения работ – 30.03.2015. Общая стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору (цена договора), определяется по фактически выполненному объему работ на основании Приложения № 1 к настоящему договору. Оплата по настоящему договору производится заказчиком в течение 5 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в порядке, установленном разделом 4 настоящего договора путем перечисления денежных средств на р/с подрядчика, указанный в реквизитах настоящего договора. Срок действия настоящего договора установлен сторонами на период выполнения работ, указанный в пункте 1.3 настоящего договора (пункты 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 6.1 договора).

02.06.2014 между ООО «С Технология» (заказчик) и                                   ООО «Стройподрядчик» (подрядчик) заключен договор подряда № 12/2014 на выполнение вертикальной планировки, 2 этап на объекте: «Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области», по условиям которого подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить следующие работы: выполнение вертикальной перепланировки, 2 этап на объекте: «Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области», а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы (пункт 1.1 договора). Согласно пункту 1.3 соглашением сторон установлены следующие сроки выполнения работ: начальный срок выполнения работ – 02.06.2014; конечный срок выполнения работ – 31.12.2014. Общая стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору (цена договора), определяется по фактически выполненному объему работ на основании Приложения №1 к настоящему договору. В соответствии с пунктом 2.3 договора оплата производится заказчиком в следующем порядке: Заказчик выплачивает подрядчику по фактически выполненному объему работ в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Оформление акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) возлагается на подрядчика, и производится последним, каждые 10 календарных дней. Согласование, проверка и подписание форм КС-2, КС-3 производится заказчиком в течение двух дней с момента оформления документов подрядчиком. В силу пункта 5.1.2 за нарушение заказчиком договорных обязательств он уплачивает подрядчику за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы – пеню в размере 0,1% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки. Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств (пункты 1.1, 1.3, 2.3, 5.1.2, 8.1 договора).

30.12.2014 дополнительным соглашением к договору от 02.06.2014                  № 12/2014 стороны внесены изменения в пункт 1.3 договора, а именно: продлен срок выполнения работ до 01 августа 2015 года на объекте указанном в пунктн 1.1 договора №12/2014 на выполнение вертикальной планировки, 2 этап.

13.08.2014 между ООО «С Технология» (заказчик) и                                  ООО «Стройподрядчик» (подрядчик) заключен договор подряда № 15/2014 на выполнение общестроительных и отделочных работ, 2 этап Основное производство. Хозяйственно-питьевой водопровод. Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области, по условиям которого подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить следующие работы: общестроительные и отделочные на объекте заказчика - 2 этап Основное производство - хозяйственно-питьевой водопровод. Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области», а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Сроки выполнения работ: начальный срок выполнения работ – 15.08.2014; конечный срок выполнения работ – 20.09.2014. Общая стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору (цена договора), определяется по фактически выполненному объему работ на основании Приложения № 1 к настоящему договору. Оплата производится заказчиком в следующем порядке: Заказчик выплачивает подрядчику по фактически выполненному объему работ в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Оформление акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) возлагается на подрядчика, и производится последним, каждые 10 календарных дней. Согласование, проверка и подписание форм КС-2, КС-3 производится заказчиком в течение двух дней с момента оформления документов подрядчиком. За нарушение заказчиком договорных обязательств он уплачивает подрядчику за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы – пеню в размере 0,1% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки. Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств (пункты 1.1, 1.3, 2.3, 5.1.2, 8.1 договора). 

01.09.2013 между ООО «С Технология» (заказчик) и                                   ООО «Стройподрядчик» (подрядчик) заключен договор подряда № 7/3/2013 на устройство подъездов к площадке. Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области, по условиям которого подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить следующие работы: устройство подъездов к площадке на объекте заказчика: производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области», а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Сроки выполнения работ: начальный срок выполнения работ – 01.09.2013; конечный срок выполнения работ – 25.09.2013. Общая стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору (цена договора) определяется по фактически выполненному объему работ на основании Приложения №1 к настоящему договору. Оплата по настоящему договору производится заказчиком в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в порядке, установленном разделом 4 настоящего договора путем перечисления денежных средств на р/с подрядчика, указанный в реквизитах настоящего договора. Срок действия настоящего договора установлен сторонами на период выполнения работ, указанный в пункте 1.3 настоящего договора (пункты 1.1, 1.3, 2.2, 2.3, 6.1 договора). 

15.06.2013 между ООО «С Технология» (заказчик) и                                 ООО «Стройподрядчик» (подрядчик) заключен договор подряда № 2/2013 на выполнение работ по строительству автостоянки № 1 в с. Березовка Ивановского района, по условиям которого подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить следующие работы: строительство вспомогательного здания – автостоянка № 1 на объекте заказчика: Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области», а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Сроки выполнения работ: начальный срок выполнения работ – 15.06.2013; конечный срок выполнения работ – 01.08.2015. Общая стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору (цена договора) определяется по фактически выполненному объему работ на основании Приложения № 1 к настоящему договору. Оплата по настоящему договору производится заказчиком в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в порядке, установленном разделом 4 настоящего договора путем перечисления денежных средств на р/с подрядчика, указанный в реквизитах настоящего договора. Срок действия настоящего договора установлен сторонами на период выполнения работ, указанный в пункте 1.3 настоящего договора (пункты 1.1, 1.3, 2.2, 2.3, 6.1 договора). 

23.03.2015 дополнительным соглашением к договору 15.06.2013                     № 2/2013 сторонами внесены изменения в пункт 2.1 договора, а именно «общая стоимость, поручаемых подрядчику по настоящему договору (цена договора), определяется по фактически выполненному объему работ на основании локальной сметы № 1 (локальный сметный расчет), согласованной сторонами в дату подписания настоящего дополнительного соглашения и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

04.07.2013 между ООО «С Технология» (заказчик) и                                    ООО «Стройподрядчик» (подрядчик) заключен договор подряда № 7/2013 на выполнение общестроительных и отделочных работ, 1 этап вспомогательные здания и сооружения. Компрессорная. Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области, по условиям которого подрядчик обязаался по заданию заказчика выполнить следующие работы: общестроительные и отделочные на объекте заказчика - 1 этап вспомогательные здания и сооружения. Компрессорная. Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области», а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Сроки выполнения работ: начальный срок выполнения работ – 04.07.2013; конечный срок выполнения работ – 30.10.2014. Общая стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору (цена договора), определяется по фактически выполненному объему работ на основании Приложения № 1 к настоящему договору. Оплата производится заказчиком в следующем порядке: Сумму в размере пятьдесят процентов от общей стоимости материалов (согласно приложению №1), но не более                                50 000 000 руб., подрядчик привлекает за счет собственных средств до начала производства работ, ввиду производственной необходимости комплектации объекта строительства всеми материалами для непрерывности строительного цикла. Заказчик выплачивает подрядчику по фактически выполненному объему работ в течение 3 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Оформление акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) возлагается на подрядчика, и производится последним каждые 10 календарных дней. Согласование, проверка и подписание форм КС-2,              КС-3 производится заказчиком в течение двух дней с момента оформления документов подрядчиком. За нарушение заказчиком договорных обязательств он уплачивает подрядчику за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы – пеню в размере 0,5% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки. Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств (пункты 1.1, 1.3, 2.3, 5.1.2, 8.1 договора).

26.12.2013 сторонами подписано дополнительное соглашение № 1 к договору от 04.07.2013 № 7/2013, которым исключили абзац второй пункта 2.3, а именно со слов: «сумму в размере пятьдесят процентов от общей стоимости материалов (согласно приложения № 1), но не более                                    50 000 000 руб., подрядчик привлекает за счет собственных средств до начала производства работ, ввиду производственной необходимости комплектации объекта строительства всеми материалами для непрерывности строительного цикла», внесли изменения в подпункт второй пункта 5.1.2, а именно слова «пеню в размере 0,1%». Дополнительным соглашением от 23.03.2015 № 1 стороны установили конечный срок выполнения работ – не позднее 31.10.2015. 

01.04.2014 между ООО «С Технология» (заказчик) и                                 ООО «Стройподрядчик» (подрядчик) заключен договор подряда № 11/1/2014 на выполнение общестроительных работ резервуары хранения воды 100 м3х3. Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области, по условиям которого подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить следующие работы: общестроительные на объекте заказчика – резервуары хранения воды 100 м3х3. Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области», а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Сроки выполнения работ: начальный срок выполнения работ – 01.04.2014; конечный срок выполнения работ – 31.12.2014. Общая стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору (цена договора), определяется по фактически выполненному объему работ на основании Приложения №1 к настоящему договору. Оплата производится заказчиком в следующем порядке: Заказчик выплачивает подрядчику по фактически выполненному объему работ в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Оформление акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) возлагается на подрядчика, и производится последним, каждые 10 календарных дней. Согласование, проверка и подписание форм КС-2, КС-3 производится заказчиком в течение двух дней с момента оформления документов подрядчиком. За нарушение заказчиком договорных обязательств он уплачивает подрядчику за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы – пеню в размере 0,1% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки. Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств (пункты 1.1, 1.3, 2.3, 5.1.2, 8.1 договора).

01.04.2014 между ООО «С Технология» (заказчик) и                                  ООО «Стройподрядчик» (подрядчик) заключен договор № 11/3/2014 на выполнение общестроительных работ: монтажная площадка под оборудование. Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области, по условиям которого подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить следующие работы – общестроительные работы: монтажная площадка под оборудование на объекте заказчика: Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка Амурской области, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Сроки выполнения работ: начальный срок выполнения работ: 01.04.2014; конечный срок выполнения работ: 14.04.2014. Общая стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору (цена договора), определяется по фактически выполненному объему работ на основании Приложений (локальных смет) к настоящему договору. Оплата по настоящему договору производится заказчиком в течение 5 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в порядке, установленном разделом 4 настоящего договора, путем перечисления денежных средств на р/с подрядчика. Срок действия настоящего договора установлен сторонами на период выполнения работ, указанный в пункте 1.3 настоящего договора (пункты 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 6.1 договора). 

13.08.2014 между ООО «С Технология» (заказчик) и                                   ООО «Стройподрядчик» (подрядчик) заключен договор подряда №16/2014, по условиям которого подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить общестроительные работы по станции оборотного водоснабжения на «Производстве по переработке цементного клинкера в с. Березовка, Ивановского района, Амурской области в соответствии с проектно-сметной документацией, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Сроки выполнения работ: начальный срок выполнения работ: 13.08.2014; конечный срок выполнения работ: 20.09.2014. Общая стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору (цена договора), определяется по фактически выполненному объему работ на основании Приложений (локальных смет) к настоящему договору. Оплата по настоящему договору производится заказчиком в следующем порядке: Заказчик выплачивает подрядчику по фактически выполненному объему работ в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Оформление акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) возлагается на подрядчика, и производиться последним, каждые 10 календарных дней. Согласование, проверка и подписание форм КС-2, КС-3 производится заказчиком в течение двух дней с момента оформления документов подрядчиком. За нарушение заказчиком договорных обязательств он уплачивает подрядчику за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы – пеню в размере 0,5% стоимости подлежащей оплате работ за каждый день просрочки. Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств (пункты 1.1, 1.3, 2.3, 5.1.2, 8.1 договора).

Представленными в материалы дела актами о приемке выполненных работ (КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) подтверждается, что подрядчик выполнил работы на общую сумму 547 909 355 руб., в том числе по договорам: от 20.03.2013 б/н на сумму 64 587 244 руб.; от 21.05.2013 № 1/2013 на сумму 75 445 487 руб.; от 15.06.2013 № 2/2013 на сумму 19 758 100 руб.; от 31.07.2013 № 3/2013 на сумму 4 692 510 руб.; от 31.07.2013 № 4/2013 на сумму 3 394 494 руб.; от 21.06.2013 № 6/2013 на сумму 27 675 644 руб.; от 04.07.2013 . №7/2013 на сумму 3 442 539 руб.; от 01.09.2013 № 7/3/2013 на сумму 19 835 122 руб.; от 26.08.2013 № 8/2013 на сумму 80 393 801 руб.; от 24.03.2014 № 9/2014 на сумму 42 292 135 руб.; на сумму 27 298 086 руб. № 10/2014; от 24.03.2014 № 11/2014 на сумму                        60 373 740 руб.; от 01.04.2014 № 11/1/2014 на сумму 3 122 267 руб.;                         от 01.04.2014 № 11/2/2014 на сумму 9 043 567 руб.; от 01.04.2014 № 11/3/2014 на сумму 5 341 011 руб.; от 02.06.2014 № 12/2014 на сумму 4 705 551 руб.;                от 13.08.2014 № 13/2014 на сумму 2 444 262 руб.; от 13.08.2014 № 14/2014 на сумму 5 396 363 руб.; от 13.08.2014 № 15/2014 на сумму 2 181 798 руб.;                 от 13.08.2014 № 16/2014 на сумму 7 371 364 руб.; от 13.08.2014 № 17/2014 на сумму 48 735 028 руб.; от 17.09.2014 №18/2014 на сумму 2 048 443 руб.;                   от 01.09.2014 № 19/2014 на сумму 1 718 272 руб.; от 29.09.2014 №20/2014 на сумму 8 632 057 руб.; от 01.11.2014 № 21/2014 на сумму 4 450 198 руб.;                    от 01.11.2014 № 21/2/2014 на сумму 2 732 869 руб.; от 01.01.2015 № 1/2015  на сумму 1 181 101 руб.; от 11.06.2015 № 3/2015 на сумму 9 626 302 руб.

Заказчиком оплата по спорным договорам произведена частично, в связи с чем ООО «Стройподрядчик» 18.05.2016 направлена в адрес                        ООО «С Технология» претензия с требованием об оплате образовавшейся задолженности.

В ответ на указанную претензию, ООО «С Технология» предложило провести совместную сверку выполненных объемов работ и провести совместную независимую строительную экспертизу по определению соответствия выполненных объемов работ оплаченной стоимости объекта (письмо от 18.05.2016 исх.№ 093). 

Оставление заказчиком претензии без удовлетворения явилось основанием для обращения подрядчика с иском в арбитражный суд.

ООО «С Технология», ссылаясь на то, что объем и виды работ, указанные в подписанных актах КС-2, не соответствуют фактическим объему и видам работ, обратилось в арбитражный суд со встречным исковым заявлением.

В силу части 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (часть 1 статьи 708 ГК РФ).

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4                            статьи 753 ГК РФ).

В силу части 3 статьи 9 АПК РФ арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом и создает условия для установления фактических обстоятельств при рассмотрении и разрешении дел, а в случае возникновения в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний, суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле (часть 1 статьи 82 АПК РФ), что является необходимым для достижения такой задачи судопроизводства в арбитражных судах, как защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность (пункт 1 статьи 2 АПК РФ).

Согласно части 2 статьи 65 АПК РФ обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

В соответствии с частью 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. Судебная экспертиза назначается судом в случаях, когда вопросы права нельзя разрешить без оценки фактов, для установления которых требуются специальные познания.

Судом первой инстанции, в связи с наличием между сторонами спора относительно объема работ определением от 16.11.2016, по ходатайству    ООО «С Технология» назначена судебная строительно-техническая экспертиза, проведение которой было поручено ООО Бизнес-центр «Ресфин», экспертами назначены: Литвиненко Сергей Николаевич, Лесных Оксана Владимировна, Малыш Наталья Алексеевна, Ершова Татьяна Сергеевна, Балан (Еремина) Олеся Николаевна, Аверьянов Павел Михайлович, Горелик Наум Хаймович. 

Согласно экспертному заключению от № 131216-21 экспертами сделаны следующие выводы по вопросам, поставленным судом:

1. фактически выполненные объемы работ ООО «Стройподрядчик» и их стоимость на объекте «Производство по переработке цементного клинкера с. Березовка» объемам и стоимости работ, указанным в актах выполненных работ (КС-2) по указанным договорам подряда, не в полной мере соответствуют расчетным данным, которые получились у экспертов; 

2. по результатам исследований определены отклонения фактически выполненных работ, как в меньшую, так и большую стороны. Результаты отклонений представлены в таблице №5 экспертизы № 131216-21; 

3. в процессе перерасчета и аналитического исследования экспертами представленных судом актов выполненных работ по форме КС-2, установлены три группы расценок не соответствующие для территории строительства объекта. Неверно применены в представленных актах формы КС-2 по всем перечисленным договорам подряда за исключением договоров 7/3/2013 от 01.09.2013, №3/2015 от 11.06.2015, б/н от 20.02.2013 (пункты 1,2,3). Неверно применены коэффициенты: на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы, не обоснована документами стоимость материалов или не соответствующая нормативной базе цена на материалы имеет место в договорных сметах и актах выполненных работ КС-2. Некоторые расценки не соответствующие для территории строительства объекта представлены единично. Обобщающий результат представлен в таблице №6 экспертизы №131216-21; 

4. по договорам от 31.07.2013 № 3/2013, от 21.06.2013 № 6/2013, от 21.05.2013 № 1/2013, от 15.06.2013 № 2/2013, от 26.08.2013 № 8/2013, от 24.03.2014 № 11/2014, от 13.08.2014 № 17/2014, от 13.08.2014 № 13/2014, от 01.04.2014 № 11/1/2014, от 13.03.2014 № 10/2014, от 24.03.2014 № 9/2014, от 01.11.2014 № 21/2/2014 установлено, что ООО «Стройподрядчик» необоснованно увеличил затраты на оплату труда рабочих, что не соответствует договорным обязательствам и дополнительными соглашениями не предусмотрено. В связи с этим экспертами при расчете фактически выполненных работ в актах формы КС-2 по указанным позициям были применены нормативные расценки на соответствующую дату; в договорах подряда №3/2013 от 31.07.2013, №12/2014 от 02.06.2014, №15/2014 от 13.08.2014, №11/2/2014 от 01.04.2014, №11/3/2014 от 01.04.2014 по указанным позициям расценки не соответствуют нормативной базе, что не предусмотрено договорами и дополнительными соглашениями, произведен перерасчет по нормативу. Свод указанных отклонений представлен в таблице № 7.

5. общая стоимость фактически выполненных ООО «Стройподрядчик» работ по всем договорам составляет 564 261 588 руб. (Таблица №8).

По указанному экспертному заключению эксперты Литвиненко С.Н., Лесных О.В., Ершова Т.С., Балан О.Н., Вавилов В.И. в судебном заседании 03.10.2017 дали пояснения.

Поскольку  между сторонами возникли разногласия по экспертному заключению № 131216-21, судом первой инстанции по ходатайству                          ООО «Стройподрядчик» определением от 31.01.2018 назначена повторная судебная строительно-техническая экспертиза, проведение которой поручено ООО «ПромСтройПрект», экспертами назначены: Меркулов Дмитрий Анатольевич, Бочкарев Владимир Евгеньевич, Шпицын Александр Владимирович, Квасников Сергей Александрович.

По результатам экспертного исследования, выполненного ООО «ПромСтройПрект» сделаны следующие выводы: по договорам от 20.02.2013 б/н, от 02.06.2014 № 12/2014, от 13.08.2014  № 16/2014, от 01.09.2014 № 19/2014, от 13.08.2014 № 13/2014, от 01.01.2015 № 1/2015, от 01.04.2014 № 11/2/2014, от 01.04.2014 № 11/3/2014, от 01.11.2014 № 21/2/2014, от 01.09.2013 № 7/3/2013, фактически выполненные работы соответствуют объемам указанных в КС-2. 

По договорам от 31.07.2013 № 3/2013, от 31.07.2013 № 4/2013, от 04.07.2013 № 7/2013, от 21.06.2013 № 6/2013, от 21.05.2013 № 1/2013, от 15.06.2013 № 2/2013, от 26.08.2013 № 8/2013, от 13.08.2014 № 17/2014, от 13.08.2014  № 14/2014, от 29.09.2014 № 20/2014, от 179.09.2014 № 18/2014, от 13.08.2014 № 15/2014, от 01.04.2014 № 11/1/2014, от 13.03.2014 № 10/2014, от 24.03.2014 № 9/2014, от 01.11.2014 № 21/2014, от 11.06.2015№3/2015 выявлены несовпадения фактических объемов работ с объемами работ, указанных в актах КС-2. 

По договорам от 26.08.2013 № 8/2013, от 21.05.2013 № 1/2013,                    от 24.03.2014 № 9/2014, от 13.03.2014 № 10/2014, от 13.08.2014 № 16/2014,           от 13.08.2014 № 17/2014, от 31.06.2013 № 6/2013, от 24.03.2014 № 11/2014,  от 04.07.2013 № 7/2013, от 31.07.2013 № 3/2013, от 13.08.2014 № 14/2014,            от 17.09.2014 № 18/2014, от 13.08.2014 № 15/2014, от 01.01.2015 № 1/2015,  от 11.06.2015 № 3/2015, от 15.06.2013 № 2/2013 часть объемов не была предусмотрена сметой, часть работ не была выполнена, некоторые объемы не учтены в смете. 

По договору от 01.09.2014 № 19/2014 КС-2 от 28.11.2014 № 6 (отчетный период с 01.11.2014 по 28.11.2014) на сумму 52 210 руб. 53 коп. Раздел «Крышка люка»: фактически работы, предусмотренные сметой и проектом выполнены. В акте КС-2 отсутствует позиция «Установка люка» (пункт 39 сметы). 

Некоторые расценки в актах выполненных работ (КС-2) не соответствуют территориальным единичным расценкам (ТЭР) Амурской области. Общая стоимость фактически выполненных работ по всем договорам составляет 547 916 375 руб.

Исследовав экспертное заключение ООО «ПромСтройПрект» в порядке статьи 71 АПК РФ, суды установили, что оно соответствует требованиям статьи 86 АПК РФ, сомнений в его достоверности не имеется; выводы экспертов являются полными и обоснованными, все эксперты обладают специальными познаниями в сфере строительства, эксперты предупреждены об уголовной ответственности, в связи с чем пришли к выводу о том, что данное экспертное заключение обладает признаками относимости и допустимости доказательства по делу.

При этом экспертное заключение № 131216-21, выполненное                    ООО Бизнес-центр «Ресфин», судом первой инстанции  не принято в качестве доказательств по делу, поскольку оно не соответствует требованиям, установленным в статье 86 АПК РФ.

Таким образом, установив, что экспертным заключением                          ООО «ПромСтройПрект» установлено, что стоимость фактически выполненных работ составляет 547 916 375 руб., суды обеих инстанций, принимая во внимание частичную оплату заказчика за выполненные работы, пришли к выводу о наличии оснований для удовлетворения первоначального иска 41 275 660 руб. 94 коп.

Поскольку судом не принято в качестве надлежащего доказательства экспертное заключение № 131216-21, выполненное  ООО Бизнес-центр «Ресфин», требование ООО «С Технология» по встречному иску о взыскании неосновательного обогащения в размере 75 303 039 руб. 64 коп. судами признано необоснованным и не подлежащим удовлетворению. И как следствие, отказано в удовлетворении требования ООО «С Технология» по встречному иску о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 30.06.2017 по 25.02.2019 в размере                                        9 762 032 руб. 12 коп.

В соответствии со статьей 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Поскольку по оценке судов документально подтверждается наличие со стороны ООО «С Технология» просрочки исполнения денежного обязательства по оплате выполненных истцом работ, то требование о взыскании процентов в размере 5 604 998 руб. 79 коп., является обоснованным, на основании статьи 395 ГК РФ удовлетворено в заявленном размере.

В силу статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. Неустойкой (штрафом, пенями) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

Учитывая, что ООО «Стройподрядчик» рассчитывает неустойку, исходя из двукратной учетной ставки Банка России, что составляет в среднем 16,5% годовых и не нарушает прав ООО «С Технология», а ставит его в более выгодное финансовое положение, а также, принимая во внимание, что неустойка рассчитана истцом по первоначальному иску с учетом снижения, согласно статье 333 ГК РФ, суды признали правомерным взыскание неустойки в размере 25 106 233 руб. 44 коп.

Руководствуясь статьей 317.1 ГК РФ, суды признали обоснованным заявленное истцом по первоначальному иску требование о взыскании процентов по договору от 11.06.2015 № 3/2015 за период с 13.10.2015 по 04.04.2019 в размере 2 978 395 руб. 41 коп.

При этом ходатайство о снижении размера процентов, предусмотренных статьей 317.1 ГК РФ, на основании статьи 333 ГК РФ судами правомерно отклонено, как противоречащее положениям пункта 76 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».

Выводы судов сделаны с правильным применением норм материального права, на основе полного и всестороннего исследования имеющихся в материалах дела доказательств.

По существу доводы, приведенные в кассационной жалобе,                       ООО «С Технология» сводятся к несогласию с выводами проведенной по делу повторной судебной экспертизы и фактически направлены на переоценку установленных ранее обстоятельств. Вместе с тем, согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной, в том числе в определении от 17.02.2015 № 274-О, определении от 28.02.2017 № 412-О, в силу статей 286-288 АПК РФ, находясь в системной связи с другими положениями данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела. Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо.

Кроме того, суд кассационной инстанции учитывает, что согласно разъяснениям, данным в пункте 12  постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе»  заключение эксперта не имеет для суда заранее установленной силы и подлежит оценке наряду с другими доказательствами. В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов (часть 2 статьи 87 АПК РФ).

Согласно статьям 8, 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия и состязательности сторон.

Права участников процесса неразрывно связаны с их процессуальными обязанностями, поэтому в случае нереализации участником процесса предоставленных ему законом прав последний несет риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с несовершением определенных действий (статья 9 АПК РФ).

Вместе с тем, в ходе рассмотрения спора при наличии значительной разницы между выводами двух проведенных по делу судебных экспертиз, ходатайство о назначении судом третьей экспертизы ООО «С Технология» не заявляло, при том, что в судебной заседании 04.03.2019 судом первой инстанции ставился на обсуждение вопрос о проведении третьей экспертизы. В этой связи доводы кассационной жалобы  в указанной части судом кассационной инстанции отклоняются.

Иных доводов, способных повлиять на результат рассмотрения настоящего дела, судом округа из кассационной жалобы не установлено. 

Поскольку все обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения спора, установлены судами на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, отвечающих признакам относимости, допустимости и достаточности, им дана надлежащая правовая оценка, неправильного применения норм материального права и нарушений положений действующего процессуального законодательства, судами не допущено, оснований для отмены или изменения обжалуемых судебных актов и удовлетворения кассационной жалобы у суда кассационной инстанции не имеется.

Руководствуясь статьями 104, 150, 283, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Дальневосточного округа

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по кассационным жалобам акционерной компании с ограниченной ответственностью источника энергии «Мэн Лань СинХэ», Хэйхэской компании торгово-промышленного развития «Сириус» прекратить.

Решение от 11.04.2019, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2019 по делу №  А04-5589/2016 Арбитражного суда Амурской области оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «С Технология» – без удовлетворения.

Приостановление исполнения решения от 11.04.2019, постановления Шестого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2019, принятое определением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 02.10.2019                   № 0000289 отменить.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Амур-Нефтехим» из федерального бюджета уплаченную платежными поручениями от 25.09.2019 № 195 и № 196 государственную пошлину по кассационной жалобе в размере 6 000 руб.

Выдать справку на возврат государственной пошлины.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия,  в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В части прекращения производства по кассационным жалобам постановление может быть обжаловано в порядке статьи 291 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в Арбитражный суд Дальневосточного округа.

 

Председательствующий судья                                                Я.В. Кондратьева     

Судьи                                                                                        А.Н. Барбатов     

                                                                                                   Г.А. Камалиева