ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А26-4783/2018

21 июля 2020 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть постановления объявлена     06 июля 2020 года

Постановление изготовлено в полном объеме  21 июля 2020 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Масенковой И.В.

судей  Пряхиной Ю.В., Семиглазова В.А.

при ведении протокола судебного заседания:  ФИО1, 

при участии:  

согласно протоколу, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-7764/2020)  Казенного учреждения Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия» на решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.01.2020 по делу № А26-4783/2018 (судья Терешонок М.В.), принятое 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» 

к Казенному учреждению Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия» 

3-и лица: 1) НО «Фонд развития моногородов»; 2) ООО «КВ-Проект»; 3) Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

о взыскании, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Инвестстрой»  обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с иском к казенному учреждению Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия»  о взыскании 9 436 903 руб. 68 коп. задолженности по оплате работ, дополнительно выполненных по государственному контракту №100/2016 от 18.05.2016. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены   некоммерческая организация «Фонд развития моногородов», Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, общество с ограниченной ответственностью «КВ-Проект».

Решением от 28.01.2020  Арбитражный суд   Республики Карелия  исковые требования удовлетворил.

В апелляционной жалобе Казенного учреждения Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия»  просит  решение отменить, в иске отказать. Податель жалобы полагает, что цена контракта является твердой и ее изменение не допустимо.

Законность и обоснованность судебного акта   проверены в апелляционном порядке.  

Из материалов дела следует, что    между КУ РК «Управление капитального строительства Республики Карелия» (заказчик) и ООО «Инвестстрой» (подрядчик) 18.05.2016   заключен госконтракт N 100/2016  в редакции дополнительных соглашений, по условиям которого подрядчик обязался выполнить работы по строительству объектов инженерно- технического обеспечения Промышленного парка.

Дополнительным соглашением № 5 от 30.06.2017   внесены изменения в контракт, стоимость работ составила 254 685 510 руб. 74 коп.

ООО «Инвестстрой» в октябре 2017 года при исполнении контракта выполнило дополнительные работы по берегоукреплению русла реки, примыкающего к автомобильным дорогам; благоустройству подъездов КТП и устройству бордюров; устройству дополнительного ограждения в районе участка, предусматриваемого под котельную и склад топлива, на общую сумму 9 436 903 руб. 68 коп. Подрядчик неоднократно обращался к заказчику письмами на необходимость выполнения дополнительных работ. 

Необходимость выполнения дополнительных работ, а также дополнительного финансирования подтверждается решениями, принятыми на совещаниях у заместителя Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации ФИО2 от 30.08.2017, у Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 12.09.2017  и от 20.10.2017, оформленных соответствующими протоколами.

В целях обеспечения финансирования дополнительных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, распоряжением Правительства Республики Карелия от 23.10.2017  № 561р-П, внесены изменения в адресную инвестиционную программу Республики Карелия в части увеличения лимитов финансирования по объекту «Строительство объектов инженерно-технического обеспечения промышленного парка» на 5000 тыс. руб. за счет средств бюджета Республики Карелия. 

В служебной записке от 01.12.2017 № 11/МСЖКХиЭ  Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия на имя первого заместителя Главы Республики Карелия просил согласовать внесение изменений в адресную инвестиционную программу Республики Карелия в части увеличения лимитов по объекту на 45785 тыс. руб., поскольку общая стоимость дополнительных работ составила 9578,5 тыс. руб. 

Дополнительные работы в 2017 фактически выполнены подрядчиком, акты сдачи-приемки дополнительных работ, а также локальные сметные расчеты направлены в КУ РК «Управление капитального строительства Республики Карелия» с сопроводительными письмами от 30.10.2017  № 130/17, от 08.11.2017 № 245 от 25.12.2017. 

Со стороны заказчика акты не подписаны. 

Работы по строительству объекта выполнены в полном объеме, цель выполнения работ по договору подряда достигнута. Объект введен в эксплуатацию на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 25.12.2017 N 10- RU10513OOO-83/1-2017.

Претензионным письмом от 01.03.2017  № 1-7/36 истец предложил ответчику подписать дополнительное соглашение к контракту, подписать акты о приемке выполненных дополнительных работ и оплатить выполненные работы в сумме 9 578 455,30 руб. 

Претензия осталась без добровольного удовлетворения, ООО «Инвестстрой» обратилось с настоящим иском в суд.

Суд первой инстанции признал требования истца обоснованными по праву и размеру. 

Оценив доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, выводы обжалуемого судебного акта, представленные в материалы дела доказательства, апелляционный суд не усматривает оснований для отмены или изменения решения.  

Суд удовлетворил требование об оплате согласованных с заказчиком дополнительных строительных работ по государственному контракту, отметив, что следует учитывать специфику отношений, складывающихся в сфере строительства, которая уже в силу своего существа создает возможность выявления в ходе исполнения обязательства дополнительных работ и в связи с этим обуславливает приоритетное необходимость применения норм статьи 743 ГК РФ наряду с положениями Закона о контрактной системе.

В соответствии с пунктом 3 статьи 743 ГК РФ подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику и обосновать необходимость немедленных действий в интересах заказчика.

В силу пункта 5 статьи 743 ГК РФ при согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам.

При этом, с учетом положений статьи 8, части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе, увеличение объема работ по государственному (муниципальному) контракту, в том числе когда такое увеличение превышает 10% от цены или объема, предусмотренных контрактом, допустимо исключительно в случае, если их невыполнение грозит годности и прочности результата выполняемой работы. К дополнительным работам, подлежащим оплате заказчиком также могут быть отнесены исключительно те работы, которые, исходя из имеющейся информации на момент подготовки документации и заключения контракта объективно не могли быть учтены в технической документации, но должны быть произведены, поскольку без их выполнения подрядчик не может приступать к другим работам или продолжать уже начатые, либо ввести объект в эксплуатацию и достичь предусмотренного контрактом результата.

По смыслу приведенных норм в случае, если заказчик согласовал действия по проведению дополнительных работ, необходимых для завершения технологического цикла и обеспечения годности и прочности их результата, последующий отказ в оплате дополнительных работ создавал бы возможности для извлечения им преимуществ из своего недобросовестного поведения, что противоречит пункту 4 статьи 1 ГК РФ.

Представитель ответчика не оспаривал тот факт, что выполненные истцом дополнительные работы относятся ко второму этапу строительства.

В ходе судебного разбирательства для определения объема выполненных дополнительных работ судом первой инстанции назначена экспертиза.  В заключении № 01/3391/19 эксперт приходит к  выводу, о том, что  освидетельствованные в ходе выполнения обследования работы, выполненные в соответствии с актами выполненных работ №№ 58-60 от 25.12.2017 являются дополнительными по отношению к работам, предусмотренным контрактом, однако их выполнение необходимо для ввода объекта в эксплуатацию; необходимость выполнения работ по устройству ограждений обусловлено требованиями СНиП 12- 03-2001; системы молниезащиты и заземления; необходимость выполнения работ по устройству берегоукрепления ручья обусловлено требованиями СП 68.13330.2017. 

Стоимость фактически выполненных ООО «Инвестстрой» дополнительных работ определена локальным сметным расчётом № 01 и составила  5975824  руб.  

Судом установлено, что дополнительные работы, выполненные истцом, являлись необходимыми для обеспечения годности и прочности результата работ; доказательств того, что подрядчиком фактически выполнены самостоятельные по отношению к заключенному контракту работы, не представлено. При этом отсутствовали основания полагать, что выполнение работ в сложившейся ситуации иным лицом было бы возможно без увеличения их стоимости.

Факт выполнения дополнительных работ в рамках контракта подтвержден судебной экспертизой.

Суд первой инстанции обоснованно признал проведенную судебную экспертизу надлежащим доказательством по делу и в силу статьи 64 АПК РФ правомерно положил сведения, полученные в ходе ее проведения, в обоснование принятого решения.

Достоверность сведений, отраженных в заключении эксперта ответчиком  в нарушение статьи 65 АПК РФ не опровергнута.

Ходатайство ответчика о назначении повторной экспертизы суд отклонил, исходя из того, что в экспертном заключении даны исчерпывающие ответы на поставленные судом вопросы, каких-либо неясностей в заключении эксперта не усматривается, заключение эксперта соответствует части 2 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Оснований, предусмотренных частью 2 статьи 87 Кодекса, для проведения повторной экспертизы судом не установлено.

Правила оценки доказательств судом первой инстанции соблюдены, неустраненных противоречий в имеющихся в деле доказательствах суд апелляционной инстанции не усматривает.

С учетом изложенного, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда  Республики Карелия  от 28.01.2020  по делу №  А26-4783/2018 в обжалуемой части  оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

И.В. Масенкова

Судьи

Ю.В. Пряхина

 В.А. Семиглазов