АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А66-16371/2024

г.Тверь

18 февраля 2025 года

(резолютивная часть решения принята 05 февраля 2025 года)

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Борцовой Н.А., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания помощником судьи Ужко А.В, с участием представителя истца – ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества "Россети Центр", г. Москва, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к ответчику индивидуальному предпринимателю ФИО2, д. Изворотень, (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>), 

с участием третьих лиц: общества с ограниченной ответственностью "Ремсервис", рп. Панковка, Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области, г. Тверь, Администрации города Твери, г. Тверь,

о расторжении договора, взыскании 2 283 394-53 рублей,

УСТАНОВИЛ:

Публичное акционерное общество "Россети Центр", г. Москва, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, далее истец, Акционерное общество) обратилось в Калининский районный суд Тверской области с исковым заявлением к ФИО2, д. Изворотень, (далее ответчик) о расторжении договора №41450383 от 12 мая 2017 года об осуществлении технологического присоединения, взыскании 2 042 244-61 рублей убытков, 241 159-92 рублей неустойки. Делу присвоен номер 2-1866/2024.

Определением от 27 сентября 2024 года гражданское дело №2-1866/2024 по иску публичного акционерного общества "Россети Центр", г. Москва, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к ФИО2, д. Изворотень направлено по подсудности в Арбитражный суд Тверской области.

Определением от 30 октября 2024 года исковое заявление принято к производству. Делу присвоен номер 16371/2024.

Рассмотрение дела в судебном заседании назначено на 05 февраля 2025 года.

Информация о месте и времени судебного заседания размещена на официальном сайте арбитражных судов в общедоступной автоматизированной системе «Картотека арбитражных дел» в сети «Интернет» (http://kad.arbitr.ru). 

Ответчик, третьи лица участия представителей не обеспечили.

Из материалов дела следует, что между Акционерным обществом (Сетевая организация) и ФИО2 (Заявитель) 12 мая 2017 года подписан договор №41450383 об осуществлении технологического присоединения (далее Договор) по условиям которого Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое присоединение) - объектов сельского хозяйства (теплиц), запитанных от проектируемых КТП 10/0,4 кВ и ЛЭП 10 кВ, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношении с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 40 кВт; в том числе по категориям надежности третья;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 10 кВ;

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объектов сельского хозяйства (теплиц), местоположение которых установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Яковлево, Участок находится примерно в 1090 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, д. Яковлеве (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000012:1290).

Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения ь электрическим сетям (далее - технические условия).

По условиям пункта 4 Договора технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении.

Срок действия технических условий составляет 2 (два) года со дня заключения настоящего договора.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 (один) год со дня заключения настоящего договора.

Права и обязанности сторон определены в разделе 2 Договора, плата за технологическое присоединение и порядок расчетов – в разделе 3 Договора.

Согласно пункту 10 Договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом ГУ РЭК Тверской области №387-нп от 29 декабря 2016 года и составляет 817 491-26 рублей, порядок внесения платы установлен пунктом 11.

Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, Сетевая организация – до границ участка Заявителя (пункт 13).

По условиям Договора пункта 17 Договора сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный Договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процентов от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном порядке настоящим абзацем порядке за год просрочки.

 Приложением №1 к Договору стороны согласовали Технические условия.

1. Наименование сетевой организации, выдавшей технические условия: филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

2. Полное наименование организации - для юридического лица; фамилия, имя, отчество - для физического лица или индивидуального предпринимателя: ФИО2. 

3. Наименование энергопринимающих устройств заявителя; объекты сельского хозяйства (теплицы), запитанные от проектируемых КТП 10/0,4 кВ и ЛЭП 10 кВ.

4. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дер. Яковлево. Участок находится примерно в 1090 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район. Михайловское с/п, дер. Яковлево (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000012:1290).

5 Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 40 кВт.

6. Категория электроприемников по надежности электроснабжения; III (третья).

7. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 10 кВ.

8. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: определяется Договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

9. Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: концевая разделка проектируемой КЛ 10 кВ фид. «ВЛ 10 кВ № 17» ПС 35/10 кВ№ 15, 40 кВт.

I ДО i! Hi

10. Основной источник питания:

 -ПС35/10кВ№15;

- ВЛ 10 кВ фид. «ВЛ 10 кВ № 17»;

Проектируемый участок КВЛ 10 кВ.

11.Резервный источник питания: нет.

12 . Сетевая организация осуществляет:

12.1 Реконструкцию ВЛ 10 кВ фид. «ВЛ 10 кВ № 17» ПС 35/10 кВ № 15 с заменой существующей промежуточной ж/б опоры № 5 на анкерную ответвительную ж/б опору

12.2 Проектирование и строительство участка КВЛ 10 кВ от опоры № 5 фид. «ВЛ 10 кВ .V-17» ПС 35/10 кВ № 15 до границы участка Заявителя с учетом переходов под автодорогой и под железной дорогой методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ). На участке воздушной линии предусмотреть использование провода СИП -3 сечением 50 мм2 на железобетонных опорах протяженностью ориентировочно 0,96 км. На участке кабельной линии предусмотреть использование кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, сечением токопроводящей жилы 50 мм2 протяженностью ориентировочно 0,26 км (из них 0,06 км - протяженность участков ГНБ). В конце проектируемой КВЛ 10 кВ предусмотреть установку анкерной железобетонной опоры 10 кВ. Трассу прохождения, протяженность, марку и сечение проводников уточнить при проектировании.

12.3 Проверку выполнения заявителем технических условий с проведением осмотр (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя с его участием.

12.4 Маркирование специальными знаками визуального контроля прибор электрической энергии и вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.

2.5 Физическое соединение (контакт) проектируемой КЛ-10 кВ с энергопринимающим устройствами Заявителя в точке присоединения после выполнения Технических условие

13. Заявитель осуществляет:

13.1 Проектирование и строительство КТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью более 63 кВ А. Место установки, тип ТП 10/0,4 кВ и мощность трансформатора уточнит при проектировании.

13.2 Проектирование и строительство отпайки 10 кВ от проектируемой КЛ 10 кВ фид. «ВЛ 1 кВ № 17» ПС 35/10 кВ № 15 сетевой организации до проектируемой КТП 10/0,4 кВ. Трассу прохождения, тип линий, протяженность, марку и сечение провода (кабели) уточнить при проектировании.

13.3 На границе раздела сети (по балансовой принадлежности) оборудование учета электроэнергии с установкой пункта коммерческого учета 10 кВ. Учет электроэнергии выполнить в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии и Правилами устройства электроустановок, класс точности не ниже 1.0 давностью поверки не более 12 месяцев,. Класс точности трансформаторов тока для присоединения расчетного счетчика электроэнергии должен быть не ниже 0,5. Класс точности трансформаторов напряжения для присоединения расчетного счетчика электроэнергии должен быть не ниже 0,5. Подключение счетчика измерительным трансформаторам осуществить через испытательный блок (клеменик), с возможностью опломбировки. Предусмотреть защиту средств учета с несанкционированного доступа.

13.4 .На границе раздела сети (по балансовой принадлежности) установку коммутационного аппарата, обеспечивающего видимый разрыв цепи, и коммутационного аппарата обеспечивающего защиту от многофазных замыканий с учетом необходимо селективности. Тип аппаратов и выбор номинальных параметров определить проектом

13.5 Комплектование вводно-распределительного устройства (ВРУ) вводным коммутационным аппаратом, оснащённым защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети. Выбор номинальных параметров коммутационное аппарата произвести согласно разрешенной мощности на присоединение.

13.6 При наличии автономного источника электроснабжения недопущение его работы параллельно с сетью сетевой организации и/или выдачи электроэнергии в сеть.

13.7 Обеспечение готовности к физическому соединению ответвления 10 кВ в точке присоединения (провод СИП или кабель, материалы и детали для присоединения).

13.7 Разработку Проекта, отвечающего требованиям, предъявляемым к нормативно технической документации, согласно обязательствам раздела 13 технических условий. До выполнения строительно-монтажных работ Проект согласовать с Филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». В случае если в ходе проектирования возникнет необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступление должны быть согласованы с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» с последующей корректировкой технических условий.

14. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Уведомлением №МР1-ТВ/13-1/345 от 14 января 2019 года Сетевая организация сообщила Заявителю о выполнении мероприятий по технологическому присоединению.

Ссылаясь на то, что Заявитель не выполнил условия договора №41450383 от 12 мая 2017 года об осуществлении технологического присоединения, в том числе мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, не уведомил Сетевую организацию о выполнении технических условий, нарушения носят длительный характер, срок технических условий истек, Заявитель не воспользовался правом продления технических условий, истец обратился в суд с настоящим иском.

 Проанализировав материалы дела, оценив собранные по делу доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

 В соответствии со статьей 11 Гражданского кодекса Российской Федерации защита нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляется в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, судом. Возможность защиты гражданских прав служит одной из гарантий их осуществления. Право на судебную защиту является правом, гарантированным статьей 46 Конституции Российской Федерации.

 Из содержания статей 1, 2 и 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

 Исходя из смысла статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обращение в суд за защитой нарушенного права допускается в отношении лица, права которого нарушены, а удовлетворение иска возможно только в отношении лица, которое нарушает или оспаривает права. В противном случае отсутствует спор, подлежащий разрешению судом. При этом в силу статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации основополагающим принципом гражданского законодательства является принцип обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

 Указанная норма закона содержит перечень юридических фактов, с которыми связано возникновение гражданских прав и обязанностей, как по воле субъекта гражданского права, так и помимо его воли.

 На основании статьи 420 Гражданского кодекса Российской Федерации договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

 В силу пункта 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

 Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. К договору, не предусмотренному законом или иными правовыми актами, при отсутствии признаков, указанных в пункте 3 настоящей статьи, правила об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, не применяются, что не исключает возможности применения правил об аналогии закона (пункт 1 статьи 6) к отдельным отношениям сторон по договору (пункт 2 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации).

 На основании пункта 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения (статья 422 Гражданского кодекса Российской Федерации).

 В конкретном случае взаимоотношения сторон по делу урегулированы договором №41450383 от 12 мая 2017 года об осуществлении технологического присоединения об осуществлении технологического присоединения. 

 Нормы, регламентирующие договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств не включены в раздел 4 «Отдельные виды обязательств» Гражданского кодекса Российской Федерации, однако эти нормы содержатся в специальных нормативных актах, закрепляющих правила подключения к системам энергоснабжения.

 В частности такие нормы содержатся в статье 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон об электроэнергетике) и Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила технологического присоединения).

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», пунктами 6, 16 и 17 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила № 861), технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. 

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). 

Как правило, построенные и реконструированные объекты электросетевого хозяйства не передаются заказчику; силами сетевой организации создаются условия для технологического присоединения энергопринимающих устройств заказчика с согласованной категорией надежности к электрической сети сетевой организации и для последующей передачи заказчику электрической энергии с определенными физическими характеристиками. Заказчик, в свою очередь, вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика. 

В таком виде договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору о возмездном оказании услуг, поэтому к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Указанная правовая позиция содержится в пункте 23 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2018), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.03.2018. 

Отсутствие у Акционерного общества как стороны публичного договора, для которой его заключение является обязательным, права на односторонний отказ от договора (пункты 20 - 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора», постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.11.2009 № 9548/09) не означает отсутствие у него права требовать расторжения договора в судебном порядке в предусмотренных законом случаях, на что прямо указано в подпункте «в» пункта 16 Правил № 861.

 В соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено названным Кодексом, другими законами или договором. 

В силу пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной, а также в случаях, предусмотренных Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

 В соответствии со статьей 452 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. 

Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок. 

Соглашение о расторжении договора ответчик не подписал, ответ в установленные в письме №МР1-ТВ/13-110206 от 24 марта 2021 года сроки не предоставил. 

Пунктом 16 Правил предусмотрены существенные условия, которые должен содержать договор технологического присоединения к электрическим сетям. К ним, в частности, относятся: мероприятия по технологическому присоединению и обязательства сторон по их выполнению; срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению; порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение. 

Предметом заключенного между сторонами договора является оказание услуги по технологическому присоединению к электрической сети. 

Так, по условиям пункта 8 заключенного договора №41450383 от 12 мая 2017 года об осуществлении технологического присоединения Заявитель обязуется исполнять указанные в разделе III Договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение, а также все условия Договора, в том числе выполнить возложенные на заявителя мероприятия по технологическому присоединению, указанные в разделе 13 технических условий, являющихся Приложением № 1 к Договору, а также после выполнения таких мероприятий уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий в своей части с представлением комплекта необходимой документации, 

В пункте 5 Договора стороны согласовали срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, который составил один год дня заключения Договора, то есть - не позднее 12 мая 2018 года.

В соответствии с пунктом 16(5) Правил № 861 нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда. 

Согласно пункту 16(6) Правил № 861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств: а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий; б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий; в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий; г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение

При этом, в установленный срок со стороны ответчика по Договору не представлено доказательств выполнения обязательств; мероприятия по технологическому присоединению - предусмотренные разделом 13 технических условий не выполнены, уведомление об исполнении технических условий со стороны заявителя сетевой организацией не получено. 

Кроме того, срок действия технических условий истек 12 мая 2019 года. Заявитель не воспользовался правом продления технических условий в соответствии с пунктом 27 Правил технологического присоединения.

Учитывая существенные нарушения договора, отсутствие интереса в сохранении договорных отношений у обеих сторон, а также продолжительное неисполнение ответчиком обязательств, в силу с пункта 16 Правил и пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации договор №41450383 от 12 мая 2017 года об осуществлении технологического присоединения подлежит расторжению в судебном порядке. 

Исходя из смысла положений статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не вытекает из соглашения сторон, при расторжении договора обязательства прекращаются на будущее время, при этом кредитор не лишается права требовать с должника суммы основного долга и имущественных санкций (в том числе договорной неустойки), которые образовались до момента расторжения договора в связи с его неисполнением или ненадлежащим исполнением. 

Принимая во внимание факт нарушения со стороны Заявителя срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного Договором, у истца возникли основания в соответствии с пунктом 17 Договора для начисления договорной неустойки из расчета 0,05 процента от общего размера платы за каждый день просрочки, но не более, чем за год просрочки. 

По расчету истца размер договорной неустойки за период с 14 января 3019 года по 11 мая 2019 года составляет 241 159-92 рублей.

Расчет неустойки ответчиком не оспорен, проверен судом.

Исковые требования в части взыскания неустойки подлежат удовлетворению.

Статья 393 Гражданского кодекса Российской Федерации обязывает должника возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, в том числе реальный ущерб и упущенную выгоду (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Как следует из разъяснений, приведенных в пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», по смыслу статей 15 и 393 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор представляет доказательства, подтверждающие наличие у него убытков, а также обосновывающие с разумной степенью достоверности их размер и причинную связь между неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником и названными убытками. 

Следовательно, лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать противоправность поведения ответчика, наличие и размер убытков и причинно следственную связь между ними. 

Удовлетворение требования о взыскании убытков возможно лишь при условии доказанности всех элементов состава гражданского правонарушения.

В свою очередь должник вправе предъявить возражения относительно размера причиненных кредитору убытков, и представить доказательства, что кредитор мог уменьшить такие убытки, но не принял для этого разумных мер (статья 404 Гражданского кодекса Российской Федерации) 

Как следует из текста искового заявления, Сетевая организация в связи с выполнением мероприятий по технологическому присоединению по Договору, предусмотренных Техническими условиями, понесла следующие расходы: расходы на выполнение проектно-изыскательских работ, работ по строительству ВЛ 10кВ, фид НЛ 10 кВ №17 ПС 35/10 кВ №15 и строительство КВЛ 10кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ФИО2 в размере 2 039 979-27 рублей (без НДС), а также накладные расходы в сумме 57  628-31 рублей (без НДС), расходы по подготовке и выдаче технических условий в размере 15 824-16 рублей 15 824-16 рублей 4-16 рублей, всего: 2 516 905-21 рублей (с НДС).

Размер убытков определен Акционерным обществом путем вычитания из суммы 2 516 905-21 рублей (с НДС) 490 494-76 рублей оплаты произведенной ответчиком.

Расходы в размере 2 039 979-27 рублей (без НДС) и их связь с выполнением Сетевой организацией обязательств по договору №41450383 от 12 мая 2017 года об осуществлении технологического присоединения полностью подтверждается материалами дела, в том договором №1214/УКС-2017 от 14 декабря 2027 года, актами о приемки проектных и изыскательских работ, актами выполненных работ, справкой формы КС-3.

Расходы в размере 15 824-16 рублей по подготовке и выдаче технических условий – приказом ГУ РЭК Тверской области №387-нп от 29 декабря 2016 года.

Накладные расходы в размере 57  628-31 рублей (без НДС) истец подтверждает бухгалтерской справкой.

Исследовав и оценив доводы истца, а также представленные в дело доказательства в их совокупности и взаимной связи по правилам статей 64, 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом установленного нарушения ответчиком существенных условий Договора, суд приходит к выводу о том, что Акционерным обществом надлежащим образом подтверждены и доказаны применительно к положениям статей 15, 393 Гражданского кодекса Российской Федерации, убытки, возникшие у Сетевой организации ввиду расторжения договора №41450383 от 12 мая 2017 года об осуществлении технологического присоединения, и представляющие собой расходы сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных Техническими условиями, в сумме 2 039 979-27 рублей (без НДС), расходы сетевой организации на подготовку и выдачу заявителю соответствующих технических условий в сумме 15 824-16 рублей.

 В части накладных расходов в размере 57 628-31 рублей (без НДС) доказательств отвечающих требованиям статей 67, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подтверждающих причинно-следственную связь с нарушением ответчиком обязательств по Договору, истцом не представлено. Бухгалтерская справка таковой не является.

С учетом изложенного исковые требования в части взыскания убытков удовлетворяются в размере 1 984 606-30 рублей (учитывая произведенную оплату 490 494-76 рублей).

 Расходы по оплате государственной пошлины распределяются между сторонами по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 167-171, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л:

Расторгнуть договор №41450383 от 12 мая 2017 года об осуществлении технологического присоединения.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2, д. Изворотень, (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества "Россети Центр", г. Москва, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 241 159-92 рублей неустойки, 1 984 606-30 рублей убытков, всего 2 225 766-22 рублей, а также 25 616-97 рублей расходов по оплате государственной пошлины;

-в доход федерального бюджета 13 931-03 рублей государственной пошлины в установленном порядке.

В остальной части в удовлетворении иска отказать.

Взыскать с публичного акционерного общества "Россети Центр", г. Москва, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 869 рублей государственной пошлины в установленном порядке.

Исполнительные листы выдать взыскателям в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после вступления решения в законную силу.

 Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд город Вологда в течение месяца со дня его принятия.

Судья Н.А. Борцова