Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А50-38019/2019

06 марта 2020г.

г. Пермь

Резолютивная часть решения принята 26.02.2020г.

Решение в полном объеме изготовлено 06.03.2020г.

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Лаврова Ю.А., рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ ЮСТИЦИИ И МИРОВЫХ СУДЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ (614060, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ПЕРМЬ, БУЛЬВАР ГАГАРИНА, ДОМ 10, ОГРН: 1025900530215, Дата присвоения ОГРН: 17.12.2002, ИНН: 5902292745) 

к ответчику: ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" (618409 

<

...> ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.09.2016, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 811 руб. 93 коп. неустойки

установил:

Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края (истец) обратился в арбитражный суд с иском к ООО «Строй-Прогресс»  (ответчик) о взыскании неустойки в сумме 811 руб. 93 коп. неустойки. 

Исследовав материалы дела, заслушав доводы представителя Истца, суд установил:

В качестве фактических обстоятельств по делу Истец ссылается на то, что 01 октября 2018 года между Агентством по делам юстиции и мировых судей Пермского края (далее - Агентство, Заказчик, Истец) и обществом с ограниченной ответственностью «Строй-Прогресс» (далее - Подрядчик, Ответчик) заключен государственный контракт № 204-ПК (далее - Контракт). 

Согласно условиям Контракта Подрядчик взял на себя обязательство выполнить работы по текущему ремонту помещений судебных участков мировых судей в здании по адресу: 

<

...>, г. Березники (далее -работы) (Приложение № 1).

Цена государственного контракта составляет 80 589 (восемьдесят тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек. 

Согласно п. 2 Контракта, срок выполнения работ - 10 рабочих дней с момента заключения Контракта, то есть по 15 октября 2018 года включительно. 

Между тем, в установленный срок обязательство по выполнению работ Ответчиком не было исполнено.

23 ноября 2018 года Заказчик получил уведомление о завершении работ, акты, счет на оплату. 

Работы в полном объеме выполнены и сданы Заказчику 23 ноября 2018 года.

Таким образом, период просрочки исполнения обязательств составил 39 (тридцать девять) дней.

В соответствии с п. 7.6. Контракта, за неисполнение обязательств в установленные сроки Исполнитель несет ответственность в виде пени.

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Истцом произведен расчет неустойки (пени) по состоянию на 26.12.2018г.: 80589,00х39х1/300х7,75% = 811 (восемьсот одиннадцать) рублей 93 копейки.

Требование (претензия) об уплате неустойки (пени) в связи с неисполнением обязательств по Контракту направлено в установленном порядке Ответчику (исх. №СЭД-37-01-12-1-исх-5 от 30.01.2019, Приложение № 6).

Как указывает Истец, уплату пени в размере 811 руб. 93 коп. Ответчик не произвел. Контррасчет неустойки не предоставил. От получение почтовой корреспонденции уклоняется.

Поскольку, ответчиком неустойка в добровольном порядке не оплачена, истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии со ст.329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. По правовой природе неустойка является мерой имущественной ответственности.

В соответствии с п.1 ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пени) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Судом произведен перерасчет неустойки, с учетом пункта 38 Обзора ВС РФ от 28.06.2017 при расчете применена ставка Центрального банка Российской Федерации, действовавшая на день прекращения обязательства по выполнению работ на 23.11.2018г. (7,50%). Согласно расчету суда размер неустойки составил 785 руб. 74 коп.

Данные выводы суда согласуется с правовой позицией, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 04.12.2018 N 302-ЭС18-10991.

С учетом вышеизложенного, исковые требования подлежат удовлетворению частично в сумме 785 руб. 74 коп., исходя из заявленного Истцом периода, с применением ставки в размере 7,5%, в удовлетворении остальной части требования следует отказать.

Согласно статье 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" (618409 

<

...> ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.09.2016, ИНН: 

<

***>)  в пользу АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ ЮСТИЦИИ И МИРОВЫХ СУДЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ (614060, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 17.12.2002, ИНН: 

<

***>)  неустойку в сумме 785 руб. 74 коп. по государственному контракту №204-ПК от 01.10.2018г.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-ПРОГРЕСС" (618409 

<

...> ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.09.2016, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме  1 935 руб. 49 коп.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пермского края в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.

Судья                                                Ю.А. Лавров