Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А61-3734/2022

г. Владикавказ

22 декабря 2023 года

Арбитражный суд Республики Северная Осетия – Алания в составе судьи Джиоева З.П.,  при ведении протокола секретарем судебного заседания Дзицоевой Д.И., рассмотрев в  судебном заседании дело исковому заявлению Муниципального казенного учреждения  муниципального образования Моздокского городского поселения "Управление  городского хозяйства" (ОГРН 1021500918196 ИНН 1510007340)  

к ответчику – Обществу с ограниченной ответственностью  "Каббалкстройкомунэкспертиза" (ОГРН: 1020700740576, ИНН: 0713002579),  

третьи лица: 

1. Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения  Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (ОГРН: 1021500001830,  ИНН: 1510008224) и  

2. Государственное автономное учреждение Республики Северная Осетия-Алания  «Государственная экспертиза проектов строительства» (ОГРН: 1071515001744,  ИНН: 1515911479)  

о понуждении заключить дополнительное соглашение о расторжении контракта и  взыскании штрафа,  

и встречному исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью  "Каббалкстройкомунэкспертиза" (ОГРН: 1020700740576, ИНН: 0713002579)  

к Муниципальному казенному учреждению муниципального образования моздокского  городского поселения "Управление городского хозяйства" (ОГРН 1021500918196 ИНН  1510007340)  

об обязании заключить дополнительное соглашение об изменении существенных условий  контракта,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  РФ, суд  

Р Е Ш И Л:

Утвердить правопреемство от Муниципального казенного учреждения  Муниципального образования Моздокское городское поселение «Городской центр  досуга» к Муниципальному казенному учреждению муниципального образования  Мохздокское городское поселение «Управление городского хозяйства» в качестве  Стороны муниципального контракта № 03102000000320002486 от 18.12.2020.  

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «Каббалстройкоммунэкспертиза» удовлетворить.  

Обязать Муниципальное казенное учреждение муниципального образования  Моздокское городское поселение «Управление городского хозяйства» заключить с  обществом с ограниченной ответственностью «Каббалкстройкомунэкспертиза»  дополнительное соглашение об изменении существенных условий контракта   № 03102000000320002486 от 18.12.2020 на следующих условиях:  

«Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Моздокское  городское поселение «Управление городского хозяйства», выступающее от имени  муниципального образования Моздокское городское поселение, далее именуемое  «Заказчик», в лице директора Химич Георгия Григорьевича, действующего на основании  Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и Общество с  ограниченной ответственностью «Каббалкстройкомунэкспертиза», далее именуемое  «подрядчик», в лице директора Ульбашева Азреталия Мусалимовича, действующего на  основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на  основании пунктов «б» и «г» части 1 Постановления Правительства РФ от 16.04.2022   № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий  государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение  работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта  капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного  наследия» заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение), к  муниципальному контракту на выполнение работ № 0310200000320002486 от 18.12.2020  (далее – Контракт) о нижеследующем:  

1. В связи с отсутствием необходимости в проведении государственной  экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,  руководствуясь п. 8.1 Контракта и ч. 3 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, Стороны  пришли к соглашению сократить объем работ, на оказание которых заключен Контракт, а  именно: в части обеспечения и оплаты работы проведения государственной экспертизы  

проектной документации и результатов инженерных изысканий и соответственно  сокращаемому объему работ уменьшить цену Контракта на 586 560 рублей (пятьсот  восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек).  

2. Учитывая пункт 1 Соглашения, Стороны пришли к соглашению о внесении  следующих изменений в Контракт и Приложения к нему:  

2.1. Пункт 1.3 Контракта изменить и изложить в следующей редакции:  

«1.3. Результатом выполненной работы по настоящему контракту, признаются проектная  документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий, при наличии  положительного заключения государственной экспертизы проверки достоверности  определения сметной стоимости.».  

2.2. Пункт 2.1 Контракта изменить и изложить в следующей редакции:  

«2.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и  включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных  платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по  контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 5 913 440 (пять  миллионов девятьсот тринадцать тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек, НДС не  облагается, в связи с тем, что контракт заключается с лицом, не являющимся в  соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах  плательщиком НДС.».  

2.3. Пункт 3.1.4 Контракта изменить и изложить в следующей редакции: 

«3.1.4. Обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы  проведения проверки достоверности определения сметной стоимости.»  

2.4. Пункт 3.2 Контракта изменить и изложить в следующей редакции:  

«3.2. Заказчик обязуется: Осуществить приемку результатов выполненных работ по  контракту в соответствии с условиями контракта, после получения положительного  заключения государственной экспертизы проведения проверки достоверности  определения сметной стоимости, а также подготовки рабочей документации,  разработанной на основании проектной документации.»  

3. Пункты 6, 9 Технического задания на проектирование изложить в следующей  редакции:  

 № 

п/п  

Перечень основных данных 

и требований  

Основные данные и требования 

6. 

Особые 

Состав проекта должен соответствовать Градостроительного  

требования 

кодекса РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, постановления  

Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов  проектной документации и требованиях к их содержанию».  Проектная организация:  

- разрабатывает проектную и рабочую документацию;  - осуществляет техническое сопровождение проведения  

государственной экспертизы; 

- вносит изменения в сметную документацию, согласно  выданных замечаний государственной экспертизы;  

- выполняет инженерно-топографический план (геоподоснова)  ив масштабе 1:500 с подземными коммуникациями и  

красными линиями в формате *.dwg. 

9. 

Указания о необходимости согласования проектной документации 

На исполнителя возлагается техническое сопровождение:  

1. Согласование проектной документации: 

- с организациями, выдавшими технические условия, в случае  необходимости;  

- материалы и оборудование, вносимые в Проектную  документацию, согласовать с Заказчиком;  

2. Качество и объем проектно-сметной документации  должны обеспечить получение в государственной экспертизе  положительного заключения проектной документации в части  проведения проверки достоверности определения сметной  стоимости.  

Оплата согласований в рамках исполнения Контракта  производится за счет средств Подрядчика.  

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами  

и является неотъемлемой частью Контракта.  

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны  руководствуются условиями Контракта и действующим законодательством Российской  Федерации.  

6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) идентичных экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон».  

Взыскать с Муниципального казенного учреждения муниципального образования  Моздокского городского поселения "Управление городского хозяйства" (ОГРН  1021500918196 ИНН 1510007340) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  "Каббалкстройкомунэкспертиза" (ОГРН: 1020700740576, ИНН: 0713002579) 6 000 руб. в  возмещение расходов на оплату госпошлины.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестнадцатый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия (изготовления в  полном объеме), а так же в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо -  Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения в законную силу  через суд, вынесший решение.  

Судья З.П. Джиоев