АРБИТРАЖНЫЙ СУД

КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Дело №А27-24284/2024

Р Е Ш Е Н И Е

 

именем Российской Федерации

22 января 2025 г.                                                                                                  г. Кемерово

Резолютивная часть решения объявлена 21 января 2025 г.

Полный текст решения изготовлен 22 января 2025 г.

Арбитражный суд Кемеровской области в составе

судьи

Беляевой Л.В.,

при ведении протокола заседания помощником судьи

ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Управления по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа администрации Тяжинского муниципального округа, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>

к обществу с ограниченной ответственностью "Жилремстрой", ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>

о взыскании 2 434 139,26 руб. неустойки

у с т а н о в и л:

Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа Администрации Тяжинского муниципального округа (далее - Управление, истец) обратилось в  Арбитражный суд Кемеровской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ЖилРемСтрой» (далее - ООО «ЖилРемСтрой», ответчик) о взыскании 2 434 139,26 руб. неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств по контракту от 03.06.2022 № 28/2022.

Определением от 18.12.2024 исковое заявление принято к производству, начата подготовка дела к судебному разбирательству, предварительное судебное заседание назначено на 21.01.2025.

Поданное до заседания ходатайство представителя истца о возможности участия посредством организации онлайн-заседания с использованием информационной системы Картотека арбитражных дел судом было удовлетворено. Данное ходатайство одобрено в установленном порядке в системе, судом организовано онлайн-заседание, произведено подключение, что зафиксировано при ведении протокола судебного заседания. Однако представитель истца к организованному судом онлайн-заседанию не подключился, о причинах не сообщил. Поскольку судом были предприняты все необходимые меры по организации заседания, обеспечению возможности участия в нем, работоспособности оборудования суда, а причины неподключения к онлайн-заседанию представителя истца зависят исключительно от участвующего в деле лица и не находятся в сфере контроля суда, указанные обстоятельства не являются препятствиями для рассмотрения дела.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела (ст.123 АПК РФ), явку полномочного представителя не обеспечил; иск не оспорил; отзыв на исковое заявление (ст.131 АПК РФ) не представил.

Учитывая отсутствие возражений сторон, в соответствии с частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации протокольным определением суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации спор рассмотрен в отсутствие сторон.

Рассмотрев представленные документы, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации  по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Общие положения о подряде применяются к подрядным работам для государственных нужд, если иное не установлено правилами Гражданского кодекса Российской Федерации об этом виде договора (пункт 2 статьи 702 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы (статья 740 ГК РФ), проектные и изыскательские работы (статья 758 ГК РФ), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

Как следует из материалов дела, 03 июня 2022 года обществом с ограниченной ответственностью «ЖИЛРЕМСТРОЙ» (далее – Исполнитель, Ответчик) и Управлением по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа администрации Тяжинского муниципального округа (далее – Инвестор, Истец) по итогам электронного аукциона в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) заключен муниципальный контракт № 28/2022 на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) на территории пгт Тяжинский Тяжинского района Кемеровской области — Кузбасса путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома (далее – контракт), цена контракта составила 13 752 199,23 руб. 

В соответствии пунктами 4.1, 4.3 контракта, передача квартир и документов к ним Инвестору должна быть произведена не позднее 15.12.2022.

В нарушение условий контракта, обязательства Исполнителем исполнены только 04.12.2023, просрочка исполнения обязательств по контракту составляет 354 дня.

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации договором либо законом может быть предусмотрена денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно пунктам 9.1-9.3 контракта, ответственность Сторон за нарушение (неисполнение или ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему контракту установлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (Исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (Исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Инвестор направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки (ч. 7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ) исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем и рассчитывается по следующей формуле:

Пеня = (Цена контракта – Объем исполненных обязательств) х (1/300 х Ключевую ставку ЦБ РФ) х Количество дней просрочки.

Руководствуясь статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ и в соответствии с пунктами 9.2, 12.3 контракта, Инвестор в соответствии с ч.16 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ, сформировал и разместил требование в единой информационной системе, и продублировал посредством электронной почты, указанной в контракте Исполнителю требование № 1220 от 05 декабря 2023 года об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, со сроком исполнения требования в течении 10 рабочих дней.

Расчет пени следующий: срок предоставления квартир, согласно условиям контракта, 15.12.2022г. (даты включительно), с 16.12.2022г. (начало просрочки) по 04.12.2023г. (акт приема-передачи квартир от 04.12.2023г.) - просрочка исполнения обязательств составила 354 дня.

Расчет пени: 13 752 199,23 руб.  ? 15 % ? (1/300) ? 354 = 2 434 139,26 руб.

Расчет произведен с применением ключевой ставки ЦБ РФ на 04.12.2023 в размере 15% годовых, действовавшей на дату исполнения обязательства, что соответствует разъяснениям, изложенным в пункте 26 Обзора судебной практики Верховного суда Российской Федерации N 2 (2019), и правовому подходу, отраженному в определении Верховного суда Российской Федерации от 18.09.2019 N 308-ЭС19-8291 по делу N А15-1198/2018.

Расчет судом проверен, признан арифметически верным и соответствующим условиям договора и действующему законодательству. Контррасчет ответчиком не представлен (ст.65 АПК РФ).

При указанных обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина относится на ответчика и подлежит взысканию в доход федерального бюджета (истец освобожден от ее уплаты).

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 168-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Жилремстрой", ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***> в пользу Управления по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа администрации Тяжинского муниципального округа, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***> неустойку в размере 2 434 139,26 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Жилремстрой", ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***> государственную пошлину в размере 98024  руб. в доход федерального бюджета.

Решение может быть обжаловано в арбитражный  суд апелляционной инстанции в течение одного месяца с момента его принятия (изготовления его в полном объеме).

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья                                                                                                    Л.В. Беляева