9/2022-69436(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А06-8428/2020

г. Астрахань

10 ноября 2022 года

Арбитражный суд Астраханской области в составе: судьи: Богатыренко С.В.  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1  

Руководствуясь статьями 109, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Администрации Муниципального образования "Образцово- Травинский сельсовет" удовлетворить частично.  

Обязать Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая  фирма "СтройЛегион" безвозмездно устранить в тридцатидневный срок недостатки  квартир, поставленных по муниципальным контрактам, расположенных по адресу:  

<

...>, № 2 и ул.Молодежная, д.14, кв. № 3, № 4:, а именно  

1. в квартире № 1 по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Образцово- Травино, ул. Молодежная, 13, выполнить следующие работы: 1.1. произвести демонтаж  натяжного потолка во всех комнатах и обшивку по готовой обрешетке ГКЛ с последующим  обратным монтажом натяжного потолка; 1.2. произвести герметизацию оконных проемов  для устранения продуваний и замену уплотнительных резинок в комнате площадью 8,97  кв.м.; 1.3. произвести утепление ростверка по периметру дома пенополистеролом с  последующим устройством отмостки.  

2. в квартире № 2 по адресу Астраханская область, Камызякский район, с. Образцово- Травино, ул. Молодежная, 13, выполнить следующие работы: 2.1. произвести демонтаж  натяжного потолка во всех комнатах и обшивку по готовой обрешетке ГКЛ с последующим  обратным монтажом натяжного потолка; 2.2. произвести герметизацию оконных проемов  для устранения продуваний и замены уплотнительных резинок в комнате площадью 6,48  кв.м.; 2.3.произвести утепление ростверка по периметру дома пенополистеролом с  последующим устройством отмостки; 2.4. произвести замену поврежденного линолеумного  покрытия и приклеить его к основанию по всей площади полотна.  

3. в квартире № 3 по адресу Астраханская область, Камызякский район, с. Образцово- Травино, ул. Молодежная, 13, выполнить следующие работы: 3.1. произвести демонтаж  натяжного потолка во всех комнатах и обшивка по готовой обрешетке ГКЛ с последующим  обратным монтажом натяжного потолка; 3.2. произвести герметизацию оконных проемов  для устранения продуваний и замены уплотнительных резинок в комнате площадью 12,24  

кв.м.; 3.3. произвести утепление ростверка по периметру дома пенополистеролом с  последующим устройством отмостки; 3.4. произвести замену поврежденного линолеумного  покрытия и приклеить его к основанию по всей площади полотна в комнатах площадью  12,24 кв.м. и 8,48 кв.м..  

4. в квартире № 4 по адресу Астраханская область, Камызякский район, с. Образцово- Травино, ул. Молодежная, 13, выполнить следующие работы: произвести демонтаж  натяжного потолка во всех комнатах и обшивку по готовой обрешетке ГКЛ с последующим  обратным монтажом натяжного потолка; 4.2. произвести герметизацию оконных проемов  для устранения продуваний и заменить уплотнительные резинки во всех комнатах; 4.3.  произвести утепление ростверка по периметру дома пенополистеролом с последующим  устройством отмостки.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "СтройЛегион" в доход федерального бюджета госпошлину в сумме  6000 руб.  

Взыскать с Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "СтройЛегион" в пользу Администрации Муниципального  образования "Образцово-Травинский сельсовет" судебные расходы по оплате за проведение  судебной экспертизы в сумме 54 000 руб.  

Перечислить с депозитного счета арбитражного суда на счет экспертной организации  Автономной некоммерческой организации «Астраханский центр экспертизы»денежные  средства за проведение судебной экспертизы в сумме 42 300 руб.  

Перечислить с депозитного счета арбитражного суда на счет экспертной организации  Общества с ограниченной ответственностью «Агентство независимой оценки и судебных  экспертиз»денежные средства за проведение судебной экспертизы в сумме 54 000 руб.  

Перечислить с депозитного счета арбитражного суда на счет экспертной организации  Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте  Российской Федерации (Астраханский филиал) денежные средства за проведение судебной  экспертизы в сумме 48 000 руб.  

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "СтройЛегион" с депозитного счета суда излишне внесенные  денежные средства за проведение судебной экспертизы¸ в сумме 2000 руб.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного  суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через  Арбитражный суд Астраханской области.  

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте  Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»  

Судья С.В. Богатыренко  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 09.09.2021 4:21:11

 Кому выдана Богатыренко Светлана Викторовна