Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А20-3421/2017

г. Нальчик

10 октября 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 03 октября 2017 года

 Полный текст решения изготовлен  10 октября 2017 года

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики

в составе судьи А.Ю. Маировой,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.Б. Мальбаховой, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «КаббалкГидроСтрой», г. Нарткала

к  Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, г. Нальчик

о   изменении государственного контракта  и обязании продлить срок выполнения работ

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО1 - по доверенности  от 04.08.2017,

от ответчика: ФИО2 - по доверенности от 10.01.2017, 

УСТАНОВИЛ :

общество с ограниченной ответственностью «КаббалкГидроСтрой» обратилось в  Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики к Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики об изменении  государственного контракта № 83/12/2016-КР от 26.12.2016 в части условия выполнения работ и продлении срока выполнения работ до 31.12.2017 включительно.

В предварительном судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме, с учетом представленных в материалы дела доказательств, просил иск удовлетворить.

Представитель ответчика не возразил против удовлетворения исковых требований.

Арбитражный суд в порядке пункта 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в отсутствие возражений сторон, завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции.

Рассмотрев и оценив в порядке 75 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства и оценив их в совокупности, а также заслушав доводы представителей сторон, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела следует, между Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики и обществом с ограниченной ответственностью «КаббалкГидроСтрой» в рамках подпрограммы «Реализация мероприятий за счет резервного фонда Президента Российской Федерации» по результатам электронного аукциона заключен государственный контракт №83/12/2016-КР от 26.12.2016 на выполнение работ по капитальному ремонту корпуса под литером 3 ГКУЗ «Психоневрологический диспансер» Минздрава КБР.

Согласно пункту 3.1 контракта подрядчик производит работы в соответствии с календарным планом (графиком выполнения работ) согласно приложению №2 к контракту, являющимся его неотъемлемой частью. В соответствии с календарным планом срок выполнения работ установлен с момента заключения контракта (26.12.2016) до 31.12.2016.

В ходе выполнения работ по контракту обнаружилась необходимость в ремонте инженерных систем (канализация, электричество, отопление, горячее водоснабжение), которая не предусмотрена контрактом и невозможность продолжения и завершения работ по контракту до его выполнения.

Истец письмом от 04.08.2017 № 79 обратился к ответчику с предложением об изменении срока выполнения работ по контракту на 31.12.2017 путем подписания сторонами дополнительного соглашения к контракту.

Оферта об изменении контракта в срок, установленный офертой, ответчиком акцептована не была, в связи с чем истец обратился с рассматриваемым иском в суд.

В силу условий п. 1 ст. 763 Гражданского кодекса Российской Федерации, подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

Пунктом 1 статьи 767 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что при уменьшении соответствующими государственными органами или органами местного самоуправления в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ. Подрядчик вправе требовать от государственного или муниципального заказчика возмещения убытков, причиненных изменением сроков выполнения работ.

Согласно пункту 2 статьи 767 Гражданского кодекса Российской Федерации, изменения условий государственного или муниципального контракта, не связанные с обстоятельствами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, в одностороннем порядке или по соглашению сторон допускаются в случаях, предусмотренных законом.

Согласно ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечёт для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Согласно статье 452 Гражданского кодекса Российской Федерации, требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, материалы и обстоятельства дела, пояснения сторон, то, что ответчик не возражает против изменения даты окончания работ по контракту, суд удовлетворяет требование истца о внесении изменения в рассматриваемый государственный контракт.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 137, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

1.      Исковые требования удовлетворить. 

2.      Изменить государственный контракт №83/12/2016-КР от 26.12.2016, заключенный между Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики и обществом с ограниченной ответственностью "КаббалкГидроСтрой" в части условия о сроке выполнения работ.

3.      Продлить срок выполнения работ по государственному контракту №83/12/2016-КР от 26.12.2016, заключенному между Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики и обществом с ограниченной ответственностью "КаббалкГидроСтрой" до 31.12.2017 включительно.

4.      Взыскать с Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в пользу общества с ограниченной ответственностью «КаббалкГидроСтрой», г. Нарткала 6 000 рублей расходов по уплате госпошлины. 

5.      Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики. 

 

Судья                                                                               А.Ю. Маирова