Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Волгоград                                                                                            Дело № А12-27071/2020

«04» декабря 2020 года 

Резолютивная часть объявлена 03 декабря 2020 года

Полный текст решения изготовлен 04 декабря 2020 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Двояновой Т.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Матвеевой Ю.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью «Стройдорком» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о привлечении к административной ответственности

с привлечением к участию в деле в качестве заинтересованных лиц –  администрации городского поселения г. Дубовка Волгоградской области, муниципального казенного учреждения городского поселения г. Дубовка «Городское хозяйство»

при участии в судебном заседании:

от заявителя  - ФИО1, доверенность №10 от 24.07.2020,

от общества – не явился, извещен

от администрации городского поселения г. Дубовка Волгоградской области – ФИО2, доверенность от 01.09.2020,

от муниципального казенного учреждения городского поселения г. Дубовка «Городское хозяйство» - не явился, извещен

установил:

Арбитражным судом Волгоградской области принято к рассмотрению заявление инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области (далее – административный орган, Инспекция) о привлечении общества с ограниченной ответственностью «Стройдорком» (далее – ООО «Стройдорком», Общество) к административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее -  КоАП РФ).

В судебном заседании представитель административного органа поддержал заявление о привлечении к административной ответственности.

В судебное заседание представитель заявителя не явился, заявитель извещен надлежащим образом.

Протокольным определением от 03.12.2020 в удовлетворении ходатайства Общества об отложении судебного заседания отказано, поскольку ООО «Стройдорком» является юридическим лицом и при невозможности явки в судебное заседание конкретного представителя общества вправе обратиться к помощи иного представителя.

Согласно представленным возражениям, Общество просит отказать в удовлетворении заявленных требований.

Администрация городского поселения г. Дубовка Волгоградской области в удовлетворении требований просит отказать. Представлен отзыв.  

Выслушав доводы, лиц участвующих в деле, исследовав материалы дела, арбитражный суд считает, что заявление о привлечении к административной ответственности  подлежит удовлетворению.

Как следует из абз. 2 п. 1.1 Положения об инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области, утверждённого постановлением Правительства Волгоградской области от 10.07.2012 №211-п, инспекция государственного строительного надзора Волгоградской области (далее - Инспекция) является органом исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченным осуществлять на территории Волгоградской области региональный государственный строительный надзор.

Администрацией городского поселения г. Дубовка Волгоградской области Муниципальному казенному учреждению городского поселения г.Дубовка «Городское хозяйство» (далее - Застройщик, Учреждение) 27.03.2020 выдано разрешение № 34-RU 34505101-326-2020 на строительство объекта: «Строительство автомобильной дороги по ул.Советская в драницах улиц Юбилейная и им. 30 лет. Победы в городском поселении г.Дубовка Волгоградской области» расположенном по адресу: Волгоградская область, Дубовский район, г.Дубовка (далее - Объект), сроком до 27.09.2020.

Согласно муниципальному контракту от 08.04.2020 № 07-2020, заключенному между Застройщиком, и обществом с ограниченной ответственностью «Стройдорком» (далее - Общество), Общество выполняет работы по строительству Объекта в качестве подрядчика.

02.06.2020 в Инспекцию Застройщиком было представлено извещение о начале строительства Объекта от 27.05.2020.

В соответствии с п. 9 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 № 54, государственный строительный надзор осуществляется в форме проверок.

В результате внеплановой выездной проверки, проведенной в отношении Общества в соответствии с приказом Инспекции от 17.06.2020 № 614 в период с 02.07.2020 по 13.07.2020 на основании программы проверок, утвержденной заместителем руководителя Инспекции ФИО3 04.06.2020, выявлены нарушения соответствия выполненных работ требованиям проектной документации шифр 151111/40, имеющей положительное заключение экспертизы ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» от 07.11.2016 № 34-1-1-3-0118-16, которые зафиксированы в акте проверки от 13.07.2020 №114/05. 

13.07.2020 Обществу выдано предписание № 19 об устранении нарушений, отраженных в акте проверки от 13.07.2020 №114/05 в срок до 07.09.2020. Указанные акт проверки и предписание были получены Обществом.

В порядке выполнения указанного предписания Обществу в срок не позднее 07.09.2020 согласно соответствующим пунктам предписания было необходимо:

1) установить дорожные знаки, предусмотренные на период строительства проектной документацией шифр 151111/40,  а именно: знаки особых предписаний, направляющие пластины, защитные блоки, буфер дорожный и информационные щиты и представить этому документальное подтверждение (фотографии и акт освидетельствования ответственных конструкций);

2) представить документальное подтверждение освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций при переустройстве инженерных коммуникаций в соответствии с требованиями проектной документации шифр 151111/40, а именно: кабелей связи; электрокабелей; воздушной линии связи; линий электропередач; водопровода (выполнено не в полном объеме) - поливочного и хозяйственно-питьевого; канализации - хозяйственно-бытовой; газопровода.

3) освидетельствовать строительным контролем  со стороны заказчика акты освидетельствования скрытых работ по устройству ливневой канализации, а именно: основного коллектора от колодца К2-1 до колодца К2-15; поперечного коллектора Д1, Д2, Д4 и Д6; вынос хозяйственно-питьевого водопровода В1, а именно: от колодца В1-1 до колодца В1-15 (от ул. Юбилейная (ПК1+26,3) до ул. Шишлянникова (ПК3+71,9) магистраль; и предоставить этому документальное подтверждение;

4) представить документальное подтверждение освидетельствования следующих работ по: приему-передачи строительной площадки; восстановлению и закреплению оси трассы основного хода и тротуаров; освидетельствованию скрытых работ по устройству корыта под конструкциюдорожной одежды тротуаров с ПК0+20 до ПК 1+20 (правая и левая сторона) и по уплотнению его подошвы; также представить документальное подтверждение ведения специальных журналов, а именно: оперативный журнал геодезических работ; журнал технического нивелирования; журнал определения физико-механических свойств грунтов; журнал пробного уплотнения земляного полотна; журнал контроля плотности земляного полотна; журнал бетонных работ; журнал испытания контрольных образцов бетона;

5) обеспечить надлежащее хранение применяемых строительных материалов, в соответствии с требованиями проектной документации шифр 151111/40 и представить этому документальное подтверждение (фото).

Общество с ходатайством о продлении срока исполнения в Инспекцию не обращалось и не заявляло о невозможности исполнить требования указанного предписания в установленный в нем срок.

21.07.2020 № 3504 Обществом в адрес Инспекции представлена информация об устранении нарушений, отраженных в предписании от 13.07.2020 № 19.

Кроме того, 07.09.2020 ООО «Стройдорком» предоставило в Инспекцию извещение №1 об 1 устранении нарушений, допущенных при строительстве Объекта от 02.09.2020 (вх.№462),

Приказом от 09.09.2020 № 993 была назначена внеплановая выездная проверка выполнения предписания от 13.07.2020 № 19.

В ходе проведения вышеуказанной проверки было установлено, что ряд нарушений, указанных в предписании от 13.07.2020 № 19, не устранены. 

Как указывается административным органом, в доказательство устранения замечаний, указанных в п.2 предписания от 13.07.2020 № 19, Обществом сообщается следующее.

По состоянию на 02.07.2020 года работы по переустройству: кабелей связи; воздушной линии связи; линий электропередач; газопровода; не выполнялись и соответственно не освидетельствовались актами скрытых работ и ответственных конструкций.

Согласно проектной документации 151111/40 (ПОС) Том 4 Раздел 5 лист 44 – «Линейный календарный график», работы по устройству ливневой канализации необходимо выполнять параллельно с работами подготовительного периода.

Глубина заложения ливневой канализации, больше, чем у других переустраиваемых коммуникаций (кабели связи, электрокабели, газопровод), соответственно необходимо выполнить устройство ливневой канализации на начальном этапе строительства.

Устройство тротуаров и установка бортового камня с омоноличиванием с ПК0+20 до ПК 1+20 (правая и левая сторона) выполнено на участке, на котором переустройство коммуникаций не предусмотрено проектной документацией, поэтому не влияет на качество и надежность конструкции.

Устройство земляного полотна (корыто) было выполнено частично, без доведения до проектных отметок, без уплотнения и не влияет на качество и надежность конструкции.

Воздушные линии электропередач, расположены в зеленой зоне, и будут устроены после планировки грунта в зеленой зоне. На качество и надежность конструкции дорожной одежды не влияет.

На основании вышеизложенного, Общество считает необходимым снять предписание №19 от 13.07.2020 по пункту 2, так как технология работ не была нарушена, на качество и надежность конструкции фактически последовательность работ не влияет.

Вместе административным органом данные доводы не приняты, поскольку работы на Объекте выполняются не в соответствии с требованиями «Линейного календарного графика», а в соответствии с требованиями, прописанными в проектной документации 151111/40 (в графической и текстовой частях).

В ходе проведения проверки Учреждение направило в Инспекцию листы проектной документации шифр 151111/40 с внесенными в нее изменениями, в том числе уточнения последовательности выполнения переустройства и строительства инженерных коммуникаций на Объекте, а также подтверждение от 10.08.2020 соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившее положительное заключение экспертизы проектной* документации, требованиям части 3.8 статьи 49 ГсК РФ и приказ от 10.08.2020 об утверждении внесения изменений (далее - Приказ), внесенных в проектную документацию шифр 151111/40, получившую ранее положительное заключение экспертизы № 34-1-3-96-16, выданное ГАУ ВО "Облгосэкспертиза".

На основании изменений, внесенных в проектную документацию Учреждением, а также с учетом того, что в ходе проведения проверки Объекта, а именно его визуального осмотра установлено, что вышеуказанные инженерные коммуникации попадают в участок, на котором на момент проведения проверки, выполнены дорожно-строительные работы, а именно: устройство ливневой канализации (в границах от ПК0+10 до ПК2+60): поперечного коллектора Д1-Д2, ДЗ-Д4, Д5-Д6, Д7-Д8, Д9-Д10 и Д-11-Д12 (выполнены работы до обратной засыпки трубопроводов и присыпке колодцев); и ранее выполнены работы по устройству основного коллектора; устройство земляного полотна (корыто) под конструктивные элементы дорожной одежды основного хода (ул. Советская) с ПК0+20 до ПК1+30; устройство конструктивных элементов дорожной одежды основного хода (ул.Советская) с ПК0+20 до ПК1+30: геотекстиль; щебеночное основание (нижний слой) (в работе); Устройство тротуаров с ПК0+20 до ПК 1+20 и ПК 1+40 до ПК2+60 (правая и левая сторона): устройство земляного полотна (корыто); установка садового бортового камня с омоноличиванием; устройство щебеночного основания; устройство асфальтобетонного покрытия.

Таким образом, Обществу необходимо было переустроить и освидетельствовать переустройство вышеуказанных инженерных коммуникаций, а именно: кабелей связи; электрокабелей; воздушной линии связи; линий электропередач; газопровода и представить этому документальное подтверждение освидетельствования актами скрытых работ и ответственных конструкций работ при переустройстве инженерных коммуникаций на участке, где уже выполнены работы основного периода и в полном объеме выполнены работы по устройству сетей ливневой канализации, не мешающей выполнить переустройство.

Кроме того административным органом учтено, что устройство тротуаров и установка бортового камня с омоноличиванием с ПК0+20 до ПК1+20 (правая и левая сторона) выполнено на участке, в створ которого также попадает переустройство инженерных коммуникаций, а согласно внесенных изменений в проектную документацию еще и устройство ливневой канализации.

Довод Общества, по поводу отсутствия нарушения технологии работ и влияния последовательности выполнения работ на качество и надежность конструкции, несостоятелен, так как Общество не обладает полномочиями давать оценку влияния выполняемых работ на качество и надежность конструкции дорожной одежды, а в соответствии с заключенным муниципальным контрактом должно выполнять работы на Объекте в соответствии с требованиями проектной документации 151111/40, получившей положительное заключение экспертизы.

Таким образом, доказательств исполнения п.2 предписания от 13.07.2020 № 19 не представлено.

Во исполнение устранения замечаний п.4 предписания от 13.07.2020 №19 Обществом, среди прочего, представлен содержащий не полную информацию акт освидетельствования скрытых работ по устройству земляного полотна (корыто) под конструктивные элементы дорожной одежды тротуаров с ПК0+20 до ПК1+20 (правая и левая сторона) (а именно: не указаны высотные отметки, уклоны, геометрические размеры и уплотнение подошвы) (акт от №ЗПт-1).

При проведении проверки на момент визуального осмотра Объекта, а именно на вышеуказанном участке были выполнены работы по устройству садового бортового камня (акт проверки от 13.07.2020 № 114/05) и освидетельствованы Обществом (акт освидетельствования скрытых работ от 05.07.2020 №БР-1).

Вместе с тем, административным органом установлено, что устройство садового бортового камня являются последующими работами относительно устройства земляного полотна (корыто) под конструктивные элементы дорожной одежды тротуаров с ПК0+20 до ПК1+20 (правая и левая сторона). Таким образом п.4 предписания от 13.07.2020 №19 не исполнен.

В связи с неисполнением предписания в отношении ООО «Стройдорком» 13.10.2020 должностным лицом Инспекции составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

Согласно части 6 статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, организации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или административное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток.

Наличие в действиях Общества состава вменяемого административного правонарушения подтверждается материалами дела.

Материалы дела не содержат доказательств принятия  лицом, привлекаемым к административной ответственности,  всех зависящих от него мер для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, а также доказательств объективной невозможности исполнения действующего законодательства, в связи с чем, вину Общества и состав вмененного правонарушения следует признать установленными.

Доводы Общества, о своевременном фактическом устранении выявленных нарушений в связи с составлением акт об устранении нарушений составленного МКУ «Городское хозяйство», ООО «Свобода-строй», ООО «Стройдорком» от 02.09.2020, судом признаются необоснованными. Для установления факта исполнения предписания необходимо, в том числе, представление документов, доказывающих устранение нарушений, в установленный предписанием срок.

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2020 № 107 «Об утверждении форм документов, необходимых для осуществления государственного строительного надзора», среди прочего утверждена форма извещения об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, в пункте 10 которого также предусматривается необходимость представления документов, подтверждающих устранение нарушений.

Таким образом, лицо, которому выдано предписание, уведомляет об его исполнении, направлением документов, свидетельствующих об устранении допущенных нарушений. При этом, получив извещение с приложенными документами, орган государственного контроля проводит соответствующую проверку, оценивая устранение выявленных недостатков.

Суд отмечает, что выданное Обществу предписание недействительным не признано.

На момент рассмотрения дела срок давности привлечения к административной ответственности, установленный статьей 4.5 КоАП РФ для данной категории дел, не истек.

Исходя из объекта посягательства и отсутствия исключительности, оснований для признания правонарушения малозначительным и освобождения от наказания по статье 2.9 КоАП РФ не установлено.

Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится с учетом п. 18 и 18.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния.

В рассматриваемом случае, основания для признания совершенного административного правонарушения малозначительным отсутствуют, поскольку выявленные нарушения создают существенную угрозу охраняемым общественным отношениям.

Материалами дела подтверждается, что порядок привлечения к административной ответственности соблюден, основания для привлечения к ответственности имеются, в связи с чем, заявление административного органа о привлечении общества к административной ответственности подлежит удовлетворению.

Правовых оснований для назначения наказания ниже низшего предела санкции в порядке ч. 2.2. ст. 4.1 КоАП РФ, а также для замены штрафа на предупреждение в порядке ст. 4.1.1 КоАП РФ в ходе судебного разбирательства не установлено. 

Довод Общества об отсутствии у административного органа правовых оснований для проведения в отношении ООО «Стройдорком» внеплановой выездной проверки суд считает несостоятельным.

Частью 1 статьи 54 ГсК РФ установлено, что государственный строительный надзор осуществляется, в том числе, при строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГсК РФ.

Как установлено административным органом и не оспаривается Обществом проектная документация на объект «Строительство автомобильной дороги по ул. Советская в границах улиц Юбилейная и им. 30 лет Победы в городском поселении г. Дубовка Волгоградской области», расположенный по адресу: Волгоградская область, Дубовский район, г. Дубовка (далее — Объект), шифр 151111/40 имеет положительное заключение экспертизы № 34-1-1-3-0118-16 от 07.11.2016, выданное ГАУ ВО «Облгосэкспертиза». Следовательно, на основании ч. 1 ст. 54 ГсК РФ в отношении Объекта должен осуществляться государственный строительный надзор.

В соответствии с частью 8 статьи 54 ГсК РФ порядок осуществления государственного строительного надзора, включая порядок организации и проведения проверок деятельности физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, при осуществлении государственного строительного надзора, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 № 54 утверждено Положение об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации (далее — Положение).

Пунктом 8 Положения, установлено, что государственный строительный надзор в отношении объектов, указанных в подпункте «а» пункта 2 Положения (проектная документация на строительство которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГсК РФ), осуществляется органом государственного строительного надзора с даты получения им в соответствии с частью 5 статьи 52 ГсК РФ извещения о начале работ до даты выдачи заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Извещение от 27.05.2020 о начале строительства Объекта поступило в Инспекцию 02.06.2020.

Согласно пункту 9 Положения государственный строительный надзор осуществляется в форме проверок.

Предписание от 13.07.2020 № 19 об устранении нарушений, допущенных при строительстве Объекта, факт неисполнения которого вменяется ООО «Стройдорком», выдано Обществу по результатам проверки, проведенной должностным лицом Инспекции на основании приказа Инспекции от 17.06.2020 №614.

Как установлено п.п. а) п. 6 приказа Инспекции от 17.06.2020 № 614, проверка проведена в рамках осуществления регионального строительного надзора в соответствии с программой проверок Объекта с целью оценки соответствия деятельности, осуществляемой на Объекте, требованиям законодательства РФ. Правовые основания проведения проверки перечислены в п. 9 названного приказа.

В силу подпункта "а" пункта 3 части 5 статьи 54 ГсК РФ основанием для проведения проверки в рамках осуществления государственного строительного надзора является программа проверок, разрабатываемая органом государственного строительного надзора. При этом извещение  органов прокуратуры в порядке, установленном ч.12 ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Закон № 294-ФЗ), о проверках, проводимых на основании разработанных органом государственного строительного надзора программ проверок, положениями ГсК РФ не предусмотрено.

В соответствии с п.4 ч.5 ст.54 ГсК РФ указанное извещение является обязательным только в случае проведения органом государственного строительного надзора проверки по основанию, указанного в п.п.б) п.2 ч.5 ст.54 ГсК РФ (на основании поступивших в орган государственного строительного надзора обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, включая извещения, направляемые лицами, осуществляющими строительство в соответствии с ст. 53 ГсК РФ, информации от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов местного самоуправления, включая извещения, направляемые лицами, осуществляющими строительство в соответствии с ст.53 ГсК РФ, из средств массовой информации о фактах произошедшей аварии, нарушений технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе нарушений обязательных требований к применяемым строительным материалам, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу либо повлекли причинение такого вреда).

Поскольку основанием внеплановой выездной проверки деятельности ООО «Стройдорком» по строительству Объекта, проведенной Инспекцией на основании приказа от 17.06.2020 № 614, являлась разработанная Инспекцией программа проверок на Объекте от 04.06.2020, извещение органа прокуратуры о проведении указанной проверки не требовалось.

Порядок проведения в 2020 году выездных проверок в отношении юридических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, в том числе, установлен «Особенностями применения разрешительных режимов, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации», являющимися Приложением № 3 к Постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году2 (далее — Особенности).

Согласно  п.3 Особенностей оценка соответствия объектов капитального строительства в целях выдачи заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), предусмотренного пунктом 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проводится в виде выездных проверок исключительно по основанию, установленному подпунктом "а" пункта 3 части 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (программа проверок, разрабатываемая органом государственного строительного надзора), а также по извещению от застройщика (заказчика) об окончании строительства в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 части 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Из совокупного анализа приведенных выше правовых норм следует, что в 2020 году проверки в отношении юридических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, проводятся в соответствии с программой проверок, сформированной Инспекцией как органом государственного строительного надзора.

Общие положения Закона № 294-ФЗ, а также Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" не имеют в данном случае отношения к проверке по приказу от 17.06.2020 № 614, поскольку основания для ее проведения установлены иными нормами действующего законодательства.

Таким образом, у Инспекции имелись правовые основания для проведения внеплановой выездной проверки деятельности ООО «Стройдорком».

Учитывая отсутствие отягчающих вину обстоятельств, суд полагает возможным назначить административный штраф в минимальном размере.

Руководствуясь статьями 167-170, 206 АПК РФ, арбитражный суд

решил:

заявление удовлетворить.

Привлечь общество с ограниченной ответственностью «Стройдорком»                         (зарегистрированное по адресу:400054, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, зарегистрированное в качестве юридического лица 07.05.2014) к административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.

Административный штраф подлежит оплате по следующим реквизитам:                        ИНН 

<

***>; 

КПП 344501001; 

ОКТМО 18701000; 

БИК 041806001;                                     

Л/С 

<

***>, 

КБК 498 1 16 01191 01 0005 140; 

расчетный счет 

<

***>, 

банк получателя- Отделение Волгоград г. Волгоград.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья                                                                                                            Т.В. Двоянова