Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

http://kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Калининград

Дело №

А21-388/2023

«29»

января

2025 года

Резолютивная часть решения объявлена  

«16» 

января

2025 года

Решение изготовлено в полном объеме   

 «29»

   января

2025 года

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

при ведении протокола судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску ООО «СПЕЦМОНТАЖ» к ООО «Курскагротерминал» о взыскании 152 435 526,69 рублей

по встречному иску ООО «Курскагротерминал» о взыскании 31 556 603,95 рублей

при участии в заседании:

от  ООО «СПЕЦМОНТАЖ»:  ФИО2 по доверенности

от ООО «Курскагротерминал»: ФИО3, ФИО4 по доверенностям

установил. 

            Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦМОНТАЖ» обратилось в суд с иском (уточненном в заседании 21.03.2024 года)  к обществу с ограниченной ответственностью «Курскагротерминал» о взыскании основного долга в сумме 42 671 265,39 рублей, неустойки в сумме 109 764 261,3 рублей.

            Судом приняты к рассмотрению встречные требования ООО «Курскагротерминал»  (окончательно уточненные в судебном заседании 13.05.2024 года) о взыскании неустойки в  сумме 30 606 179,08 рублей, затрат на электроэнергию в  сумме 810 424,87 рублей, штрафов в сумме 140 000 рублей.  

            Судом установлено.

            Между сторонами был заключен договор подряда от 30.12.2020 года № 540/02317.

            По условиям договора ООО «СПЕЦМОНТАЖ» (подрядчик) обязалось выполнить комплекс работ, указанных в дополнительных соглашениях к  договору, на строительной площадке по адресу: Курская область, Касторенский район, Краснодолинский сельский совет, а ООО «Курскагротерминал» (заказчик) обязалось работы принять и оплатить на условиях договора.

В соответствии с пунктом 4.1 договора оплата работ по соответствующему дополнительному соглашению производится в порядке, установленном дополнительным соглашением. 

В соответствии с пунктом 4.6 договора гарантийное удержание уплачивается в течение 30 рабочих дней с даты подписания последнего акта о приемке формы КС-2 по соответствующему дополнительному соглашению и вывоза со строительной площадки техники и расходных материалов. 

В соответствии с пунктом 20.1.2 договора в случае нарушения подрядчиком срока выполнения работ, он уплачивает заказчику пеню в размере 10% от общей стоимость работ по дополнительному соглашению за каждую полную неделю, начиная с четвертого дня просрочки.

            В соответствии с пунктом 20.15 договора за нарушение заказчиком сроков оплаты платежей он уплачивает подрядчику неустойку в размере 0,5% от суммы подлежащей оплате за каждый день просрочки платежа; неустойка не применяется к авансовым платежам по договору. 

            В соответствии с дополнительным соглашением от 30.12.2021 года № 1 к договору подряда от 30.12.2020 года № 540/02317 подрядчик обязался выполнить устройство фундаментов лестниц на объектах М2.1, М2.2, М2.3, М2.4 в период с 07.01.2021 года по  в срок по 04.02.2021 года; гарантийное удержание составляет 10% от цены работ по дополнительному соглашению; оплата гарантийного  удержания производится в  порядке, установленном договором. 

            В соответствии с соглашением от 01.02.2022 года №1 к дополнительному соглашению от 30.12.2021 года № 1 к договору подряда от 30.12.2020 года № 540/02317 стоимость работ была согласована 8 154 044,94 с НДС; оплата работ производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания актов формы КС-2, журнала учета выполненных работ формы КС-6а, отчета об использовании давальческих материалов.

Между сторонами были подписаны акты о выполнении работ 05.04.2021 года на сумму 1 553 999,76 рублей, 26.04.2021 года на сумму 3 779 306,93 рублей, 25.03.2022 года на сумму 2 814 897,86 рублей, всего на сумму 8 148 204,55 рублей.

Заказчик оплатил 22.01.2021 года 1 599 992,01 рублей, 26.04.2021 года 932 399,86 рублей, 18.05.2021 года 2 267 584,16 рублей, 15.04.2022 года 1 688 938,71 рублей, всего 6 488 914,74 рублей. 

По  дополнительному соглашению от 30.12.2020 года № 1 к договору подряда от 30.12.2020 № 02317 (далее – дополнительное соглашение № 1) подрядчик просил взыскать основной долг в сумме 1 659 289,81 рублей, неустойку за период с 16.04.2022 года по 10.01.2023 года с базы 844 469,35 рублей в сумме 1 131 588,92 рублей, за период с 28.05.2022 года по 10.01.2023 года с базы 814 820,46 рублей в сумме 965 562,24 рублей, всего 2 097 151,16 рублей.

            В соответствии с дополнительным соглашением от 22.01.2021 года № 2 к договору подряда от 30.12.2020 года № 540/02317 подрядчик обязался на объектах М2.1, М2.2, М2.3, М.2.4 выполнить разработку и обратную засыпку грунта с уплотнением в период с 23.01.2021 года по 26.02.2021 года; гарантийное удержание составляет 10% от цены работ по дополнительному соглашению; оплата гарантийного  удержания производится в  порядке, установленном договором. 

            В соответствии с соглашением от 04.02.2022 года №1 к дополнительному соглашению от 30.12.2021 года № 2 к договору подряда от 30.12.2020 года № 540/02317 стоимость работ была согласована 5 038 811,22 с НДС; оплата работ производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания актов формы КС-2, журнала учета выполненных работ формы КС-6а, отчета об использовании давальческих материалов.

Между сторонами были подписаны акты о выполнении работ 05.04.2021 года на сумму 4 073 099,86 рублей, 26.04.2021 года на сумму 965 711,36 рублей, всего на сумму 5 038 811,22 рублей.

Заказчик оплатил 26.04.2021 года 3 665 789,87 рублей. 

По  дополнительному соглашению от 22.01.2021 года № 2 к договору подряда от 30.12.2020 № 02317 (далее – дополнительное соглашение № 2)  подрядчик просил взыскать основной долг в сумме 1 373 021,35 рублей, неустойку за период с 27.04.2021 года по 10.01.2023 года с базы 869 140,22 рублей в сумме 2 703 026,08 рублей, за период с 28.05.2021 года по 10.01.2023 года с базы 503 881,13 рублей в сумме 1 488 968,7 рублей, всего 4 191 994,78 рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 20.02.2021 года № 4 к договору подряда от 30.12.2020 года № 540/02317 подрядчик обязался на объектах Т4.2, Т4.8 выполнить устройство железобетонных конструкций, монтаж конструкций металлических, монтаж стен, кровли, зенитного фонаря, ворот в период с 23.02.2021 года по 22.07.2021 года; гарантийное удержание составляет 5% от цены работ по дополнительному соглашению.

 В соответствии с пунктом 4.1 дополнительного соглашения от 20.02.2021 года № 4 в случае нарушения подрядчиком срока выполнения работ, он уплачивает заказчику пеню в размере 1% от общей цены невыполненных работ по дополнительному соглашению за каждую полную неделю, начиная с четвертого дня просрочки. 

В соответствии с соглашением от 01.09.2021 года № 1 к  дополнительному соглашению от 20.02.2021 года № 4 к договору подряда от 30.12.2020 года № 540/02317 срок выполнения работ был согласован по 03.09.2021 года; оплата работ производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания актов формы КС-2, журнала учета выполненных работ формы КС-6а, отчета об использовании давальческих материалов.

В соответствии с соглашением от 15.09.2022 года № 3 к дополнительному соглашению от 20.02.2021 года № 4 к договору подряда от 30.12.2020 года № 540/02317 стоимость работ была согласована 201 039 478,18 рублей с НДС.

Между сторонами были подписаны акты о выполнении работ 25.05.2021 года на сумму 15 801 230,34 рублей, 02.08.2021 года на сумму 4 426 336,92 рублей, 25.08.2021 года на сумму 20 376 741 рубль, 03.09.2021 года на сумму 1 708 806.24 рублей, 25.09.2021 года на сумму 6 849 107,94 рублей, 25.10.2021 года на сумму 60 453 238,62 рублей, 25.11.2021 года на сумму 18 256 338,31 рублей, 06.12.2021 года на сумму 11 794 781,64 рублей, 24.12.2021 года на сумму 25 748 019,81 рублей, 14.01.2022 года на сумму 544 019,88 рублей, 25.01.2022 года на сумму 14 615 377,66 рублей, 25.02.2022 года на сумму 6 479 994.41 рублей, 25.05.2022 года на сумму 10 276 842 рублей, 01.06.2022 года на сумму 3 708 647,42 рублей, всего на сумму 201 039 479,19 рублей. 

 Заказчик оплатил 01.04.2021 года 112 390 149,91 рублей, 12.11.2021 года 23 099,48 рублей (по дополнительному соглашению от 15.10.2021 года № 1 к дополнительному соглашению от 01.09.2021 года № 14 к договору подряда от 30.12.2020 года № 540/02317  аванс, излишне уплаченный по дополнительному соглашению от 01.09.2021 года № 14 в размере 23 099,48 рублей согласован в счет оплаты аванса по дополнительному соглашению от 20.02.2021 года № 4), 23.06.2021 года 7 110 553,65 рублей, 03.09.2021 года 1 991 851,61 рублей,  10.09.2021 года 9 169 533,45 рублей, 01.11.2021 года 768 962,81 рублей, 01.11.2021 года 3 082 098,57 рублей, 03.11.2021 года 15 000 000 рублей, 14.12.2021 года 5 307 651,74 рублей, 17.12.2021 года 1 796 004,56 рублей, 02.03.2022 года 4 000 000 рублей. 

По  дополнительному соглашению от 20.02.2021 года № 4 к договору подряда от 30.12.2020 № 02317 (далее – дополнительное соглашение № 4)  подрядчик просил взыскать основной долг в сумме 17 322 671,9 рублей, неустойку за период с 02.06.2022 года по 10.01.2023 года с базы 7 270 697,99 рублей в сумме 8 034 121,27 рублей, за период с 04.07.2022 года по 10.01.2023 года с базы 10 051 973,91 рублей  в сумме 9 499 115,34 рублей, а также неустойку за нарушение иных сроков оплаты согласно расчету в таблице (т. 12 л.д. 154-155) в сумме 36 533 889,05 рублей, всего неустойку в сумме 54 067 125,66 рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 24.03.2021 года № 5 к договору подряда от 30.12.2020 года № 540/02317 подрядчик обязался на объектах М2.5, М2.6, М3.4 выполнить устройство монолитных конструкций в период с 11.04.2021 года по 05.05.2021 года; гарантийное удержание составляет 10% от цены работ по дополнительному соглашению; оплата гарантийного  удержания производится в  порядке, установленном договором. 

            В соответствии с соглашением от 27.08.2021 года №1 к дополнительному соглашению от 24.03.2021 года № 5 к договору подряда от 30.12.2020 года № 540/02317 оплата работ производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания актов формы КС-2, журнала учета выполненных работ формы КС-6а, отчета об использовании давальческих материалов.

В соответствии с соглашением от 01.06.2022 года №4 к дополнительному соглашению от 24.03.2021 года № 5 к договору подряда от 30.12.2020 года № 540/02317 стоимость работ по соглашению согласована 3 381 607,87 рублей с НДС.

Между сторонами был подписан акт о выполнении работ 08.06.2022 года на сумму 3 381 607,87 рублей.

Заказчик оплатил 08.04.2021 года 592 896,03 рублей, 23.09.2021 года 1 810 207,49 рублей, всего 2 403 103,52 рубля. 

По  дополнительному соглашению от 24.03.2021 года № 5 к договору подряда от 30.12.2020 № 02317 (далее – дополнительное соглашение № 5) подрядчик просил взыскать основной долг в сумме 978 504,35 рублей, неустойку за период с 10.09.2021 года по 23.09.2021 года с базы 1 810 207,49 рублей в сумме 117 663,49 рублей, за период с 29.06.2022 года по 10.01.2023 года с базы 640 343,56 рублей в сумме 617 931,53 рублей, за период с 10.07.2022 года по 10.01.2023 года с базы 338 160,79 рублей в сумме 309 417,12 рублей, всего  1 045 012,14 рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 12.04.2021 года № 6 к договору подряда от 30.12.2020 года № 540/02317 подрядчик обязался на объекте И13 выполнить монтаж металлоконструкций с 12.04.2021 года по 18.04.2021 года; стоимость работ согласована 350 000 рублей с НДС; оплата работ производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания актов формы КС-2, журнала учета выполненных работ формы КС-6а, отчета об использовании давальческих материалов; гарантийное удержание не предусмотрено.           

Между сторонами был подписан акт о выполнении работ 25.05.2021 года на сумму 350 000 рублей.

Заказчик оплатил 24.06.20221 года 350 000 рублей. 

По  дополнительному соглашению от 12.04.2021 года № 6 к договору подряда от 30.12.2020 № 02317 (далее – дополнительное соглашение № 6)  подрядчик просил взыскать неустойку за период с 15.06.2021 года по 24.06.2021 года в сумме 15 750 рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 18.05.2021 года № 7 к договору подряда от 30.12.2020 года № 540/02317 подрядчик обязался на объекте И12.4 выполнить устройство монолитных фундаментов в период с 25.05.2021 года по 24.07.2021 года; гарантийное удержание составляет 5% от цены работ по дополнительному соглашению; оплата гарантийного  удержания производится в  порядке, установленном договором. 

            В соответствии с соглашением от 10.08.2021 года №1 к дополнительному соглашению от 18.05.2021 года № 7 к договору подряда от 30.12.2020 года № 540/02317 оплата работ производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания актов формы КС-2, журнала учета выполненных работ формы КС-6а, отчета об использовании давальческих материалов.

В соответствии с соглашением от 03.06.2022 года №2 к дополнительному соглашению от 18.05.2021 года № 7 к договору подряда от 30.12.2020 года № 540/02317 стоимость работ по соглашению согласована 20 793 395,36 рублей с НДС.

Между сторонами были подписаны акты о выполнении работ  25.09.2021 года на сумму 15 141 479,89 рублей, 25.10.2021 года на сумму 465 912 рублей, 26.11.2021 года на сумму 469 325,04 рублей, 10.06.2022 года на сумму 4 716 678,43 рублей, всего на сумму 20 793 395,36 рублей.

Заказчик оплатил 25.05.2021 года 6 106 839,92 рублей, 01.11.2021 года 8 277 565,98 рублей, 14.12.2021 года 290 841,57 рублей, 17.12.2021 года 155 017,22 рублей, всего 14 830 264,69 рублей. 

По  дополнительному соглашению от 18.05.2021 года № 7 к договору подряда от 30.12.2020 № 02317 (далее – дополнительное соглашение № 7)  подрядчик просил взыскать основной долг в сумме 5 963 130,67 рублей,  неустойку за период с 16.10.2021 года по 01.11.2021 года с базы 8 277 565,98 рублей в сумме 703 593,11 рублей, за период с 16.11.2021 года по 10.01.2023 года с базы 442 616,4 рублей в сумме 925 068,27 рублей, за период с 02.07.2022 года по 10.01.2023 года с базы 4 480 844,51 рублей в сумме 4 279 206,5 рублей, за период с 11.06.2022 года по 10.01.2023 года с базы 5 963 130,67 рублей в сумме 6 320 918,51 рублей, за период с 13.07.2022 года по 10.01.2023 года с базы 1 039 669,77 рублей в сумме 935 702,79 рублей, всего 13 164 489,18 рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 08.06.2021 года № 8 к договору подряда от 30.12.2020 года № 540/02317 подрядчик обязался на объекте Т3.1 выполнить устройство монолитных железобетонных конструкций в период с 14.06.2021 года по 13.08.2021 года; гарантийное удержание составляет 5% от цены работ по дополнительному соглашению; оплата гарантийного  удержания производится в  порядке, установленном договором. 

            В соответствии с соглашением от 06.06.2022 года № 1 к дополнительному соглашению от 08.06.2021 года № 8 к договору подряда от 30.12.2020 года № 540/02317 стоимость работ согласована 37 606 020 рублей с НДС,  оплата работ производится в течение 45 рабочих дней с даты подписания актов формы КС-2, журнала учета выполненных работ формы КС-6а, отчета об использовании давальческих материалов.

Между сторонами были подписаны акты о выполнении работ  02.08.2021 года на сумму 9 496 946,88 рублей, 03.09.2021 года на сумму 6 814 884 рублей, 24.09.2021 года на сумму 3 761 760 рублей, 25.01.2022 года на сумму 12 327 584,83 рублей, 25.05.2022 года на сумму 464 406 рублей, 24.06.2022 года на сумму 4 253 251,13 рублей, всего на сумму 37 118 832,24 рублей.

Заказчик оплатил 25.06.2021 года 9 000 000 рублей, 07.07.2021 года 9 886 476,46 рублей, 03.09.2021 года 4 273 625,83 рублей, 01.11.2021 года 4 759 489,8 рублей, всего 27 919 592,09 рублей.

По  дополнительному соглашению от 08.06.2021 года № 8 к договору подряда от 30.12.2020 № 02317 (далее – дополнительное соглашение № 8)  подрядчик просил взыскать основной долг в сумме 9 199 240,15 рублей,  неустойку за период с 23.08.2021 года по 03.09.2021 года с базы 4 273 625,83 рублей в сумме 235 049,42 рублей, за период с 14.10.2021 года по 01.11.2021 года с базы 1 692 792 в сумме 152 351,28 рублей, за период с 24.09.2021 года по 01.11.2021 года с базы 3 066 697,8 рублей в сумме 582 672,58 рублей, за период с 15.02.2022 года по 10.01.2023 года с базы 5 547 413,17 рублей в сумме 9 070 020,53 рублей, за период с 16.06.2022 года по 10.01.2023 года с базы 208 982,7 рублей в сумме 215 252,18 рублей, за период с 26.08.2022 года по 10.01.2023 года с базы 1 904 520,79 рублей в сумме 1 295 074,13 рублей, за период с 25.06.2022 года по 10.01.2023 года с базы 9 199 240,15 рублей в сумме 9 107 247,74 рублей, за период с 25.07.2022 года по 10.01.2022 года с базы 1 855 941,61 рублей в сумме 1 558 990,95 рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 25.07.2021 года № 10 к договору подряда от 30.12.2020 года № 540/02317 подрядчик обязался на объекте Т3.1 выполнить работы по водопонижению с использованием погружных иглофильтров в течение 21 дня с даты подписания соглашения; стоимость работ согласована 554 400 рублей с НДС; оплата работ производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания актов формы КС-2, журнала учета выполненных работ формы КС-6а, отчета об использовании давальческих материалов; гарантийное удержание составляет 10% от цены работ по соглашению.        

Между сторонами был подписан акт о выполнении работ 25.08.2021 года на сумму 554 400 рублей.

Заказчик оплатил 03.09.2021 года 498 960 рублей. 

По  дополнительному соглашению от 25.07.2021 года № 10 к договору подряда от 30.12.2020 № 02317 ( далее – дополнительное соглашение № 10) подрядчик просил взыскать основной долг в сумме 55 440 рублей,  неустойку за период с 05.10.2021 года по 10.01.2023 года в сумме 127 697 рублей.

 В соответствии с дополнительным соглашением от 20.07.2021 года № 11 к договору подряда от 30.12.2020 года № 540/02317 подрядчик обязался на объекте М5.11 выполнить работы по устройству монолитных фундаментов в период с 21.07.2021 года по 03.09.2021 года;  оплата работ производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания актов формы КС-2, журнала учета выполненных работ формы КС-6а, отчета об использовании давальческих материалов; гарантийное удержание составляет 5% от цены работ по соглашению.   

В соответствии с соглашением от 15.09.2022 года № 1 к дополнительному соглашению от 20.07.2021 года № 11 к договору подряда от 30.12.2020 года № 540/02317 стоимость работ согласована 9 494 039,16 рублей с НДС.

Между сторонами были подписаны акты о выполнении работ 25.11.2021 года на сумму 9 436 079,16 рублей, 25.01.2022 года на сумму 57 960 рублей, всего на сумму 9 494 039,16 рублей.

Заказчик оплатил 22.07.2021 года 3 121 870,35 рублей, 24.08.2021 года 24 965,95 рублей, 09.12.2021 года 6 133 451,45 рублей, 03.02.2022 года 12 708,05 рублей, всего  9 292 995,8 рублей.

По  дополнительному соглашению от 20.07.2021 года № 11 к договору подряда от 30.12.2020 № 02317 (далее – дополнительное соглашение № 11)  подрядчик просил взыскать основной долг в сумме 201 043,36 рублей, неустойку за период с 04.02.2022 года по 10.01.2023 года с базы 226 009.31 рублей в сумме 383 085,78 рублей, за период с 05.03.2022 года по 10.01.2023 года с базы 474 701,96 рублей в сумме 735 788,06 рублей, всего 1 118 873,81 рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 28.07.2021 года № 12 к договору подряда от 30.12.2020 года № 540/02317 подрядчик обязался на объектах М2.2, М2.3 выполнить работы по устройству монолитных железобетонных конструкций в период с 28.07.2021 года по 13.08.2021 года;  оплата работ производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания актов формы КС-2, журнала учета выполненных работ формы КС-6а, отчета об использовании давальческих материалов; гарантийное удержание составляет 10% от цены работ по соглашению.   

В соответствии с соглашением от 07.02.2022 года № 1 к дополнительному соглашению от 28.07.2021 года № 12 к договору подряда от 30.12.2020 года № 540/02317 стоимость работ согласована 1 389 526,98 рублей с НДС.

Между сторонами был подписан акт о выполнении работ 25.11.2021 года на сумму 1 389 526,98 рублей.

Заказчик оплатил 27.07.2021 года 433 416,33 рублей, 09.12.2021 года 833 716.19 рублей, всего 1 267 132,52 рублей.

По  дополнительному соглашению от 28.07.2021 года № 12 к договору подряда от 30.12.2020 № 02317 (далее – дополнительное соглашение № 12)  подрядчик просил взыскать основной долг в сумме 122 394,46 рублей, неустойку за период с 10.12.2021 года по 10.01.2023 года с базы 122 394.46 рублей в сумме 241 729,05 рублей, с 26.12.2021 года по 10.01.2023 года с базы 138 952,7 рублей в сумме 263 315,36 рублей, всего 505 044,41 рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 09.08.2021 года № 13 к договору подряда от 30.12.2020 года № 540/02317 подрядчик обязался на объекте М3.3.7 выполнить работы по устройству монолитных железобетонных конструкций в период с 15.08.2021 года по 28.08.2021 года; стоимость работ согласована 689 411,28 рублей с НДС; оплата работ производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания актов формы КС-2, журнала учета выполненных работ формы КС-6а, отчета об использовании давальческих материалов; гарантийное удержание составляет 10% от цены работ по соглашению.   

Между сторонами был подписан акт о выполнении работ 25.11.2021 года на сумму 454 643,58 рублей.

Заказчик оплатил 25.08.2021 года 206 823,38 рублей, 09.12.2021 года 272 786,15 рублей, всего 479 609,53 рублей (переплата 24 965,95 рублей засчитана в счет оплаты работ по дополнительному соглашению № 11 (соглашение от 25.01.2022 года № 1  к дополнительному соглашению от 09.08.2021 года   № 13, т.12 л.д. 163).

По  дополнительному соглашению от 09.08.2021 года № 13 к договору подряда от 30.12.2020 № 02317 (далее – дополнительное соглашение № 13)  подрядчик просил взыскать неустойку за период с 10.12.2021 года по 10.01.2023 года с базы 24 965,95 рублей в сумме 49 307,75 рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 16.09.2021 года № 15 к договору подряда от 30.12.2020 года № 540/02317 подрядчик обязался на объектах М2.1, М2.2, М2.3, М2.4 выполнить устройство основания под плиту пола в течение 20 календарных дней с даты подписания соглашения; оплата работ производится в течение 45 рабочих дней с даты подписания актов формы КС-2, журнала учета выполненных работ формы КС-6а, отчета об использовании давальческих материалов; гарантийное удержание не предусмотрено.

 В соответствии с соглашением от 25.01.2022 года № 1 к дополнительному соглашению от 16.09.2021 года № 15 к договору подряда от 30.12.2020 года № 540/02317 стоимость работ согласована 1 946 276,88 рублей с НДС.  

Между сторонами был подписан акт о выполнении работ 20.10.2021 года на сумму 1 946 276,88 рублей.

Заказчик оплату не производил.

По  дополнительному соглашению от 16.09.2021 года № 15 к договору подряда от 30.12.2020 № 02317 (далее – дополнительное соглашение № 15)  подрядчик просил взыскать основной долг в сумме 1 946 276,88 рублей, неустойку за период с 24.12.2021 года по 10.01.2023 года с базы 1 946 276,88 рублей в сумме 3 707 657,45 рублей.

 В соответствии с дополнительным соглашением от 16.09.2021 года № 16 к договору подряда от 30.12.2020 года № 540/02317 подрядчик обязался на объекте Т3.1 выполнить работы по водопонижению с использованием погружных фильтров в течение 20 календарных дней с даты подписания соглашения; стоимость работ согласована 1 217 809,44 рублей,  оплата работ производится в течение 45 рабочих дней с даты подписания актов формы КС-2, журнала учета выполненных работ формы КС-6а, отчета об использовании давальческих материалов; гарантийное удержание не предусмотрено.

Между сторонами был подписан акт о выполнении работ 20.10.2021 года на сумму 1 217 809,44 рублей.

Заказчик оплату не производил.

По  дополнительному соглашению от 16.09.2021 года № 16 к договору подряда от 30.12.2020 № 02317 (далее – дополнительное соглашение № 16)   подрядчик просил взыскать основной долг в сумме 1 217 809,44 рублей, неустойку за период с 24.12.2021 года по 10.01.2023 года с базы 1 217 809,44 рублей в сумме 2 319 926,98 рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 13.12.2021 года № 17 к договору подряда от 30.12.2020 года № 540/02317 подрядчик обязался на объекте Т4.2 выполнить работы по монтажу фасонных деталей, монтажу решетчатого настила, монтажу дверей, заделке технологических отверстий для установки колонн в период с 04.02.2022 года по 15.03.2022 года, гарантийное удержание составляет 10% от цены работ по соглашению.

 В соответствии с соглашением от 15.09.2022 года № 1 к дополнительному соглашению от 13.12.2021 года № 17 к договору подряда от 30.12.2020 года № 540/02317 стоимость работ согласована 8 741 230,03 рублей с НДС, оплата работ производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания актов формы КС-2, журнала учета выполненных работ формы КС-6а,  

Между сторонами были подписаны акты о выполнении работ 25.01.2022 года на сумму 686 160 рублей, 25.02.2022 года на сумму 6 127 989,62 рублей, 25.03.2022 года на сумму 1 178 667,04 рублей, 01.06.2022 года на сумму 682 819,63 рублей, 24.06.2022 года на сумму 65 593,74 рублей, всего на сумму 8 741 230,03 рублей.

Заказчик оплатил 13.01.2022 года 2 854 086,64 рублей, 14.05.2022 года 3 676 793,77 рублей, всего 6 530 880,41 рублей.   

По  дополнительному соглашению от 13.12.2021 года № 17 к договору подряда от 30.12.2020 № 02317 (далее – дополнительное соглашение № 17)  подрядчик просил взыскать основной долг в сумме 2 210 349,62 рублей, неустойку за период с 29.03.2022 года по 10.01.2023 года с базы 411 696 рублей в сумме 586 666,8 рублей, за период с 18.05.2022 года по 10.01.2023 года с базы 707 200,12 рублей в сумме 830 960,5 рублей, за период с 03.08.2022 года по 10.01.2023 года с базы 409 691,78 рублей в сумме 323 656,5 рублей, за период с 26.08.2022 года по 10.01.2023 года с  базы 39 356,24 рублей в сумме 26 565,46 рублей, за период с 25.06.2022 года по 10.01.2023 года с базы 2 210 349,62 рублей в сумме 2 188 246,12 рублей, за период с 26.07.2022 года по 10.01.2023 года с базы 874 123 рублей в сумме 729 892,7 рублей, всего 4 685 987,83 рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 18.12.2021 года № 18 к договору подряда от 30.12.2020 года № 540/02317 подрядчик обязался на объекте Т3.1 выполнить устройство песчаного основания в течение 20 календарных дней с даты оплаты авансового платежа; стоимость работ согласована 720 762 рубля с НДС,  оплата работ производится в течение 45 рабочих дней с даты подписания актов формы КС-2, журнала учета выполненных работ формы КС-6а, отчета об использовании давальческих материалов; гарантийное удержание  составляет 10% от цены работ по соглашению.

 Между сторонами был подписан акт о выполнении работ 25.01.2022 года на сумму 720 762 рублей.

Заказчик оплатил 03.02.2022 года 648 685,8 рублей. 

По  дополнительному соглашению от 18.12.2021 года № 18 к договору подряда от 30.12.2020 № 02317 (далее- дополнительное соглашение № 18)  подрядчик просил взыскать основной долг в сумме 72 076,2 рублей, неустойку за период с 05.03.2022 года по 10.01.2023 года с базы 72 076,2 рублей в сумме 111 718,11 рублей.

 В соответствии с дополнительным соглашением от 22.02.2022 года № 20 к договору подряда от 30.12.2020 года № 540/02317 подрядчик обязался на объекте Т4.2 выполнить работы по устройству стен лотка в период с 28.02.2022 года по 23.03.2022 года; стоимость работ согласована 350 017,2 рублей с НДС;  оплата работ производится в течение 45 рабочих дней с даты подписания актов формы КС-2, журнала учета выполненных работ формы КС-6а, отчета об использовании давальческих материалов; гарантийное удержание  составляет 10% от цены работ по соглашению.

 Между сторонами был подписан акт о выполнении работ 25.05.2022 года на сумму 350 017,2 рублей.

Заказчик работы не оплатил.

По  дополнительному соглашению от 22.02.2022 года № 20 к договору подряда от 30.12.2020 № 02317 (далее – дополнительное соглашение № 20)  подрядчик просил взыскать основной долг в сумме 350 017,2  рублей, неустойку за период с 29.06.2022 года по 10.01.2023 года с базы 315 015 рублей в сумме 305 564,55 рублей, за период с 27.06.2022 года по 10.01.2023 года с базы 35 001,72 рублей в сумме 34 301,68 рублей, всего 339 866,27 рублей.

Заказчик во встречном иске (т. 13 л.д. 65-76)  признал наличие задолженности перед подрядчиком по оплате основного долга по дополнительному соглашению № 1 в сумме 1 659 289,81 рублей, по дополнительному соглашению № 2 в сумме 1 373 021,35 рублей,  по дополнительному соглашению № 4 в сумме 17 323 523,9 рублей (подрядчиком заявлено 17 322 671,9 рублей), по дополнительному соглашению № 5 в сумме 978 504,35 рублей,  по дополнительному соглашению № 7 в сумме 5 963 130,67 рублей,  по дополнительному соглашению № 8 в сумме 9 199 240,15 рублей, по дополнительному соглашению № 10 в сумме 55 440 рублей, по дополнительному соглашению № 11 в сумме 201 043,36 рублей, по дополнительному соглашению № 12 в сумме 122 394,46 рублей, по дополнительному соглашению № 15 в сумме 1 946 276,88 рублей,  по дополнительному соглашению № 16 в сумме 1 217 809,44 рублей,  по дополнительному соглашению № 17 в сумме 2 210 349,62 рублей, по дополнительному соглашению № 18 в сумме 72 076,2 рублей, по дополнительному соглашению № 20 в сумме 350 017,2 рублей, всего в  сумме 42 672 117,39 рублей.

Заказчик заявил о зачете неустойки, рассчитанной за нарушение подрядчиком  сроков выполнения работ в счет оплаты основного долга перед ним, также частично в счет компенсации своих затрат на электроэнергию.     

С учетом уточнения подрядчиком требований в части основного долга (было 38 343 791,97 рублей, стало 42 671 265,39 рублей) заказчик в последней редакции встречного иска уточнил условия зачета (т. 13 л.д. 65-76).

В соответствии с пунктом 22.1 договора подряда от 30.12.2020 года № 540/02317 в отношении любой суммы, которая может подлежать оплате на каком-либо основании заказчиком подрядчику, заказчик вправе осуществить зачет в счет погашение обязательств перед подрядчиком.

В соответствии с разъяснениями абзаца второго пункта 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11.06.2020 года № 6 "О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств" обязательства могут быть прекращены зачетом после предъявления иска по одному из требований. В этом случае сторона по своему усмотрению вправе заявить о зачете как во встречном иске, так и в возражении на иск, юридические и фактические основания которых исследуются судом равным образом.

Заказчик рассчитал неустойку (10% от стоимости невыполненных работ  по дополнительному соглашению за каждую полную неделю) в  связи с  нарушением сроков выполнения работ по дополнительному соглашению № 2 за периоды с 02.03.2021 года по 04.04.2.21 года, с 05.04.2021 года по 25.04.2021 года в сумме 2 305 437,9 рублей.  

Заказчик рассчитал неустойку (1% от стоимости невыполненных работ  по дополнительному соглашению за каждую полную неделю) в  связи с  нарушением сроков выполнения работ по дополнительному соглашению № 4 за периоды с 07.09.2021 года по 25.09.2021 года, с 26.09.2021 года по 25.10.2021 года, с 26.10.2021 года по 25.11.2021 года, с 26.11.2021 года по 06.12.2021 года, с 07.12.2021 года по 23.12.2021 года, с 24.12.2.21 года по 31.01.2022 года, с 14.01.2021 года по 24.01.2022 года, с 25.01.2022 года по 31.03.2022 года в сумме 17 663 306,44 рублей.

  Заказчик рассчитал неустойку (10% от стоимости невыполненных работ  по дополнительному соглашению за каждую полную неделю) в  связи с  нарушением сроков выполнения работ по дополнительному соглашению № 5 за период с 06.05.2021 года по 31.03.2022 года  в сумме 15 555 396,34 рублей.

  Заказчик рассчитал неустойку (10% от стоимости невыполненных работ  по дополнительному соглашению за каждую полную неделю) в  связи с  нарушением сроков выполнения работ по дополнительному соглашению № 6 за период с 19.04.2021 года по 25.05.2021 года  в сумме 140 000 рублей.

  Заказчик рассчитал неустойку (10% от стоимости невыполненных работ  по дополнительному соглашению за каждую полную неделю) в  связи с  нарушением сроков выполнения работ по дополнительному соглашению № 7 за периоды с 28.07.2021 года по 24.09.2021 года, с 25.09.2021 года по 24.10.2021 года, с 25.10.2021 года по 24.11.2021 года, с 25.11.2021 года по 31.03.2022 года в сумме 28 988 237,32 рублей. 

  Заказчик рассчитал неустойку (10% от стоимости невыполненных работ  по дополнительному соглашению за каждую полную неделю) в  связи с  нарушением сроков выполнения работ по дополнительному соглашению № 10 за период с 18.08.2021 года по 25.08.2021 года в сумме 55 440 рублей. 

Заказчик рассчитал неустойку (10% от стоимости невыполненных работ  по дополнительному соглашению за каждую полную неделю) в  связи с  нарушением сроков выполнения работ по дополнительному соглашению № 11 за период с 07.09.2021 года по 06.10.2021 года в сумме 4 162 493,81 рублей.

Заказчик рассчитал неустойку (10% от стоимости невыполненных работ  по дополнительному соглашению за каждую полную неделю) в  связи с  нарушением сроков выполнения работ по дополнительному соглашению № 12 за период с 14.08.2021 года по 25.11.2021 года в сумме 1 806 385,07 рублей.

Заказчик рассчитал неустойку (10% от стоимости невыполненных работ  по дополнительному соглашению за каждую полную неделю) в  связи с  нарушением сроков выполнения работ по дополнительному соглашению № 15 за период с 10.10.2021 года по 20.10.2021 года в сумме 194 627,69 рублей.

Заказчик рассчитал неустойку (10% от стоимости невыполненных работ  по дополнительному соглашению за каждую полную неделю) в  связи с  нарушением сроков выполнения работ по дополнительному соглашению № 17 за период с 25.03.2022 года по 31.03.2022 года в сумме 74 871,34 рублей.

Всего неустойка по дополнительным соглашениям №№ 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17 начислена заказчиком в размере 71 067 955,85 рублей. 

В соответствии с пунктом 12.1.4 договора подряда от 30.12.2020 года № 540/02317 заказчик при наличии возможности обеспечивает подрядчику возможность присоединения к эксплуатационным сетям; стоимость потребленной электроэнергии компенсируется подрядчиком заказчику в течение 5 дней с момента получения требований заказчика или против представления текущих платежей.

Подрядчику были предъявлены счета-фактуры о компенсации затрат заказчика по электроэнергии  № 37  от 31.01.2021 года на сумму 67 890 рублей, № 23 от 28.02.2021 года на сумму 23 495,12 рублей, № 37 от 31.03.2021 года на сумму 292 512,79 рублей, № 76 от 30.04.2021 года ан сумму 200 847,12 рублей, № 101 от 31.05.2021 года на сумму 121 037,48 рублей, № 123 от 30.06.2021 года на сумму 338 442,49 рублей, № 163 от 31.07.2021 года на сумму 165 482,75 рублей, № 191 от 31.08.2021 года на сумму 174 959,92 рублей, №215 от 30.09.2021 года на сумму 413 614,15 рублей, № 237 от 31.10.2021 года на сумму 444 339,39 рублей, № 268 от 30.11.2021 года на сумму 537 597,32 рублей, № 290 от 31.12.2021 года на сумму 407 284,37 рублей, № 14 от 31.01.2022 года на сумму 326 674,85 рублей, № 38 от 28.02.2022 года на сумму 195 722,45 рублей, № 53 от 31.03.2022 года на сумму 155 105,23 рублей, № 71 от 30.04.2022 года на сумму 48 754,45 рублей, № 86 от 31.05.2022 года на сумму 22 079,19 рублей, № 99 от 30.06.2022 года на сумму 4872,85 рублей, № 108 от 31.07.2022 года на сумму 14 116,16 рублей, № 114 от 31.08.2022 года на сумму 10 007,52 рублей, № 122 от 30.09.2022 года на сумму 32 044,07 рублей, № 32 от 31.10.2022 года на сумму 13 291,07 рублей, всего на сумму 4 221 626,49 рублей (т. 9. л.д. 1-77).

Подрядчик признал затраты заказчика на электроэнергию при подписании акта сверки; при формировании исковых требований до их уточнения; затраты по электроэнергии подрядчиком не оспорены ни по праву, ни по размеру.

В уточненном встречном иске  от 13.05.2024 года заказчик заявил о зачете основного долга перед подрядчиком в общей  сумме 42  672 117,39 рублей:

по дополнительному соглашению № 1 в сумме 1 659 289,81 рублей в полном объеме за счет неустойки за нарушение срока выполнения работ по дополнительному соглашению № 5; 

по дополнительному соглашению № 2 в сумме 1 373 021,35 рублей в полном объеме за счет неустойки за нарушение срока выполнения работ по дополнительному соглашению № 2; 

 по дополнительному соглашению № 4 в сумме 17 323 523,9 рублей в полном объеме за счет неустойки за нарушение срока выполнения работ по дополнительному соглашению № 4; 

по дополнительному соглашению № 5 в сумме 978 504,35 рублей в полном объеме за счет неустойки за нарушение срока выполнения работ по дополнительному соглашению № 5; 

по дополнительному соглашению № 7 в сумме 5 963 130,67 рублей в полном объеме за счет неустойки за нарушение срока выполнения работ по дополнительному соглашению № 5; 

по дополнительному соглашению № 8 в сумме 9 199 240,15 рублей в полном объеме за счет неустойки за нарушение срока выполнения работ по дополнительному соглашению № 7; 

по дополнительному соглашению № 11 в сумме 201 043,36 рублей в полном объеме за счет неустойки за нарушение срока выполнения работ по дополнительному соглашению № 11; 

 по дополнительному соглашению № 12 в сумме 122 394,46 рублей в полном объеме за счет неустойки за нарушение срока выполнения работ по дополнительному соглашению № 12; 

по дополнительному соглашению № 15 в сумме 1 946 276,88 рублей в полном объеме за счет неустойки за нарушение срока выполнения работ по дополнительному соглашению № 11; 

по дополнительному соглашению № 16 в сумме 1 217 809,44 рублей в полном объеме за счет неустойки за нарушение срока выполнения работ по дополнительному соглашению № 12; 

по дополнительному соглашению № 17 в сумме 2 210 349,62 рублей в счет обязательств подрядчика по компенсации затрат по электроэнергии по счетам за период с 31.01.2021 года по 31.10.2021 года на сумму 2 210 349,62 рублей;

  по дополнительному соглашению № 18 в сумме 72 076,2 рублей в полном объеме за счет неустойки за нарушение срока выполнения работ по дополнительному соглашению № 2; 

по дополнительному соглашению № 20 в сумме 350 017,2 рублей в полном объеме за счет неустойки за нарушение срока выполнения работ по дополнительному соглашению № 2.

По итогам зачета заказчик в рамках встречных требований просил взыскать неустойку за нарушение срока выполнения работ по дополнительному соглашению № 2 в сумме 510 323,15 рублей, по дополнительному соглашению № 4 в сумме 339 782,54 рублей, по дополнительному соглашению № 5 в сумме 12 917 602,18       рублей; по дополнительному соглашению № 6 в сумме 140 000 рублей;  по дополнительному соглашению № 7 в сумме 13 825 866,5 рублей; по дополнительному соглашению № 11 в сумме 2 015 173,57 рублей;  по дополнительному соглашению № 12  в сумме 466 181,17 рублей; по дополнительному соглашению № 15 в сумме 194 627,69  рублей; по дополнительному соглашению № 16 в сумме 121 780,94      рублей;  по дополнительному соглашению № 17 в сумме 74 841,34   рублей; затраты в возмещение затрат на электроэнергию за период с октября 2021 года по октябрь 2022 года в сумме 810 424,87 рублей; штрафы за нарушение правил нахождения на строительной площадке в сумме 140 000 рублей, всего 31 556 603,95 рублей.

Подрядчик оспорил начисления заказчиком неустойки, указав, что задержки в выполнении работ были связаны с выявленными  несоответствиями в локальных сметных расчетах и рабочей документации; в связи с подтоплением грунтовых дорог и невозможностью проезда строительной техники; задержки в подписании актов со стороны заказчика были вызваны длительной проверкой исполнительной документации; длительной подготовкой заказчиком дополнительных соглашений, фиксирующих окончательную стоимость выполненных работ, одновременно с подписанием которых подписывались и акты и.т.д.                       

Подрядчик заявил о применении положений статьи 333 ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Из разъяснений, изложенных в пунктах 70, 71 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - постановление № 7), следует, что по смыслу статей 332, 333 ГК РФ, установление в договоре максимального или минимального размера (верхнего или нижнего предела) неустойки не являются препятствием для снижения ее судом; если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ) (пункт 73 постановления № 7).

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ) (пункт 75 постановления № 7).

Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательств и др. (пункт 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 21.12.2000 года № 263-О, суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Из указанного следует, что признание несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства является правом суда, принимающего решение. При этом в каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения санкций с учетом конкретных обстоятельств дела и взаимоотношений сторон.

Рассмотрев ходатайство ответчика об уменьшении размера неустойки, суд, учитывая компенсационный характер неустойки, необходимость соблюдения баланса интересов сторон, пришел к выводу о несоразмерности начисленной заказчиком неустойки последствиям нарушенного обязательства.

Положениями договора подряда от 30.12.2020 № 540/02317 предусмотрена ответственность подрядчика за нарушение срока выполнения работ в размере 10% от общей стоимости работ по дополнительному соглашению за каждую полную неделю просрочку, что влечет риск потери оплаты за выполненные работы за 10 недель просрочки.

Принцип свободы договора, закрепленный в статье 421 ГК РФ, не является безграничным. Сочетаясь с принципом добросовестности участников гражданских правоотношения, он не исключает оценку справедливости условий договора. 

Суд полагает возможным, с учетом применения положений статьи 333 ГК РФ, определить размер неустойки с учетом процентной ставки 0,5% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, что аналогично условиям договора об имущественной ответственности заказчика, за исключением положений об имущественной ответственности подрядчика по дополнительному соглашению № 4.

Согласно расчету суда за заявленные заказчиком периоды  размер неустойки в связи  с  нарушением сроков выполнения работ по дополнительному соглашению № 2 составляет 957 997,62 рублей, по дополнительному соглашению № 4 (1 % от стоимости невыполненных работ за неделю) - 17 663 306,44 рублей, по дополнительному соглашению № 5 – 5 579 653,2 рублей, по дополнительному соглашению № 6 – 64 750 рублей, по дополнительному соглашению № 7 – 10 780 760,44 рублей,   по дополнительному соглашению № 10 – 22 176 рублей,  по дополнительному соглашению № 11 – 1 424 105,88 рублей, по дополнительному соглашению № 12 – 722 554,04 рублей, по дополнительному соглашению № 15 – 107 045,23 рублей, по дополнительному соглашению №16 – 66 979,52 рублей, по дополнительному соглашению № 17 – 26 194,46 рублей.    

С учетом корректировки размера неустойки:

зачет основного долга заказчика по дополнительному соглашению № 1  производится в сумме 1 659 289,81 рублей за счет неустойки по дополнительному соглашению № 5 (обязательства по основному долгу прекращены); 

зачет основного долга заказчика по дополнительному соглашению № 2 производится в сумме 957 997,62 рублей за счет неустойки по дополнительному соглашению  № 2 (задолженность составляет 415 023,73 рублей); 

зачет основного долга заказчика по дополнительному соглашению № 4  производится в сумме 17 232 527,9 рублей за счет неустойки по дополнительному соглашению № 4 (обязательства по основному долгу прекращены; остаток неустойки 339 782,54 рубля); 

зачет основного долга заказчика по дополнительному соглашению № 5 производится в сумме 978 504,35 рублей за счет неустойки по дополнительному соглашению № 5 (обязательства по основному долгу прекращены, остаток неустойки 2 941 859,04 рублей);

зачет основного долга заказчика по дополнительному соглашению № 7 производится в сумме 5 953 130,67 рублей  за счет неустойки по дополнительному соглашению № 7 (обязательства по основному долгу прекращены);     

зачет основного долга заказчика по дополнительному соглашению № 8 производится в сумме 4 817 629,77 рублей за счет неустойки по дополнительному соглашению № 7 (задолженность составляет 4 381 610,38 рублей);

зачет основного долга заказчика по дополнительному соглашению № 10 производится в сумме 22 176 рублей за счет неустойки по дополнительному соглашению № 10 (задолженность составляет 33 364 рублей);

зачет основного долга заказчика по дополнительному соглашению № 11 производится в сумме 201 043,36 рублей за счет неустойки по дополнительному соглашению № 11 (обязательства по основному долгу прекращены);

зачет основного долга заказчика по дополнительному соглашению № 12 производится в сумме 122 394,46 рублей за счет неустойки по дополнительному соглашению № 12 (обязательства по основному долгу прекращены);

зачет основного долга заказчика по дополнительному соглашению № 15 производится в сумме 1 223 062,52 рублей за счет неустойки по дополнительному соглашению № 11 (задолженность составляет 723 214,36 рублей);                     

зачет основного долга заказчика по дополнительному соглашению № 16 производится в сумме 600 159,58 рублей за счет неустойки по дополнительному соглашению № 12 (задолженность составляет 617 649,86 рублей);                     

зачет основного долга заказчика по дополнительному соглашению № 17 производится в сумме 2 210 349,62 рублей в счет обязательств подрядчика по компенсации затрат по электроэнергии по счетам за период с 31.01.2021 года по 31.10.2021 года на сумму 2 210 349,62 рублей.

Итого после зачета основной долг заказчика по дополнительным соглашениям №№ 2, 8, 10, 15, 16, 18, 20 составляет 6 592 955,73 рублей, неустойка подрядчика за нарушение срока выполнения работ по дополнительным соглашениям №№ 4, 5, 6, 15, 16, 17 составляет 3 546 610,79 рублей.

После зачета в возмещение затрат на электроэнергию подлежит взысканию 810 424,87 рублей с учетом зачета на сумму 2 210 349,62 рублей по дополнительному соглашению № 17 и на сумму 1 200 852 рублей по дополнительному соглашению № 14 (подрядчиком требования по нему не заявлялись).

Как следует из положений пункта 25 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2018), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26.12.2018 года, обязательства считаются прекращенными зачетом с момента наступления срока исполнения того обязательства, срок исполнения которого наступил позднее. 

Согласно пункту 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 года № 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований», если встречные требования являются однородными, срок их исполнения наступил и одна из сторон сделала заявление о зачете, то обязательства считаются прекращенными в момент наступления срока исполнения того обязательства, срок исполнения которого наступил позднее, и независимо от того, когда было сделано или получено заявление о зачете. 

В соответствии с пунктом 15 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 11.06.2020 года № 6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств» обязательства считаются прекращенными зачетом в размере наименьшего из них не с момента получения заявления о зачете соответствующей стороной, а с момента, в который обязательства стали способными к зачету (статья 410 ГК РФ). 

Неустойка заказчика за нарушение срока выполнения работ по  дополнительному соглашению № 2 стала способной к зачету 25.04.2021 года,  по дополнительному соглашению № 4 -  31.03.2022 года, по дополнительному соглашению № 5 - 31.03.2022 года, по дополнительному соглашению № 6 –  25.05.2021 года; по дополнительному соглашению № 7 – 31.03.2022 года, по дополнительному соглашению № 10 – 25.08.2021 года; по дополнительному соглашении № 11 – 06.10.2021 года; по дополнительному соглашению № 12 – 25.11.2021 года, по дополнительному соглашению № 15 – 20.10.2021 года, по дополнительному соглашению № 16 – 20.10.2021 года, по дополнительному соглашению № 17 – 31.03.2022 года. 

С учетом произведенного зачета,  правила о сроках исполнения обязательств при зачете; положений о моратории, условий дополнительных положений о сроках оплаты выполненных работ и гарантийного удержания судом был произведен перерасчет неустойки за нарушение сроков оплаты работ.

Согласно расчету суда неустойка за нарушение срока оплаты выполненных работ по дополнительному соглашению № 1 по состоянию на 31.03.2022 года составляет 821 329,43 рублей, по дополнительному соглашению  № 2 по состоянию на 10.01.2023 года с учетом положений о моратории составляет 848 723,67 рублей, по дополнительному соглашению № 4 по состоянию на 31.03.2022 года составляет  5 227 353,13 рублей,  по дополнительному соглашению № 6 по состоянию на 24.06.2021 года составляет 12 836,25 рублей, по дополнительному соглашению № 7 по состоянию на 31.03.2022 года в сумме 942 605,96 рублей, по дополнительному соглашению № 8 по состоянию на 10.01.2023 года с учетом положений о моратории 3 215 531,53 рублей, по дополнительному соглашению № 10 по состоянию на 10.01.2023 года в сумме 39 369,52 рублей, по дополнительному соглашению № 15 по состоянию на 10.01.2023 года с учетом положений о моратории в сумме 697 901,89 рублей, по дополнительному соглашению № 16 по состоянию на 10.01.2023 года с учетом положений о моратории 596 032,25 рублей, по дополнительному соглашению № 18 по состоянию на 10.01.2023 года с учетом положений о моратории 36 398,4 рублей, по дополнительному соглашению № 20 по состоянию на 10.01.2023 года с учетом положений о моратории 296 639,24 рублей, всего 12 734 721,35 рублей.

Заказчиком заявлены встречные требования о взыскании штрафов в сумме 140 000 рублей по положениям пункта 20.9 договора подряда от 30.12.2020 № 02317.

Документы, фиксирующие нарушения допущенные сотрудниками подрядчика, в  материалы дела предоставлены, требования по штрафам не оспорены подрядчиком ни по праву, ни по размеру.

Требования сторон подлежат удовлетворению в части установленной судом на основании положений статей 309, 310, 330 ГК РФ, положений договора подряда от 30.12.2020 № 02317.

Решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Курскагротерминал» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦМОНТАЖ» основной долг в сумме 6 592 955,73 рублей, неустойку в сумме 12 734 721,35 рублей, в доход Федерального бюджета госпошлину  в сумме 25 358 рублей.

В удовлетворении остальной части требований обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦМОНТАЖ» отказать.

Взыскать с общества с  ограниченной ответственностью «СПЕЦМОНТАЖ» в доход Федерального бюджета госпошлину  в сумме 174 642 рублей.

Взыскать с общества с  ограниченной ответственностью «СПЕЦМОНТАЖ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Курскагротерминал» неустойку в сумме 3 546 610,79 рублей, затраты на электроэнергию в сумме 810 424,87 рублей, штрафы в сумме 140 000 рублей, расходы по госпошлине в сумме 180 783 рублей.

В удовлетворении остальной части встречных требований  обществу с ограниченной ответственностью «Курскагротерминал» отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Курскагротерминал» из Федерального бюджета госпошлину в сумме 19 217 рублей.

Произвести зачет, по итогам зачета. 

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Курскагротерминал» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦМОНТАЖ» 14 649 858,42 рублей. 

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Курскагротерминал» в доход Федерального бюджета госпошлину в сумме 6141 рубль.

Взыскать с  общества с  ограниченной ответственностью «СПЕЦМОНТАЖ» в доход Федерального бюджета госпошлину в сумме 174 642 рублей.

   Решение может быть обжаловано в месячный срок в арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                               О.Н.Шкутко