22/2017-3136(1) 

Арбитражный суд Амурской области  

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163  тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48  

http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть

Дело № А04-10023/2016

г. Благовещенск

23 января 2017 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи В.В. Китаева,  при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного  

заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление администрации  Октябрьского района (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Строй-Снаб» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об устранении  недостатков работ  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

решил:

Иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Строй-Снаб» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение тридцати дней со дня вступления решения суда  в законную силу устранить недостатки выполненных работ, а, именно, безвозмездно  выполнить в домах по адресу: Амурская область, Октябрьский район, с.Екатеринославка,  ул.60 лет СССР, д.ЗА и ЗБ следующие работы:  

- в доме ЗА: ремонт покрытия пола в подъездах, привести кровлю дома в  соответствие с установленными требованиями, устранить течь кровли, выполнить  отмостку с обеспечением проектного уклона, выполнить вертикальную планировку  участка с обеспечением необходимого уклона от дома, принять меры по  

осушению помещения техподполья и приямков, восстановить покрытие проезда с  выполнением проектного уклона и отвода воды, выполнить проезд, проход к  площадке в соответствие с проектом.  

- в доме ЗБ: произвести капитальный ремонт отмостки дома, устранить причину  попадания воды в подвал, выполнить вертикальную планировку согласно норм с  отводом поверхностных вод здания, произвести ремонт штукатурки здания,  произвести капитальный ремонт дорожного полотна и дорожек к подъездам,  произвести ремонт лестничных площадок и плитки в коридорах, произвести  ремонт стен входных тамбуров.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй-Снаб» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину  в размере 6 000 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой  Арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.  

Судья В.В. Китаев