АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

 

20 июня 2018 года

 

Дело № А33-33328/2017

Красноярск

 

Резолютивная часть решения принята в судебном заседании 13 июня  2018  года.

В полном объёме решение изготовлено 20 июня  2018 года.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Щелоковой О.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционерного общества "Красноярский машиностроительный завод" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск)

к обществу с ограниченной ответственностью "Вариант-999" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск)

о взыскании пени,

в присутствии представителей:

от истца: ФИО1, по доверенности от 06.03.2018,

от ответчика: ФИО2, по доверенности от 19.09.2017,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО3, 

 

установил:

акционерное общество "Красноярский машиностроительный завод" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Вариант-999" (далее – ответчик) о взыскании 1 243 374,32 руб. пени за несвоевременное исполнение договорных обязательств.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 18.01.2018 возбуждено производство по делу.

Представитель истца в судебном заседании заявила об уменьшении размера исковых требований, просила взыскать с ответчика 86 999,60 руб. пени за период с 01.01.2017 по 12.06.2018.

Заявление об уменьшении размера исковых требований принято судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования не признала.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между истцом (заказчик) и ответчиком (генподрядчик) заключен контракт  №2.150.1334 от 29.12.2015 (далее – контракт), по условиям которого Генподрядчик обязуется выполнить работы по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение объектов энергоснабжения» (Объекты энергетического хозяйства АО «Красмаш») (далее - «Объект») в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Контракту), Планом-графиком на соответствующий год (Приложение № 2 к настоящему Контракту) в установленный Контрактом срок,                   а Заказчик обязуется создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Работы на Объекте включают в себя все виды работ согласно Техническому заданию, в т.ч.:

устройство фундаментов под инженерное и технологическое оборудование;

усиление несущих и ограждающих конструкций;

монтаж металлоконструкций;

усиление колонн;

демонтаж старых и устройство новых полов;

демонтаж старого и устройство нового кровельного покрытия;

перепланировка помещений (демонтаж и монтаж перегородок);

внутренняя отделка стен и потолков;

демонтаж старых и устройство новых окон блоков;

демонтаж старых и устройство новых наружных и внутренних дверных блоков и ворот;

утепление и устройство вентилируемого фасада;

устройство отмостки;

перемещение и демонтаж существующего оборудования;

демонтаж старых и устройство новых электроустановок и электросетей;

устройство релейной защиты и противоаварийной автоматики;

демонтаж старых и устройство новых сетей, приборов водопровода и канализации;

демонтаж старых и устройство новых сетей и приборов отопления;

демонтаж-монтаж системы снабжения воздухом высокого и низкого давления;

демонтаж старой и устройство новой приточно-вытяжной вентиляции;

устройство пожаро - охранной сигнализации; -устройство сетей связи;

устройство автоматизации и диспетчеризации инженерных сетей;

устройство наружных кабельных сетей бКв;

благоустройство прилегающей территории;

устройство ограждения;

устройство проездов и площадок;

приобретение,  поставка  до  места  монтажа,  монтаж  и  пусконаладочные  работы  нового технологического и инженерного оборудования;

ПНР технологического и инженерного оборудования (пункт 2.1 контракта).

Место выполнения работ: 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29 (пункт 2.2 контракта).

Пунктами 3.1 и 3.2 контракта установлено, что цена контракта установлена по результатам закупки. Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Контракта. Общая стоимость работ составляет 210 000 000 рублей 00 копеек (двести десять миллионов рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) 32 033 898 рублей 31 копейка (тридцать два миллиона тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь рублей 31 копейка).

Распределение финансирования с 2015 года по 2017 год, в пределах, доведенных до Заказчика, лимитов бюджетных средств:

- в 2015 году - 84 206 837 рублей 05 копеек, (восемьдесят четыре миллиона двести шесть тысяч восемьсот тридцать семь рублей 05 копеек), в том числе НДС 18% - 12 845 110 рублей 74 копейки (двенадцать миллионов восемьсот сороке пять тысяч сто десять рублей 74 копейки);

в 2016 году - 117 458 610 рублей 44 копейки (сто семнадцать миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч шестьсот десять рублей 44 копейки), в том числе НДС 18% - 17 917 415 рублей 15 копеек (семнадцать миллионов девятьсот семнадцать тысяч четыреста пятнадцать рублей 15 копеек);

в 2017 году - 8 334 552 рубля 51 копейка (восемь миллионов триста тридцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят два рубля 51 копейка) в том числе НДС 18% - 1 271 372 рубля 42 копейки (один миллион двести семьдесят одна тысяча триста семьдесят два рубля 42 копейки).

Перечень оборудования, подлежащего поставке, виды и объемы выполняемых работ и сроки исполнения обязательств стороны согласовывают путем составления планом-графиком по объекту на 2015 год в течение десяти рабочих дней с момента подписания контракта. Согласование  план-графика по настоящему контракту на последующие года производится до 31 декабря, предшествующего году выполнения работ (пункт 3.4 контракта).

 

Пунктом 5.1  контракта предусмотрено, что предусмотренные Контрактом работы выполняются Генподрядчиком в следующие сроки:

Начало работ - со дня заключения Контракта.

Выполнение работ по этапам:

1 этап 2015 год - срок выполнения работ 25.12.2015;

2 этап 2016 год - срок выполнения работ 10.12.2016;

3 этап 2017 год - срок выполнения работ 25.11.2017. 

Окончанием работ: не позднее 25.11.2017 года.

В соответствии с пунктом 11.1 контракта приобретаемый генподрядчиком товар (оборудование)  должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей и восстановление потребительских свойств).

По факту приемки товара (оборудования) соответствующего по комплектности, таре, упаковке, маркировке и условиям технического задания (приложение № 1 к настоящему контракту), уполномоченный представитель генподрядчика подписывает акт сдачи - приемки и заверяет его печатью. На товарной накладной (ТОРГ-12) поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки (пункт 11.1.3 контракта)

Согласно пунктов 15.4 и 15.5  контракта в случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком   (исполнителем,   подрядчиком)   обязательств,   предусмотренных   контрактом,   заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Согласно Перечню технологического оборудования по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение объектов энергосбережения Оборудование ТХ с разбивкой по годам (конкурс 2)», согласованным сторонами,  подрядчик во исполнение контракта обязался поставить заказчику в 2016 году стол сварщика ССМ-1200-Н12 в количестве 1 штука, стоимостью 227 271,70 руб.

В связи с нарушением сроков исполнением обязательств по поставке оборудования,            заказчик претензией №127/131 от 25.08.2017 обратился к подрядчику с требованием об уплате неустойки в течение 5 дней с момента получения претензии. Претензия получена подрядчиком 31.08.2017 (согласно отметке на почтовом уведомлении).

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по контракту, истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании 86 990,60 руб. неустойки.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданское законодательство в Российской Федерации основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора. Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (статьи 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации). На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Как следует из материалов дела, между сторонами заключен контракт №2.150.1334 от 29.12.2015, который содержит в себе признаки договором подряда (глава 37 части II Гражданского кодекса Российской Федерации) и поставки (параграф 3 главы 30 части II Гражданского кодекса Российской Федерации).

Частью 3 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации  исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пунктам 15.4 и 15.5  контракта в случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком   (исполнителем,   подрядчиком)   обязательств,   предусмотренных   контрактом,   заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Стол сварщика ССМ-1200-Н12 в количестве 1 штука, стоимостью 227 271,70 руб., подлежащий поставке в адрес истца по условиям спорного контракта (Перечень технологического оборудования по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение объектов энергосбережения Оборудование ТХ с разбивкой по годам (конкурс 2)» (приложение к             допсоглашению к контракту)), фактически не поставлен ответчиком.

За нарушение срока поставки ответчику начислена неустойка в размере 86 990,60 руб. за период с 01.01.2017 по 12.06.2018 (528 дней),  исходя из стоимости непоставленного оборудования в размере 227 271,70 руб., принимая во внимание  1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, равную 7,25%. 

Расчет суммы неустойки проверен судом, расчет произведен истцом верно.

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик доказательств поставки спорного оборудования в адрес заказчика не представил. Согласно пункту 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом,  требования истца подлежат удовлетворению в размере 86 999,60 руб.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

С учетом результата рассмотрения дела, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 480 руб. подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. Излишне уплаченная государственная пошлина в сумме 22 954 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Вариант-999"                               (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу акционерного общества "Красноярский машиностроительный завод" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,                   г. Красноярск) 86 999,60 руб. пени, 3 480 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить акционерному обществу "Красноярский машиностроительный завод"               (ИНН 

<

***>) из федерального бюджета 22 954 руб. излишне уплаченной государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

О.С. Щелокова