14/2019-68831(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

672002 г.Чита, ул. Выставочная, 6 http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Резолютивная часть решения

Дело № А78-8081/2019

г.Чита

03 сентября 2019 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 174 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Альянс" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) исполнить обязательства по муниципальному  

контракту от 24.07.2018 № Ф.2018.313734 "Объект капитального строительства,  

реконструкция автомобильной дороги Нижний Стан - Бутиха на участке км 0+000 км  

4+500 в муниципальном районе "Тунгокоченский район" Забайкальского края": 

- выполнить работы по устройству покрытий дорожной одежды из щебеночно- 

песчанной смеси CI толщиной 12 см в количестве 6353 кв.м, 

- выполнить установку дорожных знаков на металлических стойках в количестве  

42 штук, 

- выполнить установку металлического барьерного ограждения в количестве 1,4  

км, 

- выполнить установку сигнальных столбиков в количестве 178 штук;  - выполнить земляные укрепительные работы:  

укрепление кюветов и откосов в количестве 3650 кв.м, 

укрепление кюветов цементогрунтом в количестве 210 кв.м,  укрепление нагорных канав в количестве 192 куб.м  

в течение 15 дней со дня вступления решения в законную силу.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Альянс" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 6000 руб.  

На 

решение

 может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный  апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия.  

Судья М.В. Сталичнова  Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебногодепартамента

 Дата 22.05.2019 4:39:48

Кому выдана Сталичнова Марина Васильевна