АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, 

<

...> E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru https://tatarstan.arbitr.ru https://my.arbitr.ru тел. 

<

***> 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-37818/2024

г. Казань

21 августа 2025 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Вербенко А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А65-14913/2025, руководствуясь статьями 110, 150, 167-169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации   

Р Е Ш И Л:

Отказ истца от иска в части требований об обязании общество с ограниченной ответственностью «Лиман» в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу подписать минусовые акты по формам КС-2, КС-3 от 14.10.2024 № 11 на сумму 9 900 935 рублей, принять. Производство по делу в этой части прекратить.  

В оставшейся части иск удовлетворить. 

Признать недействительным одностороннее расторжение обществом с ограниченной ответственностью «Лиман» договора субподряда от 12 июля 2023 года № 12/07-2023.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Лиман» (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Рамали-Строй» (ИНН 

<

***>) 4 490 600 руб. 87 коп. неустойки, 35 555 руб. 03 коп. штрафа, 106 665 руб. 10 коп. штрафа.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Лиман» (ИНН 

<

***>) в течение 10 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу представить обществу с ограниченной ответственностью «РамалиСтрой» (ИНН 

<

***>) исполнительную документацию и ведомости уложенных материалов, счета фактур, накладные на примененные материалы, оборудование, инвентарь, а также исполнительные схемы в полном объеме.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Лиман» (ИНН 

<

***>) в течение 45 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу устранить следующие недостатки работ на объекте: «161-квартирный жилой дом с нежилыми помещениями по ул. Паратская-Рогачева в г. Зеленодольск»:  

Подъезды БС (блок- секция) 

Наименование видов работ 

Ед.изм.  

Факт объемов 

Примечание 

Раздел ремонтных работ демонтаж монтаж 

БС-1 

Брак по отделке стен: 

М2 

13,00 

Очистка стен от обоев 

13,00 

Демонтаж шпаклевки 

13,00 

 Грунтовка стен 

13,00 

Шпаклевание стен 

13,00 

Грунтовка стен 

13,00 

Оклейка стен обоями 

13,00 

Демонтаж короеда в МОП и лоджии:  

М2 

541,91 

В  

местах 

утепления  

Монтаж сетки по утеплителю  

541,91 

стен 

Штукатурка стен 

541,91 

Шпаклевка стен в 2 слоя 

541,91 

Ошкуривание 

541,91 

Покраска стен в 2 слоя 

2 281,30 

Демонтаж штукатурки на потолке:  

М2 

59,20 

МОП 

Выравнивание потолков 

59,20 

штукатуркой 

Улучшенная отделка потолка с 

59,20 

покраской 

Раздел ремонтных работ демонтаж монтаж 

БС-2 

Демонтаж короеда в МОП и лоджии:  

М2 

541,91 

В  

местах 

утепления  

Монтаж сетки по утеплителю  

541,91 

стен 

Штукатурка стен 

541,91 

Демонтаж штукатурки на потолке:  

М2 

71,00 

МОП 

Выравнивание потолков 

71,00 

штукатуркой 

Улучшенная отделка потолка с 

708,10 

покраской 

Раздел ремонтных работ демонтаж монтаж 

БС-3 

Устройство стяжки: 

М2 

5,10 

Демонтаж стяжки пола Монтаж 

5,10 5,10 

стяжки пола 

Раздел ремонтных работ демонтаж монтаж 

БС-4 

Демонтаж короеда в МОП и лоджии:  

М2 

541,91 

В  

местах 

утепления  

Монтаж сетки по утеплителю  

541,91 

стен 

Штукатурка стен 

541,91 

Демонтаж штукатурки (шпаклевки) на  

 М 2 

621,00 

МОП 

потолке: 

Выравнивание потолков 

592,00 

штукатуркой 

Улучшенная отделка потолка с 

621,00 

покраской 

Устройство стяжки: 

М2 

683,28 

Демонтаж стяжки пола 

683,28 

Монтаж стяжки пола 

683,28 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Лиман» (ИНН  

<

***>) в доход бюджета 313 985 руб. госпошлины. 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в  

месячный срок. 

Судья А.А. Вербенко