Арбитражный суд Краснодарского края

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А32-8837/2024

г. Краснодар                                                                                           «28» декабря 2024 г.

 

Резолютивная часть решения суда объявлена 22 октября 2024 г. 

Полный текст решения суда изготовлен 28 декабря 2024 г.

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Орловой А.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мальцевой А.С.,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Гранд-Стар», г. Краснодар (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Ариал Строй Юг», г. Краснодар (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании передать исполнительную документацию по договору строительного подряда № 25/11/21 от 25.11.2021 г., о взыскании денежных средств за каждый день неисполнения судебного акта в размере 3 000 руб., начиная с даты истечения месячного срока, установленного для исполнения решения суда, до его фактического исполнения,

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, уведомлен,

от ответчика: не явился, уведомлен, 

 

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Гранд-Стар», г. Краснодар (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Строительные технологии», г. Усть-Лабинск (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Ариал Строй Юг», г. Краснодар (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании передать исполнительную документацию по договору строительного подряда № 25/11/21 от 25.11.2021 г., о взыскании денежных средств за каждый день неисполнения судебного акта в размере 3 000 руб., начиная с даты истечения месячного срока, установленного для исполнения решения суда, до его фактического исполнения. 

Определением суда от 20.02.2024 г. указанное исковое заявление принято к рассмотрению. 

Лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о месте и времени судебного заседания.

Истцом было заявлено ходатайство об уточнении размера исковых требований, в котором ООО  «Гранд-Стар» просит обязать ООО «Ариал Строй Юг» в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу передать исполнительную документацию работы по объекту, расположенному по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, хутор Октябрьский, Почтовое отделение, № 32, включающую:

- акты выполненных работ КС-2 и КС-3;

- перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;

- комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;

- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

- акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального;

- акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты освидетельствования ответственных конструкций;

- акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;

- исполнительные геодезические схемы и чертежи; исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения; акты испытания и опробования технических устройств;

- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

- документы изготовителя о качестве применяемых строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования, предоставляемые строительными лабораториями и (или) изготовителями;

- общий и специальные журналы, в которых осуществлялся учет выполнения работ при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (пункт 9.2.2. Свод правил 48.13330.2019).

Суд при рассмотрении заявленного истцом ходатайства об уточнении исковых требований руководствовался статьей 49 АПК РФ, согласно которой, истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Судом установлено, что уточнение исковых требований не противоречит закону и не нарушает установленных законом прав и интересов истца, других лиц, в связи с чем, судом принимается.

Таким образом, исковыми требованиями следует считать: «Обязать ООО  «Гранд-Стар» ООО «Ариал Строй Юг» в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу передать исполнительную документацию работы по объекту, расположенному по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, хутор Октябрьский, Почтовое отделение, № 32, включающую:

- акты выполненных работ КС-2 и КС-3;

- перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;

- комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;

- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

- акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального;

- акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты освидетельствования ответственных конструкций;

- акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;

- исполнительные геодезические схемы и чертежи; исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения; акты испытания и опробования технических устройств;

- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

- документы изготовителя о качестве применяемых строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования, предоставляемые строительными лабораториями и (или) изготовителями;

- общий и специальные журналы, в которых осуществлялся учет выполнения работ при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (пункт 9.2.2. Свод правил 48.13330.2019).».

В связи с необходимостью изучения документов в судебном заседании 22.10.2024 г. суд объявил перерыв до  05.11.2024 г. до 17 час. 00 мин.

После перерыва судебное заседание продолжено в отсутствии лиц, участвующих в деле.

Дело подлежит рассмотрению согласно статье 156 АПК РФ. Неявка сторон, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для разрешения спора.

В соответствии с частью 2 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Изучив представленные в материалы дела доказательства, суд установил следующие обстоятельства, касающиеся существа спора.

Как следует из материалов дела, между обществом с ограниченной ответственностью «Гранд-Стар» (далее – заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Ариал Строй Юг» (далее – подрядчик) был заключен договор строительного подряда № 25/11/21 от 25.11.2021 г.  (далее – договор).

Согласно условиям договора подрядчик обязуется по заданию заказчика произвести своими силами и техническими средствами работы по строительству нежилого строения в объеме, указанном в смете работ (приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить работу. 

Адрес проведения работ: Краснодарский край, хутор Октябрьский, Почтовое отделение № 32. 

Срок окончания работ согласован сторонами в пункте 2 дополнительного соглашения к Договору № 1 от 22.07.2022 г. стороны определили новый срок окончания работ – 31.12.2023 г.

Свои обязательства по оплате работ, согласно п. 3.2-3.2.3 договора заказчик исполнил в полном объеме, что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями.

В соответствии с пунктом 4.3.1 Договора подрядчик обязуется осуществлять работы  в соответствии с условиями Договора. Качественно выполнить порученную работу в соответствии с техническими документами, представленными заказчиком, своими силами, инструментами, механизмами с соблюдением строительных норм и правил и сдать Заказчику полностью законченную работу.

Согласно пункту 6.1 Договора приемка объекта осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных договором и оформляется актом выполненных работ формы № КС-2, КС-3, который подписывается обеими сторонами. 

Однако подрядчиком нарушены обязательства, взятые им при заключении договора: работы заказчику не сданы, акты не подписаны, исполнительная и техническая документация не передана. 

Истец направил в адрес ответчика претензию, согласно которой отказывается от исполнения Договора на основании пункта 4.2.2 Договора и требует передать указанную в претензии документацию, что подтверждается отслеживанием почтовых отправлений (трек-номер 35007388009515).

Ответчик изложенные требования оставил без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд.

Возникшие между сторонами правоотношения являются подрядными и подлежат регулированию общими гражданско-правовыми нормами об обязательствах и специальными положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

На основании статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных подрядных работ является сдача результата работ подрядчиком (статьи 711, 746 ГК РФ). 

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (статья 708 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 ГК РФ.

Заказчик надлежаще исполнил обязанность по оплате, что подтверждается представленными в материалы дела доказательствами. 

Согласно п.4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Пунктом  1 статьи 460.1 ГК РФ установлено, что предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Статьей 717 ГК РФ установлено, что если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

С учетом отсутствия доказательств передачи результатов работ подрядчиком, а также оплаты заказчиком установленной договором цены, заказчик правомерно воспользовался своим правом об одностороннем отказе от исполнения договора.

В силу статьи 726 ГК РФ подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

На основании пункта 1.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются в соответствии с проектной документацией и рабочей документацией, если иное не предусмотрено частью 1.4 статьи 48 настоящего Кодекса.

Исполнительная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и отображающую фактическое исполнение функционально-технологических, конструктивных, инженерно-технических и иных решений, содержащихся в проектной документации, рабочей документации. Состав и порядок ведения исполнительной документации устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства. (пункт 1.5 ГрК РФ). 

Согласно пункта 9.2.1 «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», утвержденному и введенному в действие приказом Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр (далее  - Свод правил 48.13330.2019), исполнительная документация передается застройщику (техническому заказчику) вместе с актами выполненных.

Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 утверждены требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического-обеспечения (РД-11-02-2006).

Пунктом 3 данного Приказа установлено, что  исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

Состав исполнительной документации при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства приведен в пунктах 5, 6 РД- 11-02-2006, а для случаев выполнения строительно-монтажных работ, проведения испытаний инженерных систем и сетей на объектах капитального строительства гражданского и промышленного назначения - и в пункте 9.2.2 СП 48.13330.2019 (часть 9 статьи 52 ГрК РФ, пункт 2 РД-11-02-2006, пункты 1.1, 1.2, 9.2.1 СП 48.13330.2019)

Исполнительная документация отражает фактическое исполнение решений проектной -и рабочей документации, фактическое состояние объекта капитального строительства и его элементов и включает: акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального; акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности; акты освидетельствования скрытых работ; акты освидетельствования ответственных конструкций; акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения; комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ; исполнительные геодезические схемы и чертежи, исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения; экспертиз, акты испытания и опробования технических устройств; результаты обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; документы изготовителя о качестве применяемых строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования, предоставляемые строительными лабораториями и (или) изготовителями; Общий и специальные журналы, в которых - осуществлялся учет выполнения работ при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства; иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений (пункт 9.2.2. Свод правил 48.13330.2019).

В соответствии с пунктом 9.2.6 Свода правил 48.13330.2019 исполнительная документация подлежит хранению у застройщика (технического заказчика) или лица, осуществляющего строительство, согласно ГОСТ Р 7.0.8 (пункт 4: Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к  актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения») или вносится в информационную модель в соответствий с требованиями ГрК РФ и нормативных документов. На время проведения итоговой проверки реестры исполнительной документации передаются в орган государственного строительного надзора в установленном порядке согласно ГрК РФ и нормативным документам.

В соответствии с положениями статьей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменений его условий не допускается.

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Относимым является то доказательство, которое имеет значение для рассматриваемого дела (статья 67АПК РФ). 

Допустимость доказательств определена в статье 68 АПК РФ: обстоятельства дела, которые согласно  закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения получены из доброкачественного источника и не противоречат сведениям, содержащимся в других доказательствах по делу (часть 3 статьи 71 АПК РФ).

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (статья 71АПК РФ).

По смыслу пункта 1 статьи 1 ГК РФ, части 1 статьи 4 АПК РФ целью судебной защиты является восстановление нарушенных или оспариваемых прав заинтересованного лица. 

В условиях реализации конституционного принципа состязательности гражданского судопроизводства, закрепленного в статье 123 Конституции Российской Федерации, истец не может рассчитывать на то, что суд будет собирать доказательства за него. 

Как указал Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 25.07.2011 № 5256/11: «по делам, рассматриваемым в порядке искового производства, такая обязанность (по собиранию доказательств) на суд не возложена.

Доказательства собирают стороны. Суд же оказывает участвующему в деле лицу по его ходатайству содействие в получении тех доказательств, которые им не могут быть представлены самостоятельно, и вправе предложить сторонам представить иные дополнительные доказательства, имеющие отношение к предмету спора».

Согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из  иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 № 12505/11 сформулирована правовая позиция, согласно которой, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно, со ссылкой на конкретные документы, указывает процессуальный оппонент. 

Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, принимая во внимание изложенное, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебныи? акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Таким образом, судебные расходы по уплате госпошлины в размере 6000 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 9, 49, 65, 70, 71, 110, 137, 156, 163, 167, 170, 171, 176, 177 АПК РФ, 

 

Р Е Ш И Л:

Ходатайство истца об уточнении исковых требований – удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Ариал Строй Юг», г. Краснодар (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу передать обществу с ограниченной ответственностью «Гранд-Стар», г. Краснодар (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) исполнительную документацию работы по объекту, расположенному по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, хутор Октябрьский, Почтовое отделение, № 32, включающую:

- акты выполненных работ КС-2 и КС-3;

- перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;

- комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;

- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

- акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального;

- акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты освидетельствования ответственных конструкций;

- акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;

- исполнительные геодезические схемы и чертежи; исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения; акты испытания и опробования технических устройств;

- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

- документы изготовителя о качестве применяемых строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования, предоставляемые строительными лабораториями и (или) изготовителями;

- общий и специальные журналы, в которых осуществлялся учет выполнения работ при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (пункт 9.2.2. Свод правил 48.13330.2019).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ариал Строй Юг», г. Краснодар (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Гранд-Стар», г. Краснодар (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Пятнадцатыи? арбитражныи? апелляционныи? суд в течение месяца после его принятия.

 

Судья                                                                                                                       Орлова А.В.