АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25

http://www.kursk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А35-7592/2017

14 декабря 2017 года

г. Курск

Резолютивная часть решения объявлена  07.12.2017.

Решение в полном объеме изготовлено 14.12.2017.    

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Волковой Е.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, завершая предварительное судебное заседание и открывая судебное разбирательство с согласия лиц участвующих в деле в соответствии с пунктом 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и рассмотрел в открытом судебном заседании после объявленного перерыва с 30.11.2017 по 07.12.2017 дело по иску

областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская городская станция скорой медицинской помощи» Комитета здравоохранения Курской области

к акционерному обществу «Курские электрические сети»

о взыскании удержанной части аванса по договору от 15 ноября 2007 года №750 в сумме 93 061 руб. 49 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 1 537 руб. 43 коп., а также расходов по уплате государственной пошлины,

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца: ФИО2 - по доверенности №9 от 26.09.2017,

от ответчика: ФИО3 - по доверенности №10 от 10.04.2017.

Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Курская городская станция скорой медицинской помощи» Комитета здравоохранения Курской области, расположенное по адресу: 305001, 

<

...>, зарегистрировано в качестве юридического лица 02.09.1998, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>. 

Акционерное общество «Курские электрические сети», расположенное по адресу: 305035, 

<

...>, зарегистрировано в качестве юридического лица 19.04.2006, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>.

Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Курская городская станция скорой медицинской помощи» Комитета здравоохранения Курской области обратилось в Арбитражный суд Курской области с исковым заявлением к акционерному обществу «Курские электрические сети» о взыскании удержанной части аванса по договору от 15 ноября 2007 года №750 в сумме 93 061 руб. 49 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 1 537 руб. 43 коп., а также расходов по уплате государственной пошлины.

Определением суда от 01 сентября 2017 года дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Истцу предложено представить доказательства, на которые ссылается истец как на основание своих требований. Ответчику предложено представить письменный мотивированный отзыв на исковое заявление, документы в обоснование своих доводов, в случае оплаты, доказательства оплаты задолженности.

19 сентября 2017 года от ответчика через систему подачи документов в арбитражные суды в электронном виде поступили возражения на исковое заявление.

Истцом 29 сентября 2017 года через канцелярию Арбитражного суда Курской области представлен отзыв на возражения ответчика.

Учитывая возражения ответчика, а также доводы, изложенные истцом в отзыве на возражения ответчика, суд приходит к выводу о том, что имеется основание для рассмотрения дела по общим правилам искового производства, предусмотренное частью 5 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку необходимо выяснить дополнительные обстоятельства и исследовать дополнительные доказательства, ввиду чего судом вынесено определение от 30 октября 2017 года о рассмотрении дела по общим правилам искового производства и назначении предварительного судебного заседания.

В предварительном судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика исковые требования не признал.

С согласия представителей сторон, на основании части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в суде первой инстанции.

Ввиду необходимости представления дополнительных доказательств по делу судом вынесено протокольное определение об объявлении перерыва в судебном заседании.

От ответчика через канцелярию Арбитражного суда Курской области поступило ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств.

Ходатайство удовлетворено, документы приобщены судом к материалам дела.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика относительно удовлетворения исковых требований возражал.

Изучив материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Между открытым акционерным обществом «Курские электрические сети» (в настоящее время акционерное общество «Курские электрические сети») (Исполнитель) и муниципальным учреждением здравоохранения «Станция скорой помощи» (в настоящее время областное бюджетное учреждение здравоохранения «Курская городская станция скорой медицинской помощи» Комитета здравоохранения Курской области) (Заявитель) 15 ноября 2007 года заключен договор №795 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого стороны обязуются выполнить мероприятия по созданию технической возможности технологического присоединения и технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) станции скорой медицинской помощи по адресу: ул. Энгельса – Красной Армии, общей мощностью 126,3 кВт, Заявителя к электрическим сетям Исполнителя. Заявитель обязуется оплатить работы по созданию технической возможности технологического присоединения и технологическому присоединению (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 1.2 договора Исполнитель принимает от Заявителя заявку, составленную в соответствии с требованиями пункта 9 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям, разрабатывает и выдает последнему технические условия для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям (ТУ) (Приложение №1 к договору).

Согласно пункту 1.3 договора мероприятия по созданию технической возможности технологического присоединения и технологическому присоединению включают в себя: подготовку и выдачу ТУ, выполнение ТУ по созданию технической возможности технологического присоединения со стороны Исполнителя, выполнение ТУ со стороны Заявителя, проверку Исполнителем выполнения ТУ со стороны Заявителя, технический осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя уполномоченным органом государственной власти, при участии представителей Исполнителя, составление акта о выполнении ТУ, фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергоустановок Заявителя в электрической сети, составление акта о технологическом присоединении.

В пункте 3.1 договора определен размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства, который составляет 999 841 руб. 20 коп.

Пунктом 3.3 договора установлено, что Заявитель вносит плату за технологическое присоединение в следующем порядке и сроки: 30% в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора, 70% в течение 5 рабочих дней с момента предоставления Исполнителем акта допуска в эксплуатацию электроустановки Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Курской области.

Как следует из искового заявления и не оспаривается ответчиком, муниципальным учреждением здравоохранения «Станция скорой помощи» (в настоящее время областное бюджетное учреждение здравоохранения «Курская городская станция скорой медицинской помощи» Комитета здравоохранения Курской области) в адрес открытого акционерного общества «Курские электрические сети» (в настоящее время акционерное общество «Курские электрические сети») произведен авансовый платеж в сумме 229 952 руб. 46 коп.

13 июня 2013 года между сторонами заключено дополнительное соглашение к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 15 ноября 2007 года №795, которым пункт 1.1 договора изложен в следующей редакции: «Стороны обязуются выполнить мероприятия по созданию технической возможности технологического присоединения и технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) станции скорой медицинской помощи по адресу: ул. Энгельса – Красной Армии, общей мощностью 190 кВт, Заявителя к электрическим сетям Исполнителя. Заявитель обязуется оплатить работы по созданию технической возможности технологического присоединения и технологическому присоединению».

Кроме того, указанным дополнительным соглашением стороны изменили  стоимость технологического присоединения соответствующая объекта, увеличив ее до 1 587 398 руб. 37 коп.

Дополнительным соглашением от 06 ноября 2015 года стороны продлили срок действия соответствующего договора и технических условий до 01 января 2017 года.

Ввиду того, что строительство станции скорой помощи произведено не было, технологическое присоединение станции скорой помощи к электрическим сетям Исполнителя осуществлено не было, письмом от 14 февраля 2017 года №112 областное бюджетное учреждение здравоохранения «Курская городская станция скорой медицинской помощи» Комитета здравоохранения Курской области сообщило акционерному обществу «Курские электрические сети», что работы по обеспечению технологического присоединения объекта строительства будет проводить областное казенное учреждение «Управление капитального строительства Курской области», что подтверждает письмо от 13 февраля 2017 года №144/5, ввиду чего указано на необходимость возвратить денежные средства в сумме 229 952 руб. 46 коп., перечисленных в качестве аванса по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 15 ноября 2007 года №795.

Письмом от 16 марта 2017 года №218 областное бюджетное учреждение здравоохранения «Курская городская станция скорой медицинской помощи» Комитета здравоохранения Курской области заявило о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 15 ноября 2007 года №795 в одностороннем порядке.

По платежному поручению от 23 июня 2017 года №3246 акционерное общество «Курские электрические сети» перечислило на счет областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская городская станция скорой медицинской помощи» Комитета здравоохранения Курской области 136 890 руб. 97 коп.

При этом в письме от 27 июня 2017 года №305 акционерное общество «Курские электрические сети» сообщило областному бюджетному учреждению здравоохранения «Курская городская станция скорой медицинской помощи» Комитета здравоохранения Курской области о том, что 93 061 руб. 49 коп. были удержаны обществом в качестве компенсации понесенных расходов, связанных с выполнением работ по технологическому присоединению, и представило копии договоров с контрагентами и иные документы, подтверждающие данные расходы.

Полагая, что удержание ответчиком денежных средств в сумме 93 061 руб. 49 коп. является необоснованным и незаконным истец обратился в суд с настоящим иском.

Суд считает требования истца необоснованными и не подлежащими удовлетворению ввиду следующего.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом. 

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

Статьей  307 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Из пункта 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

 Согласно статье 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Исходя из пункта 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В пункте 1 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

Статье 783 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

Как установлено статьей 717 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Судом установлено, что  в рамках исполнения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 15 ноября 2007 года №795 открытым акционерным обществом «Курские электрические сети» (в настоящее время акционерное общество «Курские электрические сети») (Заказчик) был заключен договор на выполнение проектных и изыскательских работ от 20 мая 2008 года №38/08 с обществом с ограниченной ответственностью «Курсккоммунэнергосервис» (Исполнитель) на выполнение работ по составлению сметной документации на объект: строительство КЛ-0,4кВ от ТП-170 к зданию скорой медицинской помощи по ул. Энгельса – Красной Армии в г. Курске.

Стоимость работ, подлежащих выполнению по указанному договору, составляет 57 921 руб.

По акту сдачи-приемки научно-технической продукции от 31 октября 2008 года, подписанному в двустороннем порядке, соответствующая научно-техническая документация была передана Исполнителем заказчику.

В соответствии с платежным поручением от 05 декабря 2008 года №4208 открытое акционерное общество «Курские электрические сети» (в настоящее время акционерное общество «Курские электрические сети») перечислило на счет общества с ограниченной ответственностью «Курсккоммунэнергосервис» денежные средства в сумме 57 921 руб.

14 августа 2009 года открытым акционерным обществом «Курские электрические сети» (в настоящее время акционерное общество «Курские электрические сети») (Заказчик) с областным государственным учреждением «Государственная экспертиза проектов Курской области» (Исполнитель) заключен договор №9-778/778 на проведение экспертизы проектной документации «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП №170 к зданию скорой медицинской помощи в г. Курске», во исполнение которого соответствующая экспертиза была проведена областным государственным учреждением «Государственная экспертиза проектов Курской области», что подтверждается актом от 22 октября 2009 года №00000868. Стоимость экспертизы составила 5 695 руб. 86 коп.

Открытое акционерное общество «Курские электрические сети» (в настоящее время акционерное общество «Курские электрически сети») в свою очередь произвело оплату выполненных работ в сумме 5 695 руб. 86 коп., что подтверждается платежным поручением от 28 сентября 2009 года №4473.

Также открытым акционерным обществом «Курские электрические сети» (в настоящее время акционерное общество «Курские электрические сети») (Заказчик) 16 сентября 2008 года заключен договор №73/Ю с обществом с ограниченной ответственностью «Землемер» (Подрядчик) на выполнение работ по землеустройству и оформлению землеустроительного дела участка, расположенного по адресу: г. Курск, КЛ 0,4 кВ от ТП №170 к зданию скорой помощи.

Согласно акту приемки выполненных работ от 24 сентября 2008 года соответствующие работы были выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Землемер» и приняты открытым акционерным обществом «Курские электрические сети» (в настоящее время акционерное общество «Курские электрические сети»). Стоимость выполненных работ составила 9 962 руб. 94 коп.

Открытым акционерным обществом «Курские электрические сети» (в настоящее время акционерное общество «Курские электрические сети») указанные работы были оплачены по платежному поручению от 23 сентября 2008 года №3348.

Кроме того, 06 августа 2008 года между открытым акционерным обществом «Курские электрические сети» (в настоящее время акционерное общество «Курские электрические сети») (Заказчик) и муниципальным унитарным предприятием «Центр архитектуры и градостроительства г. Курска» (Исполнитель) заключен договор №328-08, по которому Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить следующие виды работ: акт выбора земельного участка (трассы) для строительства КЛ-0,4 кВ объекта «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП №170 к зданию скорой медицинской помощи в                    г. Курске».

Работа по данному договора была выполнена Заказчиком и принята Исполнителем, что подтверждается актом сдачи-приемки работ от 06 августа 2008 года. Стоимость выполненных работ составила 2 190 руб.

По платежному поручению от 13 августа 2008 года №2911 открытое акционерное общество «Курские электрические сети» (в настоящее время акционерное общество  «Курские электрические сети») оплатило соответствующие работы, перечислив на счет муниципального унитарного предприятия «Центр архитектуры и градостроительства г. Курска» денежные средства в сумме 2 190 руб.

На основании решения Комитета по управлению имуществом Курской области от 19 ноября 2008 года №01-18/2633 соответствующий акт выбора земельного участка был утвержден, земельный участок площадью 440 кв. м, из категории земель населенных пунктов, расположенный по адресу: г. Курск, в районе детской областной больнице по ул. Кольцова, предоставлен открытому акционерному обществу «Курские электрические сети» (в настоящее время акционерное общество «Курские электрические сети») в аренду сроком на 364 дня для проектирования и строительства объекта «КЛ-0,4 кВ от ТП №170 к зданию скорой медицинской помощи в г. Курске».

В соответствии с обозначенным решением 15 декабря 2008 года между Комитетом по управлению имуществом Курской области (Арендодатель) и открытым акционерным обществом «Курские электрические сети» (в настоящее время акционерное общество «Курские электрические сети») (Арендатор) заключен договор №1873-08 ю аренды земельного участка из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: г. Курск, в районе детской областной больнице по ул. Кольцова, для проектирования и строительства объекта «КЛ-0,4 кВ от ТП №170 к зданию скорой медицинской помощи в г. Курске».

Срок аренды установлен в пункте 2.1 договора аренды: с 19.11.2008 до 18.11.2009.

Размер арендной платы составляет 7 161 руб. 25 коп.

По акту приема-передачи от 15 декабря 2008 года соответствующий земельный участок был передан в пользование открытому акционерному обществу «Курские электрические сети» (в настоящее время «Курские электрические сети»).

На основании решения Комитета по управлению имуществом Курской области от 04 марта 2010 года №01-18/310 между Комитетом по управлению имуществом Курской области (Арендодатель) и открытым акционерным обществом «Курские электрические сети» (в настоящее время акционерное общество «Курские электрические сети») (Арендатор) заключен договор №2876-10 ю аренды земельного участка из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: г. Курск, в районе детской областной больнице по ул. Кольцова, для проектирования и строительства объекта «КЛ-0,4 кВ от ТП №170 к зданию скорой медицинской помощи в г. Курске».

Размер арендной платы за участок составляет 9 249 руб. 65 коп. (пункт 3.1 договора аренды).

Как следует из представленных в материалы дела документов (платежных поручений, выписок по счету ответчика, акта сверки), открытым акционерным обществом «Курские электрические сети» (в настоящее время акционерное общество «Курские электрические сети») арендная плата по соответствующим договорам аренды была внесена в общей сумме 16 410 руб. 90 коп.

Кроме того, ответчиком были разработаны технические условия на осуществление технологического присоединения энергопринимающего устройства истца с присоединяемой мощностью 126,3 кВт.

Стоимость разработки и выдачи соответствующих технических условий, определенная на основании Постановления Комитета по тарифам и ценам Курской области от 18 июня 2007 года №18, составила 880 руб. 79 коп. 

Общий размер расходов ответчика составил 93 061 руб. 49 коп.

Расходы были понесены истцом в рамках выполнения мероприятий по подготовке и выдаче технических условий, выполнению технических условий по созданию технической возможности технологического присоединения со стороны Исполнителя в соответствии с пунктом 1.3 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 15 ноября 2007 года №795.

Согласно представленным в материалы дела документам и пояснениям сторон указанный договор был расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.

В настоящее время на основании Постановления Администрации Курской области от 23 декабря 2016 года №990-п заказчиком по строительству объекта: «Станция скорой помощи по ул. Энгельса в г. Курске» определено областное казенное учреждение «Управление капитального строительства Курской области», с которым акционерным обществом «Курские электрические сети» был заключён договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 10 марта 2017 года №90/13, на основании которого разработаны новые технические условия.

Исходя из положений пункта 1 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая разъяснения, данные в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №1 (2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 04 марта 2015 года, суд приходит к выводу о том, что расторжение договора на технологическое присоединение в связи с односторонним отказом заказчика от его исполнения не лишает исполнителя права на возмещение понесенных затрат, связанных с выполнением работ по изготовлению технических условий и созданию технической возможности технологического присоединения. 

Довод ответчика о том, что ответчик не ставил в известность истца о выполнении соответствующих мероприятий, судом не принимается во внимание, так как данное обстоятельство не является основанием для освобождения истца от обязанности возместить ответчику фактически понесенные последним расходы в рамках исполнения договора.

Учитывая, что соответствующие расходы были понесены акционерным обществом «Курские электрические сети» в связи с исполнением договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 15 ноября 2007 года №795, суд признает обоснованным возмещение указанных расходов за счет истца, ввиду чего не находит оснований для взыскания с ответчика в пользу истца денежных средств 93 061 руб. 49 коп. и оставляет заявленные исковые требования без удовлетворения.

Расходы по уплате государственной пошлины в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 152, 167-170, 176, 177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

Р  Е  Ш  И  Л:

В удовлетворении исковых требований областному бюджетному учреждению здравоохранения «Курская городская станция скорой медицинской помощи» Комитета здравоохранения Курской области отказать.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, в Арбитражный суд Центрального округа, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                        Е.А. Волкова