254/2018-176343(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-3841/2018

город Саратов

03 октября 2018 года

Руководствуясь статьями 110,,148, 149, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «ПКЦ-Строй» к  Обществу с ограниченной ответственностью «Загородный комплекс «Гермес» о взыскании  денежных средств за выполненные работы по договору строительного подряда № 01/17 от  13.02.2017 в размере 2888541,60 руб., пени за задержку оплаты денежных средств,  предусмотренных условиями договора строительного подряда № 01/17 от 13.02.2017, в размере  2293654 руб., о взыскании денежных средств за работы по договору строительного подряда   № 10 от 13.04.2017 в размере 1134821,10 руб., пени за задержку оплаты денежных средств,  предусмотренных условиями договора строительного подряда № 10 от 13.04.2017, в размере  756548 руб., о взыскании денежных средств за выполненные работы по договору строительного  подряда № 11 от 13.04.2017 в размере 1957904 руб. 10 коп., пени за задержку оплаты денежных  средств, предусмотренных условиями договора строительного подряда № 11 от 13.04.2017, в  размере 1305270 руб. - оставить без рассмотрения.  

Встречный иск Общества с ограниченной ответственностью «Загородный комплекс  «Гермес» к Обществу с ограниченной ответственностью «ПКЦ-Строй» удовлетворить.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ПКЦ-Строй» в пользу  Общества с ограниченной ответственностью «Загородный комплекс «Гермес» неустойку за  нарушение конечного срока выполнения работ по договору строительного подряда № 01/17 от  13.02.2017 года в размере 9705497 рублей, неустойку за нарушение конечного срока  выполнения работ по договору строительного подряда № 10 от 13.04.2017 года в размере  3858391 рубль, неустойку за нарушение конечного срока выполнения работ по договору  

строительного подряда № 11 от 13.04.2017 в размере 6656873 рублей, расходы по оплате  государственной пошлины в размере 124104 рублей.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную, кассационную  инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, путем подачи соответствующей жалобы через арбитражный суд первой  инстанции.  

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1