Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-300763/19-173-79

г. Москва

17 марта 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 26 февраля 2020 года

Полный текст решения изготовлен 17 марта 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Председательствующего: судьи Фортунатовой Е.О.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСФЕРА" (125009, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ТВЕРСКАЯ, ДОМ 9, СТРОЕНИЕ 7, ЭТАЖ 3, КОМНАТА 8, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.07.2011, ИНН: 

<

***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ОБУСТРОЙСТВУ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ" (450097, 

<

...>, , ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 03.12.2008, ИНН: 

<

***>)

о взыскании задолженности и неустойки

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания

УСТАНОВИЛ:

ООО "ЭКОСФЕРА" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ОБУСТРОЙСТВУ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ" о взыскании задолженности по договору №151-1-18/СП от 22.06.2018г. в размере 620 000 руб., неустойки в размере 70 990 руб.

Ответчик в судебное заседание не явился, письменный мотивированный отзыв, возражений не представил, о дате, месте и времени проведения судебного заседания извещен надлежащим образом в порядке ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).  

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд пришел к выводу об  обоснованности исковых требований.

Как следует из материалов дела, между сторонами 22.06.2018г.  был заключен договор №151-1-18/СП, по условиям которого  ООО "ЭКОСФЕРА" (Исполнитель) обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора и иными документами, являющимися приложениями к настоящему договору, в установленный Договором срок выполнить следующие работы по объекту «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС). Вахтовый жилой комплекс (ВЖК)»:

- исчисление размера вреда водным биоресурсам, включая при необходимости математическое моделирование распространения взвешенных веществ при проведении работ,

- методическое сопровождение разработанных материалов при их согласовании в Федеральном агентстве по рыболовству (п. 1.1 Договора)

Результатом работ, согласно п. 1.2 Договора, являются:

- расчет размера вреда водным биоресурсам,

- согласование строительства объекта Федеральным агентством по рыболовству.

Оплата этапов работ, в соответствии с п. 2.3 Договора, производится по счетам, выставленным Исполнителем, в соответствии с условиями Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней после выполнения, согласования и сдачи-приемки этапов работ, путем подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненного этапа работ, согласно Календарному плану-графику работ.

Дополнительным соглашением №3 от 30.04.2019г. к Договору Исполнитель обязался по Заданию Заказчика ООО "НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ОБУСТРОЙСТВУ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ"  выполнить дополнительный объем работ по корректировке отчета о результатах исследования влияния на водные биоресурсы и среду их обитания объекта: «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС). Вахтовый жилой комплекс (ВЖК). Этап 1» и согласование откорректированной документации в Федеральном агентстве по рыболовству (Этап 2) в соответствии с Техническим Заданием (Приложение № 1 к настоящему Соглашению).

Стоимость выполнения дополнительного объема работ, указанного в п.1 Дополнительного соглашения №3 составляет 620 000 руб., в соответствии со Сметой (Приложение №2 к настоящему Соглашению).

Сроки выполнения дополнительного объема работ, указанного в п.1 настоящего Соглашения, определены в Календарном плане-графике работ (Приложение №3 к настоящему Соглашению) и составляют:

- по первому этапу 1 месяц с даты подписания дополнительного соглашения,

- по второму этапу 1 месяц с даты выполнения первого этапа работ.

Согласно представленным Актам сдачи-приемки выполненных работ №23 от 21.05.2019г., №33 от 03.07.2019г., установленные Дополнительным соглашением №3 к Договору работы в согласованные сроки были выполнены Исполнителем и приняты без замечаний Заказчиком, но в определенный Договором срок оплачены не были, в связи с чем ответчику 20.09.2019 было направлено требование о погашении задолженности №262 от 19.09.2019г., неисполнение которого послужило основанием для обращения с настоящим иском.

В соответствии с п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ч. 1 ст. 720 ГК РФ Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

В соответствии с ч. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

Согласно положениям статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается.

Ответчиком, в нарушение ст. 9, 65 АПК РФ в материалы дела не представлено доказательств, свидетельствующих об уплате задолженности.

Судом установлено, что Исполнителем во исполнение условий Дополнительного соглашения №3 к договору были в полном объеме выполнены и приняты  Заказчиком без замечаний работы на сумму 620 000 руб., каких-либо мотивированных замечаний с составлением Акта о выявленных недостатках Заказчик не представил, на дату вынесения решения оплату не произвел, в связи с чем требование о взыскании с ответчика указанной задолженности на основании ст. 309, 702 ГК РФ подлежит удовлетворению.

Истцом помимо взыскания суммы основного долга заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки на основании п. 5.4  Договора 

Согласно 1 ст. 329 ГК РФ, исполнение обязательств может обеспечиваться в том числе, неустойкой. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (п. 1 ст. 330 ГК РФ).

Пунктом 5.4. Договора предусмотрено, что в  случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные настоящим Договором, Исполнитель, при условии выполнения им своих обязательств по Договору, вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки.

Поскольку судом установлено надлежащее исполнение истцом обязательств по Дополнительному соглашению №3 и  наличие у ответчика долга перед истцом за выполненные, но не оплаченные работы, то в силу ст. 330 ГК РФ и пункта 5.4 договора, требование истца о взыскании с ответчика неустойки за неисполнение обязательств за период с 01.06.2019 по 14.10.2019 в размере 70 990 руб., согласно проверенному судом расчету,  подлежит удовлетворению.

 Судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

 Руководствуясь ст.ст. 309, 310,  330, 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 4, 65, 68, 71, 102, 110, 123, 156, 167-170, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ОБУСТРОЙСТВУ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ" (450097, 

<

...>, , ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 03.12.2008, ИНН: 

<

***>) 

в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСФЕРА" (125009, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ТВЕРСКАЯ, ДОМ 9, СТРОЕНИЕ 7, ЭТАЖ 3, КОМНАТА 8, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.07.2011, ИНН: 

<

***>) задолженность в размере 620 000 (шестьсот двадцать тысяч) руб. 00 коп., неустойку в размере 70 990 (семьдесят тысяч девятьсот девяносто) руб. 00 коп., а также расходы по уплате госпошлины в размере 16 820 (шестнадцать тысяч восемьсот двадцать) руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

         Судья                                                                                    Е.О. Фортунатова