Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-20433/23

13 сентября    2023  года

г.Москва

Резолютивная часть объявлена 06 сентября    2023  года. 

Полный текст решения изготовлен 13 сентября    2023 года. 

Судья Арбитражного суда  Московской области Р.С. Солдатов , 

при ведении протокола секретарем А.И. Руш

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-20433/23

по исковому заявлению ООО "СУ № 157" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО "ДОМКОМ СТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании задолженности по договору подряда № СУ-ДКС/0312 21 от 03.12.2021г. в размере 2 066 039, 74 руб., расходов по оплате госпошлины,

При участии в судебном заседании - согласно протоколу.

УСТАНОВИЛ:

ООО "СУ № 157" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО "ДОМКОМ СТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании задолженности по договору подряда № СУ-ДКС/0312 21 от 03.12.2021г. в размере 2 066 039, 74 руб., расходов по оплате госпошлины.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме. Просил исковые требования удовлетворить по основаниям изложенным в иске.

Представитель ответчика полагал правомерным в удовлетворении иска отказать.

Исследовав в полном объеме все представленные в материалы дела письменные доказательства, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, арбитражный суд установил следующее.

03 Декабря 2021 г. Истец (далее «Заказчик (Истец)») и Ответчик (далее «Подрядчик (Ответчик)») заключили договор подряда № СУ -ДКС/0312 21 (далее - «Договор подряда»).

В соответствии с п. 2.1. Договора подряда, Подрядчик (Ответчик), в установленный Договором срок, по заданию Заказчика (Истца), в соответствии с переданной Заказчиком (Истцом) рабочей документацией со штампом «В производство работ», Сводным расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к настоящему Договору) обязался, действующими нормативными документами, с использованием давальческих материалов, согласно Ведомости давальческих материалов (Приложение № 3 к настоящему Договору) выполнить своими и/или привлеченными силами работы по облицовочной кладке с 20 по 25 этаж (секции 4,5) на Объекте строительства: «Жилой дом, расположенный по адресу: 

<

...>». Заказчик (Истец) же обязался оплатить выполненные работы в соответствии с п.3.6. Договора подряда.

Сводным расчетом стоимости работ по Договору подряда была установлена стоимость Работ -4 433 976,00 руб.

Дополнительным соглашением № 3 от 21 февраля 2022 г. была увеличена стоимость Работ - до 17 793 474,33 руб.

Пунктом 2.2. Договора подряда (Приложением № 2) установлены сроки выполнения работ (с 15 декабря 2021 г. по 20 января 2022 г.).

Дополнительным соглашением № 3 от 21  февраля 2022 г. стороны установили новые сроки выполнения работ: дата начала - 03 января 2022 г.; дата окончания - 31 марта 2022 г.

Пунктом 2.3. Договора подряда, установлено, что датой окончания срока действия договора является выполнение сторонами всех обязательств, предусмотренных Договором.

Сторонами установлено, что в соответствии с пунктом 3.3. Договора подряда, в цену Договора включена стоимость всех затрат Подрядчика (Ответчика), необходимых для выполнения работ по строительству Объекта, в соответствии с перечнем работ, предусмотренным Сводным расчетом стоимости работ.

Предложением 3 пункта 3.4. Договора подряда установлено, что оплату расходов, основой которых не является письменная договоренность сторон, отраженная соответствующим дополнительным соглашением, берет на себя Подрядчик (Ответчик).

Пунктом 3.5. Договора подряда стороны предусмотрели оплату аванса в размере 15% от цены Договора подряда, что составляет 665 096,40 руб.

Дополнительным соглашением №1 от 27.12.2021 г. стороны увеличили размер аванса, согласно п.3.5 до 40%, что составляет 1 773 590,40 руб.

Дополнительны соглашение №3 от 21.02.2022 г. стороны увеличили сумму аванса до 3 441 744,22 руб. (с фиксацией факта, что с учетом части произведенной оплаты, Заказчик (Истец) доплачивает 1313 435,74 руб.

В соответствии с п.3.6. Договора подряда, оплата выполненных в соответствующий отчетный период Работ производится Заказчиком (Истцом) с зачетом ранее уплаченного авансового платежа и суммы гарантийного удержания, согласованных Сторонами в п.3.5. и п.3.9. настоящего Договора. При этом зачет ранее уплаченного авансового платежа может быть произведен как пропорционально объему выполненных работ, так и в большем размере по Соглашению Сторон. Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты наступления последнего (по хронологии из нижеперечисленных событий:

Окончания Работ в соответствующем отчетном периоде (подписания обеими сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в отношении Работ, выполненных в соответствующем отчетном периоде).

Получения Заказчиком (Истцом) от Подрядчика (Ответчика) пакета исполнительной документации, в отношении Работ, выполненных в соответствующем отчетном периоде.

Получения Заказчиком (Истцом) от Подрядчика (Ответчика) счета на оплату и счет-фактуры.

В соответствии с п.3.9. Договора подряда, сумма гарантийного удержания (далее по тексту -«Гарантийное удержание») по Договору составляет 5,0 % (пять процентов) от Цены Работ (п.3.1 настоящего Договора) и удерживается Заказчиком (Истцом) в качестве обеспечения выполнения Подрядчиком (Ответчиком) принятых на себя обязательств. Гарантийное удержание выплачивается Заказчиком (Истцом) в два этапа, при условии получения Заказчиком (Истцом) от Подрядчика (Ответчика) соответствующих счетов на оплату:

50% от суммы Гарантийного удержания выплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки результата Работ;

50% от суммы Гарантийного удержания выплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта.

Гарантийное удержание обеспечивает обязанность Подрядчика (Ответчика) возместить документально подтвержденные убытки Заказчика или уплатить неустойку в случае нарушения Подрядчиком (Ответчиком) Договора.

Предложением 4 пункта 3.9. Договора подряда стороны установили, что в случае наличия денежных требований Заказчика (Истца) к Подрядчику (Ответчику), связанных с возмещением убытков, возвратом неотработанного аванса, уплаты неустойки, и иных денежных требований, обязательство Заказчика (Истца) по уплате Подрядчику (Ответчику) Гарантийного удержания (как в части, так и в целом) прекращаются зачетом - по заявлению Заказчика (Истца) - в размере, пропорциональном имеющимся встречным требованиям Заказчика (Истца) к Подрядчику (Ответчику).

В соответствии с пунктом 4.2. Договора подряда, Заказчик (Истец) передает в монтаж материалы для производства работ в соответствии с Рабочей документацией и Ведомостью давальческих материалов строго по заявкам Подрядчика (Ответчика) (Приложение №3 к настоящему Договору).

Пунктом 4.2.2. Договора подряда установлено, что Подрядчик (Ответчик) обязан за 3 (три) рабочих дня до начала очередного этапа производства Работ указанных в пункте 2.1. Договора, направить Заказчику (Истцу) заявку о передаче давальческого материала на Объект.

Договором подряда, пунктом 4.2.3. предусмотрено, что при выполнении работ с привлечением материалов Заказчика (Истца), одновременно с подписанием Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) стороны подписывают акт на фактический расход материала Заказчика (Истца). Данный пункт также дублируется пунктом 4.8. Договора подряда.

Предложением 1 пункта 4.3. стороны установили, что Подрядчик (Ответчик) принимает на себя обязательства по обеспечению Работ материалами, оборудованием, конструкциями и изделиями, необходимыми для их выполнения, не указанными в Ведомости давальческих материалов.

Стороны предусмотрели, что в соответствии с пунктом 4.8. Договора подряда, при выполнении работ с привлечением материалов Заказчика (Истца), одновременно с подписанием Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) стороны подписывают акт на фактический расход материала Заказчика (Истца).

Пунктом 4.9 Договора подряда определено, что Подрядчик (Ответчик) не позднее чем через 5(пять) дней после подписания акта на фактический расход материала Заказчика (Истца), передает Заказчику (Истцу) неизрасходованные материалы по акту приема-передачи материалов.

Согласно пункту 5.1.7. Договора подряда, Подрядчик (Ответчик) обязан незамедлительно известить Заказчика (Истца) и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Заказчика (Истца) последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

иных, не зависящих от Подрядчика (Ответчика) обстоятельств, угрожающих качеству выполняемых Работ;

иных обстоятельствах, могущих повлечь изменение объемов и (или) сроков выполнения Работ.

Стороны установили пунктом 5.1.8. Договора подряда, что Подрядчик (Ответчик) обязан со дня начала Работ до их завершения вести общий журнал работ (КС-6), а также иную исполнительную документацию в соответствии с условиями Договора и действующими нормами и правилами, СНиП.

Пунктом 5.1.9. Договора подряда, установлена обязанность Подрядчика (Ответчика) о предоставлении Заказчику (Истцу) ежемесячно отчетов о ходе выполнения Работ. Отчеты должны предоставляется одновременно с документами, предусмотренными Договором.

Сторонами согласовано, в соответствии с пунктом 5.1.11. Договора подряда, что Подрядчик (Ответчик) обязан к моменту готовности результата Работ к приемке передать Заказчику (Истцу) по Акту приема-передачи полный пакет Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах (оригиналы), проведенные испытания и полученные при этом результаты, перечень всех имевших место отступлений при реализации Рабочей документации и иных документов, относящихся к деятельности Подрядчика (Ответчика). Количество предоставляемой документации может быть изменено по усмотрению Заказчика (Истца).

Пунктом 5.2.4. предусмотрен исчерпывающий перечень согласованных сторонами прав, когда Подрядчик (Ответчик) вправе в одностороннем порядке приостановить производство Работ, а именно:

Подрядчик (Ответчик) вправе приостановить производство Работ по Договору, когда обязательства Подрядчика (Ответчика) по выполнению Работ обусловлены исполнением Заказчиком (Истцом) встречных обязательств по Договору, а именно:

необоснованного отказа (при отсутствии мотивированного письменного отказа Заказчика (Истца)) Заказчика (Истца) от подписания Актов о приемке выполненных работ (в т.ч. промежуточных);

не предоставление Заказчиком (Истцом) Рабочей документации со штампом: «В производство работ»  в  объеме,  необходимом  и  достаточном  Подрядчику  (Ответчику)  для  выполнения  Работ, предусмотренных настоящим Договором и в сроки, обеспечивающие соблюдение Подрядчиком (Ответчиком) Графика производства работ.

Пунктом 6.1. Договора подряда, установлено, промежуточная приемка выполненных работ производится один раз за отчетный период, для чего Подрядчик (Ответчик) предоставляет Заказчику (Истцу) акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) счет и счет-фактуру. До 10 числа, следующего месяца за отчетным, Подрядчик (Ответчик) предоставляет Заказчику (Истцу) комплект исполнительной документации на объем выполненных работ за один календарный месяц и не более З(трех) рабочих дней рассматривает, и подписывает предоставленные документы, а также передает их Подрядчику (Ответчику), или направляет Подрядчику (Ответчику) мотивированный отказ.

Стороны установили, что в соответствии с п.6.3. Договора подряда, сдача комплекса всех выполненных Подрядчиком (Ответчиком) Работ по Договору и их приемка осуществляется Заказчиком (Истцом) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, указанной в письменном уведомлении Подрядчика (Ответчика) о готовности к сдаче комплекса выполненных Работ, оформляется Актом окончательной приемки выполненных работ (Приложение №5 к Договору), итоговой Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на весь объем выполненных работ, с предоставлением Подрядчиком (Ответчиком) Заказчику (Истцу) Журнала учета выполненных работ (форма КС-6), полного комплекта исполнительной документации на выполненный объем Работ. При сдаче Работ с необходимостью проведения предварительных испытаний, приемка таких Работ может осуществляться только при положительном результате указанных испытаний.

Стороны установили, что руководствуясь пунктом 10.2. Договора подряда, Заказчик (Истец) вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления соответствующего уведомления Подрядчику (Ответчику), с указанием даты предполагаемого отказа в случаях:

Нарушения Подрядчиком (Ответчиком) сроков начала или окончания выполнения этапов Работ, установленных в графике производства Работ (Приложение №2), на 10 (десять) календарных дней.

Договором подряда установлено, что в соответствии с пунктом 13.1., Подрядчик (Ответчик) ежемесячно компенсирует Заказчику (Истцу) расходы по охране территории объекта, пользованию временными дорогами, обеспечением технической документацией и координацией Работ и другие услуги, необходимые для производства Работ Подрядчиком (Ответчиком) по настоящему Договору, в размере 1,5 (одна целая пять десятых) % от стоимости выполненных Работ с последующим удержанием в порядке, установленном в п. 3.6. Договора. Стоимость таких услуг отражается в справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за отчетный период.

В соответствии с п.3.5. Договора подряда и Дополнительным соглашением № 3 от 21.02.2022 г. (предусматривающем  увеличение  аванса за  весь  период до  3 441 744,22  труб.),  Истец  оплатил Ответчику аванс 3 441 744,22 руб. 

Истцом также были произведены Ответчику оплаты работ, которые выполнены.

Вместе с оплатой авансов, сумма оплат составила 13 189 356,03 руб.

В соответствии с п. 13.1. Истец компенсировал свои расходы по охране территории объекта, пользованию временными дорогами, обеспечением технической документацией и координацией Работ в соответствии с условиями Договора подряда с сумму в размере 211 593,96 руб.

Итого   вместе   с   Генподрядными   услугами,   Истец   произвел   расчеты   с   Ответчиком   на 13400 949,99 руб.

Разница между объемом выполненных Ответчиком работ на 14 106 263,14 руб. и произведенными расчетами на 13 400 949,99 руб. составляла гарантийное удержание и равна была 14106 263,14 руб. - 13 400 949,99 руб. = 705 313,15 руб.

В согласованный сторонами срок, Ответчик работы по Договору подряда не выполнил, чем  нарушил п.2.2. Договора подряда и п.1. ст. 740 ГК РФ об обязанности Подрядчика выполнить работы (построить объект) в обусловленный договором срок.

Ответчик самовольно прекратил Работы без извещения Заказчика о приостановке работ после 04.05.2022, чем нарушил п.2.1., п.5.1.7. Договора подряда об обязательном уведомлении Заказчика при прекращении работ и п.4 ст.1, п.1 ст.716 ГК РФ.

При этом от Ответчика не поступало уведомления о приостановлении работ.

Ответчик нарушил Договор подряда по объему выполненных работ, которые были выполнены на сумму 14 106 263,14 руб., чем нарушил п.2.1. Договора подряда и п.1 ст. 702 ГК РФ.

Подрядчик (Ответчик) не направляя Заказчику (Истцу) заявки о передаче давальческого материала на Объект, чем нарушал п.4.2.2 Договора подряда.

Несмотря на направленные многочисленные запросы, Ответчик не предоставил Истцу на выполненные работы (которые приняты в двухстороннем порядке на 14 106 263,14 руб.) отчеты о ходе выполнения работ, журналы производства работ, иную исполнительную документацию на объем частично выполненных работ, чем нарушил п.5.1.9, 5.1.11, 6.1. Договора подряда.

Ответчик не предоставил Истцу счет-фактуры в объеме выполненных работ. Так Счет-фактура на сумму 687 559,39 руб. была неверно оформлена по дате оформления и по номеру платежного документа, несмотря на многочисленные направленные в адрес Ответчика запросы, чем нарушен п.3.6.3. Договора подряда и положения НК РФ, что приравнивается к непредставлению счет-фактуры на эту сумму.

По утверждению истца, ответчик не отчитался за давальческий материал и не возвратил оставшийся после выполнения работ материал Истцу в соответствии с п. 4.9. Договора подряда. Не предоставлены отчеты, подтверждающие расход давальческих материалов на сумму 801 671,22 руб., что является нарушением п.4.9 Договора подряда и п.2. ст. 713 ГК РФ.

Истец был вынужден произвести реализацию в адрес Ответчика вышеуказанного давальческого материала и начислить на него НДС 20% (который составил 160 334,24 руб.). Стоимость реализованного Ответчику материала составила 962 005,46 руб.

Сложившиеся между сторонами отношения, возникшие в связи с заключением Договора, по своей правовой природе, являются подрядными, регулируются, помимо общих норм об обязательствах, положениями главы 37 ГК РФ.   

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. 

В соответствии со ст.740 ГК РФ  по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно статьям 711, 746 ГК РФ обязанность заказчика по оплате подрядчику обусловленной договором цены возникает с момента сдачи результатов выполненных работ.

На основании статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения принятых на себя обязательств не допускается. 

Относительно требования о взыскании стоимости реализованного давальческого материала истцом не учтено следующее.

В период с 03 декабря 2021 года по 31 июля 2022 года Ответчик выполнил работы общей стоимостью 22 875 085,38 рублей, в т.ч. НДС. В отношении работ стоимостью 14 106 263,14 рублей, в т.ч. НДС, акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3 (№№ 1 – 15) подписаны Истцом, в отношении работ стоимостью 8 768 822,24 рублей, в т.ч. НДС, акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3 (№№ 16) не подписаны Истцом. 

Применительно к условиям договора истец не доказал факт передачи давальческого материала, в связи в с чем в указанной части заявленные требования удовлетворению не подлежат.

Ввиду того, что сроки выполнения  работ были нарушены, истец заявил требование о взыскании с ответчика неустойки в размере 1 074 034,28 руб.

Как установлено в статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

Стороны установили, что за нарушение сроков окончания выполнения Работ не по вине Заказчика (Истца), Заказчик (Истец) вправе потребовать от Подрядчика (Ответчика) уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от Цены Договора за каждый день просрочки до момента окончания просроченных Работ, но не более 10% (десяти процентов) от Цены Договора (пункт 8.4. Договора подряда).

Пунктом 9 Приложения № 6 к Договору подряда предусмотрена ответственность, за отсутствие комплекта исполнительной документации на предъявляемую к освидетельствованию работу, в виде штрафа 30 000,00 руб.

Расчет, представленный истцом, судом проверен и признан верным и подлежащим применению.

Оснований для снижения неустойки в соответствии со ст. 333 ГК РФ Арбитражный суд Московской области  не усматривает.

В силу ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. При этом согласно ст.68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. Согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, стороны пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 8, 307, 310, 330, 702,708, 711, 753  , Гражданского кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области  полагает, что заявленные исковые требования подлежат  частичному удовлетворению.

Расходы по оплате государственной пошлины распределяются между сторонами в соответствии со ст.ст. 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями ст. 49, 110, 112, 150, 151, 162, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ДОМКОМ СТРОЙ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СУ № 157"  1 104 034,28 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере  17 810,62 руб. 

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

 

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Десятый арбитражный апелляционный суд. 

СудьяР.С. Солдатов