Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru 

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Калининград

Дело №

А21-2541/2020

«15»

мая

2020 года

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

рассмотрев в упрощенном порядке дело по иску ООО  "ЛЕНТЕЛЕФОНСТРОЙ-КАЛИНИНГРАД" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО "ЛЕНТЕЛЕФОНСТРОЙ-ПРОЕКТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 671 814,54 рублей

установил.

 Общество с ограниченной ответственностью ООО  "ЛЕНТЕЛЕФОНСТРОЙ-КАЛИНИНГРАД" обратилось в суд с иском к ООО "ЛЕНТЕЛЕФОНСТРОЙ-ПРОЕКТ" о взыскании основного долга в сумме 600 234,31 рублей, неустойки в сумме 71 580,23 рублей.

Дело рассмотрено в  упрощенном порядке.

До вынесения решения истец уточнил требования в части неустойки. Просил взыскать неустойку в сумме 67 160,07 рублей.

 Установлено.

Между сторонами был заключен договор от 18.07.2018 года № 2922968-34-18-П. По условиям договора ООО "ЛЕНТЕЛЕФОНСТРОЙ-КАЛИНИНГРАД" (подрядчик)  обязалось выполнить работы по проектированию и строительству сетей связи на территории города Калининграда и Калининградской области на основании согласованных сторонами дополнительных соглашений, а ООО "ЛЕНТЕЛЕФОНСТРОЙ-ПРОЕКТ" (заказчик) обязалось работы принять и оплатить.

В соответствии с пунктом 2.4.2 договора окончательный расчет за работы производится в течение 30 календарных дней на основании подписанных сторонами актов выполненных работ.

В соответствии с пунктом 9.4 договора за нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает неустойку в размере 1/365 действующей ключевой ставки ЦБ России от суммы,  просроченной к оплате, за каждый день просрочки.

 В соответствии с пунктом 14.4 договора споры по нему рассматриваются в Арбитражном суде по месту исполнения договора.

В соответствии с дополнительным соглашением от 12.09.2018 года № 2 к договору от 18.07.2018 года № 2922968-34-18-П подрядчик принял на себя обязательства  выполнить работы по проектированию и строительству сетей связи на территории города Калининграда по 7 адресам, а заказчик обязался оплатить  1 269 112,98 рублей.

В материалы дела представлены подписанные: акт о проектировании от 28.09.2018 года № 1, акты о приемке выполненных работ от 28.09.2018 года №№ 1/2, 2/2, от 5.10.2018 года №№ 3/2, 4/2.

Согласно расчету истца заказчик имеет задолженность по оплате выполненных работ в сумме 30 479,23 рублей.

Согласно расчету истца по положениям пункта 9.4 договора за период с 29.10.2018 года по 03.02.2020 года подлежит уплате неустойка в сумме 7478,44 рублей за нарушение срока оплаты работ.

      Между сторонами был заключен договор от 18.07.2018 года № 2924242-35-18-П. По условиям договора ООО "ЛЕНТЕЛЕФОНСТРОЙ-КАЛИНИНГРАД" (подрядчик)  обязалось выполнить  комплекс работ по проектированию и строительству магистральной и распределительной сети связи на территории города Калининграда и Калининградской области на основании согласованных сторонами дополнительных соглашений, а ООО "ЛЕНТЕЛЕФОНСТРОЙ-ПРОЕКТ" (заказчик) обязалось работы принять и оплатить.

В соответствии с пунктом 2.4.1 договора окончательный расчет за работы производится в течение 30 календарных дней на основании подписанных сторонами актов выполненных работ.

В соответствии с пунктом 9.7 договора за нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает неустойку в размере 1/365 действующей ключевой ставки ЦБ России от суммы,  просроченной к оплате, за каждый день просрочки.

 В соответствии с пунктом 13.4 договора споры по нему рассматриваются в Арбитражном суде по месту исполнения договора.

В соответствии с дополнительным соглашением от 22.11.2018 года № 5 к договору от 18.07.2018 года № 2924242-35-18-П подрядчик принял на себя обязательства  выполнить работы по проектированию и строительству сетей связи на территории города Калининграда, а заказчик обязался оплатить  1 096 810,84 рублей.

В материалы дела представлены подписанные: акт о проектировании от 29.11.2018 года № 1, акт о приемке выполненных работ от 17.12.2018 года №№ 1/5. 

Согласно расчету истца заказчик имеет задолженность по оплате выполненных работ в сумме 205 112,91 рублей.

Согласно расчету истца по положениям пункта 9.7 договора за период с 17.01.2019 года по 03.02.2020 года подлежит уплате неустойка в сумме 18 766,28 рублей за нарушение срока оплаты работ.

В соответствии с дополнительным соглашением от 03.12.2018 года № 7 к договору от 18.07.2018 года № 2924242-35-18-П подрядчик принял на себя обязательства  выполнить работы по проектированию и строительству сетей связи на территории города Калининграда, а заказчик обязался оплатить  1 045 595,41 рублей.

В материалы дела представлены подписанные: акт о проектировании от 10.12.2018 года № 1, акт о приемке выполненных работ от 21.12.2018 года №№ 1/7.

Согласно расчету истца заказчик имеет задолженность по оплате выполненных работ в сумме 364 642,17 рублей.

Согласно расчету истца по положениям пункта 9.7 договора за период с 21.01.2019 года по 03.02.2020 года подлежит уплате неустойка в сумме 40 915,35 рублей за нарушение срока оплаты работ.

Размер задолженности подтвержден подписанным актом сверки расчетов.

Доказательств оплаты долга, возражений в  отношении расчетов ответчиком не представлено.

Требования истца в заявленных суммах подлежат удовлетворению на основании положений статей 309, 310, 330 ГК РФ, положений договоров. 

Руководствуясь статьями 49, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Принять уточненные требования в части неустойки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЛЕНТЕЛЕФОНСТРОЙ-ПРОЕКТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЛЕНТЕЛЕФОНСТРОЙ-КАЛИНИНГРАД" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) основной долг по договору от 18.07.2018 года № 2922968-34-18-П (ДС № 2) в сумме 30 479,23 рублей, неустойку по состоянию на 03.02.2020 года в сумме 7478,44 рублей, основной долг по договору 18.07.2018 года № 2924242-35-18-П (ДС №№ 5, 7) в сумме 569 755,08 рублей, неустойку по состоянию на 03.02.2020 года в сумме 59 681,63 рубля, расходы по госпошлине в сумме  16 348 рублей.

Возвратить  обществу с ограниченной ответственностью "ЛЕНТЕЛЕФОНСТРОЙ-КАЛИНИНГРАД"  из Федерального бюджета госпошлину в сумме 89 рублей.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня принятия решения в полном объеме.

СудьяО.Н. Шкутко