АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина д.74, 

<

...>,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-20418/2024

г. Тюмень

22 августа 2025 года

Резолютивная часть решения вынесена 08 августа 2025 года.

В полном объеме решение изготовлено 22 августа 2025 года.

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Минулиной Д.Х., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Савицкой О.Ю., после перерыва помощником судьи Кузьминой А.Э., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 89 города Тюмени (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 625048, 

<

...>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «СтройКапитал» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 629380, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

<

...>) 

о взыскании неустойки по договору 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, муниципальное казенное учреждение «Тюменское городское имущественное казначейство» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> адрес: 625000, 

<

...>), Счетная палата города Тюмени (

<

...>),

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца: ФИО1, по доверенности № 17 от 13.01.2025 года, личность представителя удостоверена паспортом гражданина Российской Федерации, представлен документ об образовании;

от ответчика: ФИО2, по доверенности № 5/1 от 14.05.2024 года, личность представителя удостоверена паспортом гражданина Российской Федерации, представлен документ об образовании;

от третьего лица: явки нет,

у с т а н о в и л:

В Арбитражный суд Тюменской области обратилось муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 89 города Тюмени (далее – истец) с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «СтройКапитал» (далее – ответчик) о взыскании денежных средств. 

Дело рассматривается с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно спора, муниципальное казенное учреждение «Тюменское городское имущественное казначейство», Счетная палата города Тюмени.

Представитель истца в судебном заседании поддержал требования по доводам, изложенным в иске.

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в отзыве на иск (л.д. 82-87 том 1), согласно которому ответчик в письме № 91/2023 от 30.11.2023 известил истца об окончании строительно-монтажных работ по договору подряда и направил истцу на проверку акты выполненных работ, проверку результата выполненных работ истец поручил МКУ «ТГИК» на основании договора на оказание услуг по проведению строительного контроля от 15.11.2019, по результатам проверки МКУ «ТГИК» установлено, что объемы выполненных работ соответствуют фактическому выполнению и подтверждены исполнительной документацией, выполнены в соответствии с проектной документацией, другими условиями договора, ранее окончания срока проведения проверки МКУ «ТГИК» подрядчик не мог предоставить заказчику акты для подписания, передача подрядчиком полученных от МКУ «ТГИК» актов заказчику указанными выше сопроводительными письмами не свидетельствует о совершении подрядчиком действий по сдаче результата работ (о сроке окончания работ по договору); цель передачи актов не уведомление об окончании работ, а их подписание после проверки объемов и стоимости работ, проводимой с 30.11.2023, довод истца, что спорные работы сдавались ответчиком и принимались истцом поэтапно, по мере их выполнения не соответствует действительности, спорные работы сданы к приемке ответчиком единовременно 30.11.2023, до истечения срока окончания работ по договору подряда, условие договора, определяющее дату окончания работ как дату подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ, не может ставить в зависимость от усмотрения заказчика период ответственности подрядчика за нарушение сроков выполнения работ, работы по договору подряда были выполнены подрядчиком надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства в установленный договором срок, основания для начисления неустойки за просрочку исполнения обязательства подрядчика отсутствуют, в случае признания права на взыскание неустойки учитывая компенсационный характер штрафной санкции и фактические обстоятельства дела, просит суд в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) снизить размер суммы неустойки.

Согласно отзыву Счетной палаты города Тюмени, третье лицо просит удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Согласно отзыву муниципального казенного учреждения «Тюменское городское имущественное казначейство» 30.11.2023 заказчиком направлены акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 30.11.2024 и исполнительная документация, по результатам проверки которых 20.12.2023 учреждением выдана справка о соответствии стоимости объемов выполненных работ проектной документации, направлены акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 №№ 222-232.   

Как следует из материалов дела, между МАОУ СОШ № 89 города Тюмени (далее – заказчик) и ООО «СтройКапитал» (далее – подрядчик) заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: 

<

...>, под размещение детского сада» № 357778 (далее – договор), согласно которому подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить в соответствии с требованиями и условиями настоящего договора работы по капитальному ремонту объекта «Капитальным ремонт здания, расположенного по адресу: 

<

...>, под размещение детского сада» (далее – работы) на объекте заказчика, расположенном по адресу: 

<

...> (далее – объект) согласно Технического задания (Приложение № 1 к Договору), а заказчик обязуется обеспечить приемку выполненных работ, оплатить результаты фактически выполненных подрядчиком обязательств в порядке, на условиях и в сроки, установленные настоящим договором. Услуги по проведению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту на объекте осуществляет муниципальное казенное учреждение «Тюменское городское имущественное казначейство» (сокращенное наименование – МКУ «ТГИК») (пункт 1.2 договора).

В силу пункта 2.1 договора в редакции дополнительного соглашения № 13 начальная цена настоящего договора сформирована в соответствии со сводным сметным расчетом стоимости строительства на выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: 

<

...>, под размещение детского сада», являющегося неотъемлемым приложением к настоящему договору, с учетом всех расходов на выполнение работ, оплату налогов, сборов и других обязательных платежей и составляет 369 411 120 руб., включая НДС 20 %. Цена настоящего договора составляет 511 933 320 руб., в том числе НДС 20 %.

Пунктом 2.4 договора в редакции дополнительного соглашения № 9 оплата выполненных работ производится на основании актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счет-фактур (товарной накладной и т.п.) с представлением документов, подтверждающих оплату оборудования (кассовый чек, платежное поручение).

Оплата выполненных работ производиться в пределах денежных средств, выделенных заказчику, в том числе;

- в 2020 году 53 198 859,68 руб. по актам выполненных работ;

- в 2021 году 74 396 51,07 руб. по актам выполненных работ;

- в 2022 году 188 822 201,96 руб. по актам выполненных работ;

- в 2023 году 218 304 841,29 руб. окончательная оплата по актам выполненных работ.

- Акты по форме КС-3 подписываются только после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.

Дополнительные затраты по нормам ГСНр 81-05-02-2001 в размере 2,82 % применяются для работ, проводимых в период с 15 октября по 20 апреля (зимний период). Для работ, которые по техническим условиям выполняются только при положительной температуре в отапливаемых помещениях, дополнительные затраты по нормам ГСНр 81-05-02-2001 не начисляются.

В силу пункта 2.5 договора в редакции дополнительного соглашения № 6 заказчик имеет право оплатить фактически выполненный подрядчиком объем работы (часть объема работы) по настоящему договору после его завершения в течение 30 дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Окончательный расчет и оплата выполненных работ по настоящему договору производится Заказчиком в течение 30 дней с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, после подписания сторонами акта приема-передачи объекта (строительной площадки) после проведения работ по форме согласно приложению № 3 к настоящему договору. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

Как указано в пункте 3.1 договора в редакции дополнительного соглашения № 12 срок выполнения работ по договору на объекте: с даты заключения договора по 15.12.2023. В указанный срок включается выполнение всего комплекса работ, предусмотренного проектно-сметной документацией, в том числе строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, а также приобретение, комплектация объекта оборудованием, изделиями и материалами, подготовка актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, предоставление заказчику документации, необходимой для эксплуатации объекта. 

Место выполнения работ: здание и прилегающая территория, расположенные по адресу: 

<

...>, под размещение детского сада (пункт 3.2 договора).

По согласованию с заказчиком работы могут выполняться досрочно (пункт 3.3 договора).

В силу пункта 3.4 договора дата, соответствующая конечному сроку работ, указанному в пункте 3.1. настоящего договора, является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения подрядчиком срока выполнения работ по договору.

В силу пункта 3.5 договора при возникновении необходимости в выполнении дополнительных работ по настоящему договору конечный срок выполнения работ, предусмотренный пунктом 3.1. настоящего договора, может быть продлен путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору. Новый срок окончания выполнения работ определяется по соглашению сторон, исходя из сложности и объемов дополнительных работ.

Пунктами 6.2.5, 6.2.9 заказчик обязан оплатить фактически и надлежащим образом выполненные и принятые объемы работ в порядке, на условиях и в сроки, установленные разделом 2 настоящего договора. В течение трех календарных дней с момента подписания настоящего договора письменно согласовать с подрядчиком порядок оплаты фактически потребленных в связи с производством работ коммунальных услуг за период с момента подписания сторонами акта приема-передач и объекта (строительной площадки) для проведения работ по форме приложения № 2 к настоящему договору до момента подписания акта приема-передачи объекта (строительной площадки) после проведения работ по форме приложения № 3 к настоящему договору, а также контролировать своевременность их оплаты.

В соответствии с пунктом 7.1.3 договора надлежащим образом в порядке, объемах и сроки, установленные настоящим договором, выполнить работы, соответствующие требованиям и условиям настоящего договора, строительным нормам, правилам, требованиям ТУ, ГОСТ, СНиП и ПУЭ и др., сдать в соответствии с правилами приемки работ при строительстве и ремонте результаты работ заказчику в установленный срок в состоянии, соответствующем требованиям настоящего договора. Выполнение работ подрядчиком должно осуществляться после совместного осмотра объекта с представителем учреждения, осуществляющего строительный контроль. Подрядчик обязан в письменном виде согласовать с заказчиком, проектировщиком все оборудование и отделочные материалы, используемые на объекте при выполнении работ, в случае отступления от проектно-сметной документации.

В силу пункта 7.1.37 договора подрядчик в срок не позднее 45 календарных дней до даты окончания выполнения всего комплекса работ направляет заказчику письменное уведомление о завершении работ и назначении времени приемки выполненных работ с приложением документации, подтверждающей выполнение работ (актов выполненных работ, исполнительной документации).

Пунктами 7.1.38, 7.1.39 договора установлено, что при готовности объекта в двухдневный срок известить об этом заказчика в письменной форме, сдать выполненные работы в установленные сроки. После окончания выполнения работ, одновременно с результатом выполненных работ, в полном объеме обеспечить передачу заказчику всей необходимой информации и технической документации для эксплуатации объекта.

Сдать объект заказчику по акту приема-передачи объекта (строительной площадки) после проведения работ по форме приложения № 3 к настоящему договору в срок, установленный пунктом 3.1. настоящего договора, включая подготовку актов выполненных работ и корректировку исполнительной документации (пункт 7.1.42 договора).

Порядок осуществления проверки и сдачи-приемки работ изложен в разделе 8.

Так, в силу пункта 8.3 договор уведомление о завершении работ подрядчик направляет в порядке и в срок, установленный пунктом 7.1.37 настоящего договора.

В соответствии с пунктом 8.4 договора акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 рассматриваются, проверяются и подписываются заказчиком в течение 45 календарных дней со дня их предоставления подрядчиком, при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в соответствии с условиями настоящего договора.

Как указано в пункте 8.5 договора заказчик производит проверку объемов и стоимости выполненных подрядчиком работ, зафиксированных в представленных актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, в том числе на предмет соответствия проектно-сметной документации. В случае обнаружения несоответствий в представленных актах и справках, заказчик возвращает их подрядчику для устранения выявленных несоответствий.

Установлено в пункте 8.6 договора, что проведение учреждением, осуществляющим строительный контроль контрольного мероприятия и его результаты, фиксируются путем составления акта. Сведения о проведении контрольных мероприятий и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно подрядчиком и учреждением, осуществляющим строительный контроль, составляются в 3 экземплярах и подписываются их представителями.

При наличии недостатков в результатах выполненных работ стороны составляют трехсторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. В случае отказа подрядчика от подписания указанного акта в нем делается соответствующая отметка, и акт подписывается представителями заказчика, учреждения, осуществляющего строительный контроль (пункт 8.7 договора).

В силу пункта 8.8 договора подрядчик обязан своими силами и за свой счет в течение 10 календарных дней либо в срок, установленный в акте, фиксирующем недостатки, устранить допущенные в выполненных работах недостатки (дефекты) согласно указанному акту. Работы принимаются после устранения подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков (дефектов). Факт выявления недостатков (дефектов) в результатах выполненных подрядчиком работ, повлекших необходимость их устранения в течение срока, установленного настоящим договором, либо срока, установленного заказчиком, не лишает заказчика права на взыскание с подрядчика штрафных санкций, установленных разделом 11 настоящего договора и не влечет увеличения срока выполнения работ.

В соответствии с пунктом 8.9 договора заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования по назначению и не могут быть устранены подрядчиком.

Согласно пункту 8.11 договора датой окончания выполнения работ считается дата подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.

Датой приемки результата работ заказчиком в полном объеме считается дата подписания сторонами акта приема-передачи объекта (строительной площадки) после проведения работ по форме приложения № 3 к настоящему Договору, который подписывается сторонами только после подписания ими актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

Может осуществляться промежуточная сдача и приемка результата выполненных работ подрядчиком. Заказчик ведет накопительный реестр актов выполненных работ (пункт 8.15 договора).

В силу пункта 8.16 договора заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, направив в адрес подрядчика уведомление об одностороннем расторжении настоящего договора, а также потребовать возмещения убытков в случаях:

а)если подрядчик нарушил срок выполнения работ на срок более чем 30 календарных дней. Факт нарушения срока выполнения работ подтверждается актом о выявленных нарушениях.

В целях составления акта о выявленных нарушениях заказчик направляет в адрес подрядчика уведомление с указанием времени и места составления акта. В случае отсутствия подрядчика в месте составления акта, а равно в случае отказа подрядчика от подписания акта о выявленных нарушениях, о чем делается отметка в акте, акт о выявленных нарушениях подписывается заказчиком.

б)Если подрядчик нарушает срок устранения недостатков (дефектов), указанный в пункте 8.8 настоящего договора.

Факт устранения недостатков (дефектов) в установленный срок подтверждается актом об устранении недостатков.

Факт нарушения сроков устранения недостатков (дефектов) подтверждается актом о выявленных нарушениях.

В целях составления акта о выявленных нарушениях заказчик направляет в адрес подрядчика уведомление с указанием времени и места составления акта. В случае отсутствия подрядчика в месте составления акта, а равно в случае отказа подрядчика от подписания акта о выявленных нарушениях, о чем делается отметка в акте, акт о выявленных нарушениях подписывается заказчиком, учреждением, осуществляющим строительный контроль.

Обязательства сторон по договору прекращаются с 13.05.2024 согласно соглашению (л.д. 61 том 1).

В силу пункта 11.5 договора в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). За неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по настоящему договору заказчик вправе взыскать убытки в полном объеме сверх неустойки, предусмотренной настоящим договором.

В соответствии с пунктом 11.6 договора пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается договором в размере 0,1 процентов от цены договора за каждый день просрочки, уменьшенной на сумму фактически исполненных подрядчиком обязательств.

Письмами № 94/2023 от 20.12.2023, № 01/2024 от 12.01.2024, № 08/2024 от 26.01.2024, № 17/2024 от 30.01.2024, № 10/2024 от 01.02.2024 ответчик для подписания и оплаты направил в адрес истца акты (л.д. 63-69 том 1).

Как указывает истец за период 18.02.2020 - 07.11.2023 ответчиком представлен к приемке истцом объем выполненных работ на общую стоимость 417 633 678,75 руб., подтвержденный актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1-221, объем выполненных работ сдан в пределах согласованного сторонами срока, просрочка выполнения работ отсутствует.

Письмом от 20.12.2023 № 94/2023 ответчиком представлен к приемке истцом объем выполненных работ на общую стоимость 9 186 650,40 руб., подтвержденный актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 10.12.2023 № 222-232, просрочка выполнения работ составила 5 дней (период 16.12.2023 - 20.12.2023).

Письмом от 12.01.2024 № 01/2024 ответчиком представлен к приемке истцом объем выполненных работ на общую стоимость 889 169,26 руб., подтвержденный актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 11.01.2024 № 233-241, просрочка выполнения работ составила 23 дня (период 21.12.2023 - 12.01.2024).

Письмом от 26.01.24 № 08/2024 ответчиком представлен к приемке истцом объем выполненных работ на общую стоимость 54 304 160 (пятьдесят четыре миллиона триста четыре тысячи сто шестьдесят) рублей 40 копеек подтвержденный актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 24.01.2024 № 242 - 279. Просрочка выполнения работ составила 14 дней (период с 13.01.2024 по 26.01.2024).

Письмом от 30.01.2024 № 17/2024 ответчиком представлен к приемке истцом объем выполненных работ на общую стоимость 207 892,80 руб., подтвержденный актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 30.01.2024 № 284, просрочка выполнения работ составила 4 дня (период 27.01.2024 - 30.01.2024).

Письмом от 01.02.2024 № 10/2024 ответчиком представлен к приемке объем выполненных работ на общую стоимость 404 262 руб., подтвержденный актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 30,01,2024 № 208 – 283, просрочка выполнения работ составила 2 дня (период 31.01.2024 - 01.02.2024).

Данные факты установлены актом Счетной палаты города Тюмени по результатами контрольного мероприятия «Проверка использования средств бюджета города Тюмени, направленных на капитальный ремонт МАОУ СОШ № 788 города Тюмени» от 22.12.2023 (л.д. 6-24 том 8), на основании которого финансовым органом контроля в адрес заказчика внесено представление с требованием взыскать с подрядчика неустойку за просрочку исполнения обязательств по договору (л.д. 3-5 том 8).  

В целях досудебного порядка урегулирования спора истец направил в адрес ответчика претензию № 428 от 05.04.2024 (л.д.70-73 том 1), в ответе на претензию ответчик полагает, что основания для начисления пени отсутствуют (л.д.74-76 том 1), в связи с чем ответчик в добровольном порядке сумму пени не оплатил, что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском в порядке реализации статьи 4 АПК РФ, статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

Исследовав материалы дела, оценив, в соответствии со статьями 9, 71 АПК РФ, с учетом принципа состязательности, представленные доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, пояснения сторон, арбитражный суд считает, что заявленные исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

В силу пункта 1 статьи 2 АПК РФ основной задачей судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а также прав и законных интересов Российской Федерации в указанной сфере.

Право на судебную защиту нарушенных прав и законных интересов гарантировано заинтересованному лицу положениями статьи 46 Конституции Российской Федерации, статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 АПК РФ.

При этом право на судебную защиту предполагает конкретные гарантии его реализации и обеспечение эффективного восстановления в правах посредством правосудия, отвечающего требованиям справедливости.

В силу статей 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Пунктом 1 статьи 708 ГК РФ предусмотрено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работ. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В силу части 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность как за нарушение начального и конечного срока выполнения работ, так и за нарушение промежуточных сроков выполнения работ (пункт 2 статьи 708 ГК РФ).

Исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе неустойкой, и другими способами, предусмотренными законом или договором (пункт 1 статьи 329 ГК РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Договорная неустойка устанавливается по взаимному соглашению сторон в соответствии с их волей. При установлении ее размера, порядка исчисления, соотношения с убытками и других условий применения стороны свободны (статей 1, 9, 421 ГК РФ).

Истцом произведен расчет неустойки в соответствии с пунктом 11.6 договора, согласно которому пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается договором в размере 0,1 процентов от цены договора за каждый день просрочки, уменьшенной на сумму фактически исполненных подрядчиком обязательств.

Возражая относительно заявленных требований, ответчик указал, что ответчик в письме № 91/2023 от 30.11.2023 известил истца об окончании строительно-монтажных работ по договору подряда и направил истцу на проверку акты выполненных работ, проверку результата выполненных работ истец поручил МКУ «ТГИК» на основании договора на оказание услуг по проведению строительного контроля от 15.11.2019, по результатам проверки МКУ «ТГИК» установлено, что объемы выполненных работ соответствуют фактическому выполнению и подтверждены исполнительной документацией, выполнены в соответствии с проектной документацией, другими условиями договора, ранее окончания срока проведения проверки МКУ «ТГИК» подрядчик не мог предоставить заказчику акты для подписания, передача подрядчиком полученных от МКУ «ТГИК» актов заказчику указанными выше сопроводительными письмами не свидетельствует о совершении подрядчиком действий по сдаче результата работ (о сроке окончания работ по договору). Цель передачи актов не уведомление об окончании работ, а их подписание после проверки объемов и стоимости работ, проводимой с 30.11.2023; довод истца, что спорные работы сдавались ответчиком и принимались истцом поэтапно, по мере их выполнения не соответствует действительности, спорные работы сданык приемке ответчиком единовременно 30.11.2023, до истечения срока окончания работ по договору подряда, условие договора, определяющее дату окончания работ как дату подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ, не может ставить в зависимость от усмотрения заказчика период ответственности подрядчика за нарушение сроков выполнения работ, работы по договору подряда были выполнены подрядчиком надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства в установленный договором срок, основания для начисления неустойки за просрочку исполнения обязательства подрядчика отсутствуют; в случае признания права на взыскание неустойки учитывая компенсационный характер штрафной санкции и фактические обстоятельства дела, ответчик просит суд в порядке статьи 333 ГК РФ снизить размер суммы неустойки.

Как указано выше, согласно пункту 3.1 договора в редакции дополнительного соглашения № 12 срок выполнения работ по договору на объекте: с даты заключения договора по 15.12.2023. В указанный срок включается выполнение всего комплекса работ, предусмотренного проектно-сметной документацией, в том числе строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, а также приобретение, комплектация объекта оборудованием, изделиями и материалами, подготовка актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, предоставление заказчику документации, необходимой для эксплуатации объекта. Материалами дела подтверждается, что ответчик исполнил обязательства перед истцом, где 

Из материалов дела следует, что ответчик в письме № 91/2023 от 30.11.2023 известил истца об окончании строительно-монтажных работ по договору подряда и направил истцу на проверку акты выполненных работ.

Таким образом, с учетом буквального толкования положений пункта 3.1 договора в редакции дополнительного соглашения № 12 ответчик выполнил работы в установленный договором срок 15.12.2023, подготовив акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и сдав их на проверку 30.11.2023. 

В соответствии с пунктом 8.4 договора акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 рассматриваются, проверяются и подписываются заказчиком в течение 45 календарных дней со дня их предоставления подрядчиком, при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в соответствии с условиями настоящего договора.

Помимо прочего, согласно пункту 8.11 договора датой окончания выполнения работ считается дата подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.

Датой приемки результата работ заказчиком в полном объеме считается дата подписания сторонами акта приема-передачи объекта (строительной площадки) после проведения работ по форме приложения № 3 к настоящему Договору, который подписывается сторонами только после подписания ими актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

Заказчик производит проверку объемов и стоимости выполненных подрядчиком работ, зафиксированных в представленных актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, в том числе на предмет соответствия проектно-сметной документации. В случае обнаружения несоответствий в представленных актах и справках, заказчик возвращает их подрядчику для устранения выявленных несоответствий (пункт 8.5 договора).

Таким образом, пунктами 8.4 и 8.5 договора предусмотрен порядок принятия работ заказчиком. 

Как указано выше, согласно отзыву муниципального казенного учреждения «Тюменское городское имущественное казначейство» 30.11.2023 заказчиком направлены акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 30.11.2024 и исполнительная документация, по результатам проверки которых 20.12.2023 учреждением выдана справка о соответствии стоимости объемов выполненных работ проектной документации, направлены акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 №№ 222-232.   

По результатам выдачи муниципальным казенным учреждением «Тюменское городское имущественное казначейство» справки о соответствии стоимости объемов выполненных работ проектной документации письмами № 94/2023 от 20.12.2023, № 01/2024 от 12.01.2024, № 08/2024 от 26.01.2024, № 17/2024 от 30.01.2024, № 10/2024 от 01.02.2024 ответчик направил для подписания и оплаты акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 №№ 222-232.

Таким образом, по общему правилу, срок на приемку работ заказчиком не включается в период просрочки, что и имеет место в данном случае.

В силу пункта 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

По смыслу пункта 1 статьи 314 и пункта 1 статьи 408 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день, а надлежащее исполнение прекращает обязательство.

Исходя из положений пункта 1 статьи 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В силу абзаца 2 пункта 1 статьи 708 ГК РФ подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Иное может быть установлено законом, иными правовыми актами или предусмотрено договором.

Срок выполнения работы необходимо отличать от срока приемки выполненной работы, который является самостоятельным и может быть установлен в договоре подряда (пункт 1 статьи 720 ГК РФ). Названные сроки разведены в Гражданском кодексе Российской Федерации как терминологически, так и с точки зрения применения последствий их нарушения.

При этом, как правило, соблюдение срока выполнения работы зависит от подрядчика, срока приемки – от подрядчика и заказчика.

Условие договора, определяющее дату исполнения обязательств по выполнению работ как дату подписания заказчиком акта сдачи выполненных работ, не должно ставить в зависимость от усмотрения заказчика период ответственности исполнителя за нарушение сроков выполнения работ.

Право заказчика осуществлять приемку в течение установленного контрактом срока после поступления отчетной документации не отменяет право подрядчика выполнить работу в течение предусмотренного контрактом срока и предъявить работу к сдаче в последний день срока без учета времени на приемку работ. При расчете заказчиком пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения обществом обязательства, в период просрочки исполнения обязательства не подлежат включению дни, потребовавшиеся заказчику для приемки выполненной работы (ее результатов) и оформления итогов такой приемки.

Таким образом, при расчете заказчиком пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, в период просрочки исполнения обязательства не подлежат включению дни, потребовавшиеся заказчику для приемки выполненной работы (ее результатов) и оформления итогов такой приемки.

Аналогичная правовая позиция изложена в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 15.10.2019 № 305-ЭС19-12786.

Исходя из положений пункта 10 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017, при несовершении заказчиком действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или существа обязательства, до совершения которых исполнитель государственного (муниципального) контракта не мог исполнить своего обязательства, исполнитель не считается просрочившим, а сроки исполнения обязательств по государственному (муниципальному) контракту продлеваются на соответствующий период просрочки заказчика.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы (статья 71 АПК РФ).

Исследовав и оценив фактические обстоятельства дела и имеющиеся доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ в их взаимосвязи, доводы и возражения участвующих в деле лиц, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Указанная правовая позиция изложена также в Постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 22.03.2023 № Ф08-2282/2023 по делу № А32-23110/2020.

При изложенных обстоятельствах, оценивая представленные доказательства в совокупности (статья 71 АПК РФ), суд приходит к выводу, что требование истца о взыскании с ответчика пени является необоснованным и не подлежит удовлетворению. Позиция истца основана на неверном понимании и толковании условий договора. 

Согласно статье 112 АПК РФ, вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

В силу части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом (статья 101 АПК РФ).

Истцом при подаче настоящего иска уплачена государственная пошлина в размере 27 283 руб. (платежные поручения № 1066 от 05.09.2024, № 1115 от 11.099.2024).

В связи с отказом истцу в удовлетворении исковых требований, государственная пошлина относится на истца.

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Восьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы в Арбитражный суд Тюменской области.

 Судья

Минулина Д.Х.