ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ 

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

ул. Батюшкова, д.12, г. Вологда, 160001  E-mail: 14ap.spravka@arbitr.ru, http://14aas.arbitr.ru  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А66-15046/2023

г. Вологда

30 мая 2024 года

 

Резолютивная часть постановления объявлена 29 мая 2024 года.  В полном объёме постановление изготовлено 30 мая 2024 года.  

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе  председательствующего Холминова А.А., судей Рогатенко Л.Н. и  Селивановой Ю.В., при ведении протокола секретарём судебного заседания  Михайловой Р.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  публичного акционерного общества «Россети Центр» на  решение Арбитражного суда Тверской области от 21 февраля 2024 года по делу   № А66-15046/2023,  

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Районные электрические  сети» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 171400, Тверская  область, посёлок городского типа Рамешки, улица Новая, дом 1б; далее –  ООО «РЭС») обратилось в суд с иском к публичному акционерному обществу  «Россети Центр» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 119017,  Москва, улица Малая Ордынка, дом 15; далее – ПАО «Россети Центр») о  возложении обязанности подписать договор об осуществлении  технологического присоединения и технические условия, в соответствии с  заявкой на технологическое присоединение ООО «РЭС» от 06.03.2023.  

Решением Арбитражного суда Тверской области от 21.02.2024 иск  удовлетворён.  

ПАО «Россети Центр» с этим решением суда не согласилось и обратилось  с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить. В обоснование  жалобы ссылается на неправильное применение судом норм материального  права и несоответствие выводов суда обстоятельствам дела.  

ООО «РЭС» в отзыве просит решение суда оставить без изменений. 

Стороны извещены о времени и месте рассмотрения апелляционной  жалобы, представителей в суд не направили, в связи с этим дело рассмотрено  

без их участия согласно статьям 123, 156, 266 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).  

Исследовав материалы дела, апелляционный суд отказывает в  удовлетворении апелляционной жалобы.  

Как следует из материалов дела, ООО «РЭС» 06.03.2023 направило в  адрес ПАО «Россети Центр» заявку на технологическое присоединение (путём  увеличения объёма максимальной мощности по существующему  присоединению) 7 (семи) ТП 10/0,4 кВ 2*1250 кВА, подключаемых  к КВЛ-10 кВ № 35 в ячейке 10 кВ № 35 ПС 110/35/10 кВ Южная в сторону  КВЛ-10 кВ заявителя и КВЛ-10 кВ № 26 в ячейке 10 кВ № 26 ПС 110/35/10 кВ  Южная в сторону КВЛ-10 кВ заявителя, расположенного по адресу: 

<

...> кадастровый № 69:40:0000000:5133 (далее – заявка).  

Эта заявка получена ПАО «Россети Центр» 09.03.2023. 

ООО «РЭС» направило в адрес ПАО «Россети Центр» письмо  от 18.04.2023 № 76 о предоставлении проекта договора технологического  присоединения и технических условий.  

Ссылаясь на данные обстоятельства, ООО «РЭС» обратилось в суд с  настоящим иском, указывая на то, что ПАО «Россети Центр» не сообщило ему  о результатах рассмотрения заявки.  

Суд первой инстанции правомерно удовлетворил данный иск,  руководствуясь статьями 309, 310, 426, 445 Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее – ГК РФ), Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об  электроэнергетике» (далее – Закон «Об электроэнергетике»), Правилами  технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей  электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а  также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым  организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждёнными  постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861  (далее – Правила № 861).  

Согласно пункту 3 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить  в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по  технологическому присоединению при условии соблюдения им названных  Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.  

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности  заключение договора является обязательным для сетевой организации, так как  данный вид договора на основании абзаца 2 части 1 статьи 26 Закона «Об  электроэнергетике» имеет статус публичного.  

Согласно пункту 16 Правил № 861 договор должен содержать следующие  существенные условия: перечень мероприятий по технологическому  присоединению (определяется в технических условиях, являющихся  неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;  срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению,  который исчисляется со дня заключения договора.  

В соответствии с пунктами 7 и 19 Правил № 861 итоговым результатом  надлежащего исполнения сетевой организацией принятых обязательств по  

договору технологического присоединения является составление акта об  осуществлении технологического присоединения.  

Пунктом 7 Правил № 861 установлена следующая процедура  технологического присоединения:  

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (заявителем),  которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение по  основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил;  

б) заключение договора; 

в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому  присоединению, предусмотренных договором;  

г) получение разрешения органа федерального государственного  энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя.  

д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения  объектов заявителя (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1)  и 14 настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение  энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне  напряжения 0,4 кВ и ниже) к электрическим сетям и фактического приёма  (подачи) напряжения и мощности;  

е) составление акта об осуществлении технологического присоединения  по форме согласно приложению № 1, а также акта согласования  технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в  пункте 14(2) настоящих Правил).  

Согласно пункту 8 Правил № 861 для заключения договора заявитель  направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства  которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя,  с учётом условий, установленных пунктом 8(1) настоящих Правил.  

Сетевая организация в течение 3 рабочих дней рассматривает заявку, а  также приложенные к ней документы и сведения и проверяет их на  соответствие требованиям, указанным в пунктах 9, 10 и 12 - 14 Правил № 861.  При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12 - 14  настоящих Правил, сетевая организация не позднее 3 рабочих дней со дня  получения заявки направляет заявителю уведомление о необходимости в  течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие  сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявки до  получения недостающих сведений и документов.  

Согласно пункту 28 Правил № 861 к критериям наличия технической  возможности технологического присоединения отнесены:  

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории  надёжности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для  прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент  подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой  организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий  работы объектов электроэнергетики, ранее присоединённых к объектам  электросетевого хозяйства;  

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах  электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое  присоединение;  

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения  (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых  организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для  удовлетворения потребности заявителя;  

г) обеспечение в случае технологического присоединения  энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров  электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учётом  нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими  указаниями по устойчивости энергосистем, утверждёнными федеральным  органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской  Федерации на осуществление функций по выработке и реализации  государственной политики и нормативноправовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.  

Согласно пунктам 29, 30 Правил № 861 в случае несоблюдения любого из  указанных критериев считается, что техническая возможность  технологического присоединения отсутствует. В этом случае технологическое  присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.  

Согласно пункту 30.4 Правил № 861 сетевая организация направляет  заявителю проект договора, индивидуальные технические условия (в случае,  если индивидуальные технические условия в соответствии с настоящими  Правилами подлежат согласованию с системным оператором, –  индивидуальные технические условия, согласованные с системным  оператором), являющиеся неотъемлемым приложением к этому договору, а  также решение уполномоченного органа исполнительной власти в области  государственного регулирования тарифов об утверждении платы за  технологическое присоединение по индивидуальному проекту не  позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу указанного решения.  

Исполнение указанных в индивидуальных технических условиях  мероприятий либо их части может быть осуществлено как сетевой  организацией, так и заявителем (по выбору заявителя).  

В случае если мероприятия по технологическому присоединению по  индивидуальному проекту либо их часть осуществляются заявителем, в  договоре указываются конкретные мероприятия, выполняемые заявителем, при  этом размер платы за технологическое присоединение для заявителя  уменьшается на стоимость выполняемых им мероприятий, указанную в  решении уполномоченного органа исполнительной власти в области  государственного регулирования тарифов.  

Таким образом, если у сетевой организации отсутствует техническая  возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств,  указанных в заявке, то технологическое присоединение осуществляется по  индивидуальному проекту в порядке, установленном Правилами № 861  (пункт 30 Правил № 861).  

ПАО «Россети Центр» в апелляционной жалобе ссылается на то, что  непредставление им в установленные законодательством сроки в адрес  ООО «РЭС» оферты договора и технических условий обусловлено сложностью  разработки технического решения.  

Данные доводы не могут служить основанием отмены решения суда.  

На дату рассмотрения настоящего дела судом первой инстанции, то есть  спустя практически год со дня подачи истцом ответчику рассматриваемой  заявки, ответчик проект договора в адрес истца не направил. Доказательства  невозможности реального исполнения заявки истца ответчиком не  представлены.  

Ответчик (ПАО «Россети Центр») по факту рассматриваемых нарушений  привлечён к административной ответственности постановлением о назначении  административного наказания от 18.10.2023 по делу № 069/04/9.21-799/2023.  

На основании изложенного суд первой инстанции правомерно  удовлетворил иск. Выводы суда соответствуют материалам дела, нормы права  применены судом правильно, оснований для удовлетворения апелляционной  жалобы и отмены решения суда нет.  

Руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный  суд  

п о с т а н о в и л:

решение Арбитражного суда Тверской области от 21 февраля 2024 года  по делу № А66-15046/2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу  публичного акционерного общества «Россети Центр» – без удовлетворения.  

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.  

Председательствующий А.А. Холминов  

Судьи Л.Н. Рогатенко  

Ю.В. Селиванова