АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-4814/2020

г. Чебоксары

17 сентября 2020 года

Резолютивная часть решения оглашена 16 сентября 2020 года.

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Кисаповой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Павловой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Мой Дом"   

(429900, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к Администрации Цивильского городского поселения Цивильского района Чувашской Республики   

(429900, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 102 848 руб. 20 коп., 

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, финансового отдела администрации Цивильского района (429900, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

при участии

от истца: ФИО1 по доверенности от 21.01.2020

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Мой Дом"  (далее – истец) обратилась в суд с исковым заявлением к Администрации Цивильского городского поселения Цивильского района Чувашской Республики (далее – ответчик) о взыскании 99869 руб. 70 коп. долга,  а также проценты за пользовании чужими денежными средствами за период с 30.08.2019 по день фактической оплаты суммы долга. 

Требование мотивировано просрочкой исполнением ответчиком обязательств по оплате выполненных работ в рамках договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту кровли (323,0 м2) по адресу: 

<

...>. 

В отзыве от 16.09.2020 № 1280 ответчик просил дело рассмотреть в отсутствии ответчика, пояснил, что работы по договору подряда выполнены в срок в полном объеме надлежащего качества и в строгом соответствии с условиями договора подряда от 01.08.2019. 

Согласно части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, за исключением случая, если в соответствии с настоящим Кодексом требуется коллегиальное рассмотрение данного дела.

Поскольку ответчик и третье лицо, будучи надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания, возражений против рассмотрении дела в их отсутствие не заявили, арбитражный суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание суда первой инстанции. 

Представитель истца в судебном заседании уточнила исковые требования, просила взыскать с ответчика 99869 руб. 70 коп. долга, а также неустойку за просрочку оплаты выполненных работ.

Суд на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает уточнения исковых требований.

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, арбитражный суд установил. 

01.08.2019 между Администрацией Цивильского городского поселения Цивильского района Чувашской Республики (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Мой Дом" (заказчик) заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту кровли (323,0 м2) по адресу: 

<

...>, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить своим иждивением (из своих материалов, собственными силами и средствами) работы по капитальному ремонту кровли (323 м2) по адресу: 

<

...> в соответствии с условиями договора и иными документами, являющимися приложениями к договору, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.

Срок выполнения работ по договору определен в пункте 3 договора: начало работ: 01.08.2019, окончание работ: 26.08.2019.

Согласно пунктов 4.1., 4.2. договора стоимость работ составляет 99869 руб. 70 коп. Цена каждого вида работ устанавливается в смете. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет подрядчика.

Расчет производится в течение третьего квартала 2019, после принятия заказчиком оказываемых услуг и подписания акта приемке выполненных работ (пункт 4.3. договора).

Во исполнении принятых на себя обязательств истец выполнил работы на сумму 99869 руб. 70 коп. в полном объеме.

Письмом от 15.10.2019 № 636 истец в адрес ответчика направил повторно документы подтверждающие выполнение работ (л.д. 13).

15.09.2020 стороны составили акт осмотра кровли дома № 41 по ул. Гагарина, г. Цивильск, о том, что ремонт кровли  произведен  согласно договору.

Претензией от 10.02.2020 № 75 истец просил ответчика погасить задолженность за выполненные работы.

Неисполнение ответчиком требований изложенных в претензии послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд.

На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Согласно пункту 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

На основании пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В пункте 8 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» разъяснено, что основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Письмом от 15.10.2019 № 636 истец в адрес ответчика направил акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат ответчиком не подписаны. Выполнения работ и сумма задолженности ответчиком признана в отзыве 16.09.2020. 

При таких обстоятельствах, требование истца о взыскании суммы основного долга арбитражным судом признается обоснованным и подлежащим удовлетворению в заявленном размере. 

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пункте 6.6 договора предусмотрено, что при просрочке оплаты работы заказчик обязан уплатить подрядчику пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ за каждый день просрочки. 

За период с 11.10.2019 по 16.09.2020 пени подлежат взысканию в сумме 4980 руб. 17 коп.

В силу разъяснений, содержащихся в пункте 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» с 17.09.2020 пени подлежат взысканию по день фактической уплаты суммы долга. 

На основании изложенного, исковые требования подлежат удовлетворению в части взыскания суммы основного долга в размере 98869 руб. 70 коп., пеней в размере 4980 руб. 17 коп. за период с 11.10.2019 по 16.09.2020 и далее по день фактического исполнения денежного обязательства. 

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика. 

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

взыскать с Администрации Цивильского городского поселения Цивильского района Чувашской Республики в пользу общества с ограниченной ответственностью "Мой Дом" 99 869 (Девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят девять) руб.70 коп. долга, 4 980 (Четыре тысячи девятьсот восемьдесят) руб.17 коп. пени за период с 01.10.2019 по 16.09.2020 и далее по день оплаты долга, 4 085 (Четыре тысячи восемьдесят пять)  руб.00 коп. расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья

Н.В. Кисапова