Арбитражный суд Воронежской области

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г.Воронеж                                                                                              Дело №А14-5419/2018

«05» июня 2018г.

Резолютивная часть решения объявлена 29 мая 2018 г.

Полный текст решения изготовлен 05 июня 2018 г.

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Лукавенко В.И., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску муниципального унитарного предприятия городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть», г.Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Агропромстрой», г.Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)

о взыскании неустойки в размере 542715 руб. 68 коп.

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО2, доверенность №90 от 21.08.2017, 

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом,

установил:

муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть» (далее – истец, МУП «Воронежская горэлектросеть») обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Агропромстрой» (далее - ответчик, ООО «Агропромстрой») о взыскании 542715 руб. 68 коп. неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №2080 от 25.08.2014 за период с 15.09.2016 по 10.04.2017 (с учетом принятых судом в порядке ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) уточнений). 

В судебное заседание 22.05.2018 ответчик не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации на сайте Арбитражного суда Воронежской области. На основании ст.156 АПК РФ дело рассматривалось в отсутствие ответчика.

Представитель истца поддержал заявленные требования.

В судебном заседании объявлялся перерыв до 29.05.2018.

Как следует из материалов дела, 25.08.2014 между МУП «Воронежская горэлекстросеть» (сетевая организация) и ООО «Агропромстрой» (заявитель) был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №2080, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автопарковкой, расположенный  в 

<

...>), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 700,0 кВт; категория надежности 2; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств:0 кВт; заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (п.1.1. договора).

Согласно п.3.1. договора размер платы за технологическое присоединение составляет 6532328 руб. 49 коп., в том числе НДС 996456 руб. 89 коп.

Стоимость, указанная в п.3.1. договора, оплачивается заявителем в порядке, согласованном сторонами в п.3.2. договора: 10% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с даты заключения договора, 30% - в течение 60 дней со дня заключения договора,  20% - в течение 180 дней со дня заключения договора; 30% - в течение 15 дней со дня фактического присоединения, 10% - в течение 10 дней со дня  подписания акта о технологическом присоединении.

Соответствующий комплекс мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств ответчика к сетям сетевой организации был осуществлен истцом 20.01.2016, что подтверждается подписанным сторонами актом об осуществлении технологического присоединения №1032П.

С учетом частичной оплаты по договору №2080 от 25.08.2014, задолженность ответчика составила 2259058 руб. 92 руб. 

В связи с ненадлежащим исполнением ООО «Агропромстрой» обязательств по оплате осуществленных МУП «Воронежская горэлектросеть» мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, истцом в адрес ответчика была направлена претензия №09-592 от 11.07.2017 с требованием об уплате неустойки. Претензия осталась без удовлетворения. 

Данное обстоятельство послужило основанием для обращения МУП «Воронежская горэлектросеть» в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Исследовав и оценив представленные по делу материалы, с учетом доводов представителя истца, арбитражный суд находит иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст.ст.309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.  

В соответствии с п.2 ст.421 ГК РФ стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. 

Согласно позиции Президиума ВАС РФ, изложенной в постановлении от 10.07.2012 №2551/12, нормы, регламентирующие договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих (теплопринимающих) устройств, не включены в раздел IV «Отдельные виды обязательств» Гражданского кодекса, однако эти нормы содержатся в специальных нормативных актах, закрепляющих правила подключения к системам тепло- и энергоснабжения и определяющих существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

В частности, существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям указаны в пункте 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861), к их числу отнесены положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, а также порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение (подпункты «в» и «е»).

Согласно п.1 ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. 

В п.5.4. договора стороны предусмотрели, что в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

На основании указанного пункта договора истцом заявлено требование о взыскании с ответчика 542715 руб. 68 коп. неустойки за период с 15.09.2016 по 10.04.2017.

Поскольку факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательства по оплате стоимости технологического присоединения подтвержден материалами дела, требование о взыскании неустойки заявлено истцом правомерно.

Представленный истцом расчет пеней судом проверен, признан соответствующим обстоятельствам спора и требованиям действующего законодательства.

Согласно ч.3.1 ст.70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик отзыв на иск не представил, ходатайство об уменьшении размера неустойки не заявил. 

На основании изложенного, требование МУП «Воронежская горэлекстросеть» о взыскании с ООО «Агропромстрой» неустойки подлежит удовлетворению в заявленном истцом размере.

В силу ст.110 АПК РФ расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

                                                      Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Агропромстрой», г.Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в пользу муниципального унитарного предприятия городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть», г.Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) неустойку за период с 15.09.2016 по 10.04.2017 в размере 542715 руб. 68 коп. и 13854 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.

Судья                                                                                                   В.И. Лукавенко