ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

№ 18АП-16301/2022

г. Челябинск

13 марта 2023 года

Дело № А34-20880/2021

 

Резолютивная часть постановления объявлена 07 марта 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 марта 2023 года.

 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Скобелкина А.П., 

судей Арямова А.А., Калашника С.Е.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» на решение Арбитражного суда Курганской области от 12.10.2022 по делу №А34-20880/2021. 

 

Государственное бюджетное учреждение «Курганская поликлиника №2» (далее – истец, ГБУ «Курганская поликлиника №2», Учреждение) обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» (далее – ответчик, общество, ООО «АПС ТЕХНОЛОДЖИ») о взыскании задолженности в сумме 767 533 руб. 00 коп., судебных расходов по оплате государственной пошлины (платежное поручение N 76306 от 22.12.2021 на сумму 10875 руб. 33 коп.). 

Определением от 04.04.2022 судом принято к производству встречное исковое заявление ООО «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» к ГБУ «Курганская поликлиника №2» о взыскании задолженности по оплате фактически выполненных работ на сумму 1 007 410 руб. 80 коп. 

Определением суда от 31.05.2022 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: Государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Курганской области» (далее также -  ГКУ «УКС Курганской области»), общество с ограниченной ответственностью «Комфорт Плюс» (далее также – ООО «Комфорт Плюс»), индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее также – ИП ФИО2). 

Определением суда от 22.09.2022 выделено в отдельное производство из дела №А34-20880/2021 требование ООО «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» к ГБУ «Курганская поликлиника №2» о взыскании задолженности по оплате фактически выполненных работ на сумму 1 007 410 руб. 80 коп., делу присвоен номер А34-15562/2022. 

Решением Арбитражного суда Курганской области от 12.10.2022 исковые требования удовлетворены.

ООО «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» (далее также – апеллянт, податель жалобы), не согласившись с вынесенным судебным актом, обжаловало его в апелляционном порядке, просит решение суда отменить.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ее податель указывает, что отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований, поскольку подрядчиком были выполнены дополнительные работы. Отсутствие дополнительного соглашения само по себе не доказывает факт отсутствия правоотношений по выполнению дополнительных работ между истцом и ответчиком. Ссылается на недоказанность условий возникновения неосновательного обогащения.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного разбирательства на сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие не прибывших в судебное заседание участников процесса.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, из материалов дела следует, что 03.09.2021 между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен контракт №П-ИМЗ-2021-003910-24 капитальный ремонт помещений 4-го этажа отделения ГБУ «Курганская поликлиника № 2» по адресу: 

<

...>, в соответствии с которым подрядчик обязуется в установленный контрактом срок и в соответствии с утвержденным заказчиком техническим заданием (приложение № 1), локальным сметным расчетом (приложение № 2) осуществить капитальный ремонт помещений 4-го этажа отделения ГБУ «Курганская поликлиника № 2» по адресу: 

<

...>, при этом подрядчик обязуется выполнить и передать заказчику результат выполненных работ в порядке, установленном настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации 

Сданный результат выполненных работ по настоящему Контракту должен соответствовать техническому заданию, проектной документации, исполнительной документации, требованиям действующего законодательства в области строительства, ГОСТ, СП и иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а также требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Контракте, и требованиям заинтересованных организаций, под которыми в настоящем Контракте понимаются организации всех форм собственности (в том числе эксплуатирующие организации), органы государственной власти, в том числе Госнадзора и другие, уполномоченные контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенные иными властными полномочиями в отношении выполняемых работ (пункт 1.1 контракта). 

В соответствии с пунктом 1.2 контракта, заказчик обязуется принять надлежащий результат выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями Контракта. 

Цена контракта и порядок расчетов согласованы в разделе 2 контракт, в частности пунктом 2.1 контракта предусмотрено следующее: цена настоящего контракта составляет 488 000 рублей 00 копеек, без НДС (Подрядчик применяет специальный режим налогообложения - УСН). Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 

Пунктом 2.3 контракта сторонами согласован график оплаты работ по контракту: авансирование предусмотрено в размере 30% от суммы контракта: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика сумму аванса в размере 146 400 рублей 00 копеек на основании счета на оплату. 

Оставшаяся часть в размере 341600 руб. оплачивается поэтапно на основании принятых объемов по актам приемки выполненных работ унифицированной формы КС-2, справкам унифицированной формы КС-3, и наличия счета и/или счета-фактуры не более чем в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной в п. 2.1 контракта и выплаченного аванса. 

Окончательная оплата за выполненные работы производится в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены установленной в п. 2.1 настоящего контракта, наличия счета и/или счета-фактуры. 

Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки работ согласован сторонами в разделе три контракта, а именно: подрядчик приступает к выполнению работ после заключения настоящего контракта; сроки выполнения работ-с момента заключения контракта в течении 60 дней (допускается досрочное выполнение работ по контракту); работы выполняются в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 3) (пункты 3.1, 3.2 контракта). 

Порядок сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ согласован сторонами в пункте 3.3 контракта: подрядчик сдает выполненные работы по окончанию всех работ в полном объеме, до представления форм КС-2, КС-3, организовывает сдачу объемов работ с подписанием ответственным представителем заказчика журнала учета выполненных работ; подрядчик за три рабочих дня обязан письменно известить заказчика о времени и месте осуществления сдачи объемов выполненных работ. Акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ по контракту (КС-2, КС-3) исполнительная документация, акты на скрытые работы и т.д., подписанные подрядчиком, передаются на рассмотрение заказчику, заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть и подписать представленную документацию либо в этот же срок представить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки.) 

Пунктом 3.7 контракта сторонами также согласовано, что окончательный результат выполненной работы по Контракту считается принятым Заказчиком с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной в п. 2.1 настоящего Контракта. 

В соответствии с пунктами 4.1, 4.6 контракта подрядчик обязан выполнить работы на условиях настоящего Контракта, в соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием; в полном объеме и с надлежащим качеством выполнить работы на объекте и сдать их результат Заказчику в порядке и на условиях настоящего Контракта, действующих нормативных технических норм и правил, законодательных актов Российской Федерации. 

В разделе 11 контракта сторонами также согласован порядок изменения и расторжения контракта, а именно: стороны вправе расторгнуть настоящий контракт по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (пункт 11.1 контракта). 

В соответствии с условиями контракта, 20.09.2021 ГБУ «Курганская поликлиника № 2 платежным поручением № 381880 перечислило ООО «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» на расчетный счет 

<

***> руб., где в назначении платежа имеется ссылка на контракт № П-ИМЗ-2021-003910-24 от 03.09.2021. 

Предусмотренные контрактом работы выполнены ответчиком на общую сумму 9806 руб., что подтверждается, подписанными сторонами без замечаний и возражений, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 15.11.2021 в размере 9806 руб., а также актом о приемке выполненных работ №1 от 15.11.2021 в размере 9806 руб. (т. 1, л.д. 21-24).

16.11.2021 между сторонами подписано соглашение о расторжении контракта, согласно которому стороны пришли к следующему: на момент расторжения контракта общая стоимость фактически выполненных работ составила 9806 руб., НДС не облагается; с момента расторжения контракта стороны не считают себя связанными обязательствами по настоящему контракту, за исключением обязательств по возврату выплаченного заказчиком поставщику аванса в размере 136594 руб., НДС не облагается, уменьшенного на сумму выполненных работ по контракту; также сторонами обусловлено, что возврат аванса должен быть произведен поставщиком в течение пяти рабочих дней с момента подписания настоящего соглашения (пункты 2, 3 соглашения) (т. 1, л.д. 25). 

03.09.2021 между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен контракт № П-ИМЗ-2021-003912-25 капитальный ремонт помещений 4-го этажа отделения ГБУ «Курганская поликлиника № 2» по адресу: 

<

...>, в соответствии с которым подрядчик обязуется в установленный контрактом срок и в соответствии с утвержденным заказчиком техническим заданием (приложение № 1), локальным сметным расчетом (приложение № 2) осуществить капитальный ремонт помещений 4-го этажа отделения ГБУ «Курганская поликлиника № 2» по адресу: 

<

...>, при этом подрядчик обязуется выполнить и передать заказчику результат выполненных работ в порядке, установленном настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации. 

Сданный результат выполненных работ по настоящему Контракту должен соответствовать техническому заданию, проектной документации, исполнительной документации, требованиям действующего законодательства в области строительства, ГОСТ, СП и иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а также требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Контракте, и требованиям заинтересованных организаций, под которыми в настоящем Контракте понимаются организации всех форм собственности (в том числе эксплуатирующие организации), органы государственной власти, в том числе Госнадзора и другие, уполномоченные контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенные иными властными полномочиями в отношении выполняемых работ (пункт 1.1 контракта). 

В соответствии с пунктом 1.2 контракта, заказчик обязуется принять надлежащий результат выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями контракта. 

Цена контракта и порядок расчетов согласованы в разделе 2 контракт, в частности пунктом 2.1 контракта предусмотрено следующее: цена настоящего контракта составляет 333 000 рублей 00 копеек, без НДС (подрядчик применяет специальный режим налогообложения - УСН). Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

Пунктом 2.3 контракта сторонами согласован график оплаты работ по контракту: авансирование предусмотрено в размере 30% от суммы контракта: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика сумму аванса в размере 

<

***> рублей 00 копеек на основании счета на оплату. 

Оставшаяся часть в размере 233100 руб. оплачивается поэтапно на основании принятых объемов по актам приемки выполненных работ унифицированной формы КС-2, справкам унифицированной формы КС-3, и наличия счета и/или счета-фактуры не более чем в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной в п. 2.1 контракта и выплаченного аванса. 

Окончательная оплата за выполненные работы производится в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены установленной в п. 2.1 настоящего контракта, наличия счета и/или счета-фактуры. 

Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки работ согласован сторонами в разделе три контракта, а именно: подрядчик приступает к выполнению работ после заключения настоящего контракта; сроки выполнения работ-с момента заключения контракта в течении 60 дней (допускается досрочное выполнение работ по контракту); работы выполняются в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 3) (пункты 3.1, 3.2 контракта). 

Порядок сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ согласован сторонами в пункте 3.3 контракта: подрядчик сдает выполненные работы по окончанию всех работ в полном объеме, до представления форм КС-2, КС-3, организовывает сдачу объемов работ с подписанием ответственным представителем заказчика журнала учета выполненных работ; подрядчик за три рабочих дня обязан письменно известить заказчика о времени и месте осуществления сдачи объемов выполненных работ. Акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ по контракту (КС-2, КС-3) исполнительная документация, акты на скрытые работы и т.д., подписанные подрядчиком, передаются на рассмотрение заказчику, заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть и подписать представленную документацию либо в этот же срок представить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки.) 

Пунктом 3.7 контракта сторонами также согласовано, что окончательный результат выполненной работы по контракту считается принятым заказчиком с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной в п. 2.1 настоящего Контракта. 

В соответствии с пунктами 4.1, 4.6 контракта подрядчик обязан выполнить работы на условиях контракта, в соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием; в полном объеме и с надлежащим качеством выполнить работы на объекте и сдать их результат Заказчику в порядке и на условиях контракта, действующих нормативных технических норм и правил, законодательных актов Российской Федерации. 

В разделе 11 контракта сторонами также согласован порядок изменения и расторжения контракта, а именно: стороны вправе расторгнуть настоящий контракт по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (пункт 11.1 контракта). 

В соответствии с условиями контракта, 20.09.2021 ГБУ «Курганская поликлиника № 2 платежным поручением № 381883 перечислило ООО «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» на расчетный счет 

<

***> руб., где в назначении платежа имеется ссылка на контракт № П-ИМЗ-2021-003912-25 от 03.09.2021 (т. 1, л.д. 33). 

Предусмотренные контрактом работы ответчиком не выполнены. 

29.11.2021 между сторонами подписано соглашение о расторжении контракта, согласно которому стороны пришли к следующему: на момент расторжения контракта работы подрядчиком не выполнены в полном объеме; цена контракта при заключении составила 333000 руб., без НДС; в соответствии с п. 2.3 контракта заказчиком на расчетный счет подрядчика был перечислен аванс в размере 30% от суммы контракта в размере 

<

***> руб., НДС не облагается, на основании счета на оплату, возврат заказчику выплаченного по контракту аванса должен быть произведен подрядчиком в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего соглашения (т. 1, л.д. 34). 

03.09.2021 между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен контракт № П-ИМЗ-2021-003913-26 капитальный ремонт помещений 4-го этажа отделения ГБУ «Курганская поликлиника № 2» по адресу: 

<

...> в соответствии с которым подрядчик обязуется в установленный контрактом срок и в соответствии с утвержденным заказчиком техническим заданием (приложение № 1), локальным сметным расчетом (приложение N 2) осуществить капитальный ремонт помещений 4-го этажа отделения ГБУ «Курганская поликлиника № 2» по адресу: 

<

...>, при этом подрядчик обязуется выполнить и передать заказчику результат выполненных работ в порядке, установленном настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации 

Сданный результат выполненных работ по настоящему Контракту должен соответствовать техническому заданию, проектной документации, исполнительной документации, требованиям действующего законодательства в области строительства, ГОСТ, СП и иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а также требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Контракте, и требованиям заинтересованных организаций, под которыми в настоящем Контракте понимаются организации всех форм собственности (в том числе эксплуатирующие организации), органы государственной власти, в том числе Госнадзора и другие, уполномоченные контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенные иными властными полномочиями в отношении выполняемых работ (пункт 1.1 контракта). 

В соответствии с пунктом 1.2 контракта, заказчик обязуется принять надлежащий результат выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями контракта. 

Цена контракта и порядок расчетов согласованы в разделе 2 контракт, в частности пунктом 2.1 контракта предусмотрено следующее: цена настоящего контракта составляет 353 рублей 00 копеек, без НДС (Подрядчик применяет специальный режим налогообложения - УСН). Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 

Пунктом 2.3 контракта сторонами согласован график оплаты работ по Контракту: авансирование предусмотрено в размере 30% от суммы контракта: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика сумму аванса в размере 

<

***> рублей 00 копеек на основании счета на оплату. 

Оставшаяся часть в размере 247100 руб. оплачивается поэтапно на основании принятых объемов по актам приемки выполненных работ унифицированной формы КС-2, справкам унифицированной формы КС-3, и наличия счета и/или счета-фактуры не более чем в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной в п. 2.1 контракта и выплаченного аванса. 

Окончательная оплата за выполненные работы производится в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены установленной в п. 2.1 настоящего контракта, наличия счета и/или счета-фактуры. 

Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки работ согласован сторонами в разделе три контракта, а именно: подрядчик приступает к выполнению работ после заключения настоящего контракта; сроки выполнения работ-с момента заключения контракта в течении 60 дней (допускается досрочное выполнение работ по контракту); работы выполняются в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 3) (пункты 3.1, 3.2 контракта). 

Порядок сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ согласован сторонами в пункте 3.3 контракта: подрядчик сдает выполненные работы по окончанию всех работ в полном объеме, до представления форм КС-2, КС-3, организовывает сдачу объемов работ с подписанием ответственным представителем заказчика журнала учета выполненных работ; подрядчик за три рабочих дня обязан письменно известить заказчика о времени и месте осуществления сдачи объемов выполненных работ. Акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ по контракту (КС-2, КС-3) исполнительная документация, акты на скрытые работы и т.д., подписанные подрядчиком, передаются на рассмотрение заказчику, заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть и подписать представленную документацию либо в этот же срок представить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки.) 

Пунктом 3.7 контракта сторонами также согласовано, что окончательный результат выполненной работы по Контракту считается принятым Заказчиком с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной в п. 2.1 настоящего Контракта. 

В соответствии с пунктами 4.1, 4.6 контракта подрядчик обязан выполнить работы на условиях настоящего Контракта, в соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием; в полном объеме и с надлежащим качеством выполнить работы на объекте и сдать их результат Заказчику в порядке и на условиях настоящего Контракта, действующих нормативных технических норм и правил, законодательных актов Российской Федерации. 

В разделе 11 контракта сторонами также согласован порядок изменения и расторжения контракта, а именно: стороны вправе расторгнуть настоящий контракт по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (пункт 11.1 контракта). 

В соответствии с условиями контракта, 20.09.2021 ГБУ «Курганская поликлиника № 2 платежным поручением № 381882 перечислило ООО «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» на расчетный счет 

<

***> руб., где в назначении платежа имеется ссылка на контракт № П-ИМЗ-2021-003913-26 от 03.09.2021 (т. 1, л.д. 43). 

Предусмотренные контрактом работы выполнены ответчиком на общую сумму 16314 руб., что подтверждается, подписанными сторонами без замечаний и возражений, справкой о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 08.11.2021 в размере 16314 руб., а также актом о приемке выполненных работ № 1 от 08.11.2021 в размере 16314 руб. (т. 1, л.д. 44-48). 

16.11.2021 между сторонами подписано соглашение о расторжении контракта П-ИМЗ-2021-003913-26, согласно которому стороны пришли к следующему: на момент расторжения контракта общая стоимость фактически выполненных работ составила 16314 руб., НДС не облагается; с момента расторжения контракта стороны не считают себя связанными обязательствами по настоящему контракту, за исключением обязательств по возврату выплаченного заказчиком поставщику аванса в размере 89586 руб., НДС не облагается, уменьшенного на сумму выполненных работ по контракту; также сторонами обусловлено, что возврат аванса должен быть произведен поставщиком в течение пяти рабочих дней с момента подписания настоящего соглашения (пункты 2, 3 соглашения) (т. 1, л.д. 49). 

03.09.2021 между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен контракт N П-ИМЗ-2021-003914-27 капитальный ремонт помещений 4-го этажа отделения ГБУ «Курганская поликлиника № 2» по адресу: 

<

...>, в соответствии с которым подрядчик обязуется в установленный контрактом срок и в соответствии с утвержденным заказчиком техническим заданием (приложение № 1), локальным сметным расчетом (приложение № 2) осуществить капитальный ремонт помещений 4-го этажа отделения ГБУ «Курганская поликлиника № 2» по адресу: 

<

...>, при этом подрядчик обязуется выполнить и передать заказчику результат выполненных работ в порядке, установленном настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации 

Сданный результат выполненных работ по контракту должен соответствовать техническому заданию, проектной документации, исполнительной документации, требованиям действующего законодательства в области строительства, ГОСТ, СП и иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а также требованиям Заказчика, изложенным в контракте, и требованиям заинтересованных организаций, под которыми в контракте понимаются организации всех форм собственности (в том числе эксплуатирующие организации), органы государственной власти, в том числе Госнадзора и другие, уполномоченные контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенные иными властными полномочиями в отношении выполняемых работ (пункт 1.1 контракта). 

В соответствии с пунктом 1.2 контракта Заказчик обязуется принять надлежащий результат выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями Контракта. 

Цена контракта и порядок расчетов согласованы в разделе 2 контракт, в частности пунктом 2.1 контракта предусмотрено следующее: цена настоящего контракта составляет 288000 рублей 00 копеек, без НДС (Подрядчик применяет специальный режим налогообложения - УСН). Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 

Пунктом 2.3 контракта сторонами согласован график оплаты работ по Контракту: Авансирование предусмотрено в размере 30% от суммы контракта: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика сумму аванса в размере 

<

***> рублей 00 копеек на основании счета на оплату. 

Оставшаяся часть в размере 201600 руб. оплачивается поэтапно на основании принятых объемов по актам приемки выполненных работ унифицированной формы КС-2, справкам унифицированной формы КС-3, и наличия счета и/или счета-фактуры не более чем в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной в п. 2.1 контракта и выплаченного аванса. 

Окончательная оплата за выполненные работы производится в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены установленной в п. 2.1 настоящего контракта, наличия счета и/или счета-фактуры. 

Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки работ согласован сторонами в разделе три контракта, а именно: подрядчик приступает к выполнению работ после заключения настоящего контракта; сроки выполнения работ-с момента заключения контракта в течении 60 дней (допускается досрочное выполнение работ по контракту); работы выполняются в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 3) (пункты 3.1, 3.2 контракта). 

Порядок сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ согласован сторонами в пункте 3.3 контракта: подрядчик сдает выполненные работы по окончанию всех работ в полном объеме, до представления форм КС-2, КС-3, организовывает сдачу объемов работ с подписанием ответственным представителем заказчика журнала учета выполненных работ; подрядчик за три рабочих дня обязан письменно известить заказчика о времени и месте осуществления сдачи объемов выполненных работ. Акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ по контракту (КС-2, КС-3) исполнительная документация, акты на скрытые работы и т.д., подписанные подрядчиком, передаются на рассмотрение заказчику, заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть и подписать представленную документацию либо в этот же срок представить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки.) 

Пунктом 3.7 контракта сторонами также согласовано, что окончательный результат выполненной работы по Контракту считается принятым Заказчиком с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной в п. 2.1 настоящего Контракта. 

В соответствии с пунктами 4.1, 4.6 контракта подрядчик обязан выполнить работы на условиях настоящего Контракта, в соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием; в полном объеме и с надлежащим качеством выполнить работы на объекте и сдать их результат Заказчику в порядке и на условиях контракта, действующих нормативных технических норм и правил, законодательных актов Российской Федерации. 

В разделе 11 контракта сторонами также согласован порядок изменения и расторжения контракта, а именно: стороны вправе расторгнуть настоящий контракт по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (пункт 11.1 контракта). 

В соответствии с условиями контракта, 20.09.2021 ГБУ «Курганская поликлиника № 2 платежным поручением № 381881 перечислило ООО «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» на расчетный счет 

<

***> руб., где в назначении платежа имеется ссылка на контракт № П-ИМЗ-2021-003914-27 от 03.09.2021 (т. 1, л.д. 58). 

Предусмотренные контрактом работы ответчиком не выполнены. 

29.11.2021 между сторонами подписано соглашение о расторжении контракта № П-ИМЗ-2021-003914-27, согласно которому стороны пришли к следующему: на момент расторжения контракта работы подрядчиком не выполнены в полном объеме; цена контракта при заключении составила 288000 руб., без НДС; в соответствии с п. 2.3 контракта заказчиком на расчетный счет подрядчика был перечислен аванс в размере 30% от суммы контракта в размере 

<

***> руб., НДС не облагается, на основании счета на оплату, возврат заказчику выплаченного по контракту аванса должен быть произведен подрядчиком в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего соглашения (т. 1, л.д. 59). 

03.09.2021 между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен контракт № П-ИМЗ-2021-003979-28 капитальный ремонт помещений 4-го этажа отделения ГБУ «Курганская поликлиника № 2» по адресу: 

<

...>, в соответствии с которым подрядчик обязуется в установленный контрактом срок и в соответствии с утвержденным заказчиком техническим заданием (приложение № 1), локальным сметным расчетом (приложение № 2) осуществить капитальный ремонт помещений 4-го этажа отделения ГБУ «Курганская поликлиника № 2» по адресу: 

<

...>, при этом подрядчик обязуется выполнить и передать заказчику результат выполненных работ в порядке, установленном настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации 

Сданный результат выполненных работ по контракту должен соответствовать техническому заданию, проектной документации, исполнительной документации, требованиям действующего законодательства в области строительства, ГОСТ, СП и иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а также требованиям Заказчика, изложенным в контракте, и требованиям заинтересованных организаций, под которыми в контракте понимаются организации всех форм собственности (в том числе эксплуатирующие организации), органы государственной власти, в том числе Госнадзора и другие, уполномоченные контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенные иными властными полномочиями в отношении выполняемых работ (пункт 1.1 контракта). 

В соответствии с пунктом 1.2 контракта, заказчик обязуется принять надлежащий результат выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями Контракта. 

Цена контракта и порядок расчетов согласованы в разделе 2 контракт, в частности пунктом 2.1 контракта предусмотрено следующее: цена настоящего контракта составляет 488000 рублей 00 копеек, без НДС (Подрядчик применяет специальный режим налогообложения - УСН). Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 

Пунктом 2.3 контракта сторонами согласован график оплаты работ по Контракту: авансирование предусмотрено в размере 30% от суммы контракта: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика сумму аванса в размере 

<

***> рублей 00 копеек на основании счета на оплату. 

Оставшаяся часть в размере 341600 руб. оплачивается поэтапно на основании принятых объемов по актам приемки выполненных работ унифицированной формы КС-2, справкам унифицированной формы КС-3, и наличия счета и/или счета-фактуры не более чем в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной в п. 2.1 контракта и выплаченного аванса. 

Окончательная оплата за выполненные работы производится в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены установленной в п. 2.1 настоящего контракта, наличия счета и/или счета-фактуры. 

Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки работ согласован сторонами в разделе три контракта, а именно: подрядчик приступает к выполнению работ после заключения контракта; сроки выполнения работ - с момента заключения контракта в течении 60 дней (допускается досрочное выполнение работ по контракту); работы выполняются в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 3) (пункты 3.1, 3.2 контракта). 

Порядок сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ согласован сторонами в пункте 3.3 контракта: подрядчик сдает выполненные работы по окончанию всех работ в полном объеме, до представления форм КС-2, КС-3, организовывает сдачу объемов работ с подписанием ответственным представителем заказчика журнала учета выполненных работ; подрядчик за три рабочих дня обязан письменно известить заказчика о времени и месте осуществления сдачи объемов выполненных работ. Акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ по контракту (КС-2, КС-3) исполнительная документация, акты на скрытые работы и т.д., подписанные подрядчиком, передаются на рассмотрение заказчику, заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть и подписать представленную документацию либо в этот же срок представить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки.) 

Пунктом 3.7 контракта сторонами также согласовано, что окончательный результат выполненной работы по Контракту считается принятым Заказчиком с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной в п. 2.1 контракта. 

В соответствии с пунктами 4.1, 4.6 контракта подрядчик обязан выполнить работы на условиях контракта, в соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием; в полном объеме и с надлежащим качеством выполнить работы на объекте и сдать их результат Заказчику в порядке и на условиях контракта, действующих нормативных технических норм и правил, законодательных актов Российской Федерации. 

В разделе 11 контракта сторонами также согласован порядок изменения и расторжения контракта, а именно: стороны вправе расторгнуть контракт по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (пункт 11.1 контракта). 

В соответствии с условиями контракта, 20.09.2021 ГБУ «Курганская поликлиника № 2 платежным поручением № 381884 перечислило ООО «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» на расчетный счет 

<

***> руб., где в назначении платежа имеется ссылка на контракт № П-ИМЗ-2021-003979-28 от 03.09.2021 (т. 1, л.д. 67). 

Предусмотренные контрактом работы ответчиком не выполнены. 

29.11.2021 между сторонами подписано соглашение о расторжении контракта № П-ИМЗ-2021-003979-28, согласно которому стороны пришли к следующему: на момент расторжения контракта работы подрядчиком не выполнены в полном объеме; цена контракта при заключении составила 488000 руб., без НДС; в соответствии с п. 2.3 контракта заказчиком на расчетный счет подрядчика был перечислен аванс в размере 30% от суммы контракта в размере 

<

***> руб., НДС не облагается, на основании счета на оплату, возврат заказчику выплаченного по контракту аванса должен быть произведен подрядчиком в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего соглашения (т. 1, л.д. 68). 

24.09.2021 между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен контракт № П-ИМЗ-2021-004459-500 капитальный ремонт помещения отделения ГБУ «Курганская поликлиника № 2», расположенных по адресу: 

<

...>, в соответствии с которым подрядчик обязуется в установленный контрактом срок и в соответствии с утвержденным заказчиком техническим заданием (приложение № 1), локальным сметным расчетом (приложение N 2) осуществить капитальный ремонт помещений 4-го этажа отделения ГБУ «Курганская поликлиника № 2» по адресу: 

<

...>, при этом подрядчик обязуется выполнить и передать заказчику результат выполненных работ в порядке, установленном настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации 

Сданный результат выполненных работ по настоящему Контракту должен соответствовать техническому заданию, проектной документации, исполнительной документации, требованиям действующего законодательства в области строительства, ГОСТ, СП и иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а также требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Контракте, и требованиям заинтересованных организаций, под которыми в настоящем Контракте понимаются организации всех форм собственности (в том числе эксплуатирующие организации), органы государственной власти, в том числе Госнадзора и другие, уполномоченные контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенные иными властными полномочиями в отношении выполняемых работ (пункт 1.1 контракта). 

В соответствии с пунктом 1.2 контракта, заказчик обязуется принять надлежащий результат выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями Контракта. 

Цена контракта и порядок расчетов согласованы в разделе 2 контракт, в частности пунктом 2.1 контракта предусмотрено следующее: цена настоящего контракта составляет 375000 рублей 00 копеек, без НДС (Подрядчик применяет специальный режим налогообложения - УСН). Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 

Пунктом 2.3 контракта сторонами согласован график оплаты работ по Контракту: авансирование предусмотрено в размере 30% от суммы контракта: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика сумму аванса в размере 

<

***> рублей 00 копеек на основании счета на оплату. 

Оставшаяся часть в размере 262500 руб. оплачивается поэтапно на основании принятых объемов по актам приемки выполненных работ унифицированной формы КС-2, справкам унифицированной формы КС-3, и наличия счета и/или счета-фактуры не более чем в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной в п. 2.1 контракта и выплаченного аванса. 

Окончательная оплата за выполненные работы производится в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены установленной в п. 2.1 контракта, наличия счета и/или счета-фактуры. 

Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки работ согласован сторонами в разделе три контракта, а именно: подрядчик приступает к выполнению работ после заключения контракта; сроки выполнения работ-с момента заключения контракта в течении 45 дней (допускается досрочное выполнение работ по контракту); работы выполняются в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 3) (пункты 3.1, 3.2 контракта). 

Порядок сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ согласован сторонами в пункте 3.3 контракта: подрядчик сдает выполненные работы по окончанию всех работ в полном объеме, до представления форм КС-2, КС-3, организовывает сдачу объемов работ с подписанием ответственным представителем заказчика журнала учета выполненных работ; подрядчик за три рабочих дня обязан письменно известить заказчика о времени и месте осуществления сдачи объемов выполненных работ. Акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ по контракту (КС-2, КС-3) исполнительная документация, акты на скрытые работы и т.д., подписанные подрядчиком, передаются на рассмотрение заказчику, заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть и подписать представленную документацию либо в этот же срок представить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки.) 

Пунктом 3.7 контракта сторонами также согласовано, что окончательный результат выполненной работы по Контракту считается принятым Заказчиком с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной в п. 2.1 настоящего Контракта. 

В соответствии с пунктами 4.1, 4.6 контракта подрядчик обязан выполнить работы на условиях настоящего Контракта, в соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием; в полном объеме и с надлежащим качеством выполнить работы на объекте и сдать их результат Заказчику в порядке и на условиях контракта, действующих нормативных технических норм и правил, законодательных актов Российской Федерации. 

В разделе 11 контракта сторонами также согласован порядок изменения и расторжения контракта, а именно: стороны вправе расторгнуть настоящий контракт по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (пункт 11.1 контракта). 

В соответствии с условиями контракта, 06.10.2021 ГБУ «Курганская поликлиника № 2» платежным поручением № 484806 перечислило ООО «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» на расчетный счет 

<

***> руб., где в назначении платежа имеется ссылка на контракт № П-ИМЗ-2021-004459-500 от 24.09.2021. 

Предусмотренные контрактом работы выполнены ответчиком на общую сумму 4036 руб., что подтверждается, подписанными сторонами без замечаний и возражений, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 03.11.2021 в размере 4036 руб., а также актом о приемке выполненных работ №1 от 03.11.2021 в размере 4036 руб. (т. 1, л.д. 77-79). 

12.11.2021 между сторонами подписано соглашение о расторжении контракта № П-ИМЗ-2021-004459-500, согласно которому стороны пришли к следующему: на момент расторжения контракта общая стоимость фактически выполненных работ составила 4036 руб., НДС не облагается; с момента расторжения контракта стороны не считают себя связанными обязательствами по настоящему контракту, за исключением обязательств по возврату выплаченного заказчиком поставщику аванса в размере 108464 руб., НДС не облагается, уменьшенного на сумму выполненных работ по контракту; также сторонами обусловлено, что возврат аванса должен быть произведен поставщиком в течение пяти рабочих дней с момента подписания настоящего соглашения (пункты 2, 3 соглашения) (т. 1, л.д. 80). 

24.09.2021 между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен контракт № П-ИМЗ-2021-004460-501 капитальный ремонт помещения отделения ГБУ «Курганская поликлиника № 2», расположенных по адресу: 

<

...>, в соответствии с которым подрядчик обязуется в установленный контрактом срок и в соответствии с утвержденным заказчиком техническим заданием (приложение №1), локальным сметным расчетом (приложение N 2) осуществить капитальный ремонт помещений 4-го этажа отделения ГБУ «Курганская поликлиника №2» по адресу: 

<

...>, при этом подрядчик обязуется выполнить и передать заказчику результат выполненных работ в порядке, установленном настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации 

Сданный результат выполненных работ по контракту должен соответствовать техническому заданию, проектной документации, исполнительной документации, требованиям действующего законодательства в области строительства, ГОСТ, СП и иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а также требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Контракте, и требованиям заинтересованных организаций, под которыми в настоящем Контракте понимаются организации всех форм собственности (в том числе эксплуатирующие организации), органы государственной власти, в том числе Госнадзора и другие, уполномоченные контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенные иными властными полномочиями в отношении выполняемых работ (пункт 1.1 контракта). 

В соответствии с пунктом 1.2 контракта, заказчик обязуется принять надлежащий результат выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями Контракта. 

Цена контракта и порядок расчетов согласованы в разделе 2 контракт, в частности пунктом 2.1 контракта предусмотрено следующее: цена настоящего контракта составляет 407000 рублей 00 копеек, без НДС (Подрядчик применяет специальный режим налогообложения - УСН). Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 

Пунктом 2.3 контракта сторонами согласован график оплаты работ по Контракту: авансирование предусмотрено в размере 30% от суммы контракта: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика сумму аванса в размере 

<

***> рублей 00 копеек на основании счета на оплату. 

Оставшаяся часть в размере 284900 руб. оплачивается поэтапно на основании принятых объемов по актам приемки выполненных работ унифицированной формы КС-2, справкам унифицированной формы КС-3, и наличия счета и/или счета-фактуры не более чем в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной в п. 2.1 контракта и выплаченного аванса. 

Окончательная оплата за выполненные работы производится в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены установленной в п. 2.1 контракта, наличия счета и/или счета-фактуры. 

Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки работ согласован сторонами в разделе три контракта, а именно: подрядчик приступает к выполнению работ после заключения настоящего контракта; сроки выполнения работ-с момента заключения контракта в течении 45 дней (допускается досрочное выполнение работ по контракту); работы выполняются в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 3) (пункты 3.1, 3.2 контракта). 

Порядок сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ согласован сторонами в пункте 3.3 контракта: подрядчик сдает выполненные работы по окончанию всех работ в полном объеме, до представления форм КС-2, КС-3, организовывает сдачу объемов работ с подписанием ответственным представителем заказчика журнала учета выполненных работ; подрядчик за три рабочих дня обязан письменно известить заказчика о времени и месте осуществления сдачи объемов выполненных работ. Акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ по контракту (КС-2, КС-3) исполнительная документация, акты на скрытые работы и т.д., подписанные подрядчиком, передаются на рассмотрение заказчику, заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть и подписать представленную документацию либо в этот же срок представить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки.) 

Пунктом 3.7 контракта сторонами также согласовано, что окончательный результат выполненной работы по Контракту считается принятым Заказчиком с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной в п. 2.1 контракта. 

В соответствии с пунктами 4.1, 4.6 контракта, подрядчик обязан выполнить работы на условиях контракта, в соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием; в полном объеме и с надлежащим качеством выполнить работы на объекте и сдать их результат Заказчику в порядке и на условиях настоящего Контракта, действующих нормативных технических норм и правил, законодательных актов Российской Федерации. 

В разделе 11 контракта сторонами также согласован порядок изменения и расторжения контракта, а именно: стороны вправе расторгнуть настоящий контракт по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (пункт 11.1 контракта). 

В соответствии с условиями контракта, 06.10.2021 ГБУ «Курганская поликлиника № 2» платежным поручением № 484807 перечислило ООО «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» на расчетный счет 

<

***> руб., где в назначении платежа имеется ссылка на контракт № П-ИМЗ-2021-004460-501 от 24.09.2021. 

Предусмотренные контрактом работы выполнены ответчиком на общую сумму 21911 руб., что подтверждается, подписанными сторонами без замечаний и возражений, справкой о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 03.11.2021 в размере 21911 руб., а также актами о приемке выполненных работ № 1, № 2 от 03.11.2021 (т. 1, л.д. 89-94). 

12.11.2021 между сторонами подписано соглашение о расторжении контракта № П-ИМЗ-2021-004460-501, согласно которому стороны пришли к следующему: на момент расторжения контракта общая стоимость фактически выполненных работ составила 21911 руб., НДС не облагается; с момента расторжения контракта стороны не считают себя связанными обязательствами по настоящему контракту, за исключением обязательств по возврату выплаченного заказчиком поставщику аванса в размере 100189 руб., НДС не облагается, уменьшенного на сумму выполненных работ по контракту; также сторонами обусловлено, что возврат аванса должен быть произведен поставщиком в течение пяти рабочих дней с момента подписания настоящего соглашения (пункты 2, 3 соглашения) (т. 1, л.д. 95). 

Поскольку ответчик свои обязательства по возврату выплаченных авансов надлежащим образом не исполнил, истец, с соблюдением обязательного претензионного порядка, установленного частью 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обратился в арбитражный суд с настоящим иском, за защитой нарушенного права (статья 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу, что ответчик работы выполнил не в полном объеме, в силу чего ответчик утратил право на удержание полученной и не освоенной суммы авансового платежа.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в апелляционной жалобе, суд апелляционной инстанции считает, что обжалуемый судебный акт подлежит оставлению без изменения по следующим основаниям.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Оценив представленные в материалы дела письменные доказательства, суд пришел к выводу, что правоотношения сторон в рамках настоящего дела регулируется главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). 

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

Согласно пункту 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. 

В соответствии со статьей 717 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. 

Пунктом 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что предоставленное Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, иными правовыми актами или договором. 

На основании части 9 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом. 

Как следует из пункта 11.1 контрактов, стороны вправе расторгнуть настоящий контракт по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения подрядных обязательств. 

Существенным нарушением условий контракта со стороны подрядчика является: 

- нарушение срока начала работ более чем на 10 календарных дней; 

- несоблюдение графика производства работ более чем на 10 календарных дней; 

- нарушение технологии производства работ, СП, ГОСТ более 3 раз и не устранение мотивированных замечаний заказчика в течение 10 календарных дней. 

В связи с существенным нарушением условий контрактов в части невыполнения оговоренных в контрактах работ, сторонами подписаны соглашения о расторжении контрактов № П-ИМЗ-2021-003910-24 от 03.09.2021, № П-ИМЗ-2021-003912-25 от 03.09.2021, № П-ИМЗ-2021-003913-26 от 03.09.2021, № П-ИМЗ-2021-003914-27 от 03.09.2021, № П-ИМЗ-2021-003979-28 от 03.09.2021, № П-ИМЗ-2021-004459-500 от 24.09.2021, № П-ИМЗ-2021-004460-501 от 24.09.2021, в указанных соглашениях стороны также согласовали условие о возврате заказчику выплаченных по контрактам и неосвоенных подрядчиком авансов. 

Согласно пункту 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства. 

Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон. В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства (пункт 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В пункте 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» разъяснено, что положения пункта 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации не исключают возможности истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала. 

В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 

Таким образом, для возникновения обязательств из неосновательного обогащения необходимы приобретение или сбережение имущества за счет другого лица, отсутствие правового основания такого сбережения или приобретения, отсутствие обстоятельств, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

При этом основания возникновения неосновательного обогащения могут быть различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора, требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате предоставленного при незаключенности договора, требование о возврате ошибочно перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между сторонами и т.п. 

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Следовательно, распределение бремени доказывания в споре о возврате неосновательно полученного должно строиться в соответствии с особенностями оснований заявленного истцом требования. Исходя из объективной невозможности доказывания факта отсутствия правоотношений между сторонами, суд на основании статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации делает вывод о возложении бремени доказывания обратного (наличие какого-либо правового основания) на ответчика. 

В рассматриваемом споре истец обязан представить доказательства перечисления денежных ответчику (в рамках настоящего спора данное обстоятельство подтверждается представленными платежными поручениями), а ответчик обязан представить суду наличие гражданско-правового основания для получения денежных средств (доказательства исполнения обязательства). 

Из представленных в дело первичных документов следует, что истец перечислил ответчику денежные средства платежными поручениями № 381880 от 20.09.2021 на сумму 

<

***> руб., № 381883 от 20.09.2021 на сумму 

<

***> руб., № 381882 от 20.09.2021 на сумму 

<

***> руб., № 381881 от 20.09.2021 на сумму 

<

***> руб., № 381884 от 20.09.2021 на сумму 

<

***> руб., № 484806 от 06.10.2021 на сумму 

<

***> руб., № 484807 от 06.10.2021 на сумму 

<

***> руб. 

При этом, ответчиком частично были выполнены работы: по контракту №П-ИМЗ-2021-003910-24 от 03.09.2021 на сумму 9806 руб., по контракту № П-ИМЗ-2021-003913-26 от 03.09.2021 на сумму 16314 руб., по контракту № П-ИМЗ-2021-004459-500 от 24.09.2021 на сумму 4036 руб., по контракту № П-ИМЗ-2021-004460-501 от 24.09.2021 на сумму 21911 руб. 

Ответчик доказательств возврата полученных денежных средств в установленные соглашениями о расторжении контрактов сроки, либо надлежащих доказательств наличия обстоятельств, освобождающих его от возврата спорных денежных средств, суду не представил. 

По смыслу норм главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации акт о приемке выполненных работ является доказательством выполнения работ. 

Доказательством частичного выполнения работ по контрактам являются указанные выше подписанные заказчиком и подрядчиком акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ. 

По условиям соглашений о расторжении контрактов в течение 5 рабочих дней с момента их подписания подрядчик (ответчик) должен был возвратить заказчику полученный и неотработанный аванс по контрактам за вычетом стоимости фактически выполненных подрядчиком работ. 

Локальные сметные расчеты на общую сумму 1007410 руб. 80 коп. (175634,40 руб. + 480508,80 руб. + 351267,60 руб.) на выполнение скрытых работ, на которые ответчик ссылается в обоснование возражений, с заказчиком согласованы не были, доказательств иного ответчиком не представлено. 

Учитывая необходимость выполнения работ, которые фактически не были выполнены ответчиком, 15.12.2021 между истцом и ООО «КОМФОРТ-ПЛЮС» был заключен договор № 196 на выполнение необходимых работ по адресу: 

<

...> (флюорографический кабинет) и договор №212 с ИП ФИО2 на выполнение необходимых работ по адресу: 

<

...> (рентгенологический кабинет). Работы, предусмотренные условиями договоров, были выполнены ООО «КОМФОРТ-ПЛЮС» и ИП ФИО2 (третьи лица по настоящему делу) в полном объеме и приняты истцом. 

Ответчик, являясь согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц (том 1, л.д. 150-154) профессиональным участником в области производства подрядных работ, ознакомившись с контрактами, действуя без принуждения и в условиях конкурентной среды, принял на себя обязательства по выполнению согласованного объема работ в установленные сроки; учитывая предъявляемые к работам требования, соотнес все подлежащие учету показатели и документы, определил сроки выполнения работ, подписав контракты, содержащие сроки выполнения работ, принял их в качестве обязательного условия контрактов. Подписав соглашения о расторжении контрактов, ответчик обязался возвратить указанный в соглашениях неосвоенный аванс в течение 5 рабочих дней с момента их подписания. 

При изложенных обстоятельствах, принимая во внимание отсутствие сведений о согласии заказчика на выполнение и оплату дополнительных работ, непредставлении подрядчиком доказательств освоения перечисленного ему авансового платежа, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу об отсутствии у ответчика оснований для удержания суммы аванса и правомерно удовлетворил требования истца о взыскании с ответчика 767533 руб. 

Доводы апеллянта о выполнении дополнительных работ без заключения дополнительных соглашений не нашли своего подтверждения по результатам рассмотрения апелляционной жалобы, исследования представленных лицами, участвующими в деле, доказательств. Доказательства согласования с заказчиком выполненных работ в материалы дела не представлены. 

В пункте 10 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» указано, что подрядчик, не сообщивший заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, не вправе требовать оплаты этих работ и в случае, когда такие работы были включены в акт приемки, подписанный представителем заказчика.

В соответствии с пунктом 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора» если при рассмотрении спора, связанного с расторжением договора, по которому одна из сторон передала в собственность другой стороне какое-либо имущество, судом установлено нарушение эквивалентности встречных предоставлений вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей одной из сторон, сторона, передавшая имущество, вправе требовать возврата переданного другой стороне в той мере, в какой это нарушает согласованную сторонами эквивалентность встречных предоставлений.

Кроме того, суд апелляционной инстанции учитывает, что дело о взыскании стоимости фактически выполненных работ было выделено в отдельное производство №А34-15562/2022, что не препятствует, как указал суд первой инстанции, ответчику  представлять доказательства в обоснование исковых требований в рамках дела №А34-15562/2022. 

При указанных обстоятельствах суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы, доводы которой проверены в полном объеме, но не могут быть учтены как не влияющие на законность и обоснованность принятого по делу судебного акта.

Апелляционная коллегия приходит к выводу, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, отмене не подлежит. Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции не установлено.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе подлежат распределению в соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ и в силу оставления апелляционной жалобы без удовлетворения относятся на апеллянта.

Руководствуясь статьями 176, 268- 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции 

 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Курганской области от 12.10.2022 по делу №А34-20880/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

 

Председательствующий судья                                            А.П. Скобелкин 

 

Судьи                                                                                   А.А. Арямов 

 

                                                                                              С.Е. Калашник