АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25

http://www.kursk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А35-2988/2021

19 июля 2021 года

г. Курск

Резолютивная часть решения объявлена  12.07.2021.

Решение в полном объеме изготовлено 19.07.2021.    

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Волковой Е.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «Тёплый мир» 

к обществу с ограниченной ответственностью «ПИЛИГРИММ»

о взыскании в качестве неосновательного обогащения денежные средства в размере 1 652 106 руб. 64 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 13 884 руб. 48 коп., а также расходов по уплате государственной пошлины.

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца: не явился (извещен надлежащим образом),

от ответчика: не явился (извещен надлежащим образом).

Общество с ограниченной ответственностью «Тёплый мир», расположенное по адресу: 445047, 

<

...> Октября, д. 10, офис 9, зарегистрировано в качестве юридического лица 19.10.2017, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>. 

Общество с ограниченной ответственностью «ПИЛИГРИММ», расположенное по адресу: 305023, 

<

...>, литер В5, офис 16А, зарегистрировано в качестве юридического лица 03.04.2019, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>. 

Общество с ограниченной ответственностью «Тёплый мир» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ПИЛИГРИММ» о взыскании качестве неосновательного обогащения денежные средства в размере 1 652 106 руб. 64 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 13 884 руб. 48 коп., а также расходов по уплате государственной пошлины.

15 июня 2021 года от ответчика поступил отзыв на исковое заявление с возражениями относительно удовлетворения заявленных требований.

 06 июля 2021 года от истца поступили письменные возражения на отзыв ответчика, которые приобщены судом к материалам дела. 

В судебное заседание стороны, надлежащим образом уведомленные о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились.

Неявка лиц, участвующих в деле, надлежаще извещенных о времени и месте судебного разбирательства, в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, не препятствует рассмотрению спора в его отсутствие по существу по имеющимся в материалах дела документам.

Изучив материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Между обществом с ограниченной ответственностью «Тёплый мир» (Подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью ПИЛИГРИММ»  (Субподрядчик) 11 марта 2020 года заключен договор субподряда №СП027/10.03.2020-ТБ/ОС – СУБ 1, по условиям которого Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство в установленный договором срок выполнить комплекс строительно-монтажных работ на объекте, в соответствии с условиями договора и Рабочей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявленные к ним требования, а также весь объем выполненных работ в сроки, установленные настоящим договором, а также осуществить гарантийное обслуживание объекта в гарантийный период.

Конкретный объем работ, выполняемых по договору, определяется в Рабочей документации и локальных сметах №02-01-07-1 и №02-01-09-1; (Приложение №1 к настоящему договору).

При этом Подрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, своевременно предоставить Субподрядчику доступ на площадку в установленный договором срок, а также принять результат работ и оплатить обусловленную настоящим договором цену (пункт 2.1 договора).

В соответствии с пунктом 2.2 договора работа выполняется в установленные договором сроки иждивением Субподрядчика - из его материалов, его силами и средствами, а Генподрядчик принимает результат выполненных работ и оплачивает Субподрядчику за выполненные работы обусловленную Договором цену. 

Согласно пункту 3.1 договора договорная цена строительства Объекта указана исходя из объема запланированных работ и указана в локальных сметах №02-01-07-1 и №02-01-09-1 (Приложение №1 к настоящему Договору). На момент заключения договора эта стоимость составляет 25 222 805,77 рублей (Двадцать пять миллионов двести двадцать две тысячи восемьсот пять рублей 77 копеек), в том числе НДС 20% - 4 203 800,96 (Четыре миллиона двести три тысячи восемьсот рублей 96 копеек).

Из пункта 3.2 договора следует, что в целях гарантирования исполнения Субподрядчиком сроков выполнения и качества работ. Подрядчик удерживает 10% (Десять процентов) от стоимости принятых от Субподрядчика работ из каждого (последующего) платежа в пользу Субподрядчика в качестве гарантийного депозита.

В пункте 3.3 договора стороны установили следующий порядок расчетов по настоящему договору: 3.3.1. Подрядчик в срок:

- до «30» июня 2020 года выплачивает в пользу Субподрядчика авансовый (предварительный) платеж в сумме: 7 566 841,73 рублей (Семь миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот сорок один рубль 73 копейки), в том числе НДС-20%: 1 261140,29 рублей.

- Субподрядчик не позднее 1-го (Одного) календарного дня с даты получения от Подрядчика сумм оплаты в счет предстоящего выполнения работ, выставляет Подрядчику счета-фактуры с отражением в них описания работ, следующих к выполнению в рамках настоящего Договора, сумм полученных авансовых платежей и исчисленных сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных Субподрядчику, исходя из сумм полученных предварительных платежей.

В силу пункта 3.3.2 договора последующие платежи по договору за выполненные Субподрядчиком и принятые Подрядчиком работы осуществляются Подрядчиком на основании: 

- Актов приемки выполненных работ по форме КС-2, Справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

- исполнительной документации;

- - отчеты о расходе давальческих материалов;

- документов, подтверждающих качество выполненных и предъявленных к приемке Работ (акты освидетельствования скрытых работ, протоколы испытаний, геодезические исполнительные схемы и др.);

- счетов-фактур, выставленных Субподрядчиком Подрядчику при передаче результата выполненных работ в размерах стоимости, выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком объемов работ, указанных Субподрядчиком в Актах приемки выполненных работ и Справках о стоимости выполненных работ;

- акта сверки взаимных расчетов;

- счета на оплату

в течение 10-ти (Десять) банковских дней после утверждения Подрядчиком объемов выполненных Субподрядчиком работ (подписания Актов приемки выполненных работ), с

- зачетом перечисленных Подрядчиком в пользу Субподрядчика авансовых платежей в размере, пропорциональном стоимости выполненных работ к общей стоимости работ по Договору;

- удержанием суммы гарантийного депозита в размере 10 % от стоимости принятых работ. 

Исходя из пункта 4.1 договора, работы по договору должны быть начаты и завершены Субподрядчиком, при условии готовности к передаче строительного объема к выполнению работ, и на момент подписания договора определены следующим периодом:

Начало работ: «11» марта 2020 года. 

Окончание работ: «31» июля 2020 года. 

Пунктом 18.3 договора предусмотрено, что Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Субподрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становиться явно невозможным.

03 июля 2020 года между сторонами к указанному договору заключено дополнительное соглашение №1, которым пункт 4.1 договора изложен в следующей редакции: 

«Работы по Договору должны быть начаты и завершены субподрядчиком, при условии готовности к передаче строительного объема к выполнению работ, и на момент подписания Договора определены следующим периодом:

Начало работ: «11» марта 2020 года.

Окончание работ: «15» ноября 2020 года».

Во исполнение указанного договора обществом с ограниченной ответственностью «Тёплый мир» перечислило на счет общества с ограниченной ответственностью «ПИЛИГРИММ» денежные средства в сумме 3 000 000 руб. по платежному поручению от 22 мая 2020 года №305.

Обществом с ограниченной ответственностью «ПИЛИРИММ» были выполнены работы стоимостью 4 629 437 руб. 31 коп. согласно подписанным в двустороннем порядке справке стоимости выполненных работ и затрат от 07 августа 2020 года №2, акту о приемке выполненных работ от 07 августа 2020 года №2, стоимостью 374 322 руб. 80 коп. согласно подписанным в двустороннем порядке справке стоимости выполненных работ и затрат от 31 июля 2020 года №1, акту о приемке выполненных работ от 31 июля 2020 года №1.

Общество с ограниченной ответственностью «Тёплый мир» произвело оплату выполненных работ, перечислив на счет общества с ограниченной ответственностью «ПИЛИГРИММ» 374 322 руб. 79 коп. по платежному поручению от 04 августа 2020 года №525, 4 629 437 руб. 31 коп. по платежному поручению от 24 августа 2020 года №580.

30 сентября 2020 года между сторонами заключено соглашение о расторжении договора субподряда от 11 марта 2020 года №СП027/10.03.2020-ТБ/ОС – СУБ 1.

В пункте 1.2 данного соглашения указано, что Субподрядчик обязуется до 31.12.2020 перечислить Подрядчику сумму задолженности по предварительным (авансовым) платежам за строительно-монтажные работы на объекте: Тепличного комплекса «Агрокультура Групп» площадью 20га по производству овощной продукции в закрытом фунте по адресу; Московская область, Каширский район, с/п Знаменское, в рамках договора №СП027/10.03.2020-ТБ/ОС-СУБ1 от 11 марта 2020 года, в размере 1 652 106,64 рублей (Один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи сто шесть руб. 64 коп.). С даты поступления суммы задолженности по предварительным (авансовым) платежам на расчетный счет Подрядчика Стороны освобождаются от имущественных претензий друг к другу. 

Однако обществом с ограниченной ответственностью «ПИЛИГРИММ» обязательства по возврату соответствующих денежных средств выполнены не были.

Ссылаясь на то, что ответчиком требования по возврату денежных средств в добровольном порядке исполнены не были, истец обратился в суд с настоящим иском.

Суд считает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом. 

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

Статьей  307 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Из пункта 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

 Согласно статье 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Из пункта 3 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Пунктом 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. 

Из статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации  следует, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Как указывалось ранее, в связи с уменьшением объема работ по договору субподряда от 11 марта 2020 года №СП027/10.03.2020-ТБ/ОС – СУБ 1 данный договор был расторгнут на основании соглашения от 30 сентября 2020 года, ответчик обязался возвратить неиспользованные денежные средства в размере 1 652 106 руб. 64 коп. в срок до 31 декабря 2020 года.

Денежные средства обществом с ограниченной ответственностью «ПИЛИГРИММ» не возвращены.

Доказательств обратного в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суду не представлено.

С учетом указанного, исходя из фактических обстоятельств дела, суд приходит к выводу о возникновении у ответчика обязанности по возврату истцу денежных средств, уплаченных в качестве аванса по соответствующему договору субподряда, в сумме 1 652 106 руб. 64 коп.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Расчет процентов судом проверен и признан обоснованным.

Приведенные ответчиком возражения относительно процентов за пользование чужими денежными средствами судом рассмотрены и отклоняются как необоснованные и противоречащие представленным в материалы дела доказательствам.

Так, каких-либо доказательств приостановления выполнения работ ответчиком в материалы дела не представлено.

Распространение на территории Российской Федерации коронавирусной инфекции, исходя из конкретных обстоятельств настоящего дела, не может являться основанием для освобождения ответчика от исполнения обязательств, предусмотренных соглашением.

На основании изложенного, оценив представленные документы, суд приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по уплате государственной пошлины в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

В силу пункта 1 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возврату из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 152, 167-171, 176, 177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд 

Р  Е  Ш  И  Л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Тёплый мир» удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПИЛИГРИММ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Тёплый мир» денежные средства в размере 1 652 106 руб. 64 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 12.01.2021 по 24.03.2021 в сумме 13 884 руб. 48 коп., 29 660 расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, в Арбитражный суд Центрального округа, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                         Е.А. Волкова