АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(с перерывом в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)

Дело № А66-4991/2022

г.Тверь

20 июля 2022 года

(резолютивная часть решения от  14 июля 2022 года)

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Борцовой Н.А., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания помощником судьи Ужко А.В., с участием в режиме онлайн-заседания представителя истца - от истца – ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО2, с. Выдропужск, (ОГРНИП 319695200051165, ИНН 

<

***>), к публичному акционерному обществу "Россети Центр", г. Москва, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), 

неимущественный спор,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО2, с. Выдропужск, (далее - истец, Предприниматель) обратился в Арбитражный суд Тверской области с исковым заявлением к публичному акционерному обществу "Россети Центр", г. Москва, (далее - ответчик, Акционерное общество) о возложении на ответчика обязанности в течение тридцати дней со дня вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца в соответствии с условиями договора № 42085324 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Ответчик в процессе рассмотрения дела требования не признал, ссылаясь на нарушение  Предпринимателем пункта 16.6 Правил  Технологического присоединения, а именно: не направил уведомление о готовности к технологическому присоединению.

Информация о месте и времени судебного заседания размещена на официальном сайте арбитражных судов в общедоступной автоматизированной системе «Картотека арбитражных дел» в сети «Интернет» (http://kad.arbitr.ru). 

Ответчик участия представителя в судебном заседании не обеспечил.

В судебном заседании объявлен перерыв до  16 часов 30 минут 14 июля 2022 года.

Информация о перерыве  размещена на официальном сайте арбитражных судов в общедоступной автоматизированной системе «Картотека арбитражных дел» в сети «Интернет» (http://kad.arbitr.ru). 

14 июля 2022 года судебное заседание продолжено.

К дате судебного заседания от истца поступили пояснения в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, которые приобщены к материалам дела.

Из материалов дела следует, что между истцом (Заявитель) и публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания  Центра  в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», в настоящее время в связи с реорганизацией  - публичное акционерное общество «Россети Центр» (Сетевая организация) заключен договор № 42085324 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее по тексту – Договор), неотъемлемой частью которого являются технические условия.  

В соответствии с пунктом 1.2 Договора Сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.

Пунктом  7 Договора предусмотрено, что Сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств. 

Пунктом 9 Договора технологического присоединения определены обязанности Заявителя по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению. 

 В соответствии с пунктом 11 Договора размер платы за технологическое присоединение составляет 59 094-80 рублей, порядок внесения платы определен пунктом 13 Договора.  

 Согласно пункту 6 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Датой заключения договора, как следует из пункта 23 Договора, считается дата оплаты заявителем счета. 

В соответствии с пунктом 13 Договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется в следующем порядке: 15% - в течение 5 рабочих дней со дня выставления счета на оплату, 30% - вносятся в течение 60 дней со дня оплаты первого платежа, но не позже дня фактического присоединения. 

Неотъемлемой частью заключенного Договора являются технические условия, предусматривающие следующее: 

1. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Местоположение установлено относительно ориентира расположенного в границах участка. Российская Федерация, Тверская обл., Спировский муниципальный район, Выдропужское с/п (земельный участок с кадастровым номером 69:31:0000016:1724).

2. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 140 кВт, ввод трехфазный.

3. Категория электроприемников по надежности электроснабжения: III (третья).

4. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.

5. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: определяется Договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

6. Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств в точке присоединения: выходные контакты коммутационного аппарата, входящего в состав распределительной коробки сетевой организации, запитанного от проектируемой ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ – 160 кВА, 140 кВт.

7. Основной источник питания:

- ПС 35/10 кВ Выдропужск, 2 секция шин 10 кВ;

- ВЛ 10 кВ фид. № 14;

- Проектируемый участок ВЛ 10 кВ;

- Проектируемая КТП 10/0,4 кВ - 160 кВА;

- Проектируемая ВЛ 0,4 кВ;

- Выносной пункт учета (ВПУ).

8. Резервный источник питания: нет.

9. Сетевая организация осуществляет:

9.1 Реконструкцию ВЛ 10 кВ фид. № 14 ПС 35/10 кВ Выдропужск в части монтажа ответвительной арматуры в сторону проектируемого участка ВЛ 10 кВ от опоры № 3. Объем реконструкции, номер опоры уточнить при проектировании.

9.2 Проектирование и строительство новой КТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА. Тип ТП и мощность трансформатора уточнить при проектировании.

9.3 Проектирование и строительство участка ВЛ 10 кВ от опоры № 3 ВЛ 10 кВ фид. № 14 ПС 35/10 кВ Выдропужск до проектируемой КТП 10/0,4 кВ проводом марки СИП 3 сечением 50 мм2 протяженностью 0,06 км с установкой ж/б опор. Трассу прохождения, протяженность, марку и сечение провода уточнить при проектировании.

9.4 Проектирование и строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ до выносного пункта учета (ВПУ сетевой организации, установленного на опоре вблизи границы земельного участка Заявителя проводом марки СИП 2 сечением не менее 95 мм2 ориентировочной протяженностью 0,015 км. Трассу прохождения, протяженность, марку и сечение провода уточнить при проектировании.

9.5 На границе раздела сети (по балансовой принадлежности) оборудование трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной установки. Фактически прибор трехфазного учета разместить в пункте учета электроэнергии с монтажом на опоре сетевой организации, с обеспечением доступа в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 № 442 (ред. от 11.05.2017) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режим потребления электрической энергии». Ниже пункта учета предусмотреть монтаж распределительной коробки с коммутационным аппаратом. Пункт учета должен быть оборудован заводским запирающим устройством и иметь окно для снятия показаний с электросчетчика на уровне отсчетного устройства. Класс точности трансформаторов тока для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии должен быть не ниже 0,5. Подключение счетчика к измерительным трансформаторам осуществить через испытательный блок (клеммник), с возможностью опломбировки. Исключить установку во вторичных цепях учёта коммутационных аппаратов, а также амперметров и вольтметров. Предусмотреть защиту средств учета от несанкционированного доступа. Установить трехфазный прибор учета полукосвенного включения (PLC/RF/GSM -технология), соответствующий стандарту ПАО «Россети» СТО 34.01-5.1-009-2019, класса точности не ниже 1.0.

9.6 Комплектование ВПУ вводным коммутационным аппаратом, оснащённым защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети. Выбор номинальных параметров коммутационных аппаратов произвести согласно разрешенной мощности на присоединение.

9.7 Комплектование распределительной коробки, размещаемой на опоре сетевой организации, коммутационным аппаратом, оснащённым защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети. Выбор номинальных параметров коммутационного аппарата произвести согласно разрешенной мощности на присоединение.

9.8 Проверку выполнения заявителем технических условий с проведением осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя с его участием.

9.9 Маркирование прибора учёта электрической энергии, вводного защитного аппарата специальными знаками визуального контроля несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.

9.10 Выполнение фактического присоединения объекта заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата в распределительной коробке сетевой организации (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).

10. Заявитель осуществляет:

10.1 Комплектование вводного распределительного устройства (ВРУ) объекта вводным коммутационным аппаратом, оснащенным защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети. Выбор номинальных параметров коммутационного аппарата произвести согласно разрешенной мощности на присоединение.

10.2 При наличии автономного источника электроснабжения недопущение его работы параллельно с сетью сетевой организации и/или выдачи электроэнергии в сеть.

10.3 Обеспечение готовности к физическому соединению ответвления от распределительной коробки сетевой организации до ВРУ объекта (провод СИП или кабель, материалы и детали для крепления и присоединения).  

10.4 Разработку Проекта на обустройство ответвления от распределительной коробки до ВРУ объекта, отвечающего требованиям, предъявляемым к нормативно-технической документации, согласно обязательствам раздела 13. технических условий. При проектировании и строительстве ВЛ 0,4 кВ использовать провод марки СИП. До выполнения строительно-монтажных работ Проект согласовать с Филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

Как указывает Предприниматель, им 26 июня 2021 года оплачен счет, выставленный Сетевой организацией на сумму 8 864-22 рублей, 15 июля 2021 года в адрес Сетевой организации внесено 30% стоимости технологического присоединения - 17 728-44 рублей; получено заключение об отсутствии замечаний к рабочей документации. 

Предприниматель обратился к ответчику с просьбой незамедлительно исполнить обязательства по осуществлению технологического присоединения объекта заявителя. 

Невыполнение Акционерным обществом  мероприятий по технологическому присоединению послужило основанием для обращения истца  в суд с настоящим иском.

Проанализировав материалы дела, оценив собранные по делу доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд пришел к следующим выводам. 

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств. 

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений. 

       Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. Указанная норма закона содержит перечень юридических фактов, с которыми связано возникновение гражданских прав и обязанностей, как по воле субъекта  гражданского права, так и помимо его воли. Одним из оснований возникновения гражданских прав и обязанностей является договор.

        В конкретном случае взаимоотношения сторон по делу урегулированы договором № 42085324 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям неотъемлемой частью которого являются технические условия.

        Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.         

  На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310).

         В силу статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

         Срок исполнения обязательств Сетевой организацией определен заключенным между сторонами Договором, а также Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей. 

        Как указывалось выше, взаимоотношения сторон по делу урегулированы договором № 42085324 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям неотъемлемой частью которого являются технические условия. Спорные отношения сторон регулируется нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

        В соответствии с пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

       Согласно части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее Закон об электроэнергетике) технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

         Во исполнение Закона об электроэнергетике постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 утверждены Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила технологического присоединения, Правила № 861) (здесь и далее в редакции, действующей на момент заключения договора). 

Правила №861 определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) юридических и физических лиц к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

       Согласно пункту 3 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим лицом (пункт 6 Правил № 861). 

        В соответствии с пунктом 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. 

       Как следует из пункта 18 Правил технологического присоединения, мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

        а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями;

        б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

        в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

г) выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и сетевой организацией требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем) (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ);

       д) проверку выполнения заявителем (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ) и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил;

       д(1)) выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем;

       д(2)) выполнение мероприятий по обеспечению возможности вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя, присоединенного к электрическим сетям этой сетевой организации, в случае технологического присоединения вновь сооружаемого (реконструируемого) объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя к электрическим сетям той же сетевой организации в целях замещения им такого объекта по производству электрической энергии (мощности);

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений. 

В соответствии пунктом 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

Кроме того, лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  К числу таких последствий относится признание требований истца обоснованными при непредставлении другой стороной в споре доказательств, опровергающих доводы истца. 

Материалами дела полностью подтверждается не оспорено Акционерным обществом перечисление Предпринимателем Сетевой организации  26 июня 2021 года 8 864-22 рублей, 15 июля 2021 года - 17 728-44 рублей; а также получение заключения об отсутствии замечаний к рабочей документации. 

        В силу пункта  3 статьи  401 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

        В нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Сетевая организация не представила доказательств выполнения условий Договора и технических условий относительно срока выполнения работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям. 

Возражая против удовлетворения иска, Акционерное общество ссылается на то, что истцом не выполнены обязательства по Договору, обосновывая свои возражения ссылкой на п. 16(6) Привил, в соответствии с которым срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:

       а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий;

       б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий;

       в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий;

       г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.

Также ответчик указывает на то, что деятельность Акционерного общества является регулируемой, недостаток денежных средств  в составе регулируемого тарифа для подключения  льготных категорий  потребителей на протяжении многих лет  объективно препятствует выполнению обязательств по договорам перед заявителями.

Арбитражный суд, оценив изложенные в отзыве на иск доводы ответчика, считает их несостоятельными, поскольку указанного рода обстоятельства представляют собой нормальный риск предпринимательской деятельности и не могут служить основанием для освобождения от ответственности лица, которое сознательно избрало для себя предпринимательскую деятельность в качестве экономической. 

        Кроме того, ответчик, являясь Сетевой организацией, осведомлён при подписании договоров о расходах, учитываемых при установлении тарифов. 

       Частью 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации  установлено, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. При этом арбитражный суд учитывает, что ответчик является специализированной организацией, длительное время оказывающей услуги по технологическому присоединению, по передаче электроэнергии, оперативно-техническому управлению. Учитывая указанную специфику и осведомлённость в вопросах процедуры технологического присоединения и сопряжённых с ним вопросов, сетевая организация могла предусмотреть возможность возникновения проблем при исполнении договоров. 

        Довод ответчика о том, что Предприниматель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении технических условий, что сделало невозможным осуществление технологического присоединения его электроустановки в срок, судом отклоняется на основании следующего. 

Невыполнение потребителем со своей стороны технических условий не освобождает сетевую организацию от выполнения обязательств, возложенных на нее как техническими условиями, так и Правилами № 861. Обязательства ответчика по договорам об осуществлении технологического присоединения, указанные в технических условиях, не являются ни обусловленными обязательствами по смыслу статьи 327.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, ни встречными обязательствами по смыслу статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, истцом  выполнены мероприятия, выполнение которых являлось  технически возможным. Иные обязательства, предусмотренные Договором  и техническими условиями со стороны Заявителя выполнить  технически невозможно, поскольку  Сетевой организацией  не выполнено ни одного пункта  технических условий, в связи, с чем Предприниматель  не имеет возможности  обеспечить готовность к физическому присоединению.

       При таких обстоятельствах отсутствие уведомления от истца об исполнении им технических условий не препятствует осуществлению ответчиком мероприятий, предусмотренных техническими условиями к выполнению самим ответчиком, для технологического присоединения объектов истца. 

       Учитывает суд и то обстоятельство, что заключая двусторонний возмездный договор, порядок исполнения которого предусмотрен императивными нормами публичного права, Сетевая организация, как профессиональный участник рынка, берет на себя все риски его исполнения, исходя из статуса сторон, а также с учетом того, что такие риски являются неотъемлемо сопутствующими коммерческой деятельности сетевой организации в силу пункта 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

       Таким образом, Сетевая организация обязана надлежаще исполнить соответствующие мероприятия в установленный законом и договором срок. 

        Исковые требования подлежат удовлетворению.

        Предприниматель просит обязать Акционерное общество осуществить вышеуказанные действия в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления в силу решения по настоящему делу. Учитывая объём мероприятий, необходимых для осуществления работ по технологическому присоединению к электрическим сетям, арбитражный суд считает возможным обязать ответчика осуществить вышеуказанные действия в течение 60 календарных дней с момента вступления в силу решения по настоящему делу.

Расходы по оплате  государственной пошлины распределяются по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Обязать публичное акционерное общество "Россети Центр", г. Москва, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 60  календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств индивидуального предпринимателя ФИО2, с. Выдропужск, (ОГРНИП 319695200051165, ИНН 

<

***>) в соответствии с условиями договора №42085324 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Взыскать с публичного акционерного общества "Россети Центр", г. Москва, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2, с. Выдропужск, (ОГРНИП 319695200051165, ИНН 

<

***>) 6 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после вступления решения в законную силу. 

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, город Вологда, в течение месяца со дня его принятия.

 

Судья                                                                                                    Н.А. Борцова