АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-199583/24-141-1433

г. Москва

23 октября 2024 года

Резолютивная часть решения изготовлена 14.10.2024г.  Решение в полном объеме изготовлено 23.10.2024г.  

Арбитражный суд в составе судьи Авагимяна А.Г. рассмотрел дело по иску АО «Рубль» (ИНН 

<

***>) к ООО «Спецстроймонтаж» (ИНН 

<

***>) о взыскании 779 488руб. 54коп. 

УСТАНОВИЛ:

АО «Рубль» обратилось с исковым заявлением к ООО  «Спецстроймонтаж» о взыскании 174 577руб. 50коп. задолженности и 604 911руб.  04коп. неустойки, а также неустойки, начисленной на сумму долга в размере 0,33% за  каждый день просрочки за период с 22.08.2024г. по дату фактической оплаты долга по  соглашениям № 230804-1МДА от 04.08.2023г. и № 230824-1БМО от 24.08.2023г.  

При решении вопроса о принятии искового заявления к производству судом  установлены основания, предусмотренные статьей 227 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, для рассмотрения дела в порядке упрощенного  производства.  

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 27.08.2024г. исковое заявление  принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.  

Копия определения Арбитражного суда г. Москвы направлена лицам,  участвующим в деле, а также размещена на официальном сайте https://kad.arbitr.ru/.  

Лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом в порядке ст. 123  АПК РФ о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке  упрощенного производства.  

Ответчик против удовлетворения требований возражал по доводам отзыва,  заявил о применении ст. 333 ГК РФ, а также заявил ходатайство о рассмотрении дела  по общим правилам искового производства.  

В соответствии с ч. 5 ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации суд выносит определение о рассмотрении дела по общим  правилам искового производства или по правилам административного  судопроизводства, если в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства  удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело, принят встречный иск,  который не может быть рассмотрен по правилам, установленным настоящей главой,  либо если суд, в том числе по ходатайству одной из сторон, пришел к выводу о том,  что:  

1) порядок упрощенного производства может привести к разглашению  государственной тайны;  

2) необходимо провести осмотр и исследование доказательств по месту их  нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания;  

3) заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к другим  лицам, или судебным актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены права и  законные интересы других лиц;  

4) рассмотрение дела в порядке упрощенного производства не соответствует  целям эффективного правосудия, в том числе в случае признания судом необходимым  выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные  доказательства.  

Согласно разъяснениям, содержащимся в Постановлении Пленума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 г. № 62 «О некоторых  вопросах рассмотрения арбитражными судами дел», обстоятельства, препятствующие  рассмотрению дела в порядке упрощенного производства, указанные в ч. 5 ст. 227  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, могут быть выявлены  только в ходе рассмотрения этого дела после принятия искового заявления, заявления к  производству, а не одновременно с его принятием, за исключением случая,  предусмотренного п. 1 ч. 5 этой статьи. В случае выявления таких обстоятельств  арбитражный суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам  искового производства или по правилам административного судопроизводства и  указывает в нем действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и  сроки совершения этих действий (ч. 6 ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации), то есть переходит к подготовке дела к судебному  разбирательству, осуществляемой в соответствии с положениями частей 1 и 2 статьи  135 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Названное определение может быть вынесено, в том числе по результатам  рассмотрения арбитражным судом ходатайства стороны, указавшей на наличие одного  из обстоятельств, предусмотренных п.п. 1 - 4 ч. 5 ст. 227 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, в случае его удовлетворения.  

В определении о рассмотрении дела по общим правилам искового производства  или по правилам административного судопроизводства должно содержаться  обоснование вывода арбитражного суда о невозможности рассмотрения дела в порядке  упрощенного производства; обжалование такого определения Арбитражным  процессуальным кодексом Российской Федерации не предусмотрено.  

Суд, рассмотрев заявленное ходатайство, не установил наличия  предусмотренных ч. 5 ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации оснований для рассмотрения дела по общим правилам искового  производства. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации не  предусматривает обязательности перехода к рассмотрению дела по общим правилам  искового производства в случае заявления об этом лица, участвующего в деле,  считающего, что данное дело должно быть рассмотрено в этом порядке, а не в порядке  упрощенного производства.  

Ответчиком представлен встречный иск о взыскании 465 540руб. 00 коп.  задолженности и 58 195руб. 50коп. неустойки по соглашениям № 230804-1МДА от  04.08.2023г. и № 230824-1БМО от 24.08.2023г.  

В соответствии с ч. 3 ст. 132 АПК РФ встречный иск принимается арбитражным  судом в случае, если:  

1) встречное требование направлено к зачету первоначального требования; 

2) удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части  удовлетворение первоначального иска;  

3) между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их  совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению  дела.  

По смыслу ч. 4 ст. 132 АПК РФ отсутствие одного из указанных критериев  является основанием для возвращения встречного искового заявления.  

Суд считает, что встречный иск подлежит возвращению, поскольку отсутствуют  основания, предусмотренные ст. 132 АПК РФ.  

По смыслу ст. 132 АПК РФ встречный иск должен быть заявлен в том случае,  если возражения ответчика против первоначального иска могут быть рассмотрены  только в форме встречного иска.  

Судом установлено, что принятие встречного иска необоснованно расширит  предмет доказывания, более того приведет к нарушению принципа процессуальной  экономии судебного процесса.  

Заявление встречных требований по одному и тому же договору не означает  безусловную связь первоначального и встречного исков. Исковые требования,  предъявленные к исследованию и оценке судом по первоначальному и встречному  искам различны, что не будет способствовать более быстрому и правильному  рассмотрению дела, приведет к необоснованному затягиванию процесса. Таким  образом, между встречным и первоначальным исками отсутствует взаимная связь.  

Учитывая, что спор рассматривается судом в порядке упрощенного  производства, принятие встречного иска неизбежно влечет за собой затягивание  судебного процесса.  

При указанных обстоятельствах суд не находит оснований, предусмотренных ст.  132 АПК РФ, для принятия встречного искового заявления.  

Истцом заявлено о признании приложения № 5 к отзыву на исковое заявление -  текст претензии исх. № 132/2 от 26.09.2024г. недопустимым доказательством и  подлежащим исключению его из числа доказательств по делу.  

Рассмотрев заявленное ходатайство, суд считает его подлежащим отклонению на  основании следующего.  

Согласно ст. 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны  быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в  арбитражном суде иными доказательствами.  

По общему правилу, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и  возражений (ч. 1 ст. 65 АПК РФ). Однако такая обязанность не является безграничной.  Если истец в подтверждение своих доводов приводит убедительные доказательства, а  ответчик с ними не соглашается, не представляя документы, подтверждающие его  позицию, то возложение на истца дополнительного бремени опровержения  документально неподтвержденной позиции процессуального оппонента будет  противоречить состязательному характеру судопроизводства (статьи 8, 9 АПК РФ).  

Представленная ответчиком в материалы дела претензия исх. № 132/2 от  26.09.2024г. в силу изложенных норм процессуального права, не является  недопустимым доказательством, при этом, само по себе несогласие истца с  представленным ответчиком в материалы дела доказательством, не может  свидетельствовать о его недопустимости, неотносимости и недостоверности.  

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в порядке главы  29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции,  действовавшей на дату принятия решения на основании доказательств, представленных  в течение установленного судом срока.  

Резолютивная часть судебного акта размещена на официальном сайте  арбитражного суда города Москвы.  

В канцелярию суда от ответчика поступило заявление об изготовлении  мотивированного решения по делу.  

Исследовав и оценив письменные доказательства, суд считает исковые  требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.  

Как усматривается из материалов дела, 04.08.2023г. между истцом и ответчиком  заключен договор строительного подряда № 

<

***>.  

В соответствии с вышеуказанным договором истец обязался выполнить работы,  а ответчик принять и оплатить их.  

Согласно п. 1.2 договора характер, объем, сроки, смета, порядок платежей, адрес  проведения работ и объектов согласовывается в дополнительных соглашениях, которые  являются неотъемлемой частью договора.  

Так, согласно условиям соглашения № 230804-1МДА от 04.08.2023г., подрядчик  принял на себя обязательство выполнить работы по изготовлению и монтажу офисных  дверей на объекте: ул. Панфилова, 19, стр. 1. Стоимость работ составляет 303 000руб.  00коп.  

Условиями соглашения № 230824-1БМО от 24.08.2023г., предусмотрена  обязанность подрядчика по выполниению работы по изготовлению и монтажу офисной  перегородки с дверью на объекте, расположенном по адресу: ул. Якиманская наб. 4,  стр. 1. Стоимость работ составляет 278 925руб. 00коп.  

В порядке ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые  предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять  выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора,  ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об  этом подрядчику.  

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться  на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были  оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования  об их устранении.  

Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу  без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть  установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).  

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора  подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном  способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно  скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их  обнаружении.  

Истец свои обязательства по соглашениям выполнил надлежащим образом, о  чем свидетельствуют акты выполненных работ КС-2 № 182 от 29.09.2023г. и КС-3   № 182 от 29.09.2023г. по соглашению № 230804-1МДА от 04.08.2023г. и акты  выполненных работ КС-2 № 183 от 29.09.2023г. и КС-3 № 183 от 29.09.2023г. по  соглашению № 230824-1БМО от 24.08.2023г., направленные в адрес ответчика  заказным письмом с описью вложения.  

Доказательств направления в адрес истца мотивированного отказа от приемки  работ, ответчик в материалы дела не представил.  

Поскольку основания, препятствующие подписанию актов у ответчика  отсутствуют, то акты выполненных работ в силу п. 6.4 договора и п. 4 ст. 753 ГК РФ  считаются подписанными в одностороннем порядке, а работы – принятыми без  замечаний и подлежащими оплате.  

В порядке ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим  образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.  

Оплата ответчиком произведена частично, задолженность ответчика по  соглашению № 230804-1МДА от 04.08.2023г. составила 90 900руб. 00коп., по  соглашению № 230824-1БМО от 24.08.2023г. составила 83 677руб. 50коп. и до  настоящего времени им не погашена.  

Так, в действиях ответчика усматривается односторонний отказ от исполнения  обязательств, что в соответствии со ст. 310 ГК РФ не допускается, следовательно,  требование истца о взыскании 174 577руб. 50коп. задолженности является  обоснованным и подлежит удовлетворению в судебном порядке.  

Довод ответчика об отсутствии обязанности по оплате выполненных работ  ввиду отсутствия доказательств выполнения работ истцом, отклоняется судом,  поскольку доказательств наличия со стороны ответчика мотивированных возражений  

по объему и качеству выполненных работ в материалы дела в нарушение ч. 1 ст. 65  АПК РФ не представлено.  

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки, предусмотренной п. 7.2  договора в размере 0,33 % от стоимости работ, утвержденных в соглашениях за каждый  день просрочки, что по расчету истца по соглашению № 2З0804-1МДА от 04.08.2023г.  составляет 314 968руб. 50коп. и по соглашению № 2308241БМО от 24.08.2023г.  составляет 289 942 руб. 54коп. за период с 12.10.2023г. по 21.08.2024г.  

Кроме того, истец просит взыскать неустойку, начисленную на сумму долга в  размере 581 925руб. 00коп. в размере 0,33% за каждый день просрочки за период с  22.08.2024г. по дату фактической оплаты долга.  

Согласно п. 65. Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 7 от  24.03.2016г. по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения  неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической  уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).  

О наличии оснований для снижения неустойки, предусмотренных ст. 333 ГК РФ,  ответчиком не приведено, в связи с чем у суда отсутствуют основания для его  снижения, поскольку в соответствии с п. 71 Постановления Пленума ВС РФ № 7, если  должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а  равно некоммерческая организация при осуществлении ей приносящей доход  деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному  заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме.  

В соответствии с п. 73 Постановления Пленума ВС РФ № 7 бремя доказывания  несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на  ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в  частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть  вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.  

Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения  обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать  оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и  обстоятельств конкретного дела, как того требует ст. 71 АПК РФ.  

Таким образом, в каждом конкретном случае суд оценивает возможность  снижения неустойки с учетом конкретных обстоятельств спора и взаимоотношений  сторон.  

Ответчиком не представлено доказательств того, что размер неустойки явно  несоразмерен последствиям нарушения обязательства.  

Для установления ответственности за неисполнение денежного обязательства  имеет значение именно сам факт нарушения этого обязательства, выражающийся в  неуплате соответствующих денежных средств в срок, а не факт использования  должником этих средств.  

Лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство  при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не  докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие  непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях  обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение  обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для  исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.  

Снижение неустойки судом возможно только в одном случае - в случае явной  несоразмерности неустойки последствиям нарушения права.  

Однако в настоящем споре ответчик не представил суду доказательств,  свидетельствующих о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения  обязательства. Необоснованное уменьшение неустойки судом с экономической точки  зрения позволяет должнику получить доступ к финансированию за счет другого лица  на нерыночных условиях, что в целом может стимулировать недобросовестных  должников к неплатежам. Неисполнение должником денежного обязательства  

позволяет ему пользоваться чужими денежными средствами, однако никто не вправе  извлекать преимущества из своего незаконного поведения.  

Учитывая, что ответчиком не приведены доводы, изложенные в Постановлении  Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 г. № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333  Гражданского кодекса Российской Федерации», то у суда отсутствуют основания для  применения ст. 333 ГК РФ в отношении требования о взыскании неустойки.  

Таким образом, размер неустойки, представленный истцом, судом проверен,  признан правильным и соответствующим последствиям нарушения обязательства, в  связи с чем подлежащим взысканию с ответчика в судебном порядке в заявленной  сумме.  

Иные доводы отзыва ответчика признаны судом необоснованными и не  состоятельными и отклонены ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела,  представленным в дело доказательствам и неправильным применением норм  материального права.  

На основании ст. 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины  относятся на ответчика.  

Руководствуясь ст.ст. 309, 310, 330, 720, 753 ГК РФ, ст.ст. 65, 68, 110, 167-170,  176, 229 АПК РФ, суд  

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении ходатайства АО «Рубль» о рассмотрении дела по общим  правилам искового производства, отказать.  

Встречное исковое заявление и приложенные к нему документы возвратить  ООО «Спецстроймонтаж» (ИНН 

<

***>).  

Возвратить ООО «Спецстроймонтаж» (ИНН 

<

***>) из Федерального  бюджета РФ уплаченную государственную пошлину в сумме 28 277руб. 00коп.,  перечисленную по платежному поручению № 677 от 17.09.2024г.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Спецстроймонтаж»  (ИНН 

<

***>) в пользу Акционерного общества «Рубль» (ИНН 

<

***>)  задолженность по соглашениям № 230804-1МДА от 04.08.2023г. и № 230824-1БМО от  24.08.2023г. в размере 174 577руб. 50коп., неустойку в размере 604 911руб. 04коп. и 18  590руб. 00коп. расходов по уплате госпошлины.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Спецстроймонтаж»  (ИНН 

<

***>) в пользу Акционерного общества «Рубль» (ИНН 

<

***>)  неустойку, начисленную на сумму долга в размере 581 925руб. 00коп. в размере 0,33%  за каждый день просрочки за период с 22.08.2024г. по дату фактической оплаты долга.  

Решение подлежит немедленному исполнению. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления  мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном  объеме.  

По заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке  упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.  Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть  подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке  упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

СУДЬЯ: А.Г. Авагимян