АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102

http://kirov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А28-9365/2020

г. Киров

07 сентября 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 02 сентября 2020 года 

В полном объеме решение изготовлено 07 сентября 2020 года  

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Прозоровой Е.Ю.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев дело по исковому заявлению

Администрации Вахрушевского городского поселения Слободского района Кировской области (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 613110,  Кировская область, пгт.Вахруши, р-он Слободской, ул.Горького, д.1)

к  обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Марика" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 610000, 

<

...>) об устранении недостатков выполненных работ

без участия сторон,

установил:

администрация Вахрушевского городского поселения Слободского района Кировской области (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд Кировской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Марика" (далее – ответчик) об устранении гарантийных недостатков выполненных работ по муниципальным контрактам от 29.08.2017 №0340200003317003986-0174631-01, №0340200003317003985-0174631-01, от 18.06.2018 №0340200003318004051-0174631-01, от 02.07.2018 №0340200003318004502-0174631-01, от 18.07.2018 №0340200003318005033-0174631-02, от 26.08.2018 № 0340200003318004311-0174631-01. В частности, истец просит обязать ответчика устранить в срок до 30.09.2020 следующие недостатки выполненных работ: многочисленные выбоины по всей длине проезжей части ул. Володарского от д.8 до д.29; продольные и поперечные трещины на въезде с северной стороны дома 48 по ул. ФИО2, продольные трещины по центру на проезде у 1,2,3 подъездов дома 48 по ул. ФИО2, продольные трещины на въезде с южной стороны дома 48 по ул. ФИО2, поперечная трещина на тротуаре и на углу дома с южной стороны, а также на стыке с въездом д.48 по ул. ФИО2; сеть продольных и поперечных трещин по всей длине тротуара около дома 2 по ул. Коммунистическая, на проезде к дому № 6а по ул. Ленина многочисленные ямы, выбоины, прорастание растительности через асфальт у дома №4 по ул. Ленина; трещины по краю асфальтобетонного лотка, сеть поперечных трещин на тротуаре перед домом 2 по ул. Советская, прорастание растительности с южной стороны дома 2 по ул. Советская на тротуаре; сеть поперечных и продольных трещин напротив заезда во двор дома ул. Коммунистическая 2Б, продольные трещины у ТП, продольные трещины на въезде по краю проезда от ул. Коммунистическая до детского сада №5.

Исковые требования основаны на положениях статей 721, 722, 724, 755 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и мотивированы неисполнением ответчиком гарантийных обязательств по контракту.

Ответчик отзыв на иск не представил, чем в силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) принял на себя риск наступления последствий несовершения данного процессуального действия. 

Стороны, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, явку представителей в предварительное судебное заседание не обеспечили. Истец представил ходатайство о рассмотрении искового заявления в отсутствие своего представителя. На основании статьи 136 АПК РФ предварительное судебное заседание проводится в отсутствие представителей сторон.

После завершения рассмотрения всех  вынесенных в предварительное судебное заседание вопросов арбитражный суд в отсутствие возражений сторон на основании части 4 статьи 137 АПК РФ  завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции.  

Стороны явку представителей в судебное заседание не обеспечили.

На основании статьи 156 АПК РФ дело рассматривается в отсутствие сторон по представленным в материалы дела доказательствам.

Суд, исследовав в полном объеме представленные в материалы дела доказательства, установил следующие фактические обстоятельства.

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подписан муниципальный контракт от 29.08.2017 № 0340200003317003986-0174631-01 (далее – контракт 1), по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту проезда и придомовых территорий ул. Горького, 

<

...> пгт Вахруши в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к контракту) и сдать их в законченном виде, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта (пункт 1.1 контракта 1).

Место выполнения работ: Кировская область, Слободской район, пгт Вахруши, проезд и придомовые территории ул. Горького, 

<

...>. (пункт 1.3 контракта 1).

Работа считается выполненной после подписания акта приемки выполненных работ заказчиком или его уполномоченным представителем (пункт 1.5 контракта 1).

Гарантийный срок начинается с даты подписания акта приемки выполненных работ. Гарантия качества на выполненные работы 4 года. После завершения выполнения всех работ подрядчик должен предоставить заказчику информацию о сроке предоставления гарантии качества выполненных подрядчиком работ, который стороны фиксируют в акте приемки выполненных работ (пункт 5.2 контракта 1).

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки (дефекты), не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продляется соответственно на период устранения дефектов, возникающих по вине подрядчика. Устранение дефектов, выявленных во время приемки работ, а также в период гарантийного срока, производится подрядчиком за его счет в срок, согласованный с заказчиком, на основании акта выявленных недостатков, составленного заказчиком (пункт 5.3 контракта 1).

Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 рабочих дней со дня получения письменного уведомления заказчика для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения (пункт 5.4 контракта 1).

Согласно пункту 2.1.8 контракта 1 подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившие качество работы в порядке, предусмотренном пунктом 2.6.2 контракта.

Заказчик в праве требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов. В случае выявления несоответствия объемов и качества выполненных работ условиям, содержащимся в описании закупки. Заказчик в течение 3 рабочих дней в письменной форме уведомляет об этом подрядчика, составляет акт выявленных недостатков и направляет его подрядчику. Подрядчик, в согласованные с заказчиком сроки, обязан устранить выявленные недостатки за свой счет (пункт 2.6.2 контракта 1).

Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами обязательств (пункт 9.1 контракта 1).

Обязательства по выполнению предусмотренных контрактом 1 работ были исполнены подрядчиком. В материалы дела представлены акт о приемке выполненных работ от 21.12.2017 №1 формы КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат от 21.12.2017 №1 формы КС-3, подписанные сторонами без возражений и замечаний. 

Как указывает истец, 30.04.2020 проведен осмотр проезда и придомовых территорий ул. Горького, 

<

...> пгт Вахруши, при  участии представителей истца в составе комиссии. По результатам осмотра составлен акт от 30.04.2020, в котором зафиксированы выявленные недостатки (дефекты): на проезде к дому №6а по ул. Ленина выявлены многочисленные ямы и выбоины, прорастание растительности через асфальт у дома №4 по ул. Ленина.

В претензии от 03.06.2020 №716, истец просил ответчика устранить выявленные дефекты и замечания в срок не позднее 20 дней со дня получения претензии. В ответ на указанную претензию ответчик сообщает, что обязуется исправить выявленные недостатки в срок не позднее 30.06.2020.

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подписан муниципальный контракт от 29.08.2017 №0340200003317003985-0174631-01 (далее – контракт 2), по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту проезжей части ул. Володарского от д. 8 до д. 29, пгт Вахруши в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к контракту) и сдать их в законченном виде, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта (пункт 1.1 контракта 2).

Место выполнения работ: 

<

...> от д. 8 до д. 29 (пункт 1.3 контракта 2).

Работа считается выполненной после подписания акта приемки выполненных работ заказчиком или его уполномоченным представителем (пункт 1.5 контракта 2).

Гарантийный срок начинается с даты подписания акта приемки выполненных работ. Гарантия качества на выполненные работы 4 года. После завершения выполнения всех работ подрядчик должен предоставить заказчику информацию о сроке предоставления гарантии качества выполненных подрядчиком работ, который стороны фиксируют в акте приемки выполненных работ (пункт 5.2 контракта 2).

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки (дефекты), не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продляется соответственно на период устранения дефектов, возникающих по вине подрядчика. Устранение дефектов, выявленных во время приемки работ, а также в период гарантийного срока, производится подрядчиком за его счет в срок, согласованный с заказчиком, на основании акта выявленных недостатков, составленного заказчиком (пункт 5.3 контракта 2).

Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 рабочих дней со дня получения письменного уведомления заказчика для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения (пункт 5.4 контракта 2).

Согласно пункту 2.1.8 контракта 2 подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившие качество работы в порядке, предусмотренном пунктом 2.6.2 контракта.

Заказчик в праве требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов. В случае выявления несоответствия объемов и качества выполненных работ условиям, содержащимся в описании закупки. Заказчик в течение 3 рабочих дней в письменной форме уведомляет об этом подрядчика, составляет акт выявленных недостатков и направляет его подрядчику. Подрядчик, в согласованные с заказчиком сроки, обязан устранить выявленные недостатки за свой счет (пункт 2.6.2 контракта 2).

Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами обязательств (пункт 9.1 контракта 2).

Обязательства по выполнению предусмотренных контрактом 2 работ были исполнены подрядчиком. В материалы дела представлены акт о приемке выполненных работ от 21.12.2017 №2 формы КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат от 21.12.2017 №2 формы КС-3, подписанные сторонами без возражений и замечаний. 

Как указывает истец, 30.04.2020 проведен осмотр проезжей части ул. Володарского от д. 8 до д. 29, пгт Вахруши, при  участии представителей истца в составе комиссии. По результатам осмотра составлен акт от 30.04.2020, в котором зафиксированы выявленные недостатки (дефекты): многочисленные выбоины по всей длин проезжей части. 

В претензии от 19.05.2020 №625, истец просил ответчика устранить выявленные дефекты и замечания в срок не позднее 20 дней со дня получения претензии. В ответ на указанную претензию ответчик сообщает, что обязуется исправить выявленные недостатки в срок не позднее 30.06.2020.

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подписан муниципальный контракт от 18.06.2018 № 0340200003318004051-0174631-01 (далее – контракт 3), по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту придомовой территории ул. Советская, д. 2, пгт Вахруши в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к контракту) и сдать их в законченном виде, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта (пункт 1.1 контракта 3).

Место выполнения работ: 

<

...> (пункт 1.3 контракта 3).

Работа считается выполненной после подписания акта приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости формы КС-3 заказчиком или его уполномоченным представителем. Датой акта приемки выполненных работ является дата подписания его последней стороной (пункт 1.5 контракта 3).

Гарантийный срок начинается с даты подписания акта приемки выполненных работ. Гарантия качества на выполненные работы 4 года. После завершения выполнения всех работ подрядчик должен предоставить заказчику информацию о сроке предоставления гарантии качества выполненных подрядчиком работ, который стороны фиксируют в акте приемки выполненных работ (пункт 5.2 контракта 3).

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки (дефекты), не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продляется соответственно на период устранения дефектов, возникающих по вине подрядчика. Устранение дефектов, выявленных во время приемки работ, а также в период гарантийного срока, производится подрядчиком за его счет в срок, согласованный с заказчиком, на основании акта выявленных недостатков, составленного заказчиком (пункт 5.3 контракта 3).

Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 рабочих дней со дня получения письменного уведомления заказчика для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения (пункт 5.4 контракта 3).

Согласно пункту 2.1.8 контракта 3 подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившие качество работы в порядке, предусмотренном пунктом 2.6.2 контракта.

Заказчик в праве требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов. В случае выявления несоответствия объемов и качества выполненных работ условиям, содержащимся в описании закупки. Заказчик в течение 3 рабочих дней в письменной форме уведомляет об этом подрядчика, составляет акт выявленных недостатков и направляет его подрядчику. Подрядчик, в согласованные с заказчиком сроки, обязан устранить выявленные недостатки за свой счет (пункт 2.6.2 контракта 3).

Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами обязательств (пункт 9.1 контракта 3).

Обязательства по выполнению предусмотренных контрактом 3 работ были исполнены подрядчиком. В материалы дела представлен акт о приемке выполненных работ от 25.12.2018 №1 формы КС-2, подписанные сторонами без возражений и замечаний. 

Как указывает истец, 30.04.2020 проведен осмотр придомовой территории ул. Советская, д. 2, пгт Вахруши, при  участии представителей истца в составе комиссии. По результатам осмотра составлен акт от 30.04.2020, в котором зафиксированы выявленные недостатки (дефекты): трещины по краю асфальтобетонного лотка, сеть поперечных трещин на тротуаре перед домом, прорастание растительности с южной стороны дома на тротуаре. 

В претензии от 01.06.2020 №689, истец просил ответчика устранить выявленные дефекты и замечания в срок не позднее 20 дней со дня получения претензии. В ответ на указанную претензию ответчик сообщает, что обязуется исправить выявленные недостатки в срок не позднее 30.06.2020.

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подписан муниципальный контракт от 02.07.2018 № 0340200003318004502-0174631-01 (далее – контракт 4), по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту проезда от ул. Коммунистическая до детского сада № 5, пгт Вахруши в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к контракту) и сдать их в законченном виде, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта (пункт 1.1 контракта 4).

Место выполнения работ: Кировская область, Слободской район, пгт Вахруши, проезд от ул. Коммунистическая до детского сада № 5 (пункт 1.3 контракта 4).

Работа считается выполненной после подписания акта приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости формы КС-3 заказчиком или его уполномоченным представителем. Датой акта приемки выполненных работ является дата подписания его последней стороной (пункт 1.5 контракта 4).

Гарантийный срок начинается с даты подписания акта приемки выполненных работ. Гарантия качества на выполненные работы 4 года. После завершения выполнения всех работ подрядчик должен предоставить заказчику информацию о сроке предоставления гарантии качества выполненных подрядчиком работ, который стороны фиксируют в акте приемки выполненных работ (пункт 5.2 контракта 4).

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки (дефекты), не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продляется соответственно на период устранения дефектов, возникающих по вине подрядчика. Устранение дефектов, выявленных во время приемки работ, а также в период гарантийного срока, производится подрядчиком за его счет в срок, согласованный с заказчиком, на основании акта выявленных недостатков, составленного заказчиком (пункт 5.3 контракта 4).

Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 рабочих дней со дня получения письменного уведомления заказчика для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения (пункт 5.4 контракта 4).

Согласно пункту 2.1.8 контракта 4 подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившие качество работы в порядке, предусмотренном пунктом 2.6.2 контракта.

Заказчик в праве требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов. В случае выявления несоответствия объемов и качества выполненных работ условиям, содержащимся в описании закупки. Заказчик в течение 3 рабочих дней в письменной форме уведомляет об этом подрядчика, составляет акт выявленных недостатков и направляет его подрядчику. Подрядчик, в согласованные с заказчиком сроки, обязан устранить выявленные недостатки за свой счет (пункт 2.6.2 контракта 4).

Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами обязательств (пункт 9.1 контракта 4).

Обязательства по выполнению предусмотренных контрактом 4 работ были исполнены подрядчиком. В материалы дела представлен акт о приемке выполненных работ от 25.12.2018 №1 формы КС-2, подписанные сторонами без возражений и замечаний. 

Как указывает истец, 30.04.2020 проведен осмотр проезда от ул. Коммунистическая до детского сада № 5, пгт Вахруши, при  участии представителей истца в составе комиссии. По результатам осмотра составлен акт от 30.04.2020, в котором зафиксированы выявленные недостатки (дефекты): сеть поперечных и продольных трещин напротив заезда во двор дома ул. Коммунистическая 2Б, продольные трещины у ТП, продольные трещины на въезде по краю. 

В претензии от 19.05.2020 №630, истец просил ответчика устранить выявленные дефекты и замечания в срок не позднее 20 дней со дня получения претензии. В ответ на указанную претензию ответчик сообщает, что обязуется исправить выявленные недостатки в срок не позднее 30.06.2020.

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подписан муниципальный контракт от 18.07.2018 № 0340200003318005033-0174631-02 (далее – контракт 5), по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту и благоустройству дворовой территории 

<

...> пгт Вахруши в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к контракту) и сдать их в законченном виде, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта (пункт 1.1 контракта 5).

Место выполнения работ: 

<

...> (пункт 1.3 контракта 5).

Работа считается выполненной после подписания акта приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости формы КС-3 заказчиком или его уполномоченным представителем. Датой акта приемки выполненных работ является дата подписания его последней стороной (пункт 1.5 контракта 5).

Гарантийный срок начинается с даты подписания акта приемки выполненных работ. Гарантия качества на выполненные работы 4 года. После завершения выполнения всех работ подрядчик должен предоставить заказчику информацию о сроке предоставления гарантии качества выполненных подрядчиком работ, который стороны фиксируют в акте приемки выполненных работ (пункт 5.2 контракта 5).

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки (дефекты), не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продляется соответственно на период устранения дефектов, возникающих по вине подрядчика. Устранение дефектов, выявленных во время приемки работ, а также в период гарантийного срока, производится подрядчиком за его счет в срок, согласованный с заказчиком, на основании акта выявленных недостатков, составленного заказчиком (пункт 5.3 контракта 5).

Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 рабочих дней со дня получения письменного уведомления заказчика для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения (пункт 5.4 контракта 5).

Согласно пункту 2.1.8 контракта 5 подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившие качество работы в порядке, предусмотренном пунктом 2.6.2 контракта.

Заказчик в праве требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов. В случае выявления несоответствия объемов и качества выполненных работ условиям, содержащимся в описании закупки. Заказчик в течение 3 рабочих дней в письменной форме уведомляет об этом подрядчика, составляет акт выявленных недостатков и направляет его подрядчику. Подрядчик, в согласованные с заказчиком сроки, обязан устранить выявленные недостатки за свой счет (пункт 2.6.2 контракта 5).

Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами обязательств (пункт 9.1 контракта 5).

Обязательства по выполнению предусмотренных контрактом 5 работ были исполнены подрядчиком. В материалы дела представлены акт о приемке выполненных работ от 30.07.2018 №1 формы КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат от 30.07.2018 №2 формы КС-3, подписанные сторонами без возражений и замечаний.

Как указывает истец, 30.04.2020 проведен осмотр дворовой территории 

<

...> пгт Вахруши, при  участии представителей истца в составе комиссии. По результатам осмотра составлен акт от 30.04.2020, в котором зафиксированы выявленные недостатки (дефекты): сеть продольных и поперечных трещин по всей длине тротуара около дома.  

В претензии от 25.05.2020 №646, истец просил ответчика устранить выявленные дефекты и замечания в срок не позднее 20 дней со дня получения претензии. В ответ на указанную претензию ответчик сообщает, что обязуется исправить выявленные недостатки в срок не позднее 30.06.2020.

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подписан муниципальный контракт от 26.08.2018 № 0340200003318004311-0174631-01 (далее – контракт 6), по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту и благоустройству дворовой территории 

<

...> в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к контракту) и сдать их в законченном виде, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта (пункт 1.1 контракта 6).

Место выполнения работ: 1.2.Кировская область, 

<

...> (пункт 1.3 контракта 6).

Работа считается выполненной после подписания акта приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости формы КС-3 заказчиком или его уполномоченным представителем. Датой акта приемки выполненных работ является дата подписания его последней стороной (пункт 1.5 контракта 6).

Гарантийный срок начинается с даты подписания акта приемки выполненных работ. Гарантия качества на выполненные работы 4 года. После завершения выполнения всех работ подрядчик должен предоставить заказчику информацию о сроке предоставления гарантии качества выполненных подрядчиком работ, который стороны фиксируют в акте приемки выполненных работ (пункт 5.2 контракта 6).

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки (дефекты), не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продляется соответственно на период устранения дефектов, возникающих по вине подрядчика. Устранение дефектов, выявленных во время приемки работ, а также в период гарантийного срока, производится подрядчиком за его счет в срок, согласованный с заказчиком, на основании акта выявленных недостатков, составленного заказчиком (пункт 5.3 контракта 6).

Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 рабочих дней со дня получения письменного уведомления заказчика для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения (пункт 5.4 контракта 6).

Согласно пункту 2.1.8 контракта 5 подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившие качество работы в порядке, предусмотренном пунктом 2.6.2 контракта.

Заказчик в праве требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов. В случае выявления несоответствия объемов и качества выполненных работ условиям, содержащимся в описании закупки. Заказчик в течение 3 рабочих дней в письменной форме уведомляет об этом подрядчика, составляет акт выявленных недостатков и направляет его подрядчику. Подрядчик, в согласованные с заказчиком сроки, обязан устранить выявленные недостатки за свой счет (пункт 2.6.2 контракта 6).

Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами обязательств (пункт 9.1 контракта 6).

Обязательства по выполнению предусмотренных контрактом 6 работ были исполнены подрядчиком. В материалы дела представлены акт о приемке выполненных работ от 30.07.2018 №1 формы КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат от 30.07.2018 №2 формы КС-3, подписанные сторонами без возражений и замечаний.

Как указывает истец, 30.04.2020 проведен осмотр дворовой территории 

<

...> при  участии представителей истца в составе комиссии. По результатам осмотра составлен акт от 30.04.2020, в котором зафиксированы выявленные недостатки (дефекты): продольные и поперечные трещины на въезде с северной стороны дома, продольные трещины по центру на проезде у 1,2,3 подъездов, продольные трещины на въезде с южной стороны, поперечная трещина на тротуаре и на углу дома с южной стороны, а также на стыке с въездом.  

В претензии от 25.05.2020 №646, истец просил ответчика устранить выявленные дефекты и замечания в срок не позднее 20 дней со дня получения претензии. В ответ на указанную претензию ответчик сообщает, что обязуется исправить выявленные недостатки в срок не позднее 30.06.2020.

Неисполнение ответчиком требований истца об устранении недостатков выполненных работ, выявленных в период гарантийного срока, послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Исследовав представленные материалы и установленные обстоятельства, суд приходит к следующим выводам.

Оценив условия контрактов и сложившиеся правоотношения сторон, суд считает, что к указанным отношениям подлежат применению нормы главы 37 ГК РФ о договоре подряда, общие положения гражданского законодательства.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 ГК РФ).

Как следует из материалов дела, сторонами заключены муниципальные контракты, предметом которых является выполнение работ, в том числе по ремонту проезда и придомовых территорий ул. Горького, 

<

...> пгт Вахруши; по ремонту проезжей части ул. Володарского от д. 8 до д. 29, пгт Вахруши; по ремонту придомовой территории ул. Советская, д. 2, пгт Вахруши; по ремонту проезда от ул. Коммунистическая до детского сада № 5, пгт Вахруши; по ремонту и благоустройству дворовой территории 

<

...> пгт Вахруши; по ремонту и благоустройству дворовой территории 

<

...>. Контракты не признаны недействительными, незаключенными в установленном законом порядке.

Факт выполнения работ по контрактам подтверждается совокупностью представленных в материалы доказательств и ответчиком не оспаривается.

В период гарантийного срока в процессе эксплуатации объекта истцом были выявлены недостатки выполненных работ.

В силу пункта 1 статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721). Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы (статья 722 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 724 ГК РФ предусмотрено, если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей.

Заявление заказчика о выявленных недостатках выполненных работ состоялось в период течения установленного пунктом 5.2 контрактов гарантийного срока на работы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: 

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 

возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397). 

Ответчик не устранил выявленные недостатки работ, не исполнил гарантийные обязательства, принятые на себя в соответствии с условиями контрактов.

В силу пункта 2 статьи 755 ГК РФ подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Указанные основания для освобождения подрядчика от ответственности за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, являются исчерпывающими.

Таким образом, из буквального толкования положений указанной нормы следует, что в пределах гарантийного срока действует презумпция вины подрядчика в виде ответственности за недостатки (дефекты) выполненных работ. 

В рамках заключенных контрактов ответчик принял на себя обязательства по выполнению работ, в том числе по ремонту проезда и придомовых территорий ул. Горького, 

<

...> пгт Вахруши; по ремонту проезжей части ул. Володарского от д. 8 до д. 29, пгт Вахруши; по ремонту придомовой территории ул. Советская, д. 2, пгт Вахруши; по ремонту проезда от ул. Коммунистическая до детского сада № 5, пгт Вахруши; по ремонту и благоустройству дворовой территории 

<

...> пгт Вахруши; по ремонту и благоустройству дворовой территории 

<

...> а также по устранению выявленных заказчиком недостатков результата работ, в том числе в пределах гарантийного срока.

Результат работ должен соответствовать условиям контракта по качеству в течение всего гарантийного срока. 

Истец представил доказательства наличия недостатков выполненных работ, а также обращения к ответчику с требованием об устранении недостатков в пределах действия гарантийного срока. Доказательства и доводы истца ответчиком не опровергнуты.

Ответчик, на котором лежит бремя доказывания отсутствия своей вины в возникновении недостатков, доказательств в оспаривание заявленных требований не представил. У суда отсутствует информация о возникшем между сторонами споре по поводу недостатков выполненной работы или их причин, о выполненном ответчиком гарантийном ремонте по устранению спорных недостатков работ.

Исследовав и оценив фактические обстоятельства дела и имеющиеся доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ в их совокупности и взаимосвязи, суд установил факт некачественного выполнения ответчиком работ, а также факт обращения истца к ответчику по устранению недостатков выполненных работ, нарушение ответчиком гарантийных обязательств по устранению недостатков выполненных работ.

При изложенных обстоятельствах требование истца об устранении гарантийных недостатков является правомерным и подлежит удовлетворению.

Вместе с тем, истцом в просительной части искового заявления указан срок, до которого ответчику подлежит устранить недостатки, а именно до 30.09.2020. Указанное требование является не исполнимым, поскольку выходит за сроки вступления данного решения в законную силу.

Истец при подаче иска не понес судебных расходов по уплате государственной пошлины, будучи освобожденным от ее уплаты в силу положений подпункта 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 110 АПК РФ государственная пошлина в сумме 6 000 рублей 00 копеек относится на ответчика и подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Марика"  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) устранить недостатки выполненных работ в пгт Вахруши Слободского района Кировской области:

-многочисленные выбоины по всей длине проезжей части ул. Володарского от д.8 до д.29;

-продольные и поперечные трещины на въезде с северной стороны дома 48 по ул. ФИО2, продольные трещины по центру на проезде у 1,2,3 подъездов дома 48 по ул. ФИО2, продольные трещины на въезде с южной стороны дома 48 по ул. ФИО2, поперечная трещина на тротуаре и на углу дома с южной стороны, а также на стыке с въездом д.48 по ул. ФИО2;

-сеть продольных и поперечных трещин по всей длине тротуара около дома 2 по ул. Коммунистическая,

-на проезде к дому № 6а по ул. Ленина многочисленные ямы, выбоины, прорастание растительности через асфальт у дома №4 по ул. Ленина;

-трещины по краю асфальтобетонного лотка, сеть поперечных трещин на тротуаре перед домом 2 по ул. Советская, прорастание растительности с южной стороны дома 2 по ул. Советская на тротуаре;

-сеть поперечных и продольных трещин напротив заезда во двор дома ул. Коммунистическая 2Б, продольные трещины у ТП, продольные трещины на въезде по краю проезда от ул. Коммунистическая до детского сада №5.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Марика"  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 (шесть тысяч) рублей.   

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок в соответствии со статьями 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кировской области.

Судья                                                                                        Е.Ю.Прозорова.