7/2020-54478(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А06-142/2019

г. Астрахань

10 сентября 2020 года

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обществу с ограниченной ответственностью "Лютан Стройсервис" в течение трех  месяцев с даты вступления решения в законную силу устранить недостатки допущенные при  строительстве многоквартирного дома по проспекту Бумажников, д.9, в Трусовском районе  г. Астрахани:  

 - произвести работы по замене стальных магистральных трубопроводов холодного  водоснабжения на полипропиленовые трубы РРRС PN10, согласно проектной документации;  

 -произвести работы по обработке пандусов в подъездах защитным материалом с  профрезерованными полосами против скольжения, согласно СП 59.13330.2012, п. 4.1.11 СП  59.13330.2012;  

- произвести работы по замене плитки входных ступеней подъездов на плитку типа  керамический гранит износостойкая с шероховатой поверхностью с оборудованием  поверхности входных ступеней в подъезды профрезерованными полосами против  скольжения, согласно п. 5.17, 5.25 СНиП 2.03.13-88, п.4.1.11 СП 59.13330.2012;  

- произвести работы по установке в подъездах электро-подъемников для инвалидов и  лиц с ограниченными возможностями, согласно ГОСТ Р51630, п.5.2.21 СП 59.13330.2012;  

- произвести работы по ориентированию стока атмосферных осадков от входа в 6-ой  подъезд (третья очередь), согласно СП 32.13330.2012;  

- отремонтировать частичное обрушение облицовочной плитки, по периметру дома на  1 нежилых этажах;  

- произвести работы по надлежащему устройству камер мусоропроводов, с  перемонтажом порога и оборудованием выкатного проема на уровне пола;  

- установить выкатные контейнеры для сбора мусора, в количестве 7 штук, согласно  СП 31-108-2002;  

- произвести работы по восстановлению деформированного тротуарного и дорожного  покрытия, согласно проекту в места просадки, согласно СНиП III-10-75;  

- произвести работы по частичной замене наружной отделки вентилируемого фасада  керамогранитной плиткой согласно проекту;  

- установить и укрепить вентиляционные решетки по фасаду, с  наружной стороны многоквартирного дома, согласно СНиП 41-01-2003;  

- установить в помещении водомерного узла электрический обогреватель "NOBO". 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Лютан Стройсервис" в  доход федерального бюджета госпошлину в сумме 6 000 руб.  

Производство по иску Общества с ограниченной ответственностью Управляющая  компания "Берег" прекратить ввиду отказа истца от иска.  

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания  "Берег" из федерального бюджета госпошлину в сумме 6 000 руб., уплаченную по  платежным поручениям: № 27 от 30.01.2019г. и № 429 от 15.10.2018г.  

 Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Астраханской области на счет  Общества с ограниченной ответственностью Экспетрно-правового центра "ОТЧЕТ"  денежные средства за проведение судебной экспертизы в сумме 35 000 руб., перечисленные  по чек-ордерам от 10.09.2020г. в сумме 5 000 руб. и от 11.12.2019г. в сумме 30 000 руб.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Лютан Стройсервис" в  пользу Общества с ограниченной ответственностью "Русло" денежные средства в сумме 35  000 руб. за проведение судебной экспертизы.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного  суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через  Арбитражный суд Астраханской области.  

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте  Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»  

Судья Г.В. Серикова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 02.07.2019 7:42:04

 Кому выдана Серикова Галина Владимировна