Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40- 245375/23-3-1907

г. Москва

16 февраля 2024 г.

Резолютивная часть объявлена 08 февраля 2024 г.

Дата изготовления решения в полном объеме 16 февраля 2024 г. 

Арбитражный суд Москвы в составе судьи Федоточкина А.А., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

с использованием средств аудиозаписи, 

рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ" ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА" 107078, 

<

...>, СТР.1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 30.12.2011, ИНН: 

<

***>, КПП: 770101001 к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ДИЗАЙН СИТИ" 125424, 

<

...>, ЭТ 2 П I К 25 ОФ 75, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 31.01.2003, ИНН: 

<

***>, КПП: 773301001 о взыскании 93 673 235, 11 руб. 

В судебное заседание явились: 

От истца: ФИО2 дов. от 27.12.2023г., диплом, 

От ответчика: не явился, извещен, 

УСТАНОВИЛ:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ" ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙ ДИЗАЙН СИТИ" о взыскании остатка неиспользованного аванса по Договору в размере 84 902 947 рублей 41 коп., штрафа за нарушение срока устранения нарушений, допущенных Генподрядчиком в ходе выполнения работ по Договору в размере 100 000 руб., штрафа за неисполнение обязательств по предоставлению актов сверки расчетов (п. 4.14 Договора), отчетов об использовании в течение отчетного периода полученных в порядке расчетов по Договору авансовых платежей с приложением выписки из лицевого счета Генподрядчика, открытого Генподрядчиком в территориальных органах Федерального казначейства (п. 7.2.53 Договора) и предоставлению по требованию Заказчика заверенных копий документов (включая первичные учетные документы), подтверждающих направление расходования Целевых средств, полученных от Заказчика в оплату Работ, а также затраты Генподрядчика по исполнению Договора (п. 7.2.23 Договора) в общем размере 1 600 000  рублей 00 коп., неустойки за нарушение срока выполнения работ по устройству отопления, теплоснабжения и теплового пункта (п. 3 Графика производства работ (Приложение № 1 к Договору) в размере 2 815 254,38 руб., процентов за пользование чужими средствами на сумму неосновательного денежного обогащения за период с 18.04.2023 по 16.10.2023 в размере 4 255 033 руб. 32 коп., процентов за пользование чужими средствами на сумму неосновательного денежного обогащения с 17.10.2023 по день фактической уплаты не использованного Ответчиком аванса.

В судебное заседание не явились представители ответчика. Определение суда о времени и месте проведения судебного заседания, направленное ответчику по юридическому адресу, согласно выписке из ЕГРЮЛ, вернулось с отметкой почтового органа «Истек срок хранения». 

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (ст. 165.1), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

В силу п. 1 ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В соответствии с частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о принятии искового заявления, о времени и месте судебного заседания опубликована на сайте http://www.msk.arbitr.ru.

Частью 6 статьи 121 АПК РФ установлено, что лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления к производству и возбуждении производства по делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Согласно части 1 статьи 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

Учитывая изложенное, суд считает ответчика извещенными надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, на основании п. 2 ч. 4 ст. 123 АПК РФ, в связи с чем, в соответствии с ч. 3 ст. 156 АПК РФ, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителей ответчика. 

В судебном заседании истец поддержал заявленные исковые требований по доводам заявления. 

Ответчик, в нарушение ст. 131 АПК РФ, отзыв на заявление не представил, требования истца не оспорил.

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, проверив обоснованность исковых требований по имеющимся в деле материалам, заслушав представителей истца, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, между АО «Корпорация «ВНИИЭМ» (Заказчик) и ООО «Строй Дизайн Сити» (Генподрядчик) заключен договор подряда на выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению объекта капитального строительства «Техническое перевооружение лабораторно-производственного корпуса № 17 (этажи 6-10)» ул. Вольная, д. 30 от 10.12.2021 № 0473000008121000003 (далее - Договор).

В соответствии с условиями Договора (п. 2.1) Генподрядчик обязуется выполнить на условиях Договора в соответствии с указанной в Техническом задании (приложение № 4 к Договору) Проектной и Рабочей документацией и сдать Заказчику Комплекс работ по техническому перевооружению (с элементами реконструкции) объекта капитального строительства «Техническое перевооружение лабораторно-производственного корпуса № 17 (этажи 6-10)» ул. Вольная, д. 30 (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных Генподрядчиком по Договору Работ.

Результатом выполненных Генподрядчиком по Договору Работ (далее -Результат Работ) является реконструированный и технически перевооруженный Объект в объеме Проектной и Рабочей документации, указанной в Техническом задании (Приложение № 4 к Договору) (п. 2.2 Договора).

В соответствии с п. 4.7.1 Договора Генподрядчику выплачен аванс в размере 127 354421 (ста двадцати семи миллионов трехсот пятидесяти четырех тысяч четырехсот двадцати одного) руб. 12 коп., что подтверждается платежным поручением от 02.06.2022 № 2945.

Согласно п. 5.5 Договора срок начала Работ — со дня заключения настоящего Договора. Срок окончания Работ - в течение 18 (восемнадцати) месяцев с даты заключения Договора (до 10.07.2023 включительно).

В соответствии с п.п. 5.2.3, 7.2.10 Договора Генподрядчик производит Работы в сроки, согласованные Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору).

В целях реализации Договора отчетным периодом является период продолжительностью в один месяц с 15 числа текущего месяца по 14 число следующего месяца. Началом первого отчетного периода является дата подписания Акта приема-передачи строительной площадки (Приложение № 8 к Договору) Генподрядчику в соответствии с Договором (п. 13.1.1 Договора).

Согласно п. 13.1.2. Договора Генподрядчик извещает Заказчика о готовности к сдаче результатов выполненных Работ путем направления письма, подписанного руководителем, в адрес Заказчика. В соответствии с п. 13.1.3 Договора к письму, указанному в п. 13.1.2, прилагается в трех экземплярах документация, обосновывающая объемы выполненных и подлежащих приемке Заказчиком Работ. Генподрядчик представляет Заказчику отчеты, указанные в п. 7.2.47 Договора, отчетные документы, указанные в п. 13.1.3, а также исполнительную документацию на выполнение Работы, оформленные должным образом, с сопроводительным письмом, в течение 3 (трех) дней после окончания отчетного периода (п. 13.4.1 Договора).

В соответствии с п. 18.2 Договора расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации (п. 18.3 Договора).

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (п. 2 ст. 715 ГК РФ).

По состоянию на 31.03.2023 (по прошествии 15 месяцев из 18, установленных Договором для выполнения Работ) Работы Генподрядчиком в нарушение п.п. 13.1.1, 13.4.1 Договора к приемке не предъявлялись, с ноября 2022 года работы на Объекте не велись, что подтверждается записями в Общем журнале работ (раздел 3).

На основании вышеизложенного, в соответствии с п.п. 18.2, 18.3 Договора, п. 2 ст. 715 ГК РФ, Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения договора подряда на выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению объекта капитального строительства «Техническое перевооружение лабораторно-производственного корпуса № 17 (этажи 6-10)» по адресу: 

<

...> от 10.12.2021 № 0473000008121000003.

Согласно п. 18.4 Договора решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Генподрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Генподрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Генподрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Генподрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Генподрядчика по его адресу, указанному в Договоре.

Решение АО «Корпорация «ВНИИЭМ» об одностороннем отказе от исполнения договора подряда на выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению объекта капитального строительства «Техническое перевооружение лабораторно-производственного корпуса № 17 (этажи 6-10)» по адресу: 

<

...> от 10.12.2021 № 0473000008121000003 с требованием о возврате неиспользованного аванса от 06.04.2023 № ПС-721/5/2274/В (далее - Решение с требованием) направлено в адрес Ответчика письмом 1 класса с простым уведомлением 06.04.2023, что подтверждается кассовым чеком от 06.04.2023 № Прод376222 и описью вложения в письмо от 06.04.2023 (трек номер 11114180023714), а также на электронную почту corp@sdcity.ru, что подтверждается отчетом о доставке Решения с требованием.

В соответствии с п. 18.5 Договора решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Таким образом, Договор расторгнут с 17.04.2023.

Решение с требованием, направленное в адрес Ответчика содержит требование о возврате в течение 7 (семи) дней с даты расторжения Договора на лицевой счет, указанный в п. 25.1 Договора, неиспользованный аванс в размере 127 354 421 (ста двадцати семи миллионов трехсот пятидесяти четырех тысяч четырехсот двадцати одного) руб. 12 коп. В указанный срок денежные средства Истцу не возвращены.

В соответствии с разделом 21 Договора Ответчиком было предоставлено Истцу обеспечение исполнения Договора в размере 42 451 473 рублей 71 коп. в виде независимой банковской гарантии от 08.12.2021 № ЭБГ-08177-2021, выданной акционерным обществом «Акционерный банк «Россия» (АО «АБ «Россия»).

Согласно п. 21.14 Договора обеспечение исполнения Договора может быть удержано Заказчиком полностью или частично в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обеспеченных обязательств. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, денежные средства, перечисленные Банком-гарантом по требованию Заказчика удерживаются Заказчиком в свою пользу, при этом Заказчик приобретает на них право собственности. Удержание денежных средств производится Заказчиком в одностороннем порядке (п. 21.15 Договора). В соответствии с п. 21.6 обеспечение исполнения Договора и гарантийных обязательств обеспечивает требования Заказчика в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения. Удержание обеспечения производится пропорционально сумме неисполненных обязательств.

Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии от 24.05.2023 № ИК-65/3751/В, направленное Истцом в адрес АО «АБ «Россия», удовлетворено в полном объеме, что подтверждается платежным поручением от 01.06.2023 № 37112.

Таким образом, остаток неиспользованного Ответчиком аванса по Договору по состоянию на 16.10.2023 составляет 84 902 947 рублей 41 коп.

Истец направил в адрес ответчика досудебную претензию с требованием оплаты задолженности, которая оставлена последним без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца с требованиями в суд.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, в силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим.

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (п. 2 ст. 715 ГК РФ).

В соответствии со ст. 450.1 ГК РФ, предоставленное названным кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора), при этом договор прекращается с момента получения данного уведомления.

Как следует из разъяснений, данных в п. 14 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 22.11.2016г. № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» при осуществлении стороной права на одностороннее изменение условий обязательства или односторонний отказ от его исполнения она должна действовать разумно и добросовестно, учитывая права и законные интересы другой стороны ( п. 3 ст. 307, п. 4 ст. 450.1 ГК РФ).

Согласно ст. 717 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

В соответствии с п.п. 18.2, 18.3 Договора, п. 2 ст. 715 ГК РФ, Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения договора подряда на выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению объекта капитального строительства «Техническое перевооружение лабораторно-производственного корпуса № 17 (этажи 6-10)» по адресу: 

<

...> от 10.12.2021 № 0473000008121000003.

Согласно п. 18.4 Договора решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Генподрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Генподрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Генподрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Генподрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Генподрядчика по его адресу, указанному в Договоре.

Решение АО «Корпорация «ВНИИЭМ» об одностороннем отказе от исполнения договора подряда на выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению объекта капитального строительства «Техническое перевооружение лабораторно-производственного корпуса № 17 (этажи 6-10)» по адресу: 

<

...> от 10.12.2021 № 0473000008121000003 с требованием о возврате неиспользованного аванса от 06.04.2023 № ПС-721/5/2274/В (далее - Решение с требованием) направлено в адрес Ответчика письмом 1 класса с простым уведомлением 06.04.2023, что подтверждается кассовым чеком от 06.04.2023 № Прод376222 и описью вложения в письмо от 06.04.2023 (трек номер 11114180023714), а также на электронную почту corp@sdcity.ru, что подтверждается отчетом о доставке Решения с требованием.

В соответствии с п. 18.5 Договора решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Таким образом, Договор расторгнут с 17.04.2023.

При указанных обстоятельствах, после отказа от исполнения Договора, взаимные обязательства участвовавших в его исполнении сторон прекращаются и, соответственно, у ответчика отсутствуют законные основания для удержания денежных средств, перечисленных истцом в качестве аванса.

Согласно п. 4 ст. 453 ГК РФ, в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В силу ст. 1102 ГК РФ лицо,  которое  без  установленных  законом,  иными правовыми  актами   или   сделкой   оснований  приобрело  или   сберегло  имущество  (приобретатель)  за   счет  другого  лица  (потерпевшего),  обязано  возвратить   последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество  (неосновательное обогащение).

В соответствии с п. 2 ст. 1105 ГК РФ лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.

В соответствии со ст. 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим кодексом и другими Федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования или возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио-видеозаписи, иные документы и материалы. 

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В соответствии со ст. 71 АПК РФ доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. 

Арбитражным процессуальным законодательством установлены критерии оценки доказательств в качестве подтверждающих фактов наличия тех или иных обстоятельств. 

Доказательства, на основании которых лицо, участвующее в деле, обосновывает свои требования и возражения должны быть допустимыми, относимыми и достаточными. 

Признак допустимости доказательств предусмотрен положениями ст. 68 АПК РФ. 

В соответствии с указанной статьей обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

Достаточность доказательств можно определить как наличие необходимого количества сведений, достоверно подтверждающих те или иные обстоятельства спора. 

Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков является основанием не признавать требования лица, участвующего в деле, обоснованными (доказанными). 

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание тот факт, что согласно нормам действующего законодательства о подряде и разъяснениям судебной практики, заказчик в любое время немотивированно имеет право отказаться от договора, взыскав с подрядчика неотработанный аванс, при отсутствии доказательств выполнения ответчиком работ и сдачи результата соответствующих работ истцу, перечисления истцом ответчику денежных средств, а также доказательств их возвращения истцу, суд приходит к выводу о том, что заявленные истцом исковые требования о взыскании неосновательного обогащения в виде перечисленного авансового платежа в размере 84 902 947 рублей 41 коп., являются правомерными и подлежат удовлетворению.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения обязательств и др.

Согласно п. 7.2.10 Договора Генподрядчик обязан выполнить все Работы по настоящему Договору в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору), Проектной и Рабочей документациями, Техническим заданием (Приложение № 4 к Договору), условиями Договора и требованиями нормативных документов в области строительства.

В соответствии с абз. 3, 4 п. 7.2.29 Договора Генподрядчик обязан выполнить все Работы, предусмотренные Договором, в соответствии с переданной Заказчиком согласно Техническому заданию (приложение № 4 к Договору) Проектной и Рабочей документацией, с соблюдением строительных норм и правил, требований регулирующих надзорных органов, законодательства Российской Федерации, технических условий и других требований, установленных Договором.

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Генподрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, установленных Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору) или другими согласованными Сторонами документами, качеством предоставленных Генподрядчиком Материалов, а также правильности использования Генподрядчиком Материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Генподрядчика (п. 6.1.7 Договора).

В соответствии с п. 6.2.4 Договора Заказчик имеет право осуществлять своими силами или силами привлекаемого на основании договора третьего лица непрерывный строительный контроль при осуществлении Работ. Предмет строительного контроля и формы его проведения определяются Заказчиком в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» и Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В ходе осуществления строительного контроля Заказчиком выявлены нарушения, допущенные Генподрядчиком при производстве работ, и выдано Предписание о выявленных нарушениях при реконструкции строительного объекта капитального строительства от 21.10.2022 № 721/1 (далее - Предписание) (срок устранения выявленных нарушений - 25.10.2022).

В общем журнале работ (раздел 4 «Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства (с. 18) (приложение 3) Заказчиком внесена запись о выданном Предписании и сроках устранения выявленных недостатков.

В соответствии с п. 7.2.45 Договора Генподрядчик обязан исполнять в ходе выполнения Работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной Работе и иные отступления от Технического задания и условий настоящего Договора.

В нарушение условий Договора Генподрядчиком выданное Предписание не исполнено.

Согласно п. 16.7 Договора за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 100 000 (ста тысяч)рублей.

В адрес Ответчика была направлена Претензия от 19.12.2022 № ЕМ-100/16094/В с требованием об уплате штрафа за нарушение установленного Предписанием срока устранения нарушений, допущенных Генподрядчиком в ходе выполнения работ по Договору, что подтверждается списком № 12 (партия 861) внутренних почтовых отправлений от 27.12.2022 (приложение 12), а также отчетом о доставке письма на электронную почту corp@sdcitv.ru от 20.12.2022.

Согласно п. 24.5 Договора любое сообщение (уведомление) по Договору дается в письменной форме и направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой с доказательством его доставки адресату по его адресу, указанному в разделе «Адреса и платежные реквизиты стороны». Сообщение (уведомление) считается доставленным Стороне или ее представителю, если оно: поступило адресату одним из способов, указанных в настоящем разделе. Датой уведомления в таких случаях признается дата получения (вручении) сообщения (уведомления) адресату; по обстоятельствам, зависящим от адресата, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. К таким обстоятельствам относятся: отказ Стороны от получения сообщения (уведомления) при условии, что отказ зафиксирован организацией почтовой связи ли курьерской службой; несмотря на почтовое извещение или извещение курьерской службы, адресат не явился за получением сообщения (уведомления), о чем организация почтовой связи или курьерская служба уведомила отправителя; сообщение (уведомление) не вручено в связи с отсутствием адресата по адресу, указанному в Договоре, о чем организация почтовой связи или курьерская служба уведомила отправителя. В случаях, предусмотренных настоящим подпунктом, датой надлежащего уведомления признается дата по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты направления Стороне сообщения (уведомления).

Претензия от 19.12.2022 № ЕМ-100/16094/В не была вручена Ответчику, поскольку последний не явился за получением почтового отправления, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 80100679905159. Таким образом, претензия от 19.12.2022 № ЕМ-100/16094/В считается полученной Ответчиком 09.01.2023. Требования претензии от 19.12.2022 № ЕМ-100/16094/В Ответчиком не удовлетворены.

На основании изложенного с Ответчику начислен штраф за нарушение установленного Предписанием срока устранения нарушений, допущенных Генподрядчиком в ходе выполнения работ по Договору в размере 100 000 руб.

Согласно п. 4.1 Договора оплата Работ по Договору производится Заказчиком за счет и только в пределах предоставленных ему на осуществление работ по Объекту Целевых средств, перечисленных в соответствии с условиями договора о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием от 25.12.2019 № 016-КИ156/19/265.

В соответствии с п. 4.7 Договора Заказчик произвел авансовый платеж путем перевода предоставленных ему Целевых средств со счета Заказчика, открытого в территориальном органе Федерального казначейства по городу Москве, на лицевой счет Генподрядчика, открытый Генподрядчику в территориальном органе Федерального казначейства, что подтверждается платежным поручением от 02.06.2022 № 2945 (приложение 2).

Согласно п. 4.14 Договора ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, Генподрядчик представляет Заказчику акт сверки расчетов по форме, установленной приложением № 3 к настоящему Договору, за истекший период (нарастающим итогом с даты заключения Договора).

В соответствии с пп. а п. 7.2.53 Договора Генподрядчик обязан в течение 3 (трех) дней после окончания отчетного периода (п. 13.1.1. Договора) предоставлять Заказчику письменные отчеты об использовании в течение отчетного периода полученных в порядке расчетов по Договору авансовых платежей с приложением выписки из лицевого счета Генподрядчика, открытого Генподрядчиком в территориальных органах Федерального казначейства.

Однако в период с даты заключения Договора по дату расторжения Договора (17.04.2023) в нарушение п.п. 4.14, 7.2.53 Договора Генподрядчиком обязанности по предоставлению актов сверки расчетов и отчетов об использовании в течение отчетного периода полученных в порядке расчетов по Договору авансовых платежей с приложением выписки из лицевого счета Генподрядчика, открытого Генподрядчиком в территориальных органах Федерального казначейства, не исполнены.

В соответствии с п. 7.2.23 Договора по требованию Заказчика не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты его получения, если иной срок не будет указан в требовании, предоставлять заверенные копии документов (включая первичные учетные документы), подтверждающих направление расходования Целевых средств, полученных от Заказчика в оплату Работ, а также затраты Генподрядчика по исполнению Договора.

Заказчик письмами от 16.11.2022 исх. № ПС-721/14728/В (получено представителем Генподрядчика ФИО3 16.11.2022, что подтверждается отметкой о получении на копии письма), от 22.11.2022 исх. № ПС-721/14944/В (получено представителем Генподрядчика ФИО3

25.11.2022, что подтверждается отметкой о получении на копии письма) направил в адрес Генподрядчика требования о предоставлении отчета по целевому использованию денежных средств на открытом ООО «Строй Дизайн Сити» лицевом счете в УФК по г. Москве по состоянию на 01.11.2022 с приложением копий первичных учетных документов, подтверждающих выплаты по указанному счету и заключенные договоры, поставки, выполнения субподрядных работ и оказания услуг (по прилагаемой форме).

Отчеты в соответствии с вышеуказанными письмами Заказчику не представлены.

Согласно п. 16.7 Договора за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 100 000 рублей.

Таким образом, общий размер штрафов за неисполнение обязательств по предоставлению актов сверки расчетов (п. 4.14 Договора), отчетов об использовании в течение отчетного периода полученных в порядке расчетов по Договору авансовых платежей с приложением выписки из лицевого счета Генподрядчика, открытого Генподрядчиком в территориальных органах Федерального казначейства (п. 7.2.53 Договора) и предоставлению по требованию Заказчика заверенных копий документов (включая первичные учетные документы), подтверждающих направление расходования Целевых средств, полученных от Заказчика в оплату Работ, а также затраты Генподрядчика по исполнению Договора (п. 7.2.23 Договора), составляет 1 600 000 рублей 00 коп., согласно расчету в исковом заявлении (таблица том 1 л.д. 6).

В адрес Ответчика была направлена Претензия от 16.02.2023 Ш ЕМ-100/18/952/В с требованием об уплате штрафов за неисполнение обязательств по предоставлению актов сверки расчетов (п. 4.14 Договора), отчетов об использовании в течение отчетного периода полученных в порядке расчетов по Договору авансовых платежей с приложением выписки из лицевого счета Генподрядчика, открытого Генподрядчиком в территориальных органах Федерального казначейства (п. 7.2.53 Договора) и предоставлению по требованию Заказчика заверенных копий документов (включая первичные учетные документы), подтверждающих направление расходования Целевых средств, полученных от Заказчика в оплату Работ, а также затраты Генподрядчика по исполнению Договора (п. 7.2.23 Договора), что подтверждается списком № 8 (партия 929) внутренних почтовых отправлений от 20.02.2023, а также отчетом о доставке письма на электронную почту от 16.02.2023.

Претензия от 16.02.2023 № ЕМ-100/18/952/В не была вручена Ответчику, поскольку последний не явился за получением почтового отправления, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 80097581355540. Таким образом, претензия от 16.02.2023 № ЕМ-100/18/952/В считается полученной Ответчиком 28.02.2023. Требования претензии от 16.02.2023 № ЕМ-100/18/952/В Ответчиком не удовлетворены.

На основании изложенного с Ответчику начислены штрафы за неисполнение обязательств по предоставлению актов сверки расчетов (п. 4.14 Договора), отчетов об использовании в течение отчетного периода полученных в порядке расчетов по Договору авансовых платежей с приложением выписки из лицевого счета Генподрядчика, открытого Генподрядчиком в территориальных органах Федерального казначейства (п. 7.2.53 Договора) и предоставлению по требованию Заказчика заверенных копий документов (включая первичные учетные документы), подтверждающих направление расходования Целевых средств, полученных от Заказчика в оплату Работ, а также затраты Генподрядчика по исполнению Договора (п. 7.2.23 Договора) в общем размере 1 600 000 рублей.

В соответствии с п.п. 5.2.3, 7.2.10 Договора Генподрядчик производит Работы в сроки, согласованные Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (абз. 2 п. 1 ст. 708 ГК РФ).

По состоянию на 16.04.2023 (последний день действия Договора) Генподрядчиком нарушен срок выполнения работ по устройству отопления, теплоснабжения и теплового пункта (п. 3 Графика производства работ (Приложение № 1 к Договору) на 188 дней (с 11.10.2022 по 16.04.2023 включительно).

В соответствии с ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельньм этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени (ч. 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Таким образом, но состоянию на дату расторжения Договора (17.04.2023) размер неустойки, подлежащей уплате Генподрядчиком за нарушение срока выполнения работ по устройству отопления, теплоснабжения и теплового пункта (п. 3 Графика производства работ (Приложение № 1 к Договору), составляет 2 815 254,38 рубля 38 копеек, начисленных на сумму 59 899 029,40 руб. за период с 11.10.2022 по 16.04.2023, согласно приложенному к иску расчет (приложение № 21).

В адрес Ответчика была направлена Претензия от 14.03.2023 № ЕМ-721/5/1608/В с требованием об уплате неустойки за нарушение срока выполнения работ по устройству отопления, теплоснабжения и теплового пункта (п. 3 Графика производства работ (Приложение № 1 к Договору), что подтверждается списком  №   8   (партия   969)   внутренних   почтовых   отправлений   от 16.03.2023, а также отчетом о доставке письма на электронную почту corp@sdcitv.ru от 14.03.2023.

Претензия от 14.03.2023 № ЕМ-100/16094/В не была вручена Ответчику, поскольку последний не явился за получением почтового отправления, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 80080982005794. Таким образом, претензия от 14.03.2023 № №№ ЕМ-721/5/1608/В считается полученной Ответчиком 18.03.2023. Требования претензии от 14.03.2023 № № ЕМ-721/5/1608/В Ответчиком не удовлетворены.

На основании изложенного Ответчику начислена неустойка за нарушение срока выполнения работ по устройству отопления, теплоснабжения и теплового пункта (п. 3 Графика производства работ (Приложение № 1 к Договору) в размере 2 815 254,38 руб.

Таким образом, истец начислил ответчику штраф за нарушение срока устранения нарушений, допущенных Генподрядчиком в ходе выполнения работ по Договору в размере 100 000 руб., штраф за неисполнение обязательств по предоставлению актов сверки расчетов (п. 4.14 Договора), отчетов об использовании в течение отчетного периода полученных в порядке расчетов по Договору авансовых платежей с приложением выписки из лицевого счета Генподрядчика, открытого Генподрядчиком в территориальных органах Федерального казначейства (п. 7.2.53 Договора) и предоставлению по требованию Заказчика заверенных копий документов (включая первичные учетные документы), подтверждающих направление расходования Целевых средств, полученных от Заказчика в оплату Работ, а также затраты Генподрядчика по исполнению Договора (п. 7.2.23 Договора) в общем размере 1 600 000  рублей 00 коп., неустойку за нарушение срока выполнения работ по устройству отопления, теплоснабжения и теплового пункта (п. 3 Графика производства работ (Приложение № 1 к Договору) в размере 2 815 254,38 руб., расчеты проверены судом и признаны обоснованнымы. Ответчиком о применении ст. 333 ГК РФ не заявлено.       

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание представленные в материалы дела доказательства, факт нарушения обязательств подтвержден истцом, ответчиком не опровергнут, начисление неустойки и штрафов произведено обоснованно, в связи с чем, требование истца о взыскании штрафа и неустойки подлежит удовлетворению, а штраф за нарушение срока устранения нарушений, допущенных Генподрядчиком в ходе выполнения работ по Договору в размере 100 000 руб., штраф за неисполнение обязательств по предоставлению актов сверки расчетов (п. 4.14 Договора), отчетов об использовании в течение отчетного периода полученных в порядке расчетов по Договору авансовых платежей с приложением выписки из лицевого счета Генподрядчика, открытого Генподрядчиком в территориальных органах Федерального казначейства (п. 7.2.53 Договора) и предоставлению по требованию Заказчика заверенных копий документов (включая первичные учетные документы), подтверждающих направление расходования Целевых средств, полученных от Заказчика в оплату Работ, а также затраты Генподрядчика по исполнению Договора (п. 7.2.23 Договора) в общем размере 1 600 000  рублей 00 коп., неустойку за нарушение срока выполнения работ по устройству отопления, теплоснабжения и теплового пункта (п. 3 Графика производства работ (Приложение № 1 к Договору) в размере 2 815 254,38 руб. взысканию с ответчика.

Также истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими средствами на сумму неосновательного денежного обогащения за период с 18.04.2023 по 16.10.2023 в размере 4 255 033 руб. 32 коп., процентов за пользование чужими средствами на сумму неосновательного денежного обогащения с 17.10.2023 по день фактической уплаты не использованного Ответчиком аванса, согласно расчету (т. 2 л.д. 61). Расчет судом проверен, признан верным.

В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

В силу действовавшей до 01.08.2016 редакции п. 1 ст. 395 ГК РФ размер процентов определяется существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц (п. 1 ст. 395 ГК РФ, в редакции Федерального закона от 08.03.2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В соответствии с редакцией п. 1 ст. 395 ГК РФ, действующей с 01.08.2016, размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды (п. 1 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 315-ФЗ).

Согласно положениям Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции настоящего Федерального закона применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Как следует из п. 48 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24 марта 2016 г. № 7 «О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Расчет процентов, начисляемых после вынесения решения, осуществляется в процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). Размер процентов, начисленных за периоды просрочки, имевшие место с 1 июня 2015 года по 31 июля 2016 года включительно, определяется по средним ставкам банковского процента по вкладам физических лиц, а за периоды, имевшие место после 31 июля 2016 года, - исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды после вынесения решения (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.02.2017 № 6).

В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание, что ответчик не доказал факт возврата неосновательного обогащения, суд приходит к выводу, что исковые требования о взыскании процентов за пользование чужими средствами на сумму неосновательного денежного обогащения за период с 18.04.2023 по 16.10.2023 в размере 4 255 033 руб. 32 коп., согласно расчету истца, с последующим начислением процентов по день фактической оплаты суммы долга исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующий период, подлежат удовлетворению судом.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ, расходы по оплате госпошлине в размере 200 000 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца. 

На основании ст. ст. 8-12, 309, 310, 330, 702, 711 ГК РФ, руководствуясь ст. ст.  64, 65, 67, 71, 110, 167-171, 176, 180 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ДИЗАЙН СИТИ" 125424, 

<

...>, ЭТ 2 П I К 25 ОФ 75, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 31.01.2003, ИНН: 

<

***>, КПП: 773301001 в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ" ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА" 107078, 

<

...>, СТР.1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 30.12.2011, ИНН: 

<

***>, КПП: 770101001 неотработанный аванс в размере 84 902 947 (Восемьдесят четыре миллиона девятьсот две тысячи девятьсот сорок семь) руб. 41 коп., штраф  за нарушение сроков устранения нарушений  в размере 100 000 (Сто тысяч) руб., штрафы за неисполнение обязательств по предоставлению актов сверки расчетов (п. 4.14 Договора), отчетов об использовании в течение отчетного периода полученных в порядке расчетов по Договору авансовых платежей с приложением выписки из лицевого счета Генподрядчика, открытого Генподрядчиком в территориальных органах Федерального казначейства (п. 7.2.53 Договора) и предоставлению по требованию Заказчика заверенных копий документов (включая первичные учетные документы), подтверждающих направление расходования Целевых средств, полученных от Заказчика в оплату Работ, а также затраты Генподрядчика по исполнению Договора (п. 7.2.23 Договора) в общем размере 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) руб., неустойку за нарушение срока выполнения работ по устройству отопления, теплоснабжения и теплового пункта (п. 3 Графика производства работ в размере 2 815 254 (Два миллиона восемьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) руб. 38 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 18.04.2023 г. по 16.10.2023 г. в размере 4 255 033 (Четыре миллиона двести пятьдесят пять тысяч тридцать три) руб. 32 коп. с последующим начислением процентов по день фактической оплаты суммы неотработанного аванса исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующий период, расходы по оплате госпошлины  в размере 200 000 (Двести тысяч) руб. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его  изготовления в полном объеме в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                            А. А. Федоточкин