12/2017-27222(1) 

Арбитражный суд Республики Карелия  ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru  

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А26-10233/2016

г. Петрозаводск

17 мая 2017 года

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия  

РЕШИЛ:

1. Удовлетворить иск государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения Республики Карелия «Межрайонная больница № 1». 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Новатек" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в течение 10 дней с даты вступления решения в  законную силу выполнить в рамках гарантийного ремонта по государственному  контракту № 46/2012 от 2 ноября 2012 года по строительству амбулатории в пос.  Ледмозеро Меуезерского района следующие работы:  

1) В кабинете врача-педиатра: 

- заменить половую плитку площадью 0,12 кв.м;  - провести переклейку обоев площадью 3,05 кв.м;  

 2) В прививочном кабинете педиатрического блока:   - заменить стеновую плитку под окном площадью 0.12 кв.м;  

 3) В туалете педиатрического блока: 

 - выполнить затирку швов между половой плиткой на площади 3,95 кв.м;   - заменить стеновую плитку на площади 0,3 кв.м;  

 4) В туалете для маломобильных граждан: 

 - выполнить затирку швов между половой плиткой на площади 3,42 кв.м;   5) В помещении автоклавной:  

 - устранить прогиб пола на площади 1,71 кв.м; ; 

 - выполнить затирку швов между половой плиткой на площади 5,87 кв.м;   - заменить половую плитку на площади 0,45 кв.м;  

 6) В прививочном кабинете: 

 - выполнить затирку швов между половой плиткой на площади 1,6 кв.м;   7) В кабинете врача-стоматолога:  

 - устранить дефекты по длине уложенного линолеума 1,9 п.м, по ширине –  2см;  

 8) В туалете Пункта скорой и неотложной медицинской помощи:   - выполнить затирку швов между половой плиткой на площади 4,15 кв.м;  

 9) В комнате персонала Пункта скорой и неотложной медицинской помощи:  

 - переклеить обои на площади 3,05 кв.м; 

 10) В тамбуре выхода из Пункта скорой и неотложной медицинской помощи:   - заменить половую плитку на площади 0,09 кв.м;  

 - выполнить затирку швов между половой плиткой на площади 2,5 кв.м;   11) На входе в Пункт скорой и неотложной медицинской помощи:  

 - устранить прогиб подшивки козырька на площади 6,9 кв.м; 

 12) С наружной стороны здания залить сплошную трещину между наружной  

стеной и отмосткой по периметру здания – 76,5 п.м (периметр = 2*(19,96 м+18,29  

м)); 

 - залить трещины в отмостках по периметру здания амбулатории площадью  

6,8 кв.м,. 

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Новатек» в пользу  государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики  Карелия «Межрайонная больница № 1» 6000 руб. расходов по госпошлине.  

3. В удовлетворении иска казённого учреждения Республики Карелия  «Управление капитального строительства Республики Карелия» отказать.  

4. В удовлетворении встречного иска отказать. 5. Решение может быть обжаловано: 

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления  полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд  (191015, 

<

...>);  

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000,  

<

...>) при условии, что данное решение было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд  апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд  Республики Карелия.  

Судья Шалапаева И.В.