Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-30049/2018

29 июня 2018 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  20 июня 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  29 июня 2018 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЗАПСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" (адрес:  196655, КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ДОМ 9, ОГРН:  1027808750958)

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСТРОЙ" (адрес:  123056, МОСКВА, пер. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, Д. 12, ПОМ.II; КОМН.6, ОГРН:  1137746316872)

о взыскании

при участии

- от истца: ФИО2, по доверенности  от 17.01.2018

- от ответчика: не явился, извещен

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЗАПСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» (далее – ООО «СЗСК») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ГЕОСТРОЙ» (далее – ООО «ГЕОСТРОЙ») о взыскании 958 551,47 руб. задолженности и 293 491,47 руб. неустойки за период с 01.04.2016 по 03.03.2018 по договору подряда от 21.12.2015 № 12-15.

Представитель истца в судебном заседании требования поддержал.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание своих представителей не направил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие. Отзыв с возражениями по заявленным требованиям ответчик не представил.

Исследовав материалы дела и оценив представленные доказательства, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, ООО «СЗСК» (субподрядчик) и ООО «ГЕОСТРОЙ» (подрядчик) заключили договор подряда от 21.12.2015 № 12-15, по условиям которого субподрядчик обязуется по заданию подрядчика выполнить в соответствии с технической документацией, а также ГОСТами, СНиПами, РД и иной нормативной документации, за свой риск, из своих материалов, собственными и привлеченными силами комплекс общестроительных работ, монтаж металлоконструкций и кровельного покрытия для здания Административно-учебного корпуса с КПП и с медико-санитарной частью с дневным стационаром на 10 койко-мест, включая комплексную поставку необходимого для выполнения работ оборудования, материалов, конструкций, комплектующих и механизмов на объекте согласно Приложения № 1, со сдачей результата работ подрядчику, технадзору заказчика, заказчику.

Согласно пункту 3.1 договора цена работ определяется Сводным расчетом стоимости работ и составляет 14 926 770 руб. Цена работ является твердой, фиксированной на весь период выполнения работ субподрядчиком и не может быть вышеуказанной в данном пункте.

В силу пункта 3.2 договора в течение 5-ти рабочих дней после подписания договора подрядчик на основании счета субподрядчика производит перечисление ему авансового платежа в размере 60% от цены работ по договору, что составляет 8 956 062 руб. Зачет аванса производится ежемесячно пропорционально объемам выполненных работ и отражается в КС-3.

Субподрядчик обязан предоставить подрядчику счет-фактуру на полученный аванс в течение 3-х дней с момента его получения.

Пунктом 3.3 договора субподрядчик до 20 числа каждого месяца предъявляет подрядчик выполненные объемы работ и предоставляет акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, составленную на выполненные работы согласно Приложения № 1 в 3-х экземплярах, полный комплект исполнительной документации на выполненные работы в отчетном периоде в 4-х экземплярах и счет-фактуру.

В силу пункта 3.4 договора оплата выполненных субподрядчиком работ производится ежемесячно в течение 10 рабочих дней с момента подписания подрядчиком форм КС-2, КС-3, исполнительной документации на выполненный объем  (или по отметкам) работ в 4-х экземплярах при условии получения подрядчиком оригинала счета-фактуры, счета на оплату, с зачетом ранее уплаченных авансовых платежей.

По пункту 6.1 договора начало выполнения работ – в 3-х дневный срок после выполнения подрядчиком обязательств  по п. 3.2 договора, окончание работ – 31.03.2015, при условии выполнения подрядчиком платежных обязательств по пункту 3.4 договора.

Согласно пункту 12.4 договора за задержку расчетов за выполненные и принятые работы подрядчик уплачивает субподрядчику пеню в размере 0,1% в сутки от стоимости выполненных в данный период работ, но не более 10% от их стоимости.

Стороны заключили дополнительные соглашения от 16.05.2006 № 1, от 23.06.2016 № 2 к договору на выполнение дополнительных строительно-монтажных работ по устройству кровельного покрытия для здания Административно-учебного корпуса с КПП и с медико-санитарной частью на объекте.

Стороны подписали акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 20.02.2016, от 17.03.2016, от 20.04.2016, от 20.05.2016, от 23.05.2016, от 25.07.2016, от 24.05.2016, от 23.06.2016, от 25.07.2016 № 1 и справки о стоимости работ по договору по форме КС-3 от 20.02.2016, от 17.03.2016, от 20.04.2016, от 20.05.2016, от 23.05.2016, от 25.07.2016, от 24.05.2016, от 23.06.2016, от 25.07.2016 № 1 на общую сумму выполненных работ в размере 14 809 117 руб.

Субподрядчик, ссылаясь на частичную оплату выполненных и принятых работ, направил подрядчику претензию от 27.12.2017 № 657 с требованием оплатить 665 060 руб. задолженности.

Отказ ООО «ГЕОСТРОЙ» удовлетворить названную претензию послужил основанием для обращения ООО «СЗСК» в арбитражный суд с настоящим иском.

Статьями 309 и 310 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Пунктом 1 статьи 702 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 ГК РФ). 

В пункте 1 статьи 746 ГК РФ предусмотрено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Выполнение подрядчиком работ по договору на сумму 14 809 117 руб. подтверждено представленными в материалы дела актами по форме КС-2 от 20.02.2016, от 17.03.2016, от 20.04.2016, от 20.05.2016, от 23.05.2016, от 25.07.2016, от 24.05.2016, от 23.06.2016, от 25.07.2016 № 1 и справками по форме КС-3 от 20.02.2016, от 17.03.2016, от 20.04.2016, от 20.05.2016, от 23.05.2016, от 25.07.2016, от 24.05.2016, от 23.06.2016, от 25.07.2016 № 1, подписанными подрядчиком без возражений по объему и качеству. 

Поскольку подрядчик не представил в материалы дела доказательства полной оплаты выполненных работ в сумме 665 060 руб., требование ООО «СЗСК»  об их оплате подлежит удовлетворению.

ООО «СЗСК» начислило ООО «ГЕОСТРОЙ» неустойку в сумме 293 491,47 руб. на основании пункта 12.4 договора.

Статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств, средством возмещения потерь кредитора, вызванных нарушением должником своих обязательств.

ООО «СЗСК» начислило 293 491,47 руб. пеней за период с 01.04.2016 по 03.03.2018 в соответствии с пунктом 12.4 договора. Расчет проверен судом и признан верным. Ответчик возражения по расчету не представил, контррасчет не направил.

Принимая во внимание, что суду не представлены документы, опровергающие исковые требования истца, в деле отсутствуют доказательства оплаты долга, исковые требования истца являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины по иску относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГЕОСТРОЙ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СЕВЗАПСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» 665 060 руб. задолженности, 293 491,47 руб. неустойки и 22 171 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Косенко Т.А.