1000100133_1736446  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

г. Барнаул Дело № А03-12290/2020 09.11.2022 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Кулика М.А., при ведении  протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом  судебном заседании исковое заявление закрытого акционерного общества  «Бурводопроводстрой» (649002, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Строй-Мастер» (656012, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании  задолженности по договору субподряда № 05-19 от 25.05.2019 в размере 9987689 руб.,  неустойки за период с 21.12.2019 по 04.02.2020 в размере 95715 руб. 35 коп.,  

а также по встречному иску общества с ограниченной ответственностью  обществу с ограниченной ответственностью "Строй-Мастер" (656012, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к  закрытому акционерному обществу закрытого акционерного общества  "Бурводопроводстрой" (649002, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании 748272 руб.  неосновательного обогащения, 211027 руб. убытков, 1330760 руб. 39 коп. неустойки за  просрочку выполнения работ за период с 03.02.2020 по 08.02.2021, с начислением  неустойки за просрочку исполнения обязательств в размере 1/300 действующей на день  уплаты неустойки ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости невыполненных ЗАО  «Бурводопроводстрой» работ за каждый день просрочки начиная с 09.02.2021 до  момента завершения работ,  

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица Администрации  муниципального образования «Турочакский район» (649140, Республика Алтай,  

<

...>, ОГРН 

<

***>  ИНН 

<

***>),  

 при участии в судебном заседании: от истца - с использованием средств веб- конференции - ФИО2 по доверенности от 16.09.2020, от ответчика –  ФИО3 по доверенности 01.08.2022,  

Руководствуясь ст. 779 Гражданского кодекса российской Федерации, статьями  110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.  Встречные исковые требования удовлетворить в полном объеме.  Произвести зачет встречных денежных требований сторон.  

Взыскать с акционерного общества «Бурводопроводстрой» (ОГРН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строй-Мастер»  (ОГРН 

<

***>) денежную сумму 232776 руб. 75 коп., в возмещение судебных  расходов 173518 руб. 83 коп.  

Признать недействительным односторонний отказ акционерного общества  «Бурводопроводстрой» (ОГРН 

<

***>) от 23.04.2021 № 14 от исполнения  договора субподряда от 25.05.2019 № 05-19, заключенного между обществом с  ограниченной ответственностью «Строй-Мастер» (ОГРН 

<

***>) и закрытым  акционерным обществом «Бурводопроводстрой» (ОГРН 

<

***>).  

Вернуть акционерному обществу «Бурводопроводстрой» (ОГРН 

<

***>)  из Федерального бюджета Российской Федерации 2020 руб. государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй-Мастер» (ОГРН  

<

***>) в доход Федерального бюджета Российской Федерации 20603 руб.  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия решения.  

Судья М.А. Кулик  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 13.01.2022 0:24:13

 Кому выдана Кулик Максим Алексеевич