36/2023-208749(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27 Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-12064/2023

г. Владивосток

01 сентября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 30 августа 2023 года .  Полный текст решения изготовлен 01 сентября 2023 года.  

 Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Буров А.В., 

Протокол ведет секретарь судебного заседания Препелица Д.Л.  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску МИНИСТЕРСТВО  ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ДСК" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

При участии в судебном заседании: от истца – ФИО1 по доверенности от 16.03.2022 № 15/2357/8, диплом; от ответчика – надлежаще извещены, не явились. установил: 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  ПРИМОРСКОГО КРАЯ обратилось с иском к ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ДСК" о взыскании штрафа.  

Истец иск поддержал. 

Ответчик, надлежащим образом извещенный о месте и времени проведения  судебного заседания, в суд не явился, в связи, с чем судебное заседание проведено в  отсутствие указанного лица в порядке статьи 136 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).  

Исследовав материалы дела, суд установил следующее. 

Между министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края  (далее - министерство) и обществом с ограниченной ответственностью «ДСК» (далее -  Подрядчик) заключен государственный контракт от 04.05.2022 № 166/22 на выполнение  работ по ремонту на участках км 3+000 - км 6+000, км 6+000 - км 8+000, км 10+000 - км  11+000, км 12+000 - км 16+755, км 209+090 - км 214+090 автомобильной дороги  регионального значения Раздольное - Хасал в Надеждинском и Хасанском  муниципальных районах на территории Приморского края (далее - Контракт).  

Общая стоимость работ по Контракту составила 533 459 950,00 руб. (пункт 2.1  Контракта). Срок выполнения работ: с момента заключения Контракта по 31.10.2022  (пункт 1.2 Контракта).  

Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными подписями  судей по делу № А51-12064/2023 на информационном ресурсе «Картотека арбитражных  дел» (http://kad.arbitr.ru) используйте секретный код:  

 Возможность доступна для пользователей, авторизованных через портал государственных услуг (ЕСИА). 

В связи с многочисленными существенными нарушениями Подрядчиком  условий Контракта, 18.07.2022 заказчиком принято решение об одностороннем отказе  от исполнения государственного контракта на основании пункта 3 статы: 723  Гражданского кодекса Российской Федерации, части 9 статьи 95 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товгров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктов 11.1, 11.2  государственного контракта. Решение вступило в силу, 28.07.2022 государственный  контракт расторгнут.  

Согласно пункту 4.1 Контракта Подрядчик принял на себя обязательства  выполнять на объекте работы по ремонту автомобильных дорог в сроки,  предусмотренные контрактом, с учетом Графика выполнения строительно-монтажных  работ (приложение № 4 к настоящему Контракту) в соответстЕИИ с Техническим  заданием (приложение № 1 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой  частью Контракта (далее - Техническое задание), со сметными расчетами стоимости  работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, и  требованиями нормативно-правовых и норматквно-технических документов и  документов, регламентирующих данный вид деятельности.  

Между тем, работы ООО «ДСК» в установленный срок не выполнены. В  соответствии с графиком производства работ и в соответствии с пунктов 2.1 Контракта,  Подрядчиком должны быть выполнены работы: 1 этап - до 31.05.2022 (33 651 720,65  руб.), 2 этап - до 30.06.2022 (114 962 564,06 руб.).  

За время действия Контракта Подрядчиком сдано, а Заказчиком принято работ  по 1 этапу 08.07.2022 на сумму 20 085 786,79 руб., по 2 этапу работы Подрядчиком не  сдавались.  

Просрочка исполнения Подрядчиком обязательств составила: 1 этап - 37 дней от  суммы 33 651 720,65 руб. и 20 дней от суммы 13 565 933,86 руб.; 2 этап - 27 дней от  суммы 114 962 564,06 руб., за что истцом начислена неустойка.  

Отказ ответчика оплатить неустойку, послужил основанием настоящего иска. 

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться сторонами надлежащим образом в соответствии с  условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.  

Согласно пункту 7.6 Контракта в случае просрочки исполнения Подрядчиком  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом,  а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет  Подрядчику, требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  

Пунктами 7.1, 7.3 и 7.7 Контракта установлено что, пеня начисляется за каждый  день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного  контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной  трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную  объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных  Подрядчиком.  

ООО «ДСК» нарушило сроки выполнения работ, предусмотренные Графиком  выполнения строительно-монтажных работ и условиями Контракта, в связи с чем  начислены штрафные санкции в размере 1232112,42 руб. за период с 01.06.2022 по  27.07.2022. Расчет судом проверен и признан верным.  

Оснований для снижения санкций или применения ст.333 ГК РФ судом не  установлено.  

С учетом изложенного исковые требования подлежат удовлетворению. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ, по результатам рассмотрения спора,  государственная пошлина подлежат взысканию с ответчика в доход федерального  бюджета, так как истец освобожден от ее уплаты.  

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд 

р е ш и л:

Взыскать с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСК" в  пользу МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  ПРИМОРСКОГО КРАЯ 1232112,42 руб. санкций, в доход федерального бюджета  25321,00 руб. государственной пошлины.  

Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в  течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в  Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом  рассмотрения апелляционной инстанции.  

Судья Буров А.В. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 19.03.2023 22:52:00

 Кому выдана Буров Александр Васильевич