И М Е Н Е М    Р О С С И Й С К О Й    Ф Е Д Е Р А Ц И И

         

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-161943/19-143-1444

25 сентября 2019 года

г.Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 18 сентября 2019 года

Полный текст решения изготовлен 25 сентября  2019 года 

Арбитражный суд в составе:

Судьи Гедрайтис О.С.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

с использованием средств аудиозаписи

рассматривает в  судебном заседании дело по иску ООО «Центр Вест Сибирь» (ИНН 

<

***>) 

к ООО «ТВОЕ» (ИНН 

<

***>)

о  взыскании 3.708.182 руб. 61 коп.

при участии: 

от истца: ФИО2 дов. от  04.03.19г.

от ответчика: ФИО3 дов. от  09.01.19г.

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Вест Сибирь»  обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «ТВОЕ» о взыскании 3 708 182 руб. 61 коп., составляющих в том числе: задолженность по договорам подряда №№7,11, 38, 39, 40, 44, 49, 50, 58, 62, 65, 66, 80, 94,102,116 и техническому обслуживанию №93 ДС№21 в размере 3 387 118 руб. 43 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленных в порядке ст.395 ГК РФ за период с 13.03.2018г. по 21.06.2019г. в размере  321 064 руб. 18 коп. 

Истец поддержал исковые требования в полном объеме, просил иск удовлетворить.

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований, ссылаясь на то, что истцом не представлены документы, подтверждающие выполнение работ по договорам подряда №7,38,39,44,49,50,58,62,65,66, заявил ходатайство об оставлении части исковых требований без рассмотрения, ссылаясь на несоблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора.   

Ходатайство рассмотрено и оставлено судом без удовлетворения по следующим основаниям.

         В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором.

                  Претензионный порядок урегулирования спора подразумевает особую (письменную) примирительную процедуру - процедуру урегулирования спора самими спорящими сторонами, осуществляемую посредством предъявления претензии и направления ответа на нее.

Под претензией следует понимать требование заинтересованного лица, направленное непосредственно контрагенту, об урегулировании спора между ними путем добровольного применения, не противоречащего законодательству способа защиты нарушенного права. Из содержания претензии должны четко следовать суть, обоснование и объем претензионных требований, а также к кому они предъявляются.

            Указанное требование (претензия) облекается в форму письменного документа, содержащего четко сформулированные требования; обстоятельства, на которых основываются требования; доказательства, подтверждающие их; сумму претензии и ее расчет и иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

            При этом письменная форма претензии подразумевает составление одного документа, содержащего все необходимые реквизиты, включая адресата претензии; предъявителя претензии; наименование документа; обстоятельства, на которых основаны претензионные требования; требования предъявителя; ссылку на соответствующую норму права и условие договора; перечень прилагаемых к претензии документов, иных доказательств, другую информацию, которая необходима для эффективного использования претензионного порядка урегулирования спора.

             Доказательствами соблюдения истцом досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора с ответчиком являются копия претензии и документы, подтверждающие ее направление ответчику. 

           К числу последних относятся почтовая квитанция (при отправке документов заказным или ценным письмом), заверенная выписка из журнала записей факсимильных сообщений (при отправке документов по телетайпу или факсу) либо копия самой претензии, содержащая отметку ответчика о принятии документов (в том случае, если документы вручены лично).

                       В материалы дела истцом представлена копия претензии, направленная в адрес ответчика  ООО «Центр Вест Сибирь» в рамках договора на техническое обслуживание №93 от 01.12.2016г. исх.№14 от 12.03.2019г. с требованием погашения задолженности.  

              Данные обстоятельства подтверждают факт соблюдения истцом досудебного порядка урегулирования спора, в связи с чем, ходатайство ответчика об оставлении иска без рассмотрения на основании п.2 ст.148 АПК РФ, удовлетворению не подлежит. 

Суд, рассмотрев материалы дела, в силу статей 67, 68, 71 АПК РФ исследовав и оценив представленные доказательства с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности, заслушав представителей истца и ответчика, считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материала дела между Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Вест Сибирь» и Обществом с ограниченной ответственностью «ТВОЕ» заключен договор подряда № 7 от 01.02.2017 г., № 38 от 26.07.2017 г., № 39 от 26.07.2017 г., № 44 от 10.07.2017 г. с учетом соглашения № 2 об изменении стоимости от 24.05.2018 г., № 49 от 15.08.2017 г., № 50 от 28.08.2017 г., № 58 от 20.09.2017 г. в редакции дополнительного соглашения № 1 от 28.09.2017 г., № 62 от 28.09.2017 г., № 65 от 09.10.2017 г., № 66 от 09.10.2017 г., № 102 от 16.11.2016 г., № 116 от 27.12.2016 г., № 40 от 02.08.2017 г. в редакции дополнительного соглашения № 1 от 04.08.2017 г., № 94 от 17.11.2016 г. в редакции дополнительного соглашения № 1 от 17.11.2016 г., № 80 от 16.11.2016 г. в редакции дополнительного соглашения № 1 от 16.11.2016 г., № 11 от 15.02.2017 г. в редакции дополнительного соглашения № 1 от 06.03.2017 г. и дополнительного соглашения № 2 от 06.03.2017 г., договор на техническое обслуживание № 93 от 01.12.2016 г.

ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» направило в адрес ООО «ТВОЕ» подписанный со своей стороны договор подряда № 7 от 01 февраля 2017 года (далее – договор № 7), счет на оплату № 97 от 07.02.2017 г., счет-фактуру № 97 от 03.04.2017 г. на сумму 125 833,78 руб.  Заказчик от подписания договора № 7 необоснованно уклонился.

Согласно п. 1.1. договора № 7 заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство по заданию заказчика, выполнить следующие работы: пакетное закрытие магазина ТМ «ТВОЕ», расположенного по адресу: РФ, 

<

...>, ТЦ «ЛЕТО». Заказчик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, принять результат работ и осуществить оплату выполняемых работ (п. 1.2. договора № 7).

В соответствии с п. 2.1. договора № 7 предусматривающим, что объем выполняемых работ, используемые материалы и их цена согласованы сторонами в смете, являющейся неотъемлемой частью договора, ООО «ТВОЕ» и ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» согласован локальный сметный расчет, являющийся приложением № 1 к договору № 7, что подтверждается перепиской по договору № 7.

Договорная цена работ указана в п. 2 договора № 7 и составляет 125 833 руб. 78 коп.

Согласно п. 2.2. договора № 7 заказчик принимает на себя обязательство осуществить оплату выполняемых по настоящему договору работ в следующем порядке:

предварительная оплата в размере 50% от сметной суммы - в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания сторонами настоящего договора;

окончательная оплата – в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ (форма КС-2).

По условиям п. 5.1. договора № 7 подрядчик считается исполнившим свою обязанность по выполнению работ, а результат работ считается переданным заказчику с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС – 2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС – 3) (далее – приемо-сдаточные документы). 

В силу п. 5.2. договора № 7 заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления результата работ и приемо-сдаточной документации утвердить ее либо представить мотивированный отказ от утверждения. В случае мотивированного отказа Заказчика от утверждения сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (ч. 1 ст. 702 ГК РФ).

Работы по договору № 7 подрядчиком выполнены в полном объёме и в срок, что подтверждается «первичными» актом выполненных работ № 5208 от 09.02.2017, актом выполненных работ от 10.02.2017 г. , подписанными уполномоченными лицами магазина ООО «ТВОЕ», где проводились работы. Заказчиком оплаты выполненных работ произведено не было.

В силу ч. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно ч. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Истец направил ответчику акт о приемке выполненных работ № 97 от 03.04.2017 г. по форме КС - 2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат № 97 от 03.04.2017 г. по форме КС-3 (приложение № 19), от подписания которых ООО «ТВОЕ» немотивированно уклонилось.

Таким образом, работы по договору № 7 на сумму 125 833 руб. 78 коп. приняты заказчиком по одностороннему акту в порядке ч. 4 ст. 753 ГК РФ, иного ООО «ТВОЕ» не доказало.

ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» направило в адрес ООО «ТВОЕ» подписанный со своей стороны договор подряда № 38 от 26 июля 2017 года (далее – Договор № 38), счет на оплату № 1208 от 10.08.2017 г., УПД № 1208 от 10.08.2017 г. на сумму 178 522,20 рублей заказчик от подписания договора № 38 необоснованно уклонился.

Согласно п. 1.1. договора № 38 подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по демонтажу и упаковке оборудования заказчика, а также выполнению иных работ, связанных с закрытием фирменного магазина «ТВОЕ», расположенного по адресу: РФ, г. Клин, Советская площадь, д.5 (1й этаж, секция В-5), ТЦ «Счастливая 7я» на объекте заказчика, а заказчик в свою очередь принимает на себя обязательство принять и оплатить выполненные подрядчиком работы.

В соответствии с п. 1.2. договора № 38 предполагающего, что работы выполняются в соответствии с его условиями и требованиями Технического задания, являющегося неотъемлемой частью договора и п. 1.4. договора № 38 предусматривающим, что наименование, объем и стоимость работ, наименование, объем и стоимость материалов, используемых для выполнения работ по договору, определяются сторонами в смете, являющейся неотъемлемой частью договора, ООО «ТВОЕ» и ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» согласованы техническое задание и локальный сметный расчет, являющийся приложением № 1 и приложением № 2 к договору № 38 соответственно, что подтверждается перепиской по договору № 38.

Договорная цена работ указана в п. 7.1 договора № 38 и составляет 178 522 руб. 20 коп..

Согласно п. 7.4. договора № 38 заказчик принимает на себя обязательство осуществить оплату выполняемых по настоящему договору работ в следующем порядке:

авансовый платеж в размере 50% от общей суммы настоящего договора, что составляет 89 261 (восемьдесят девять тысяч двести шестьдесят один) рубль 10 копеек, в том числе НДС-18% 13 616 (тринадцать тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 10 копеек, в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты, подписания настоящего договора;

оставшийся платеж 89 261 (восемьдесят девять тысяч двести шестьдесят один) рубль 10 копеек, в том числе НДС-18% % 13 616 (тринадцать тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 10 копеек, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты, подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, без замечаний.

По условиям п. 5.1. договора № 38 по окончании выполнения работ по договору, подрядчик предоставляет заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет, счет-фактуру, исполнительную документацию (если это следует из условий договора и/или выполняемых подрядчиком обязательств).

В силу п. 5.2. договора № 38 заказчик обязуется произвести приемку выполненных подрядчиком работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения полного комплекта документов, указанного в п. 5.1. настоящего договора от подрядчика. В срок, указанный в настоящем пункте заказчик обязуется подписать акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) или акт обнаружения дефектов (любой другой документ соответствующего содержания) и передать указанные документы подрядчику.

Работы по договору № 38 подрядчиком выполнены в полном объёме и в срок, что подтверждается фотоотчетом. Заказчиком оплаты выполненных работ произведено не было.

Истец направил ответчику акт о приемке выполненных работ № 1208 от 10.08.2017 г. по форме КС - 2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1208 от 10.08.2017 г. по форме КС-3, от подписания которых ООО «ТВОЕ» немотивированно уклонилось.

Таким образом, работы по договору № 38 на сумму 178 522 руб. 20 коп. приняты заказчиком по одностороннему акту в порядке ч. 4 ст. 753 ГК РФ, иного ООО «ТВОЕ» не доказало.

ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» направило в адрес ООО «ТВОЕ» подписанный со своей стороны договор подряда № 39 от 26.07.2017 года (далее –договор № 39), счет на оплату № 1207 от 10.08.2017 г., УПД № 1207 от 10.08.2017 г. на сумму 219 008,00 рублей. Заказчик от подписания договора № 39 необоснованно уклонился.

Согласно п. 1.1. договора № 39 подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по демонтажу и упаковке оборудования заказчика, а также выполнению иных работ, связанных с закрытием фирменного магазина «ТВОЕ», расположенного по адресу: РФ, г. Рязань, Московское ш., 65А, ТЦ «М5 Молл» на объекте заказчика, а заказчик в свою очередь принимает на себя обязательство принять и оплатить выполненные подрядчиком работы.

В соответствии с п. 1.2. договора № 39 предполагающего, что работы выполняются в соответствии с его условиями и требованиями Технического задания, являющегося неотъемлемой частью договора и п. 1.4. договора № 39 предусматривающим, что наименование, объем и стоимость работ, наименование, объем и стоимость материалов, используемых для выполнения работ по договору, определяются сторонами в смете, являющейся неотъемлемой частью договора, ООО «ТВОЕ» и ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» согласованы техническое задание и локальный сметный расчет, являющийся приложением № 1 и приложением № 2 к договору № 39 соответственно, что подтверждается перепиской по договору № 39.

Договорная цена работ указана в п. 7.1 договора № 39 и составляет 219 008 руб. 00 коп. 

Согласно п. 7.4. договора № 39 заказчик принимает на себя обязательство осуществить оплату выполняемых по настоящему договору работ в следующем порядке:

авансовый платеж в размере 50% от общей суммы настоящего договора, что составляет 109 504 (сто девять тысяч пятьсот четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% 19 710 (девятнадцать тысяч семьсот десять рублей) 72 копейки, в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты, подписания настоящего договора;

оставшийся платеж 109 504 (сто девять тысяч пятьсот четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% 19 710 (девятнадцать тысяч семьсот десять рублей) 72 копейки, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты, подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, без замечаний.

По условиям п. 5.1. договора № 39 по окончании выполнения работ по договору, подрядчик предоставляет заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет, счет-фактуру, исполнительную документацию.

В силу п. 5.2. договора № 39 заказчик обязуется произвести приемку выполненных подрядчиком работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения полного комплекта документов, указанного в п. 5.1. настоящего договора от подрядчика. В срок, указанный в настоящем пункте заказчик обязуется подписать акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) или акт обнаружения дефектов (любой другой документ соответствующего содержания) и передать указанные документы подрядчику.

Работы по договору № 39 подрядчиком выполнены в полном объёме и в срок, что подтверждается фотоотчетом. Заказчиком оплаты выполненных работ произведено не было.

Истец направил ответчику акт о приемке выполненных работ № 1207 от 10.08.2017 г. по форме КС - 2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1207 от 10.08.2017 г. по форме КС-3 , от подписания которых ООО «ТВОЕ» немотивированно уклонилось.

Таким образом, работы по договору № 39 на сумму 219 008 руб. 00 коп. приняты заказчиком по одностороннему акту в порядке ч. 4 ст. 753 ГК РФ, иного ООО «ТВОЕ» не доказало.

ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» направило в адрес ООО «ТВОЕ» подписанный со своей стороны договор подряда № 44 от 10 июля 2017 года (далее – договор № 44), счет на оплату № 1074 от 20.07.2017 г., УПД № 1074 от 20.07.2017 г. на сумму 291 519,00 рублей (приложение № 29) и соглашение № 2 об изменении стоимости от 24.05.2018 г. на сумму 173 991,00 рублей. Заказчик от подписания договора № 44 необоснованно уклонился.

Согласно положениям раздела 1 договора № 44 подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по демонтажу и упаковке оборудования заказчика, а также выполнению иных работ, связанных с закрытием фирменного магазина «ТВОЕ», расположенного по адресу: РФ, 

<

...>, ТЦ «Золотой Вавилон» на объекте заказчика, а заказчик в свою очередь принимает на себя обязательство принять и оплатить выполненные подрядчиком работы.

В соответствии с п. 1.1. договора № 44 предполагающего, что работы выполняются в соответствии с его условиями и требованиями Технического задания, являющегося неотъемлемой частью договора и п. 1.3. договора № 44 предусматривающим, что наименование, объем и стоимость работ, наименование, объем и стоимость материалов, используемых для выполнения работ по договору, определяются сторонами в смете, являющейся неотъемлемой частью договора, ООО «ТВОЕ» и ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» согласованы техническое задание и локальный сметный расчет, являющийся приложением № 1 и приложением № 2 к договору № 44 соответственно, что подтверждается перепиской по договору № 44.

Договорная цена работ указана в п. 7.1 договора № 44 и составляет 173 991 руб. 00 коп. 

Согласно п. 7.4. договора № 44 заказчик принимает на себя обязательство осуществить оплату выполняемых по настоящему договору работ в следующем порядке:

авансовый платеж в размере 50% от общей суммы настоящего договора, что составляет 86 995 (восемьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 50 копеек, в том числе НДС-18% 13 270 (тринадцать тысяч двести семьдесят) рублей 50 копеек, в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты, подписания настоящего договора;

оставшийся платеж 86 995 (восемьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 50 копеек, в том числе НДС-18% 13 270 (тринадцать тысяч двести семьдесят) рублей 50 копеек, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты, подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, без замечаний.

По условиям п. 5.1. договора № 44 по окончании выполнения работ по договору, подрядчик предоставляет заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет, счет-фактуру, исполнительную документацию (если это следует из условий договора и/или выполняемых подрядчиком обязательств).

В силу п. 5.2. договора № 44 заказчик обязуется произвести приемку выполненных подрядчиком работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения полного комплекта документов, указанного в п. 5.1. настоящего договора от подрядчика. В срок, указанный в настоящем пункте заказчик обязуется подписать акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) или акт обнаружения дефектов (любой другой документ соответствующего содержания) и передать указанные документы подрядчику.

Работы по договору № 44 подрядчиком выполнены в полном объёме и в срок, что подтверждается «первичным» актом выполненных работ от 18.07.2017 г., подписанным уполномоченным лицом магазина ООО «ТВОЕ», где проводились работы (приложение № 31). Заказчиком оплаты выполненных работ произведено не было.

Истец направил ответчику акт о приемке выполненных работ № 1074 от 18.07.2017 г. по форме КС - 2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1074 от 18.07.2017 г. по форме КС-3, от подписания которых ООО «ТВОЕ» немотивированно уклонилось.

Таким образом, работы по договору № 44 на сумму 173 991 руб. 00 коп. приняты заказчиком по одностороннему акту в порядке ч. 4 ст. 753 ГК РФ, иного ООО «ТВОЕ» не доказало.

ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» направило в адрес ООО «ТВОЕ» подписанный со своей стороны договор подряда № 49 от 15.08.2017 года (далее – договор № 49), счет на оплату № 1323 от 25.08.2017 г., УПД № 1323 от 25.08.2017 г. на сумму 214 229,00 рублей (приложение № 34). Заказчик от подписания договора № 49 необоснованно уклонился.

Согласно п. 1.1. договора № 49 подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по демонтажу и упаковке оборудования заказчика, а также выполнению иных работ, связанных с закрытием фирменного магазина «ТВОЕ», расположенного по адресу: РФ, 

<

...> ТЦ «Северное Нагорное» на объекте заказчика, а заказчик в свою очередь принимает на себя обязательство принять и оплатить выполненные подрядчиком работы.

В соответствии с п. 1.2. договора № 49 предполагающего, что работы выполняются в соответствии с его условиями и требованиями Технического задания, являющегося неотъемлемой частью договора и п. 1.4. договора № 49 предусматривающим, что наименование, объем и стоимость работ, наименование, объем и стоимость материалов, используемых для выполнения работ по договору, определяются сторонами в смете, являющейся неотъемлемой частью договора, ООО «ТВОЕ» и ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» согласованы техническое задание и локальный сметный расчет, являющийся приложением № 1 и приложением № 2 к договору № 49 соответственно, что подтверждается перепиской по договору № 49.

Договорная цена работ указана в п. 7.1 договора № 49 и составляет 214 229 руб. 00 коп. 

Согласно п. 7.4. договора № 49 заказчик принимает на себя обязательство осуществить оплату выполняемых по настоящему договору работ в следующем порядке:

авансовый платеж в размере 50% от общей суммы настоящего договора, что составляет 107 114 (сто семь тысяч сто четырнадцать) рублей 50 копеек, в том числе НДС-18% 16 339 (шестнадцать тысяч триста тридцать девять) рублей 50 копеек, в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты, подписания настоящего договора;

оставшийся платеж 107 114 (сто семь тысяч сто четырнадцать) рублей 50 копеек, в том числе НДС-18% 16 339 (шестнадцать тысяч триста тридцать девять) рублей 50 копеек, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты, подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, без замечаний.

По условиям п. 5.1. договора № 49 по окончании выполнения работ по договору, подрядчик предоставляет заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет, счет-фактуру, исполнительную документацию (если это следует из условий договора и/или выполняемых подрядчиком обязательств).

В силу п. 5.2. договора № 49 заказчик обязуется произвести приемку выполненных подрядчиком работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения полного комплекта документов, указанного в п. 5.1. настоящего договора от подрядчика. В срок, указанный в настоящем пункте заказчик обязуется подписать акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) или акт обнаружения дефектов (любой другой документ соответствующего содержания) и передать указанные документы подрядчику.

Работы по договору № 49 подрядчиком выполнены в полном объёме и в срок, что подтверждается «первичным» актом выполненных работ от 21.08.2017 г., подписанным уполномоченным лицом магазина ООО «ТВОЕ», где проводились работы. Заказчиком оплаты выполненных работ произведено не было.

Истец направил ответчику акт о приемке выполненных работ № 1323 от 25.08.2017 г. по форме КС - 2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1323 от 25.08.2017 г. по форме КС-3, от подписания которых ООО «ТВОЕ» немотивированно уклонилось.

Таким образом, работы по договору № 49 на сумму 214 229 руб. 00 коп. приняты заказчиком по одностороннему акту в порядке ч. 4 ст. 753 ГК РФ, иного ООО «ТВОЕ» не доказало.

ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» направило в адрес ООО «ТВОЕ» подписанный со своей стороны договор подряда № 50 от 28.08.2017 года (далее – договор № 50), счет на оплату № 1498 от 28.08.2017 г., УПД № 1498 от 01.09.2017 г. на сумму 282 345, 21 рублей (приложение № 38). Заказчик от подписания договора № 50 необоснованно уклонился.

Согласно п. 1.1. договора № 50 подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по демонтажу и упаковке оборудования заказчика, а также выполнению иных работ, связанных с закрытием фирменного магазина «ТВОЕ», расположенного по адресу: РФ, Ленинградская область, г. Гатчина, пр.25 Октября, д.42 ТЦ «Мегаполис» на объекте заказчика, а заказчик в свою очередь принимает на себя обязательство принять и оплатить выполненные подрядчиком работы.

В соответствии с п. 1.2. договора № 50 предполагающего, что работы выполняются в соответствии с его условиями и требованиями Технического задания, являющегося неотъемлемой частью договора и п. 1.4. договора № 50 предусматривающим, что наименование, объем и стоимость работ, наименование, объем и стоимость материалов, используемых для выполнения работ по договору, определяются сторонами в смете, являющейся неотъемлемой частью договора, ООО «ТВОЕ» и ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» согласованы техническое задание и локальный сметный расчет, являющийся приложением № 1 и приложением № 2 к договору № 50 соответственно, что подтверждается перепиской по договору № 50.

Договорная цена работ указана в п. 7.1 договора № 50 и составляет 282 345  руб. 21 коп.

Согласно п. 7.4. договора № 50 заказчик принимает на себя обязательство осуществить оплату выполняемых по настоящему договору работ в следующем порядке:

авансовый платеж в размере 50% от общей суммы настоящего договора, что составляет 141 172 (сто сорок одна тысяча сто семьдесят два) рубля 60 копеек, в том числе НДС-18% 21 534 (двадцать одна тысяча пятьсот тридцать четыре) рубля 80 копеек, в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты, подписания настоящего договора;

оставшийся платеж 141 172 (сто сорок одна тысяча сто семьдесят два) рубля 60 копеек, в том числе НДС-18% 21 534 (двадцать одна тысяча пятьсот тридцать четыре) рубля 80 копеек, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты, подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, без замечаний.

По условиям п. 5.1. договора № 50 по окончании выполнения работ по договору, подрядчик предоставляет заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет, счет-фактуру, исполнительную документацию (если это следует из условий договора и/или выполняемых подрядчиком обязательств).

В силу п. 5.2. договора № 50 заказчик обязуется произвести приемку выполненных подрядчиком работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения полного комплекта документов, указанного в п. 5.1. настоящего договора от подрядчика. В срок, указанный в настоящем пункте заказчик обязуется подписать акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) или акт обнаружения дефектов (любой другой документ соответствующего содержания) и передать указанные документы подрядчику.

Работы по договору № 50 подрядчиком выполнены в полном объёме и в срок, что подтверждается «первичным» актом выполненных работ от 01.09.2017 г., подписанным уполномоченным лицом магазина ООО «ТВОЕ», где проводились работы. Заказчиком оплаты выполненных работ произведено не было.

Истец направил ответчику акт о приемке выполненных работ № 1498 от 01.09.2017 г. по форме КС - 2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1498 от 01.09.2017 г. по форме КС-3, от подписания которых ООО «ТВОЕ» немотивированно уклонилось.

Таким образом, работы по договору № 50 на сумму 282 345 руб. 21 коп. приняты заказчиком по одностороннему акту в порядке ч. 4 ст. 753 ГК РФ, иного ООО «ТВОЕ» не доказало.

ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» направило в адрес ООО «ТВОЕ» подписанный со своей стороны договор подряда № 58 от 20.09.2017 года (далее – договор № 58) и дополнительное соглашение № 1 от 28.09.2017 года (далее – ДС № 1/58), счет на оплату № 1545 от 02.10.2017 г., УПД № 1545 от 02.10.2017 г., на сумму 125 906,00 рублей, счет на оплату № 1546 от 02.10.2017 г., УПД № от 02.10.2017 г. на сумму 5000,00 рублей. Заказчик от подписания договора № 58, ДС № 1 необоснованно уклонился.

Согласно п. 1.1. договора № 58, п. 1 ДС № 1/58 подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по демонтажу и упаковке оборудования заказчика, а также выполнению иных работ, связанных с закрытием фирменного магазина «ТВОЕ», расположенного по адресу: РФ, 

<

...>, ТЦ Арена на объекте заказчика, а заказчик в свою очередь принимает на себя обязательство принять и оплатить выполненные подрядчиком работы.

В соответствии с п. 1.2. договора № 58 предполагающего, что работы выполняются в соответствии с его условиями и требованиями Технического задания, являющегося неотъемлемой частью договора и п. 1.4. договора № 58 предусматривающим, что наименование, объем и стоимость работ, наименование, объем и стоимость материалов, используемых для выполнения работ по договору, определяются сторонами в смете, являющейся неотъемлемой частью договора, ООО «ТВОЕ» и ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» согласованы техническое задание и локальный сметный расчет, являющийся приложением № 1 и приложением № 2 к договору № 58 соответственно, что подтверждается перепиской по договору № 58, а так же локальный сметный расчет, являющийся приложением № 1 к ДС № 1/58, что подтверждается перепиской по ДС № 1/58.

Договорная цена работ указана в п. 7.1 договора № 58 и составляет 125 906 руб. 00 коп. 

Договорная цена дополнительных работ указана в п. 3 ДС № 1/58 и составляет: 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в сумме 762 (семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка.

Согласно п. 7.4. договора № 58 заказчик принимает на себя обязательство осуществить оплату выполняемых по настоящему договору работ в следующем порядке:

авансовый платеж в размере 50% от общей суммы настоящего договора, что составляет 62 953 (шестьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС-18% 9 603 (девять тысяч шестьсот три) рубля 00 копеек, в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты, подписания настоящего договора;

оставшийся платеж 62 953 (шестьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС-18% 9 603 (девять тысяч шестьсот три) рубля 00 копеек, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты, подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, без замечаний.

В силу п. 4.1. ДС № 1/58 заказчик обязуется произвести оплату работ в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ;

По условиям п. 5.1. договора № 58 по окончании выполнения работ по договору, подрядчик предоставляет заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет, счет-фактуру, исполнительную документацию (если это следует из условий договора и/или выполняемых подрядчиком обязательств).

В силу п. 5.2. договора № 58 заказчик обязуется произвести приемку выполненных подрядчиком работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения полного комплекта документов, указанного в п. 5.1. настоящего договора от подрядчика. В срок, указанный в настоящем пункте заказчик обязуется подписать акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) или акт обнаружения дефектов (любой другой документ соответствующего содержания) и передать указанные документы подрядчику.

Работы по договору № 58, ДС № 1/58 подрядчиком выполнены в полном объёме и в срок, что подтверждается «первичным» актом выполненных работ от 29.09.2017 г., подписанным уполномоченным лицом магазина ООО «ТВОЕ», где проводились работы. Заказчиком оплаты выполненных работ произведено не было.

Истец направил ответчику акт о приемке выполненных работ № 1545 от 02.10.2017 г. по форме КС - 2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1545 от 02.10.2017 г. по форме КС-3, от подписания которых ООО «ТВОЕ» немотивированно уклонилось.

Таким образом, работы по договору № 58 на сумму 125 906,00 приняты заказчиком по одностороннему акту в порядке ч. 4 ст. 753 ГК РФ, иного ООО «ТВОЕ» не доказало. Работы по ДС № 1/58 (монтаж баннера 6,1х3,5 м) приняты заказчиком фактически. Общая стоимость работ по договору № 58 и ДС № 1/58 составила 130900, 00 рублей.

ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» направило в адрес ООО «ТВОЕ» подписанный со своей стороны договор подряда № 62 от 28.09.2017 года (далее –договор № 62), счет на оплату № 1621 от 02.10.2017 г., УПД № 1621 от 02.10.2017 г. на сумму 94 223,00 рублей. Заказчик от подписания договора № 62 необоснованно уклонился.

Согласно п. 1.1. договора № 62 подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по демонтажу и упаковке оборудования заказчика, а также выполнению иных работ, связанных с закрытием фирменного магазина «ТВОЕ», расположенного по адресу: РФ, г. Москва, Земляной вал, д.29, Курский вокзал на объекте заказчика, а заказчик в свою очередь принимает на себя обязательство принять и оплатить выполненные подрядчиком работы.

В соответствии с п. 1.2. договора № 62 предполагающего, что работы выполняются в соответствии с его условиями и требованиями Технического задания, являющегося неотъемлемой частью договора и п. 1.4. договора № 62 предусматривающим, что наименование, объем и стоимость работ, наименование, объем и стоимость материалов, используемых для выполнения работ по договору, определяются сторонами в смете, являющейся неотъемлемой частью договора, ООО «ТВОЕ» и ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» согласованы техническое задание и локальный сметный расчет, являющийся приложением № 1 и приложением № 2 к договору № 62 соответственно, что подтверждается перепиской по договору № 62.

Договорная цена работ указана в п. 7.1 договора № 62 и составляет 94 223 руб. 00 коп.

Согласно п. 7.4. договора № 62 заказчик принимает на себя обязательство осуществить оплату выполняемых по настоящему договору работ в следующем порядке:

авансовый платеж в размере 50% от общей суммы настоящего договора, что составляет 47 111 (сорок семь тысяч сто одиннадцать) рублей 50 копеек, в том числе НДС-18% 7 186 (семь тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 50 копеек, в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты, подписания настоящего договора;

оставшийся платеж 47 111 (сорок семь тысяч сто одиннадцать) рублей 50 копеек, в том числе НДС-18% 7 186 (семь тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 50 копеек, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты, подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, без замечаний.

По условиям п. 5.1. договора № 62 по окончании выполнения работ по договору, подрядчик предоставляет заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет, счет-фактуру, исполнительную документацию (если это следует из условий договора и/или выполняемых подрядчиком обязательств).

В силу п. 5.2. договора № 62 заказчик обязуется произвести приемку выполненных подрядчиком работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения полного комплекта документов, указанного в п. 5.1. настоящего договора от подрядчика. В срок, указанный в настоящем пункте заказчик обязуется подписать акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) или акт обнаружения дефектов (любой другой документ соответствующего содержания) и передать указанные документы подрядчику.

Работы по договору № 62 подрядчиком выполнены в полном объёме и в срок, что подтверждается фотоотчетом. Заказчиком оплаты выполненных работ произведено не было.

Истец направил ответчику акт о приемке выполненных работ № 1621 от 02.10.2017 г. по форме КС - 2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1621 от 02.10.2017 г. по форме КС-3, от подписания которых ООО «ТВОЕ» немотивированно уклонилось.

Таким образом, работы по договору № 62 на сумму 94 223 руб. 00 коп. приняты заказчиком по одностороннему акту в порядке ч. 4 ст. 753 ГК РФ, иного ООО «ТВОЕ» не доказало.

ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» направило в адрес ООО «ТВОЕ» подписанный со своей стороны договор подряда № 65 от 09 октября 2017 года (далее – договор № 65), счет на оплату № 1740 от 16.10.2017 г., УПД № 1740 от 16.10.2017 г. на сумму 128 837,00 рублей.  Заказчик от подписания договора № 65 необоснованно уклонился.

Согласно п. 1.1. договора № 65 подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по замене аварийного освещения в фирменном магазине «ТВОЕ», расположенного по адресу: РФ, 

<

...> ТЦ «Мега» на объекте заказчика, а заказчик в свою очередь принимает на себя обязательство принять и оплатить выполненные подрядчиком работы.

В соответствии с п. 1.3. договора № 65 предусматривающим, что наименование, объем и стоимость работ, наименование, объем и стоимость материалов, используемых для выполнения работ по договору, определяются сторонами в смете, являющейся неотъемлемой частью договора, ООО «ТВОЕ» и ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» согласован локальный сметный расчет, являющийся приложением № 1 к договору № 65 соответственно, что подтверждается перепиской по договору № 65.

Договорная цена работ указана в п. 7.1 договора № 65 и составляет 128 837 руб. 00 коп. 

Согласно п. 7.4. договора № 65 заказчик принимает на себя обязательство осуществить оплату выполняемых по настоящему договору работ в следующем порядке:

авансовый платеж в размере 50% от общей суммы настоящего договора, что составляет 64 418 (шестьдесят четыре тысячи четыреста восемнадцать) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18% 9 826 (девять тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 55 копеек, в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты, подписания настоящего договора;

оставшийся платеж 64 418 (шестьдесят четыре тысячи четыреста восемнадцать) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18% 9 826 (девять тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 55 копеек, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты, подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, без замечаний.

По условиям п. 5.1. договора № 65 по окончании выполнения работ по договору, подрядчик предоставляет заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет, счет-фактуру, исполнительную документацию (если это следует из условий договора и/или выполняемых подрядчиком обязательств).

В силу п. 5.2. договора № 65 заказчик обязуется произвести приемку выполненных подрядчиком работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения полного комплекта документов, указанного в п. 5.1. настоящего договора от подрядчика. В срок, указанный в настоящем пункте заказчик обязуется подписать акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) или акт обнаружения дефектов (любой другой документ соответствующего содержания) и передать указанные документы подрядчику.

Работы по договору № 65 подрядчиком выполнены в полном объёме и в срок, что подтверждается «первичным» актом выполненных работ от 12.10.2017 г., подписанным уполномоченным лицом магазина ООО «ТВОЕ». Заказчиком оплаты выполненных работ произведено не было.

Истец направил ответчику акт о приемке выполненных работ № 1740 от 16.10.2017 г. по форме КС - 2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1740 от 16.10.2017 г. по форме КС-3, от подписания которых ООО «ТВОЕ» немотивированно уклонилось.

Таким образом, работы по договору № 65 на сумму 128 837 руб. 00 коп. приняты заказчиком по одностороннему акту в порядке ч. 4 ст. 753 ГК РФ, иного ООО «ТВОЕ» не доказало.

ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» направило в адрес ООО «ТВОЕ» подписанный со своей стороны договор подряда № 66 от 09 октября 2017 года (далее – договор № 66), счет на оплату № 1741 от 16.10.2017 г., УПД № 1741 от 16.10.2017 г. на сумму 98 140,01 рублей. Заказчик от подписания договора № 66 необоснованно уклонился.

Согласно п. 1.1. договора № 66 подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по демонтажу/монтажу внешнего блока в фирменном магазине «ТВОЕ», расположенного по адресу: РФ, 

<

...> ТЦ «Лапландия» на объекте заказчика, а заказчик в свою очередь принимает на себя обязательство принять и оплатить выполненные подрядчиком работы.

В соответствии с п. 1.3. договора № 66 предусматривающим, что наименование, объем и стоимость работ, наименование, объем и стоимость материалов, используемых для выполнения работ по договору, определяются сторонами в смете, являющейся неотъемлемой частью договора, ООО «ТВОЕ» и ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» согласован локальный сметный расчет, являющийся приложением № 1 к договору № 66 соответственно, что подтверждается перепиской по договору № 66.

Договорная цена работ указана в п. 7.1 договора № 66 и составляет 98 140 руб. 01 коп.

Согласно п. 7.4. договора № 66 заказчик принимает на себя обязательство осуществить оплату выполняемых по настоящему договору работ в следующем порядке:

авансовый платеж в размере 50% от общей суммы настоящего договора, что составляет 49 070 (сорок девять тысяч семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС-18% 7 485 (семь тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 26 копеек, в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты, подписания настоящего договора;

оставшийся платеж 49 070 (сорок девять тысяч семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС-18% 7 485 (семь тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 26 копеек, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты, подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, без замечаний.

По условиям п. 5.1. договора № 66 по окончании выполнения работ по договору, подрядчик предоставляет заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет, счет-фактуру, исполнительную документацию (если это следует из условий договора и/или выполняемых подрядчиком обязательств).

В силу п. 5.2. договора № 66 заказчик обязуется произвести приемку выполненных подрядчиком работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения полного комплекта документов, указанного в п. 5.1. настоящего договора от подрядчика. В срок, указанный в настоящем пункте заказчик обязуется подписать акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) или акт обнаружения дефектов (любой другой документ соответствующего содержания) и передать указанные документы подрядчику.

Работы по договору № 66 подрядчиком выполнены в полном объёме и в срок, что подтверждается «первичным» актом выполненных работ от 11.10.2017 г., подписанным уполномоченным лицом магазина ООО «ТВОЕ», письмом АО «АМК-Фарма» в адрес ООО «ТВОЕ» от 31.08.2017 г. Заказчиком оплаты выполненных работ произведено не было.

Истец направил ответчику акт о приемке выполненных работ № 1741 от 16.10.2017 г. по форме КС - 2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1741 от 16.10.2017 г. по форме КС-3, от подписания которых ООО «ТВОЕ» немотивированно уклонилось.

Таким образом, работы по договору № 66 на сумму 98 140 руб. 01 коп. приняты заказчиком по одностороннему акту в порядке ч. 4 ст. 753 ГК РФ, иного ООО «ТВОЕ» не доказало.

ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» направило в адрес ООО «ТВОЕ» подписанный со своей стороны договор подряда № 102 от 16.11.2016 года (далее – договор № 102), счет на оплату № 1033 от 30.11.2016 г., на сумму 111 998,27 рублей. Договор № 102, подписан ответчиком без разногласий.

В соответствии с п. 2.1. договора № 102 предусматривающим, что объем выполняемых работ, используемые материалы и их цена согласованы сторонами в смете, являющейся неотъемлемой частью договора, ООО «ТВОЕ» и ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» согласован локальный сметный расчет, являющийся приложением № 1 к договору № 102.

Согласно п. 1.1. договора № 102 заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство по заданию заказчика, выполнить следующие работы: монтаж тепловой завесы, монтаж ролеты, замену входной двери в магазине ТМ «ТВОЕ», расположенном по адресу РФ, 

<

...>. Заказчик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, принять результат работ и осуществить оплату выполняемых работ (п. 1.2. договора № 102).

Договорная цена работ указана в п. 2 договора № 102 и составляет 111 998 руб. 27 коп. 

Согласно п. 2.2. договора № 102 заказчик принимает на себя обязательство осуществить оплату выполняемых по настоящему договору работ в следующем порядке:

предварительная оплата в размере 50% от сметной суммы - в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания сторонами настоящего договора;

окончательная оплата – в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ (форма КС-2).

По условиям п. 5.1. договора № 102 подрядчик считается исполнившим свою обязанность по выполнению работ, а результат работ считается переданным заказчику с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС – 2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС – 3) (далее – приемо-сдаточные документы). 

В силу п. 5.2. договора № 102 заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления результата работ и приемо-сдаточной документации утвердить ее либо представить мотивированный отказ от утверждения. В случае мотивированного отказа Заказчика от утверждения сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

Истец направил ответчику акт № 1033 от 02.12.2016 г., акт о приемке выполненных работ № 1033 от 31.12.2016 г. по форме КС - 2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1033 от 31.12.2016 г. по форме КС-3, от подписания которых ООО «ТВОЕ» немотивированно уклонилось.

Таким образом, работы по договору № 102 на сумму 111 998 руб. 00 коп. приняты заказчиком по одностороннему акту в порядке ч. 4 ст. 753 ГК РФ, иного ООО «ТВОЕ» не доказало.

ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» направило в адрес ООО «ТВОЕ» подписанный со своей стороны договор подряда № 116 от 27.12.2016 года (далее – договор № 116), счет на оплату № 29 от 19.01.2017 г., УПД № 29 от 19.01.2017 г. на сумму 108 750, 00 рублей (приложение № 63). Договор № 116, подписан ответчиком без разногласий.

В соответствии с п. 2.1. договора № 116 предусматривающим, что объем выполняемых работ, используемые материалы и их цена согласованы сторонами в смете, являющейся неотъемлемой частью договора, ООО «ТВОЕ» и ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» согласован локальный сметный расчет, являющийся приложением № 1 к договору № 116.

Согласно п. 1.1. договора № 116 заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство по заданию заказчика, выполнить следующие работы: поставка и монтаж секционных рольворот в магазине ТМ «ТВОЕ», расположенном по адресу РФ, 

<

...>, ТЦ «Аура». Заказчик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, принять результат работ и осуществить оплату выполняемых работ (п. 1.2. договора № 116).

Договорная цена работ указана в п. 2 договора № 116 и составляет 108 750 руб. 00 коп.

Согласно п. 2.2. договора № 116 заказчик принимает на себя обязательство осуществить оплату выполняемых по настоящему договору работ в следующем порядке:

предварительная оплата в размере 50% от сметной суммы - в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания сторонами настоящего договора;

окончательная оплата – в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ (форма КС-2).

По условиям п. 5.1. договора № 116 подрядчик считается исполнившим свою обязанность по выполнению работ, а результат работ считается переданным заказчику с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС – 2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС – 3) (далее – приемо-сдаточные документы). 

В силу п. 5.2. договора № 116 заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления результата работ и приемо-сдаточной документации утвердить ее либо представить мотивированный отказ от утверждения. В случае мотивированного отказа заказчика от утверждения сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

Истец направил ответчику акт о приемке выполненных работ № 29 от 27.12.2016 г. по форме КС - 2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат № 29 от 27.12.2016 г. по форме КС-3, от подписания которых ООО «ТВОЕ» немотивированно уклонилось.

Таким образом, работы по договору № 116 на сумму 108 750 руб. 00 коп. (приняты заказчиком по одностороннему акту в порядке ч. 4 ст. 753 ГК РФ, иного ООО «ТВОЕ» не доказало.

ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» направило в адрес ООО «ТВОЕ» подписанный со своей стороны договор подряда № 40 от 02.08.2017 года (далее – договор № 40) и дополнительное соглашение № 1 от 04.08.2017 года (далее – ДС № 1/40) в связи с ошибочным указанием стоимости работ по договору № 40 (вместо 215 496, 23 рублей указано 212 776, 00 рублей), счет на оплату № 1150 от 07.08.2017 г., УПД № 1150 от 10.08.2017 г., на сумму 215 496, 23 рублей. Договор № 40 подписан ответчиком без разногласий, от подписания ДС № 1/40 ответчик необоснованно уклонился.

Согласно п. 1.1. договора № 40, подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы связанные с пакетным закрытием магазина ТМ «ТВОЕ», расположенного по адресу: РФ, г. Самара, пр-кт Кирова, 147, ТРК «Вива Ленд» на объекте заказчика, а заказчик в свою очередь принимает на себя обязательство принять и оплатить выполненные подрядчиком работы.

В соответствии с п. 1.2. договора № 40 предполагающего, что работы выполняются в соответствии с его условиями и требованиями Технического задания, являющегося неотъемлемой частью договора и п. 1.4. договора № 58 предусматривающим, что наименование, объем и стоимость работ, наименование, объем и стоимость материалов, используемых для выполнения работ по договору, определяются сторонами в смете, являющейся неотъемлемой частью договора, ООО «ТВОЕ» и ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» согласованы техническое задание и локальный сметный расчет, являющийся приложением № 1 и приложением № 2 к договору № 40 соответственно, а так же локальный сметный расчет, являющийся приложением № 1 к ДС № 1/40, что подтверждается перепиской по ДС № 1/40.

Договорная цена работ указана в п. 7.1 договора № 40, откорректирована п. 2 ДС № 1/40 и составляет 215 496 руб. 23 коп. 

Согласно п. 7.3. договора № 40 в редакции п. 3 ДС № 1/40 заказчик принимает на себя обязательство осуществить оплату выполняемых по настоящему договору работ в следующем порядке:

авансовый платеж в размере 50% от общей суммы настоящего договора, что составляет 107 748 (сто семь тысяч семьсот сорок восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС-18% 16 436 (шестнадцать тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 16 копеек, в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты, подписания настоящего договора;

оставшийся 107 748 (сто семь тысяч семьсот сорок восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС-18% 16 436 (шестнадцать тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 16 копеек, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты, подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, без замечаний.

По условиям п. 5.1. договора № 40 по окончании выполнения работ по договору, подрядчик предоставляет заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет, счет-фактуру, исполнительную документацию.

В силу п. 5.2. договора № 40 заказчик обязуется произвести приемку выполненных Подрядчиком Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения полного комплекта документов, указанного в п. 5.1. настоящего договора от подрядчика. В срок, указанный в настоящем пункте Заказчик обязуется подписать акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) или акт обнаружения дефектов (любой другой документ соответствующего содержания) и передать указанные документы подрядчику.

Работы по договору № 40 в редакции ДС № 1/40 подрядчиком выполнены в полном объёме и в срок, что подтверждается «первичным» актом выполненных работ от 09.08.2017 г., подписанным уполномоченным лицом магазина ООО «ТВОЕ», где проводились работы. Заказчиком оплаты выполненных работ произведено не было.

Истец направил Ответчику акт о приемке выполненных работ № 1150 от 10.08.2017 г. по форме КС - 2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1150 от 10.08.2017 г. по форме КС-3, от подписания которых ООО «ТВОЕ» немотивированно уклонилось.

Таким образом, работы по договору № 40 в редакции ДС № 1/40 на сумму 215 496 руб. 23 коп. приняты заказчиком по одностороннему акту в порядке ч. 4 ст. 753 ГК РФ, иного ООО «ТВОЕ» не доказало.

ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» направило в адрес ООО «ТВОЕ» подписанный со своей стороны договор подряда № 94 от 17.11.2016 года (далее – договор № 94) и дополнительное соглашение № 1 от 17.09.2017 года (далее – ДС № 1/94), счет на оплату № 1030 от 30.11.2016 г. на сумму 83 339, 00 рублей. Договор № 94 подписан ответчиком без разногласий, от подписания ДС № 1/94 ответчик необоснованно уклонился.

В соответствии с п. 2.1. договора № 94 предусматривающим, что объем выполняемых работ, используемые материалы и их цена согласованы сторонами в смете, являющейся неотъемлемой частью договора, ООО «ТВОЕ» и ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» согласован локальный сметный расчет, являющийся приложением № 1 к договору № 94, а так же локальный сметный расчет, являющийся приложением № 1 к ДС № 1/94.

Согласно п. 1.1. договора № 94, п. 1 ДС № 1/94 подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы связанные с пакетным закрытием магазина ТМ «ТВОЕ», расположенного по адресу: РФ, 

<

...>, ТРЦ «Аура», а заказчик в свою очередь принимает на себя обязательство принять и оплатить выполненные подрядчиком работы.

Договорная цена работ указана в п. 2 договора № 94 и составляет 72 500 руб. 00 коп. 

Договорная цена дополнительных работ указана в п. 3 ДС № 1/94 и составляет: 10 839 (десять тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 00 копеек.

Согласно п. 2.2. договора № 94 заказчик принимает на себя обязательство осуществить оплату выполняемых по настоящему договору работ в следующем порядке:

предварительная оплата в размере 50% от сметной суммы - в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания сторонами настоящего договора;

окончательная оплата – в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ (форма КС-2).

В силу п.п. 4.1., 4.2. ДС № 1/94 заказчик обязуется произвести пятидесятипроцентную предварительную оплату работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами настоящего дополнительного соглашения;

Окончательную оплату работ заказчик обязуется произвести в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

По условиям п. 5.1. договора № 94 подрядчик считается исполнившим свою обязанность по выполнению работ, а результат работ считается переданным заказчику с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС – 2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС – 3) (далее – приемо-сдаточные документы). 

В силу п. 5.2. договора № 94 заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления результата работ и приемо-сдаточной документации утвердить ее либо представить мотивированный отказ от утверждения. В случае мотивированного отказа заказчика от утверждения сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

Истец направил ответчику акт о приемке выполненных работ № 1030 от 03.12.2016 г. по форме КС - 2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1030 от 03.12.2016 г. по форме КС-3, от подписания которых ООО «ТВОЕ» немотивированно уклонилось.

Таким образом, работы по договору № 94 на сумму 72 500 руб. 00 коп. (приняты заказчиком по одностороннему акту в порядке ч. 4 ст. 753 ГК РФ, иного ООО «ТВОЕ» не доказало. Работы по ДС № 1/94 (комплекс малярных работ (шпатлевка+покраска) приняты заказчиком фактически. Общая стоимость работ по договору № 94 и дополнительных работ по ДС № 1/94 составила 83 339 руб. 00 коп.

ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» направило в адрес ООО «ТВОЕ» подписанный со своей стороны договор подряда № 80 от 16.11.2016 года (далее – договор № 80) и дополнительное соглашение № 1 от 16.11.2017 года (далее – ДС № 1/80), счет на оплату № 1029 от 30.11.2016 г. на сумму 82 540,00 рублей, счет на оплату № 1029/1 от 30.11.2016 на сумму 149 393,00 рублей. Договор № 80 подписан ответчиком без разногласий, от подписания ДС № 1/80 ответчик необоснованно уклонился.

В соответствии с п. 2.1. договора № 80 предусматривающим, что объем выполняемых работ, используемые материалы и их цена согласованы сторонами в смете, являющейся неотъемлемой частью договора, ООО «ТВОЕ» и ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» согласован локальный сметный расчет, являющийся приложением № 1 к договору № 80, а так же локальный сметный расчет, являющийся приложением № 1 к ДС № 1/80.

Согласно п. 1.1. договора № 80, п. 1 ДС № 1/80 подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы связанные с пакетным закрытием магазина ТМ «ТВОЕ», расположенного по адресу: РФ, 

<

...> ТЦ «Северо-Западный», а заказчик в свою очередь принимает на себя обязательство принять и оплатить выполненные подрядчиком работы.

Договорная цена работ указана в п. 2 договора № 80 и составляет 82 580 руб. 00 коп. 

Договорная цена дополнительных работ указана в п. 3 ДС № 1/80 и составляет: 149 393 руб. 00 коп.

Согласно п. 2.2. договора № 80 заказчик принимает на себя обязательство осуществить оплату выполняемых по настоящему договору работ в следующем порядке:

предварительная оплата в размере 50% от сметной суммы - в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания сторонами настоящего договора;

окончательная оплата – в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ (форма КС-2).

В силу п.п. 4.1., 4.2. ДС № 1/80 заказчик обязуется произвести пятидесятипроцентную предварительную оплату работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами настоящего дополнительного соглашения;

Окончательную оплату работ заказчик обязуется произвести в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

По условиям п. 5.1. договора № 80 подрядчик считается исполнившим свою обязанность по выполнению работ, а результат работ считается переданным заказчику с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС – 2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС – 3) (далее – приемо-сдаточные документы). 

В силу п. 5.2. договора № 80 заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления результата работ и приемо-сдаточной документации утвердить ее либо представить мотивированный отказ от утверждения. В случае мотивированного отказа заказчика от утверждения сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

Истец направил ответчику акт № 1029 от 30.11.2016 г. на сумму 82 540,00 рублей, акт о приемке выполненных работ № 1029 от 30.11.2016 г. по форме КС - 2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1029 от 30.11.2016 г. по форме КС-3, акт № 1029/1 от 30.11.2016 г. на сумму149 393,00 рублей, акт о приемке выполненных работ № 1029/1 от 30.11.2016 г. по форме КС - 2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1029/1 от 30.11.2016 г. по форме КС-3 от подписания которых ООО «ТВОЕ» немотивированно уклонилось.

Таким образом, работы по договору № 80 на сумму 82 540 руб. 00 коп. и дополнительные работы по ДС № 1/80 на сумму 149 393 руб. 00 коп. (приняты заказчиком по односторонним актам в порядке ч. 4 ст. 753 ГК РФ, иного ООО «ТВОЕ» не доказало.

Общая стоимость работ по договору № 80 и дополнительных работ по ДС № 1/80 составила 231 933 руб. 00 руб. 00 коп.

ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» направило в адрес ООО «ТВОЕ» подписанный со своей стороны договор подряда № 11 от 15.02.2017 года (далее – договор № 11), дополнительное соглашение № 1 от 06.03.2017 года (далее – ДС № 1/11) и дополнительное соглашение № 2 от 06.03.2017 года (далее – ДС № 2/11), счет на оплату № 254 от 06.03.2017 г. на сумму 6 937,50 рублей. Договор № 11 в редакции ДС № 1/11 подписан ответчиком без разногласий и оплачен, от подписания ДС № 2/11 ответчик необоснованно уклонился.

В соответствии с п. 2.1. договора № 11 в редакции ДС № 2/11 предусматривающим, что объем выполняемых работ, используемые материалы и их цена согласованы сторонами в смете, являющейся неотъемлемой частью договора, ООО «ТВОЕ» и ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» согласован локальный сметный расчет, являющийся приложением № 1 к ДС № 2/11.

Согласно п. 1.1. договора № 11, п. 1 ДС № 2/11 подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы связанные с пакетным закрытием магазина ТМ «ТВОЕ», расположенного по адресу: 

<

...>, ТЦ «Простор», а заказчик в свою очередь принимает на себя обязательство принять и оплатить выполненные подрядчиком работы.

Договорная цена дополнительных работ указана в п. 3 ДС № 2/80 и составляет: 6 937 руб. 50 коп.

В силу п.п. 4.1. ДС № 2/11 заказчик обязуется произвести оплату работ в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ;

По условиям п. 5.1. договора № 11 подрядчик считается исполнившим свою обязанность по выполнению работ, а результат работ считается переданным заказчику с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС – 2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС – 3) (далее – приемо-сдаточные документы). 

В силу п. 5.2. договора № 11 заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления результата работ и приемо-сдаточной документации утвердить ее либо представить мотивированный отказ от утверждения. В случае мотивированного отказа заказчика от утверждения сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

Истец направил ответчику УПД № 254 от 07.03.2017 г. на сумму 6 937,50 рублей , от подписания которой ООО «ТВОЕ» немотивированно уклонилось.

Таким образом, дополнительные работы (демонтаж вывески «ТВОЕ» и демонтаж ГКЛ перегородок по ДС № 2/11 на сумму 6 937 руб. 50 коп. фактически приняты заказчиком.

ООО «ТВОЕ» и ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» заключили договор на техническое обслуживание № 93 от 01.12.2016 года (далее – договор № 93), пунктом 8.2. которого предусмотрена его ежегодная пролонгация на следующий календарный год на тех же условиях, при отсутствии письменного заявления стороны о нежелании пролонгации, пунктом 10.2. установлен порядок внесения изменений и дополнений условий договора № 93 с обязательным соблюдением письменной формы и подписанием документа уполномоченным лицом.

Согласно ч. 1 ст. 452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное.

В соответствии с п. 10.2. договора № 93, на основании ч. 1 ст. 452 ГК РФ, сторонами заключены ряд дополнительных соглашений, услуги по которым оплачены за исключением обязательств по дополнительному соглашению № 21 от 25.05.2017 года (далее – ДС № 21 к договору № 93) в рамках счета на оплату № 914 от 07.07.2017 г., УПД № 914 от 07.07.2017 г. на сумму 107 095, 27 рублей.

Согласно п. 1 ДС № 21 к договору № 93 заказчик поручает, подрядчик принимает на себя обязательство по заданию заказчика выполнить согласованные работы на объекте «ТВОЕ», расположенном по адресу: г. Краснодар, Адыгея – Кубань, Тургеневское шоссе, д. 27 ТЦ «МЕГА».

Стоимость работ, выполняемых по настоящему дополнительному соглашению, согласована сторонами в смете и составляет: 107 095 руб. 27 коп. 

В силу п. 6 ДС № 21 к договору № 93 остальные условия указанного договора, не измененные настоящим соглашением, остаются неизменными, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

От подписания ДС № 21 к договору № 93 ответчик необоснованно уклонился.

В силу п. 4.1. ДС № 21 к договору № 93 заказчик обязуется произвести оплату работ в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ;

Работы, предусмотренные ДС № 21 к договору № 93 подрядчиком выполнены в полном объёме и в срок, что подтверждается актом выполненных работ от 21.06.2017 г., подписанным субподрядчиком. Заказчиком оплаты выполненных работ произведено не было.

Истец направил ответчику акт о приемке выполненных работ № 914 от25.06.2017 г. по форме КС - 2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат № 914 от 25.06.2017 г. по форме КС-3, от подписания которых ООО «ТВОЕ» немотивированно уклонилось.

Таким образом, работы по ДС № 21 к договору № 93 на сумму 107 095, 27 рублей приняты заказчиком по одностороннему акту в порядке ч. 4 ст. 753 ГК РФ, иного ООО «ТВОЕ» не доказало.

Согласно тексту преамбулы и п.п. 1.1., 1.2. договора № 93 заказчик поручает и оплачивает, а исполнитель берет на себя обязательства по оказанию услуг (услугами для целей настоящего договора по именуются предоставленные исполнителем непосредственно и/или посредством привлечения третьих лиц услуги/работы, перечень которых и график оказания их выполнения установлены в приложении № 2 к настоящему договору) по техническому обслуживанию согласно Приложению № 2 («Перечень услуг») к договору, на объектах заказчика, указанных в Приложении № 1 («Список объектов принятых на техническое обслуживание») к договору. Услуг оказываются исполнителем ежедневно, в том числе в нерабочие дни и ночное время. 

Согласно п. 3.1. договора ежемесячная стоимость Услуг, указанных в п. 1 настоящего договора (абонентская плата), составляет: 5500,00 руб. за один объект формата стандарт (площадью от 0 до 250 м2);7500,00 руб. за один объект формата большой (площадью от 250 до 500 м2); 10000,00 руб. за один объект формата СС (площадью свыше 500м2). НДС не облагается в связи с применением исполнителем УСН (уведомление налогового органа №962 от 02.11.2016 года). Указанная стоимость является фиксированной и подлежащая оплате заказчиком в течение 5 рабочих дней с момента подписания заказчиком акта о сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период на основании счета. Отчётным признается календарный месяц (полный или неполный, в зависимости от даты начала/окончания выполнения работ по настоящему договору.

В силу п. 3.3. договора № 93 срок оплаты стоимости согласованных сторонами услуг, не указанных в Приложении № 2 к настоящему договору, оказываемые по заявкам заказчика, а также стоимость запасных частей, расходных материалов, оборудования, подлежат оплате заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг на основании выставленного исполнителем счета. 

Согласно п. 4.1. договора № 93 по факту оказания услуг/выполненных работ, предусмотренных настоящим договором, исполнитель предоставляет заказчику не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, подписанный им акт сдачи-приемки оказанных услуг и счет-фактуру к нему. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней подписать полученный акт сдачи-приемки оказанных услуг либо представить исполнителю мотивированный (обоснованный) отказ от его подписания. Услуги по настоящему договору считаются оказанными с момента подписания заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг (п.п. 4.2., 4.3. договора № 93).

На основании п.п. 2.2.3, 2.2.4 договора № 93 заказчик обязан произвести приемку оказанных услуг и своевременно и в полном объеме оплатить на условиях договора выполненные исполнителем и принятые заказчиком услуги/работы.

В силу п. 2.2.5 договора № 93 все сообщения, направляемые исполнителем в адрес заказчика, считаются полученными заказчиком, если они направлены посредствам электронной почты по адресу: m.perepechko@tvoe.ru; a.alekseev@tvoe.ru

Статьей 779 ГК РФ предусмотрено, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии с пунктом 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В соответствии с частью 2 статьи 314 ГК РФ в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. 

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.      

Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

В соответствии со статьей 783 ГК РФ к договору возмездного оказания услуг применяются общие положения о подряде, если это не противоречит статьям 779 – 782 Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

На основании статьи 720 ГК РФ основанием для оплаты выполненных работ является факт принятия результата работ, доказательством передачи результата работ является акт приема-передачи или иной приравненный к нему документ.

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. 

Исходя из толкования условий договора № 93, в соответствии со статьей 431 ГК РФ, заключенный сторонами договор № 93 является договорами с исполнением по требованию (абонентскими договорами). Сходный договор признавался Арбитражным судом Омской области абонентским, при рассмотрении дела № А46-3838/2018, что говорит о наличии сложившейся судебной практики по аналогичным правоотношениям.

Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Закон № 42-ФЗ) часть первая ГК РФ дополнена статьей 429.4 «Договор с исполнением по требованию (абонентский договор)», вступившей в силу с 01.06.2015 года.

Согласно части 2 статьи 2 Закона № 42-ФЗ положения ГК РФ (в редакции данного Федерального закона) и учитывая правовую позицию, изложенную в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.03.2013 № ВАС-1686/13, применяются к правоотношениям, возникшим как после, так и до дня вступления в силу данного Федерального закона. Обязанности Заказчика оплатить услуги, оказанные по Договору № 93 должны рассматриваться судом с учетом положений Закона № 42-ФЗ.

        В соответствии со статьей 429.4 ГК РФ договором с исполнением по требованию (абонентским договором) признается договор, предусматривающий внесение одной из сторон (абонентом) определенных, в том числе периодических, платежей или иного предоставления за право требовать от другой стороны (исполнителя) предоставления предусмотренного договором исполнения в затребованных количестве или объеме либо на иных условиях, определяемых абонентом. Абонент обязан вносить платежи или предоставлять иное исполнение по абонентскому договору независимо от того, было ли затребовано им соответствующее исполнение от исполнителя, если иное не предусмотрено законом или договором. Особенностью данного вида договора является внесение оплаты по нему вне зависимости от того, было ли затребовано заказчиком соответствующее исполнение от исполнителя или нет, а также в стабильности размера оплаты за расчетный период, независимо от того, что объем встречного исполнения в расчетных периодах может отличаться.

Такие договоры предполагают возможность заказчика обратиться к исполнителю в любой момент времени и затребовать соответствующее исполнение (услугу), а оплата предусматривается именно за постоянное «состояние готовности» исполнителя в течение отдельного периода предоставить встречное предоставление заказчику.

Учитывая, что сторонами договора № 93 предусмотрена ежемесячная плата (п. 3.1. договора № 93) за исполнение обязательств за тот или иной период, рассматриваемый договор имеют абонентский характер, оплата по которому производится помесячно (п.п. 1.2., 3.1. договора). При этом абонентская плата включает не только стоимость оказываемых услуг, но и поддержание ресурсов, в данном случае трудовых и материальных (сотрудники, запасные части и т.д.), в состоянии постоянной готовности оказать услуги по требованию заказчика.

ООО «ЦЕНТР ВЕСТ СИБИРЬ» выполняло не только плановые работы, предусмотренные Договором, но и заявочный ремонт (п.п. 5.1.-5.4. договора).

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов (часть 1 статьи 782 ГК РФ).

В силу части 1 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Доказательств достижения сторонами соглашения о расторжении договора № 93 материалы дела не содержат, договор № 93 является действующим.

Счета на оплату, указанные в настоящей таблице и УПД, относящиеся к указанным в счетах работах по договору № 93, являются приложениями № 90-92 к иску.

Факты выполнения, указанных в настоящей таблицы работ по договору № 93 подтверждаются компиляцией «первичных» актов выполненных работ, подписанных уполномоченными лицами магазинов ООО «ТВОЕ», где проводились работы по договору № 93.

Таким образом, задолженность ответчика перед истцом по договору № 93 и ДС № 21 к договору № 93 составляет 1 038 511 (один миллион тридцать восемь тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 41 копейка, из которых задолженность по договору № 93 составляет 931 416,14 рублей, по ДС № 21 к договору № 93 - 107 095,27 рублей.

У ответчика перед истцом имеется переплата равная 55 882 (пятьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 18 копеек.

За минусом переплаты задолженность ответчика перед истцом по договору № 93 и ДС № 21 к договору № 93 составляет 982 629 (девятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот двадцать девять) рублей 23 копейки, из которых задолженность по договору № 93 составляет 875 333, 96 рублей (931 416,14 руб. - 55 882, 18 рублей), по ДС № 21 к Договору № 93 - 107 095,27 рублей.

Таким образом, общая сумма задолженности составляет 3 387 118 руб. 43 коп., которая подлежит взысканию с ответчика в судебном порядке. 

          Требование истца о взыскании неустойки по договору подряда № 102 от 16.11.2016 года, договору подряда № 116 от 27.12.2016 года, договору подряда № 40 от 02.08.2017 года, по договору подряда № 94 от 17.11.2016 года, по договору подряда № 80 от 16.11.2016 года за просрочку платежа, начисленной в соответствии с п. 7.1 договоров  в размере 58 855 руб. 80 коп. из расчета 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки и по договору  №93 от и ДС №21 от 01.12.2016г. в размере 87 533 руб.39 коп., из расчета 0,1% от просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной суммы,   суд считает обоснованным и подлежащим удовлетворению в заявленном размере, поскольку факт просрочки исполнения принятого на себя обязательства подтвержден представленными в дело доказательствами.

           Оснований для применения ст. 333 ГК РФ у суда не имеется в силу положений Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016г. №7.

  Также ответчиком заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в порядке ст.395 ГК РФ за период с  13.03.2018г. по 21.06.2019г. в размере  182 927 руб. 91 коп. 

     В соответствии со ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. Проценты за пользование чужими денежными средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.  

Начисление процентов произведено истцом обоснованно, так как факт нарушения денежного обязательства ответчиком перед истцом подтвержден материалами дела и соответствует требованиями ст. 395 ГК РФ, в связи с чем, суд взыскивает с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 13.03.2018г. по 21.06.2019г. в размере  182 927 руб. 91 коп. 

Сума штрафных санкций в общей сумме составляет 329 347руб. 10коп., однако истец  просит взыскать 321 064руб. 18коп.

Частью 1 ст.65 АПК РФ установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Учитывая изложенное требования истца,  подлежат взысканию в  судебном порядке. 

В соответствии со ст.110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика.

            Учитывая ст. ст. 8, 12, 307-310, 330, 395, 702, 711, 720, 753, 781 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 65, 68, 71, 75, 110, 123, 137, 148, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд          

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении ходатайства об оставлении части исковых требований без рассмотрения, отказать. 

               Взыскать с ООО «ТВОЕ» в пользу ООО «Центр Вест Сибирь» 3 387 118 руб. 43 коп. задолженности, 321 064руб. 18коп. процентов   и  41 541руб. 00коп. расходов по уплате госпошлины. 

              Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.

Судья О.С. Гедрайтис