820/2023-145159(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27 Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-4390/2023

г. Владивосток

19 июня 2023 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Бурова А.В.,  

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску ФОНД  ПРИМОРСКОГО КРАЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" (ИНН 2540975823, ОГРН  1132500003195)  

к ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГИОН" (ИНН  7811479098, ОГРН 1109847017246)  

о взыскании 662 253,59 рублей, 

установил:

ФОНД ПРИМОРСКОГО КРАЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" обратился в  Арбитражный суд Приморского края с иском к обществу с ограниченной  ответственностью "ЛЕГИОН" о взыскании 662253,59 рублей неустойки по договору от  01.06.2021 № РТС225А210030(Д).  

Истец, ответчик, о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства  уведомлены надлежащим образом.  

Решение по настоящему делу принято арбитражным судом 28.04.2023 согласно  части 1 статьи 229 АПК РФ путем подписания резолютивной части решения, разместив  ее на официальном сайте арбитражного суда в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет».  

От истца поступила апелляционная жалоба, в связи с чем, в соответствии с  пунктом 39 Постановления пленума Верховного суда Российской Федерации от  18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений гражданского  процессуального кодекса Российской Федерации и арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» судом  изготовлено мотивированное решение.  

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком  обязательств по договору, что выразилось в выполнении работ с нарушением  установленного договором срока, в связи, с чем ответчику начислены штрафные  санкции.  

Ответчик требования не оспорил, отзыв на иск не представил.  

Исследовав и оценив в соответствии со статьями 65, 71 АПК РФ представленные  доказательства, суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению в  силу следующего.  

Как установлено судом из материалов дела, между Фондом Приморского края  «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» (далее -  Фонд, Заказчик, Истец) и ООО «Легион» (далее - Подрядчик, Ответчик) заключен  договор от 01.06.2021 № РТС225А21003 0(Д) на выполнение работ по капитальному  Для доступа к материалам дела № А51-4390/2023 на информационном ресурсе  

«Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru) используйте секретный код:  

ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории  Хасанского муниципального района (далее - Договор).  

Согласно п. 1.1 Договора ООО «Легион» приняло на себя обязательства по  выполнению работ по капитальному ремонту, в том числе, крыши многоквартирного  дома № 4 по ул. Молодежной в пгт. Славянка (далее - объект), а Заказчик обязался  принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену.  

В Приложении № 3 к Договору установлен срок выполнения работ по  капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 4 по ул. Молодежной в пгт.  Славянка - до 30 сентября 2021 года.  

Согласно пунктам 4.1, 4.4 Договора Подрядчик обязан выполнить работы в  полном объеме согласно Техническому заданию и в сроки, указанные в пункте 1.2  Договора и сдать Заказчику выполненные работы по актам в порядке, установленном  Договором.  

В соответствии с пунктом 8.2 Договора работы считаются принятыми после  подписания заказчиком форм КС-2 и КС-3, подписания членами приемочной комиссии  и согласования в соответствии с требованиями Закона Приморского края от 7 августа  2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в  Приморском крае» акта приемки выполненных работ, подтвержденных исполнительной  документацией и актами на скрытые работы.  

Приемочной комиссией 17.02.2022 была проведена приемка выполненных работ,  по итогам которой составлен Акт приемки выполненных работ.  

Поскольку работы были сданы с нарушением установленного срока (после  30.09.2021) Фондом 29.06.2022 была направлена претензия в адрес ООО «Легион» за  нарушение срока выполнения работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного  дома № 4 по ул. Молодежной в пгт. Славянка (исходящий от 29.06.2022 № Об- исп/05961-пд), согласно которой была выставлена неустойка в размере 662 253,59  рублей.  

Поскольку работы по договору выполнены несвоевременно, требование о  перечислении штрафных санкций ответчик оставил без удовлетворения, истец  обратился с настоящим иском в арбитражный суд.  

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких  условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми  требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее  изменение его условий не допускаются.  

В соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации  исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.  

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором  денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения  или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки  исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать  причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской  Федерации).  

В пункте 13.4 Договора установлено, что пеня начисляется за каждый день  просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока  исполнения обязательства, включая срок исполнения его этапа. Размер пени  устанавливается в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты пени  ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости  этапа работ, сроки по которому нарушены.  

Истцом при расчете размера подлежащей оплате пени принимается во внимание  фактическая стоимость выполнения работ, которая составила 12 946 310,83 рублей. По  информация Банка России ключевая ставка с 14.02.2022 по 27.02.2022 составляла 9,50  % годовых.  

Расчет подлежащих уплате пеней (объем неисполненных обязательств  количество дней просрочки*ключевая ставка Банка России* 1/130): период просрочки: с  01.10.2021 по 17.02.2022 -140 дней.  

В тоже время, учитывая уведомление Подрядчика об окончании работ на объекте  (входящий от 07.02.2022 № 00540-пд), с учетом анализа раздела 3 Общего журнала  работ, представленного в составе исполнительной документации, а также период  приостановки работ, Заказчик считает возможным сократить количество дней  просрочки на 70 дней.  

Таким образом, по расчету истца период просрочки выполнения работ по  капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 4 по ул. Молодежной в пгт.  Славянка, с учетом изложенных обстоятельств, составляет 70 дней. Размер неустойки:  662 253 (шестьсот шестьдесят две тысячи двести пятьдесят три) рубля 59 копеек (12 946  310,83x70 днейх9,50%х 1/130).  

Поскольку меры по досудебному урегулированию спора не привели к его  разрешению, истец обратился в суд с настоящим иском.  

Оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает исковые  требования подлежащими частичному удовлетворению в силу следующего.  

Правоотношения сторон подлежат регулированию положениями главы 37 ГК РФ  о подряде, а также общими нормами об исполнении обязательств.  

Пунктом 1 статьи 702 ГК РФ установлено, что по договору подряда одна сторона  (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)  определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять  результат работы и оплатить его.  

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный  и конечный сроки выполнения работ. По согласованию между сторонами в договоре  могут быть предусмотрены сроки завершения отдельных этапов работы  (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами  или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как  начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.  

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (статья 329 ГК РФ).  

В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан  уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

Пунктом 13.3. спорного договора предусмотрено, что в случае просрочки  исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных  случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных  договором, Заказчик имеет право предъявить требование об уплате неустоек (штрафов,  пеней).  

В пункте 13.4 Договора установлено, что пеня начисляется за каждый день  просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока  исполнения обязательства, включая срок исполнения его этапа. Размер пени  устанавливается в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты пени  ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости  этапа работ, сроки по которому нарушены.  

Как установлено судом из материалов дела, подрядчик в уведомлении об  окончании работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 4 по ул.  Молодежной в пгт. Славянка от 02.02.2022 № 675/22 указал на сдачу работ 07.02.2022,  в связи с чем суд считает возможным применить ключевую ставку Банка России, на  вышеуказанную дату – 8.5%, а размер санкций за с учетом определенного истцом  периода просрочки 70 дней составит 592 542,69 рублей.  

В удовлетворении остальной части иска суд отказывает. 

Оснований для снижения санкций или применения ст.333 ГК РФ судом не  установлено.  

 Расходы по уплате государственной пошлины на основании статьи 110  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на стороны  пропорционально удовлетворенным требованиям.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170,229 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд 

р е ш и л:

Взыскать с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ЛЕГИОН" в пользу ФОНД ПРИМОРСКОГО КРАЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" 592542,69 руб.  санкций, 14535,00 руб. государственной пошлины.  

В удовлетворении остальных требований отказать. Выдать исполнительный лист. 

Решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по  истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного  производства может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в  течение 15 дней со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья Буров А.В. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 19.03.2023 22:52:00

 Кому выдана Буров Александр Васильевич