АРБИТРАЖНЫЙ   СУД   РЕСПУБЛИКИ   ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А74-12535/2020

23 июля 2021 года

г. Абакан

Резолютивная часть решения объявлена 16 июля 2021 года.

Решение в полном объеме изготовлено 23 июля 2021 года.

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи А.А. Пономарёвой, при ведении протокола судебного заседания до и после перерыва секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании осуществить работы по технологическому присоединению к электрическим сетям по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 29.04.2019 № 20.1900.5649.18, № 20.1900.5654.18,                                     № 20.1900.5648.18, № 20.1900.5647.18, № 20.1900.5650.18, № 20.1900.5653.18,                                     № 20.1900.5651.18, № 20.1900.5655.18, № 20.1900.5652.18, о взыскании неустойки за неисполнение обязательств в размере 50 000 рублей по каждому договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям единоразово со дня, следующего за последним днем, установленным решением суда дня исполнения обязательства.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в судебном заседании 09.07.2021 объявлялся перерыв до 15 час. 00 мин. 16.07.2021. Информация о перерыве в судебном заседании размещалась на официальном Интернет-сайте Арбитражного суда Республики Хакасия 09.07.2021.

В судебном заседании приняли участие представители: 

истца – ФИО2 на основании доверенности № 086/195 от 22.12.2020 (до и после перерыва);

ответчика – ФИО3 на основании доверенности № 00/190/513 от 25.12.2020 (до перерыва), ФИО4 на основании доверенности № 00/190/449 от 25.12.2020 (с использованием информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания) (после перерыва).

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»  (далее – истец, ФГУП «РТРС») обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (далее – ответчик, ПАО «Россети Сибирь») об обязании осуществить работы по технологическому присоединению к электрическим сетям по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 29.04.2019 № 20.1900.5649.18, № 20.1900.5654.18, № 20.1900.5648.18, № 20.1900.5647.18, № 20.1900.5650.18, № 20.1900.5653.18,                                   № 20.1900.5651.18, № 20.1900.5655.18, № 20.1900.5652.18, а также о взыскании неустойки за неисполнение судебного акта.

Протокольным определением от 09.07.2021 принято уточнение размера требования о взыскании неустойки за неисполнение судебного акта в размере 50 000 рублей по каждому договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям единоразово со дня, следующего за последним днем, установленным решением суда дня исполнения обязательства.

Представитель истца в судебном заседании до и после перерыва поддержал заявленные требования в полном объеме по основаниям, изложенным в иске.

Представители ответчика в судебном заседании до и после перерыва возражали относительно удовлетворения исковых требований, ссылаясь на доводы, изложенные в возражениях.

В ходе рассмотрения дела ответчик по существу заявленных требований указал следующие возражения.

По мнению ответчика не усматривается наличие необходимости перехода РТРС с третей категории надежности на вторую. 

Ответчик полагал, что в п. 11.5 Технических условий к договорам установлено, что указанная в настоящих технических условиях точка присоединения к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» на момент заключения договора о технологическом присоединении является условной и окончательно фиксируется в документах о технологическом присоединении (акт о технологическом присоединении), что не требует внесения изменений в данные технические условия для последующего осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям. Между тем истец просит построить вторую точку присоединения - новую ЛЭП-0,4 кВ, расположенную не далее 25 метров от границы земельного участка заявителя. 

Представитель ответчика указал, что истец не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, а также не отрицает неисполнение со своей стороны мероприятий по договорам, поэтому требования истца о понуждении ответчика исполнить условия договоров технологического присоединения не подлежат удовлетворению.

По мнению ответчика, принимая во внимание отсутствие недобросовестного поведения ответчика, наличие обстоятельств, объективно препятствующих исполнению судебного акта, непредоставление истцом доказательств для обоснования заявленного с его стороны размера судебной неустойки, исходя из других обстоятельств настоящего дела и общих принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды недобросовестного поведения обеих сторон спора, требования истца о присуждении судебной неустойки удовлетворению не подлежат. При этом, в случае удовлетворения требований о понуждении ответчика исполнить условия договора, полагал, что разумным размером неустойки за неисполнение обязательства будет являться 5 000 руб. за каждый договор, а исполнение условий договоров возможно лишь не ранее шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Указал, что мероприятия со стороны сетевой организации не выполнялись в связи со значительным объемом работ и затрат, а также отсутствием в достаточном количестве источника финансирования по льготному технологическому присоединению в 2021 году.

Также исполнению договоров технологического присоединения препятствует то, что постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 на территории Республики Хакасия введен режим повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности, который является обстоятельством непреодолимой силы. 

По мнению ответчика довод РТРС о том, что препятствием для исполнения мероприятий, предусмотренных техническими условиями, ФГУП РТРС, является отсутствие точки присоединения, несостоятелен, поскольку проектируемая опора ЛЭП-0,4 кВ будет являться собственностью ПАО «Россети Сибирь» и находиться в границах балансовой принадлежности общества, она не может быть отражена в рабочей документации РТРС, кроме того согласно пункту 11.1 технических условий заявитель обязан: «разработать проектную документацию в границах земельного участка заявителя в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87».

Возражая относительно доводов ответчика, истец указал, что спорный пункт 11.5 содержится в технических условиях не ко всем договорам, а только к двум:                                   № 20.1900.5649.18 от 29.04.2019 и 20.1900.5647.18 от 29.04.2019. Согласно подпункту «а» пункта 25(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, в технических условиях для заявителей, мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 150 кВт включительно, должны быть указаны точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. Согласно выданным ответчиком техническим условиям местом присоединения определена ближайшая опора новой ЛЭП-0,4 кВ. Кроме того, Правилами 861 не предусмотрено, что указанные в технических условиях точки присоединения на момент заключения договора о технологическом присоединении могут являться условными и окончательно фиксироваться в документах о технологическом присоединении (акт о технологическом присоединении), что не требует внесения изменений в данные технические условия для последующего осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, также не дано определение условной точки.

Указал, что определенная ответчиком в технических условиях точка присоединения предполагает осуществление истцом ряда мероприятий вне границ его участка. Пунктом 116 технических условий на истца возложена обязанность осуществить ввод до щита учета кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП. Щит учета согласно рабочей документации (раздел 3), согласованной с ответчиком, должен располагаться в точке присоединения (на опоре). Точкой присоединения является ближайшая опора новой ЛЭП-0,4 кВ, которую ответчик до настоящего времени не построил, в связи с чем у истца отсутствует возможность выполнить технические условия в полном объеме и уведомить ответчика о выполнении технических условий.

По мнению истца, ответчик, зная о том, что истец не сможет выполнить технические условия, а также, создавая условия для невозможности исполнения технических условий истцом, не вправе ссылаться на отсутствие уведомления со стороны истца о выполнении мероприятий по технологическому присоединению.

Доказательств наличия обстоятельств непреодолимой силы, не позволяющих выполнить мероприятия со стороны сетевой организации, в материалах дела не содержатся, равно как и не содержится доказательств, подтверждающих, какие меры были приняты ответчиком для своевременного исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения.

Кроме того, ответчик, по мнению истца, не представил доказательств, свидетельствующих о невозможности исполнения обязательств в месячный срок из-за пандемии COVID-19, равно как и не представил доказательств, свидетельствующих о том, что пандемия COVID-19 повлекла затруднения в осуществлении ответчиком предпринимательской деятельности в полном объеме.

Исследовав представленные доказательства, выслушав представителей сторон, арбитражный суд установил следующие обстоятельства, имеющие значение для дела.

ФГУП «РТРС» 19.09.2018 подало ПАО «МРСК Сибири» заявки об изменении категории надёжности в отношении электроустановок радиоэлектронного оборудования, которые ранее были присоединены на объектах сети цифрового эфирного наземного телевизионного вещания, с третьей группы надёжности на вторую.

ПАО «МРСК Сибири» рассмотрело заявки и в письме № 1.7/250/8763-исх от 09.10.2018 просило осуществить обеспечение резервного электроснабжения объектов телерадиовещания самостоятельно путем установки дизель-генераторов и аннулировать ранее поданные заявки на технологическое присоединение.

ПАО «МРСК Сибири» 23.01.2019 вручило ФГУП «РТРС» проекты договоров об осуществлении технологического присоединения.

ФГУП «РТРС» 20.02.2019 вручило ПАО «МРСК Сибири» письмо № 09-09/289, в котором сообщило о направлении подписанных договоров с протоколами разногласий.

ПАО «МРСК Сибири» 04.03.2019 вручило ФГУП «РТРС» письмо № 1.7/19/1432-исх, в котором предложило для устранения противоречий между категорией надежности электроснабжения, указанной в заявках, и запрашиваемых характеристиках резервного источника питания, привести ранее поданные заявки в соответствие с нормами действующего законодательства. 

ФГУП «РТРС» 13.03.2019 вручило ПАО «МРСК Сибири» уточненные протоколы разногласий к договорам и сообщило, что отзывает ранее направленные письмом от 19.02.2019 № 09-09/289 протоколы разногласий к проектам договоров (письмо № 09-09/407).

ПАО «МРСК Сибири» 03.04.2019 вручило ответчику письмо № 1.7/19/2074-исх, в котором указало, что, учитывая предложения по изменению условий договоров на технологическое присоединение, изложенные в письме от 13.03.2019 № 1.7/685-вх, считает ранее поданные заявки отозванными.

ФГУП «РТРС» в письме от 29.04.2019 № 18-06/611 сообщило истцу, что считает направленные 19.02.2019 договоры на технологическое присоединение заключенными на условиях, предложенных ПАО «МРСК Сибири», без разногласий со стороны ФГУП «РТРС».

С учетом указанной переписки между истцом (сетевая организация) и ответчиком (заявителем) на аналогичных условиях заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 29.04.2019 №№ 20.1900.5647.18, 20.1900.5648.18, 20.1900.5649.18, 20.1900.5654.18, 20.1900.5652.18, 20.1900.5655.18, 20.1900.5651.18, 20.1900.5653.18, 20.1900.5650.18, по условиям пунктов 1.1 которых сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее – технологическое присоединение) электроустановок радиоэлектронного оборудования, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

– максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 16 кВт;

– категория надежности вторая (изменение категории надежности с третьей на вторую);

– класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение 0,40 кВ;

– максимальная мощность ранее присоединённых энергопринимающих устройств 16 кВт по третьей категории надежности.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

В приложениях № 1 к договорам стороны согласовали технические условия.

На основании пункта 7 приложения № 1 договора от 24.09.2019 № 20.1900.5647.18 точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

I точка присоединения: максимальная мощность — 16 кВт.

Опора (3/6/10) Присоединительные зажимы на опоре №92

Линия (3/6/10)ф. 90-07_с. Полтаково

ПСПС «Полтаково « №90

II точка присоединения: максимальная мощность -16 кВт.

Точка присоединенияБлижайшая опора новой ЛЭП-0,4 кВ, расположенная не

далее 25метров, от границы земельного участка   Заявителя

В пункте 9 приложения № 1 договора от 24.09.2019 №№ 20.1900.5647.18 стороны согласовали резервный источник питания: Ближайшая опора новой ЛЭП-0,4 кВ запитанной от независимого источника питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на основном источнике питания.

В соответствии с пунктом 10.2. приложения №1 договора от 29.04.2019                                № 20.1900.5647.18 требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с пунктом 10.2.1. приложения № 1 договора от 24.09.2019                        № 20.1900.5647.18 сетевая организация осуществляет выполнение  необходимых мероприятий для обеспечения второй категории надежности электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя.

На основании пункта 7 приложения № 1 договора от 24.09.2019 № 20.1900.5648.18 точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

I точка присоединения: максимальная мощность 100 кВт.

Опора (0,4)Опора № 2

Линия (0,4)ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-123-09-18

ТП ТП-123-09-18

Линия (3/6/10)ф. 123-09_с. У-Камышта

Ячейка ПСячейка №9

ПСПС «Аскизский о/с» №123

II точка присоединения: максимальная мощность 100 кВт.

Точка присоединенияБлижайшая опора новой ЛЭП-0,4 кВ, расположенная не

далее 25 метров, от границы земельного участка Заявителя

В пункте 9 приложения № 1 договора от 24.09.2019 №№ 20.1900.5648.18 стороны согласовали резервный источник питания: Ближайшая опора новой ЛЭП-0,4 кВ, запитанной от независимого источника питания, на котором сохраняется напряжение в после аварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на основном источнике питания.

В соответствии с пунктом 10.2. приложения №1 договора от 29.04.2019 20.1900.5648.18 требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с пунктом 10.2.1. приложения № 1 договора от 24.09.2019                           № 20.1900.5648.18 сетевая организация осуществляет выполнение необходимых мероприятий для обеспечения второй категории надежности электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя.

На основании пункта 7 приложения № 1 договора от 24.09.2019 № 20.1900.5649.18 точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

I точка присоединения (основная): максимальная мощность -100 кВт.

ТПТП-

<

***>-07

Линия (3/6/10)ф. 

<

***>

Ячейка ПСячейка №9

ПСПС «Лукьяновская « №30

II точка присоединения (резервная): максимальная мощность - 100 кВт.

Точка присоединения Ближайшая опора новой ЛЭП-0,4 кВ, расположенная не

далее 25метров, от границы земельного участка Заявителя

В пункте 9 приложения № 1 договора от 24.09.2019 № 20.1900.5649.18 стороны согласовали резервный источник питания: Ближайшая опора новой ЛЭП-0,4 кВ запитанной от независимого источника питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на основном источнике питания.

В соответствии с пунктом 10.2. приложения №1 договора от 29.04.2019                        № 20.1900.5649.18 требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с пунктом 10.2.1. приложения № 1 договора от 24.09.2019                              № 20.1900.5649.18 сетевая организация осуществляет выполнение необходимых мероприятий для обеспечения второй категории надежности электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя.

На основании пункта 7 приложения № 1 договора от 24.09.2019 № 20.1900.5654.18 Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

I точка присоединения: максимальная мощность 23,2 кВт.

Точка присоединения: РУ-0,4 кВ от ТП №

<

***>-18

ТП ТП-

<

***>-18

Линия (3/6/10) ф. 

<

***> с. Таштып

ПС ПС « Таштып» №88

II точка присоединения: максимальная мощность - 23,2 кВт.

Точка присоединения Ближайшая опора новой ЛЭП-0,4 кВ,

расположенная не далее 25 метров,от границы земельного участка Заявителя

В пункте 9 приложения № 1 договора от 24.09.2019 №№ 20.1900.5654.18 стороны согласовали резервный источник питания: Ближайшая опора новой ЛЭП-0,4 кВ, запитанной от независимого источника питания, на котором сохраняется напряжение в послеавариином режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на основном источнике питания.

В соответствии с пунктом 10.2. приложения №1 договора от 29.04.2019 №20.1900.5654.18 требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с пунктом 10.2.1. приложения № 1 договора от 24.09.2019                    № 20.1900.5654.18 сетевая организация осуществляет выполнение необходимых мероприятий для обеспечения второй категории надежности электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя.

На основании пункта 7 приложения № 1 договора от 29.04.2019 № 20.1900.5652.18 точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

I точка присоединения: максимальная мощность — 41 кВт. 

Опора(0,4)                       Ближайшая опора

Линия (0,4)                      ВЛ-0,4 кВ ф. №1

ТП                                  ТП-

<

***>-03

Линия (3/6/10)                 ф.

<

***>_с. Аскиз

Ячейка ПС                     ф. 

<

***>

ПС                                  ПС «Аскиз» (Ведомственная)

II точка присоединения: максимальная мощность - 41 кВт.

Точка присоединения         Ближайшая опора новой ЛЭП-0,4 кВ,

    расположенная не далее 25метров, от границы  

    земельного участка Заявителя.

В пункте 9 приложения № 1 договора от 29.04.2019 № 20.1900.5652.18 стороны согласовали резервный источник питания: Ближайшая опора новой ЛЭП-0,4 кВ запитанной от независимого источника питания, на котором сохраняется напряжение в послеавариином режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на основном источнике питания.

В соответствии с пунктом 10.2. приложения №1 договора от 29.04.2019                             № 20.1900.5652.18 требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с пунктом 10.2.1. приложения № 1 договора от 29.04.2019                          № 20.1900.5652.18 сетевая организация осуществляет выполнение необходимых мероприятий для обеспечения второй категории надежности электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя.

На основании пункта 7 приложения № 1 договора от 29.04.2019 № 20.1900.5655.18 точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

I точка присоединения: максимальная мощность — 50 кВт. 

Точка присоединения        Кабельный наконечник 

Линия (0,4)                       Л 2 от ТП-25-15-07

ТП                                  ТП-25-15-07

Линия (3/6/10)                       ф.25-15_ ПС Боград-п.Боград

ПС                                 ПС «Боград» №25

II точка присоединения: максимальная мощность - 50 кВт.

Точка присоединения         Ближайшая опора новой ЛЭП-0,4 кВ,

расположенная не далее 25метров, от границы земельного участка Заявителя.

В пункте 9 приложения № 1 договора от 29.04.2019 № 20.1900.5655.18 стороны согласовали резервный источник питания: Ближайшая опора новой ЛЭП-0,4 кВ запитанной от независимого источника питания, на котором сохраняется напряжение в послеавариином режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на основном источнике питания.

В соответствии с пунктом 10.2. приложения №1 договора от 29.04.2019                             № 20.1900.5655.18 требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с пунктом 10.2.1. приложения № 1 договора от о29.04.2019                        № 20.1900.5655.18 сетевая организация осуществляет выполнение необходимых мероприятий для обеспечения второй категории надежности электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя.

На основании пункта 7 приложения № 1 договора от 29.04.2019 № 20.1900.5651.18 точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

I точка присоединения: максимальная мощность — 15 кВт.

Точка(0,4)              ВЛИ-0,4    кВ    присоединения    кабельных    наконечников отходящего автомата в РУ-0,4 кВ ТП-

<

***>-04 

ТП ТП-51 -01 -04 столбовая

Линия(3/6/10)               ф. 

<

***> ПС Октябрьская-ст.Фыркал

Ячейка ПС                      Ячейка № 1

ПС                                  ПС «Октябрьская» №51

II точка присоединения: максимальная мощность - 15 кВт.

Точка присоединения         Ближайшая опора новой ЛЭП-0,4 кВ, расположенная

    не далее 25метров, от границы земельного участка

    Заявителя.

В пункте 9 приложения № 1 договора от 29.04.2019 № 20.1900.5651.18 стороны согласовали резервный источник питания: Ближайшая опора новой ЛЭП-0,4 кВ запитанной от независимого источника питания, на котором сохраняется напряжение в послеавариином режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на основном источнике питания.

В соответствии с пунктом 10.2. приложения №1 договора от 29.04.2019                              № 20.1900.5651.18 требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с пунктом 10.2.1. приложения № 1 договора от 29.04.2019                          № 20.1900.5651.18 сетевая организация осуществляет выполнение необходимых мероприятий для обеспечения второй категории надежности электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя.

На основании пункта 7 приложения № 1 договора от 29.04.2019 № 20.1900.5653.18 точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

I точка присоединения: максимальная мощность — 82 кВт. 

Опора(0,4)                     Опора№11

Линия (0,4)                    ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-49-24-02

Ячейка ТП                     Присоединение ВЛИ-0,4 кВ Л-1

ТП                                  ТП-49-24-02

Линия (3/6/10)                ф.49-24 ПС Шира-Секачуль

Ячейка ПС                     Ячейка №24

ПС                                  ПС «Шира» №49

II точка присоединения: максимальная мощность - 82кВт.

Точка присоединения         Ближайшая опора новой ЛЭП-0,4 кВ,

расположенная не далее 25метров, от границы земельного участка Заявителя.

В пункте 9 приложения № 1 договора от 29.04.2019 № 20.1900.5653.18 стороны согласовали резервный источник питания: Ближайшая опора новой ЛЭП-0,4 кВ запитанной от независимого источника питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на основном источнике питания.

В соответствии с пунктом 10.2. приложения №1 договора от 29.04.2019                              № 20.1900.5653.18 требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с пунктом 10.2.1. приложения № 1 договора от 29.04.2019                          № 20.1900.5653.18 сетевая организация осуществляет выполнение необходимых мероприятий для обеспечения второй категории надежности электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя.

На основании пункта 7 приложения № 1 договора от 29.04.2019 № 20.1900.5650.18 точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

I точка присоединения: максимальная мощность — 22,8 кВт.

Точка присоединения        присоединительные        зажимы        ВЛ-0,4        кВ,

  установленные в РУ-0,4 кВ, установленные в РУ-0,4

  кВЛ-2ТП 20-17-02

ТП                                  ТП-20-17-02

Линия (3/6/10)                 ф.20-17_ с.Буденовка, с. Табат

ПС                                  ПС «Бея» №20

II точка присоединения: максимальная мощность -22,8 кВт.

Точка присоединения     Ближайшая опора новой ЛЭП-0,4 кВ, расположенная

          не далее 25метров, от границы земельного участка

          Заявителя.

В пункте 9 приложения № 1 договора от 29.04.2019 № 20.1900.5650.18 стороны согласовали резервный источник питания: Ближайшая опора новой ЛЭП-0,4 кВ запитанной от независимого источника питания, на котором сохраняется напряжение в послеавариином режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на основном источнике питания.

В соответствии с пунктом 10.2. приложения №1 договора от 29.04.2019 № 20.1900.5650.18 требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с пунктом 10.2.1. приложения № 1 договора от 29.04.2019                           № 20.1900.5650.18 сетевая организация осуществляет выполнение необходимых мероприятий для обеспечения второй категории надежности электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя.

Заявитель произвел оплату за технологическое присоединение в соответствии с условиями договоров.

Согласно пункту 3 договоров точки присоединения указаны в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагаются на расстоянии 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

В соответствии с пунктом 5 договоров срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

Согласно пункту 6 договора сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

Сетевая организация обязуется в течение 10 календарных дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя.

ФГУП «РТРС» 05.03.2020 письмом № 09-09/266 уведомило ПАО «Россети Сибирь» о невозможности в полной мере выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями, так как не установлены ближайшие к участку заявителя опоры новых ЛЭП-0,4 кВ.

ФГУП «РТРС» письмом № 18-06/1102 от 28.08.2020 повторно уведомило ПАО «Россети Сибирь» о необходимости исполнить договорные обязательства и осуществить мероприятия по технологическому присоединению.

В адрес ФГУП «РТРС» 06.10.2020 поступило письмо от ПАО «Россети Сибирь»         № 1.7/1/6145-исх, которым ПАО «Россети Сибирь» сообщило, что не может исполнить свои обязанности по договору в связи с отсутствием у него источника финансирования мероприятий необходимых для выполнения технических условий.

В данном письме ПАО «Россети Сибирь» также указало на то, что ретранслятор, принадлежащий ФГУП «РТРС», расположенный по адресу: РХ, Аскизский район, гора возле с. Аскиз, подключен по второй категории электроснабжения за счет ДГУ.

Письмом №09-09/1358 от 13.10.2020 ФГУП «РТРС» сообщило, что объект ЦЭТВ «Аскиз гора» по адресу: Республика Хакасия, район Аскизский, урочище Тондюх, п.Аскиз, в 1,5 км южнее р.п. Аскиз строился в соответствии с приложением № 2, по техническим условиям категория надежности установлена как третья, а резервный источник питания объекта отсутствует. Энергоснабжение осуществляется по III-ей категории, что подтверждается договором энергоснабжения от 10.04.2020 № 61180, а также документами о технологическом присоединении.

В адрес ФГУ «РТРС» 26.10.2020 от ПАО «Россети Сибирь» поступил ответ (исх.         № 1.7/03/6351-исх от 16.10.2020) на № 09-09/266 от 05.03.2020, которым ПАО «Россети» уведомило ФГУП «РТРС» о необходимости выполнения обязательства по договорам со своей стороны и уведомления сетевой организации в порядке, установленным договором и Правилами технологического присоединения.

ФГУП «РТРС» 27.10.2020 повторно уведомило ПАО «Россети Сибирь» о невозможности выполнить мероприятия по технологическому присоединению в связи с тем, что заявителю неизвестно, где будут расположены точки присоединения в виде опоры новой ЛЭП-0,4, расположенной не далее 25 метров от границы земельного участка ФГУП «РТРС».

Невыполнение мероприятия по технологическому присоединению послужило для истца основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Оценив представленные доказательства в их совокупности в соответствии со статьей 71 АПК РФ, арбитражный суд пришёл к следующим выводам. 

Статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)  определен такой способ защиты права как присуждение к исполнению обязанности в натуре. В силу статьи 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

Согласно статье 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Неисполнение ответчиком обязательств, предусмотренных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 29.04.2019                         №№ 20.1900.5647.18, 20.1900.5648.18, 20.1900.5649.18, 20.1900.5654.18, 20.1900.5652.18, 20.1900.5655.18, 20.1900.5651.18, 20.1900.5653.18, 20.1900.5650.18 послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Спорные отношения сторон основаны на договорах, которые регулируются нормами ГК РФ, Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроснабжении» (далее -  Закон об электроэнергетике).

Согласно пункту 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 3 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим лицом (пункт 6 Правил № 861).

Абзацем восьмым пункта 2 статьи 23.2 Закона об электроэнергетике установлено, что с 1 октября 2017 года в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Во исполнение Закона об электроэнергетике постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 утверждены Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила технологического присоединения, Правила № 861) (здесь и далее в редакции, действующей на момент обращения с заявлением в адрес общества).

Данные Правила определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) юридических и физических лиц к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Абзацем 1 пункта 3 Правил технологического присоединения установлена обязанность сетевой организации выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Пунктом 2 Правил № 861 предусмотрено, что их действие распространяется, в том числе, на случаи увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств и изменения категории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотра величины максимальной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 7 Правил № 861 изменение категории надежности электроснабжения осуществляется путем подачи заявки юридическим лицом, которое имеет намерение изменить категорию надежности.

Согласно пункту 14(1) Правил № 861 технологическое присоединение энергопринимающих устройств в целях обеспечения надежного их энергоснабжения и качества электрической энергии может быть осуществлено по одной из трех категорий надежности. 

Отнесение энергопринимающих устройств ко второй категории надежности осуществляется в случае, если необходимо обеспечить надежное функционирование энергопринимающих устройств, перерыв снабжения электрической энергией которых приводит к недопустимым нарушениям технологических процессов производства.

Для энергопринимающих устройств, отнесенных к первой и второй категориям надежности, должно быть обеспечено наличие независимых резервных источников снабжения электрической энергией. Дополнительно для энергопринимающих устройств особой категории первой категории надежности, а также для энергопринимающих устройств, относящихся к энергопринимающим устройствам аварийной брони, должно быть обеспечено наличие автономного резервного источника питания соответствующей мощности.

Автономные резервные источники питания в случае, если их наличие предусмотрено техническими условиями, подлежат установке владельцем энергопринимающих устройств и технологическому присоединению в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Владелец энергопринимающих устройств обязан поддерживать установленные автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Как следует из материалов дела, ФГУП «РТРС» обратилось в ПАО «МРСК Сибири» именно за изменением категории надежности электроснабжения (повышением) в связи с проведением на предприятии комплекса мероприятий по повышению устойчивости сети и обеспечению бесперебойной трансляции общероссийских обязательных и общедоступных телерадиопрограмм.

Между истцом (заявителем) и ответчиком (сетевой организацией) заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 29.04.2019 №№ 20.1900.5647.18, 20.1900.5648.18, 20.1900.5649.18, 20.1900.5654.18, 20.1900.5652.18, 20.1900.5655.18, 20.1900.5651.18, 20.1900.5653.18, 20.1900.5650.18.

Согласно пункту 10 технических условий к договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 29.04.2019 №№ 20.1900.5647.18, 20.1900.5648.18, 20.1900.5649.18, 20.1900.5654.18, 20.1900.5652.18, 20.1900.5655.18, 20.1900.5651.18, 20.1900.5653.18, 20.1900.5650.18 к мероприятиям, исполнение которых возложено на ОАО «Россети Сибирь», относятся, в том числе, следующие: 

- подготовка технических условий на технологическое присоединение; 

- проверка выполнения технических условий со стороны заявителя; 

- фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств заявителя;

- выполнение проектной документации в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и согласование со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством;

- выполнение необходимых мероприятий для обеспечения второй категории надежности электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя.

Точка присоединения - ближайшая опора новой ЛЭП-0,4 кВ, расположенная не далее 25 метров от границы земельного участка заявителя.

В пунктах 9 приложений № 1 договорам стороны согласовали резервный источник питания: Ближайшая опора новой ЛЭП-0,4 кВ, запитанной от независимого источника питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на основном источнике питания.

Пунктом 5 договоров предусмотрено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Материалами дела установлено, что ответчик свои обязательства по спорным договорам в полном объеме не выполнил до настоящего момента. 

С учетом изложенного исковые требования истца являются обоснованными и подлежат удовлетворению с учетом условий, согласованных в разделе 1 пункта 6 договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 29.04.2019 №№ 20.1900.5647.18, 20.1900.5648.18, 20.1900.5649.18, 20.1900.5654.18, 20.1900.5652.18, 20.1900.5655.18, 20.1900.5651.18, 20.1900.5653.18, 20.1900.5650.18, то есть в следующей редакции: 

- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством (пункт 10.2 приложений № 1 к договорам);

- выполнить необходимые мероприятия для обеспечения второй категории надежности электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя (пункт 10.2.1 приложений № 1 к договорам);

- построить вторую точку присоединения - новую ЛЭП-0,4 кВ, расположенную не далее 25 метров от границы земельного участка заявителя (пункт 7 приложений № 1 к договорам).

Арбитражный суд полагает возражения ответчика, изложенные в отзывах на иск, необоснованными, исходя из следующего.

Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 26.08.2020 по делу                            № А74-14234/2019, оставленным без изменения постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 12.11.2020 и постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 16.02.2021, ПАО «Россети Сибирь» отказано в удовлетворении исковых требований к ФГУП «РТРС» об обязании заключить дополнительные соглашения о внесении изменений в пункты 7, 9, 10.2.1 приложения № 1 договоров от 29.04.2019                    №№ 20.1900.5647.18, 20.1900.5648.18, 20.1900.5649.18, 20.1900.5654.18.

В рамках рассмотрения дела № А74-14234/2019 ПАО «Россети Сибирь», полагая, что для создания независимого источника питания (II точки) объектов ФГУП «РТРС» необходимо осуществить строительство ПС, ТП и линий с напряжением 110 и 35 кВ, что влечет значительные финансовые затраты и, как следствие, включение указанных затрат в тариф на электрическую энергию, предложило ФГУП «РТРС» подписать дополнительные соглашения к указанным выше договорам, в которых указан способ обеспечения второй категории надежности путем установки дизель-генераторной установки.

Как указал Верховный Суд Российской Федерации в Определении от 10.06.2021          № 302-ЭС21-8430, отказывая публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, отказывая в удовлетворении иска, суды сходили из осведомленности истца (сетевая организация) при подписании договоров о влиянии стоимости необходимых мероприятий по строительству новых подстанций и линий электропередачи на расходы, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Арбитражный суд, оценив изложенные в отзыве на иск доводы ответчика, полагает их несостоятельными, поскольку указанного рода обстоятельства представляют собой нормальный риск предпринимательской деятельности и не могут служить основанием для освобождения от ответственности лица, которое сознательно избрало для себя предпринимательскую деятельность в качестве экономической. 

Задержка согласования проектно-сметной документации с подрядными организациями, надзорными органами также не может служить основанием для освобождения сетей организации от выполнения принятых не себя обязательств. 

Кроме того, ответчик, являясь сетевой организацией, осведомлён  при подписании договоров о влиянии стоимости необходимых мероприятий по строительству новых подстанций и линий электропередачи на расходы, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Частью 3 статьи 1 ГК РФ установлено, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

При этом арбитражный суд учитывает, что ответчик является специализированной организацией, длительное время оказывающей услуги по технологическому присоединению, по передаче электроэнергии, оперативно-техническому управлению. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц указанная организация создана 04.07.2005, основными видом деятельности являются передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

Учитывая указанную специфику и осведомлённость в вопросах процедуры технологического присоединения и сопряжённых с ним вопросов (привлечение подрядных организаций, проведение торгов, согласование с надзорными органами), сетевая организация могла предусмотреть возможность возникновения проблем при исполнении договоров и с учётом этого согласовать условия договоров о сроках выполнения работ. 

Материалы дела не содержат доказательств перехода сотрудников общества на режим самоизоляции. Также не предоставлены доказательства того, что деятельность общества относится к сферам отраслей, наиболее пострадавшим от ограничительных мер, связанных с распространением пандемии коронавируса, ввиду полного приостановления хозяйственной деятельности общества в период введения ограничительных мер.

Кроме того, договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заключены сторонами 29.04.2019, и неисполнение ответчиком своих обязательств началось до начала распространения новой короновирусной инфекции.

Довод ответчика о том, что истец не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении технических условий, что сделало невозможным осуществление технологического присоединения его электроустановки в срок, рассмотрен судом и отклонён на основании следующего.

Невыполнение потребителем со своей стороны технических условий не освобождает сетевую организацию от выполнения обязательств, возложенных на нее как техническими условиями, так и Правилами № 861.

Обязательства ответчика по договорам об осуществлении технологического присоединения, указанные в технических условиях, не являются ни обусловленными обязательствами по смыслу статьи 327.1 ГК РФ, ни встречными обязательствами по смыслу статьи 328 ГК РФ. 

При таких обстоятельствах отсутствие уведомления от истца об исполнении им технических условий не препятствует осуществлению ответчиком мероприятий, предусмотренных техническими условиями к выполнению самим ответчиком, для технологического присоединения объектов истца. 

Доводы ответчика о злоупотреблении истцом правом не подтвердились при рассмотрении спора.

Частью 1 статьи 174 АПК РФ установлено, что при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Истец просит обязать ответчика осуществить вышеуказанные действия в течение месяца с момента вступления в силу решения по настоящему делу.

Учитывая объём мероприятий по 9 договорам, необходимых для осуществления работ по технологическому присоединению к электрическим сетям, арбитражный суд считает возможным обязать ответчика осуществить вышеуказанные действия в течение двух месяцев с момента вступления в силу решения по настоящему делу.

При этом арбитражный суд учитывает, что частью 1 статьи 324 АПК РФ предусмотрена возможность отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта. При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, и предоставлении подтверждающих доказательств сетевая организация вправе обратиться в арбитражный суд с указанным заявлением.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки за неисполнение обязательств в размере 50 000 рублей по каждому договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям единоразово со дня, следующего за последним днем, установленным решением суда дня исполнения обязательства.

Согласно статье 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения, при этом по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Как разъяснено в пункте 32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы.

В рассматриваемом случае суд, исходя из принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения истцом выгоды из незаконного и недобросовестного поведения, необходимости установления баланса интересов сторон, приходит к выводу, что заявленная истцом неустойка является явно не разумной, и считает возможным определить компенсацию за неисполнение решения суда в размере 10 000 руб. единовременно за неисполнение обязательств по каждому договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 29.04.2019 № 20.1900.5649.18, № 20.1900.5654.18, № 20.1900.5648.18, № 20.1900.5647.18, № 20.1900.5650.18, № 20.1900.5653.18,                                    № 20.1900.5651.18, № 20.1900.5655.18, № 20.1900.5652.18, подлежащую взысканию по истечении 2 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

По мнению суда, такой размер, не возлагая на ответчика чрезмерной финансовой нагрузки, будет стимулировать его к скорейшему исполнению решения арбитражного суда. 

Государственная пошлина по делу составляет 6 000 руб., уплачена истцом при подаче иска  платежным поручением от 26.11.2020 № 1939.

В соответствии со статьёй 110 АПК РФ государственная пошлина относится на ответчика, по результатам рассмотрения дела расходы истца по уплате государственной пошлины в сумме 6 000 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Настоящее решение считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им заказным письмом или вручены под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить исковые требования. 

Обязать публичное акционерное общества «Россети Сибирь» в течение 2 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу 

согласно разделу 1 пункта 6 договора от 29.04.2019 № 20.1900.5649.18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и техническим условиям № 8000371531 (приложения № 1 к договору), 

согласно разделу 1 пункта 6 договора от 29.04.2019 № 20.1900.5654.18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и техническим условиям № 8000371511 (приложения № 1 к договору),

согласно разделу 1 пункта 6 договора от 29.04.2019 № 20.1900.5648.18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и техническим условиям № 8000371230 (приложения № 1 к договору),

согласно разделу 1 пункта 6 договора от 29.04.2019 № 20.1900.5647.18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и техническим условиям № 8000371516 (приложения № 1 к договору),

согласно разделу 1 пункта 6 договора от 29.04.2019 № 20.1900.5650.18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и техническим условиям № 8000371510 (приложения № 1 к договору),

согласно разделу 1 пункта 6 договора от 29.04.2019 № 20.1900.5653.18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и техническим условиям № 8000371520 (приложения № 1 к договору),

согласно разделу 1 пункта 6 договора от 29.04.2019 № 20.1900.5651.18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и техническим условиям № 8000371508 (приложения № 1 к договору),

согласно разделу 1 пункта 6 договора от 29.04.2019 № 20.1900.5655.18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и техническим условиям № 8000371513 (приложения № 1 к договору),

согласно разделу 1 пункта 6 договора от 29.04.2019 № 20.1900.5652.18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и техническим условиям № 8000371512 (приложения № 1 к договору)

для перевода энергопринимающих устройств ФГУП «РТРС» на вторую категорию надежности электроснабжения осуществить следующие работы:

- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством (пункт 10.2 приложений № 1 к договорам);

- выполнить необходимые мероприятия для обеспечения второй категории надежности электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя (пункт 10.2.1 приложений № 1 к договорам);

- построить вторую точку присоединения - новую ЛЭП-0,4 кВ, расположенную не далее 25 метров от границы земельного участка заявителя (пункт 7 приложений № 1 к договорам).

2. Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» 6 000 (шесть тысяч) руб. расходов по уплате государственной пошлины.

3. В случае неисполнения настоящего судебного акта взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» судебную неустойку в размере 10 000 (десять тысяч) руб. единовременно за неисполнение обязательств по каждому договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 29.04.2019 № 20.1900.5649.18, № 20.1900.5654.18, № 20.1900.5648.18,                            № 20.1900.5647.18, № 20.1900.5650.18, № 20.1900.5653.18, № 20.1900.5651.18,                              № 20.1900.5655.18, № 20.1900.5652.18 по истечении 2 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд (г. Красноярск) в течение месяца с момента его принятия.

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

Судья                                                                                                                        А.А. Пономарёва