АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2025 года

Дело № А33-28290/2025

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 09 декабря 2025 года.

В полном объёме решение изготовлено 17 декабря 2025 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Копейкиной Ю.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционерного общества "Национальная башенная компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к публичному акционерному обществу "Россети Сибирь" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

об обязании осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям,

в отсутствие лиц, участвующих в деле,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ениной Ю.Н.,

установил:

Акционерное общество "Национальная башенная компания" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением к публичному акционерному обществу "Россети Сибирь" (далее – ответчик) об обязании осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, согласно которому просит:

- Обязать ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала «Красноярскэнерго» не позднее пяти рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств АО «Национальная башенная компания»:

- в соответствии с техническими условиями № 8000631589, объект, в целях электроснабжения которого осуществляется технологическое присоединение

энергопринимающих устройств заявителя: «Базовая станция/оборудование сотовой связи», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Жилой район Солонцы-2, в районе ул. Утренняя, 4б, в границах кадастрового квартала 24:50:0300298»;

- в соответствии с техническими условиями № 8000651541 объект, в целях электроснабжения которого осуществляется технологическое присоединениеэнергопринимающих устройств заявителя ««Базовая станция/оборудование сотовой связи», расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290109:00, Красноярский край, Емельяновский район, МО Солонцовский сельсовет, п. Солонцы, в границах кадастрового квартала 24:11:0290109»;

- в соответствии с техническими условиями № 8000677907 объект, в целях которого осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя «Базовая станция/оборудование сотовой связи», расположенный по адресу: Березовский муниципальный район, сельское поселение Есаульский сельсовет, 

<

...>.».

Определением от 01.11.2025 исковое заявление принято к производству суда, назначены предварительное и судебное заседания.

08.12.2025 в материалы дела от ответчика посредством сервиса «Мой Арбитр» поступил отзыв на исковое заявление, который судом приобщен к материалам дела в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В отзыве ответчик возражает против удовлетворения исковых требований и просит снизить размер судебной неустойки.

Поскольку представители лиц, участвующих в деле, извещены надлежащим образом о времени и месте предварительного судебного заседания и ими не было заявлено возражений относительно перехода, суд в соответствии с частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признал дело подготовленным, завершил предварительное судебное заседание и перешел к рассмотрению настоящего дела в судебном заседании.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Одним из способов защиты нарушенных гражданских прав в соответствии со статьёй 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) является присуждение к исполнению обязанности в натуре.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (статья 307 ГК РФ).

Как следует из статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Неисполнение ответчиком обязательств, предусмотренных тремя типовыми договорами об осуществлении технологического присоединения от 18.10.2024, от 30.01.2025, от 11.06.2025 объекта к электрическим сетям (далее - договоры) по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов истца, послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

В соответствии с условиями типового договора об осуществлении технологического присоединения от 18.10.2024, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения "Базовая станция/оборудование сотовой связи", расположенного (который будет располагаться) по адресу: по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Жилой район Солонцы-2, в районе ул. Утренняя, 4б, в границах кадастрового квартала 24:50:0300298.

Согласно условиям типового договора об осуществлении технологического присоединения от 30.01.2025, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения "Базовая станция/оборудование сотовой связи", расположенного (который будет располагаться) по адресу: Россия, Красноярский край, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290109:00, Красноярский край, Емельяновский район, МО Солонцовский сельсовет, п. Солонцы, в границах кадастрового квартала 24:11:0290109.

В соответствии с условиями типового договора об осуществлении технологического присоединения от 11.06.2025, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения "Базовая станция/оборудование сотовой связи", расположенного (который будет располагаться) по адресу: Березовский муниципальный район, сельское поселение Есаульский сельсовет, 

<

...>.

От ответчика в материалы дела поступил отзыв на исковое заявление, в котором указано следующее:

- по условиям договора от 30.01.2025 №20.2400.166.25, об осуществлении технологического присоединения объекта АО «Национальная башенная компания» для ПАО «Россети Сибирь» как сетевой организации предусмотрены, в том числе обязанности по строительству новых объектов электроэнергетики. При выполнении подобных мероприятий сетевой организации необходимо разработать проект для строительства новых объектов, оформить правоустанавливающие документы на земельные участки под строительство, получить разрешительные документов на строительство и реконструкцию, изыскать денежные средства, необходимые для строительства и другие. По итогам 2024 года финансовый результат ПАО «Россети Сибирь» отрицательный;

- задержка исполнения мероприятий по технологическому присоединению согласно договору вызвана недостатком финансирования, а также высокой фактической стоимостью выполнения мероприятий по договору;

- относительно требования о возложении обязанности выполнить все мероприятия по договору технологического присоединения в течении 5 дней, ответчик полагает, что суд при вынесении решения обязан установить реальный срок исполнения мероприятий;

- в связи с тем, что объект электросетевого хозяйства еще не введен в эксплуатацию, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств истца в течение менее чем 6 месяцев, как и осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям в срок менее чем 6 месяцев время не представляется возможным.

Отношения сторон регулируются нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроснабжении» (далее – Закон об электроснабжении).

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона об электроснабжении технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила № 861).

Кроме того, приказом Федеральной службы по тарифам от 30.11.2010 №365-э/5 утверждены Методические указания по определению платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.

Правила № 861 регламентируют процедуру технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, предусматривают существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также требования к выдаче индивидуальных технических условий для присоединения к электрическим сетям. Любые юридические и физические лица имеют право на технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям при наличии технической возможности для этого и соблюдении ими установленных правил такого присоединения.

В соответствии с пунктом 18 Правил № 861, в действовавшей в спорный период редакции, технологическое присоединение включает в себя последовательность следующих действий:

- подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями;

- разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

- разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

- выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и сетевой организацией требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 937 «Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем) (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ);

- проверку выполнения заявителем (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ) и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил;

- выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем;

- выполнение мероприятий по обеспечению возможности вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя, присоединенного к электрическим сетям этой сетевой организации, в случае технологического присоединения вновь сооружаемого (реконструируемого) объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя к электрическим сетям той же сетевой организации в целях замещения им такого объекта по производству электрической энергии (мощности).

Завершает указанный процесс составление акта об осуществлении технологического присоединения по форме согласно приложению № 1, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) настоящих Правил) (подпункт «е» пункта 7 Правил № 861).

Согласно пункту 19 Правил № 861 стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной приложением № 1 к настоящим Правилам, не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению регламентирован в подпункте «б» пункта 16 Правил № 861, в действующей в спорный период редакции.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и заявителем (пункт 6 Правил № 861).

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу частей 1 и 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Согласно материалам дела, сторонами заключены типовые договоры об осуществлении технологического присоединения объекта к электрическим сетям

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору об осуществлении технологического присоединения от 18.10.2024 составляет 6 месяцев со дня заключения договора (пункт 5 договора).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору об осуществлении технологического присоединения от 30.01.2025 составляет 6 месяцев со дня заключения договора (пункт 5 договора).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору об осуществлении технологического присоединения от 11.06.2025 составляет 30 рабочих дней со дня заключения договора (пункт 5 договора).

В соответствии с пунктом 10 договора об осуществлении технологического присоединения от 18.10.2024, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 07.12.2023 №57-э с изменениями, внесенными Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 27.12.2023г № 115-э, от 23.01.2024г № 3-э, от 06.02.2024г № 4-э, от 20.02.2024г № 13-э, от 21.03.2024г № 16-э, от 26.04.2024г № 20-э, от 21.05.2024г № 27-э, от 26.09.2024г № 49-э и составляет 687 128,52 руб.

15.11.2025 ПАО «Россети Сибирь» выставлен счет на оплату № 20.2400.11107.24 на сумму 687 128,52 руб.

Согласно пункту 10 договора об осуществлении технологического присоединения от 30.01.2025 , размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 28.11.2024 №58-э с изменениями, внесенными Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 25.12.2024г № 100-э и составляет 2 811 997,22 руб.

14.01.2025 ПАО «Россети Сибирь» выставлен счет на оплату № 1600000150 на сумму 2 811 997,22 руб.

В соответствии с пунктом 10 договора об осуществлении технологического присоединения от 11.06.2025, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 28.11.2024 №58-э с изменениями, внесенными Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 25.12.2024г № 100-э, от 13.02.2025г № 10-э, от 20.02.2025г № 11-э, от 20.02.2025г № 12-э, от 04.03.2025г № 13-э и составляет 67 674,79 руб.

27.05.2025 ПАО «Россети Сибирь» выставлен счет на № 1600005442 на сумму 67 674,79 руб.

Пунктом 11 названных договоров об осуществлении технологического присоединения стороны согласовали, что внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в порядке, предусмотренном Правилами № 861.

Надлежащее и своевременное внесение истцом платы по договорам об осуществлении технологического присоединения на сумму 687 128,52 руб. подтверждается платежным поручением от 18.10.2024 № 189797, на сумму 2 811 997,22 руб. подтверждается платежным поручением от 30.01.2025 № 18630, на сумму 67 674,79 руб. подтверждается платежным поручением от 11.06.2025 № 116776.

Как установлено судом и не оспаривается ответчиком, на момент рассмотрения спора технологическое присоединение фактически не произведено.

Предметом договоров об осуществлении технологического присоединения выступают мероприятия по технологическому присоединению, представляющие собой систему действий, осуществляемых сторонами при участии уполномоченного органа государственной власти.

Мероприятия по технологическому присоединению относятся к существенным условиям договора технологического присоединения и включают в себя, в том числе подготовку сетевой организацией технических условий, фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети.

В соответствии с пунктом 10 технических условий № 8000631589 к договору об осуществлении технологического присоединения от 18.10.2024 (далее - ТУ), на сетевую организации возложено:

- обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке (пункт 10.1.2);

- требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством (пункт 10.2);

- построить ЛЭП 0,4 кВ от точки, указанной в пункте №7 настоящих ТУ, до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Тип и мощность силового трансформатора определить проектом (пункт 10.2.1);

- определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ЛЭП 0.4 кВ

(пункт 10.2.2);

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442) (пункт 10.2.3).

В соответствии с пунктом 10 технических условий № 8000651541 к договору об осуществлении технологического присоединения от 30.01.2025 (далее - ТУ), на сетевую организации возложено:

- обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке (пункт 10.1.2);

- требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством (пункт 10.2);

- построить ТП 10 КВ. Тип и мощность силового трансформатора определить проектом (пункт 10.2.1);

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442) (пункт 10.2.5).

В соответствии с пунктом 10 технических условий № 8000677907 к договору об осуществлении технологического присоединения от 11.06.2025 (далее - ТУ), на сетевую организации возложено:

- обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке (пункт 10.1.2);

- требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: не требуются (пункт 10.2);

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442) (пункт 10.2.1).

Согласно материалам дела, ответчик не исполняет обязательства по договору, при этом арбитражный суд учитывает, что ПАО «Россети Сибирь» является специализированной организацией, длительное время оказывающей услуги по технологическому присоединению и передаче электроэнергии.

Также арбитражный суд учитывает, что ПАО «Россети Сибирь» не представлены доказательства, подтверждающие принятие необходимых и достаточных мер по исполнению договора, либо свидетельствующие о наличии препятствий по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 18.10.2024, от 30.01.2025, от 11.06.2025.

В соответствии с уставом ПАО «Россети Сибирь», основными видами его деятельности являются осуществление эффективного и надёжного функционирования объектов электросетевого комплекса, обеспечение устойчивого развития распределительного электросетевого комплекса, обеспечение надёжного и качественного энергоснабжения потребителей.

Учитывая специфику деятельности ответчика и осведомленность в вопросах процедуры технологического присоединения и сопряженных с ним вопросов, суд приходит к выводу, что сетевая организация могла предусмотреть возможность возникновения проблем при исполнении договора, в том числе с учетом необходимого времени для исполнения принятых на себя обязательств и денежных затрат на приобретение оборудования с учетом сложившейся экономической ситуации в стране и с учетом этого согласовать условия договора о сроках выполнения работ.

Кроме того, арбитражный суд учитывает, что ответчик с требованием о расторжении договоров не обращался.

По смыслу гражданско-правового обязательства и по значению, придаваемому содержанию обязательства правоприменительной практикой, обязанность по технологическому присоединению возникает у ответчика в силу заключенного возмездного договора, независимо ни от финансового состояния (платежеспособности) ответчика, ни от связи исполнения обязательства ответчика с деятельностью третьих лиц.

Таким образом, заключая двусторонний возмездный договор, порядок исполнения которого предусмотрен императивными нормами публичного права, сетевая организация, как профессиональный участник рынка, берет на себя все риски его исполнения, исходя из статуса сторон, а также с учетом того, что такие риски являются неотъемлемо сопутствующими коммерческой деятельности сетевой организации в силу пункта 1 статьи 2 ГК РФ.

Необходимость выполнения требуемых мероприятий, их сроки и стоимость должны учитываться ПАО «Россети Сибирь» при осуществлении своей деятельности как профессиональным участником рынка оказания услуг по осуществлению технологического присоединения.

Как установлено судом, доказательств, свидетельствующих о препятствовании истцом к выполнению ответчиком принятых по договору на себя обязательств, в материалы дела не представлено; исполнение истцом принятых на себя в рамках заключенных трех договоров об осуществлении технологического присоединения обязательств, возможно только после исполнения сетевой организацией обязательств, предусмотренных пунктом 10 ТУ.

Пунктом 14 договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 18.10.2024, от 30.01.2025, от 11.06.2025 предусмотрено, что договор может быть изменен по письменному соглашению сторон или в судебном порядке.

Перечень мероприятий по технологическому присоединению определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора (подпункт "а" пункта 16 Правил № 861).

Общий перечень мероприятий, относящихся к технологическому присоединению, приведен в пункте 18 Правил № 861 и представляет собой комплекс технических и организационных действий сторон по обеспечению возможности подключения энергопринимающих устройств заявителя к электрической сети, включая подготовку, выдачу технических условий, их согласование и выполнение; разработку сторонами договора проектной документации и иные мероприятия.

В силу подпункта "г" пункта 25(1) Правил № 861 мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией.

Следовательно, на сетевой организации лежала обязанность не только по совершению мероприятий по технологическому присоединению в рамках договора присоединения, но и совершению действий по обеспечению технических условий технологического присоединения, в том числе выполнению необходимых технических и строительных работ. При этом, заключая договор технологического присоединения, сетевая организация обладала сведениями, необходимыми для реализации обязанностей по данному договору, и самостоятельно согласовала технические условия.

Частью 1 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Истец просит обязать ответчика осуществить вышеуказанные действия в течение пяти рабочих дней с момента вступления в силу решения по настоящему делу.

Ответчик, ссылаясь на отсутствие возможности исполнить решение в запрошенный истцом срок ввиду сложного финансового положения, а также того, что объект электросетевого хозяйства не введен в эксплуатацию, ходатайствовал об установлении срока для исполнения обязательств не менее 6 месяцев.

Ходатайство ответчика судом рассмотрено и отклонено, как противоречащее смыслу и содержанию статей 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По смыслу гражданско-правового обязательства и по значению, придаваемому содержанию обязательства правоприменительной практикой, обязанность по технологическому присоединению возникает у ответчика в силу заключенного возмездного договора, независимо ни от финансового состояния (платежеспособности) ответчика, ни от связи исполнения обязательства ответчика с деятельностью третьих лиц.

Заключая двусторонний возмездный договор, порядок исполнения которого предусмотрен императивными нормами публичного права, сетевая организация, как профессиональный участник рынка, берет на себя все риски его исполнения, исходя из статуса сторон, а также с учетом того, что такие риски являются неотъемлемо сопутствующими коммерческой деятельности сетевой организации в силу пункта 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ответчик является специализированной организацией, длительное время оказывающей услуги по технологическому присоединению, по передаче электроэнергии, оперативно-техническому управлению. Учитывая указанную специфику и осведомленность в вопросах процедуры технологического присоединения и сопряженных с ним вопросов (привлечение подрядных организаций, проведение торгов, согласование с надзорными органами), сетевая организация могла предусмотреть возможность возникновения проблем при исполнении договора и с учетом этого согласовать условия договоров о сроках выполнения работ.

Как уже указывалось, ответчиком не представлены доказательства, подтверждающие наличие объективной невозможности исполнения своих обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 18.10.2024, от 30.01.2025, от 11.06.2025 в установленный данным договорами срок.

При определении срока, в течение которого ответчик обязан исполнить обязательство, суд также исходит из того, что ответчик до настоящего времени не исполнил свои обязательства по договорам. Доказательств иного ответчиком не представлено.

Вместе с тем, суд также полагает, что заявленный истцом срок в течение 5-ти рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу также не может отвечать принципу разумности и может привести к неисполнимости судебного акта.

Таким образом, суд считает разумным установление срока для выполнения указанных мероприятий с целью исполнения принятых обязательств ответчиком по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 18.10.2024, от 30.01.2025, от 11.06.2025 в течение одного месяца с момента вступления в силу решения суда, что обеспечивает исполнимость настоящего судебного акта с учетом характера мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных техническими условиями № 8000631589, № 8000651541, № 8000677907 к договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 18.10.2024, от 30.01.2025, от 11.06.2025.

При этом арбитражный суд учитывает, что частью 1 статьи 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрена возможность отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта. При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, и предоставлении подтверждающих доказательств сетевая организация вправе обратиться в арбитражный суд с указанным заявлением.

Ходатайство ответчика о снижении размера неустойки судом не рассматривается, поскольку требование о взыскании неустойки истцом не заявлялось.

При изложенных обстоятельствах, суд признает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально размеру удовлетворённых требований.

Размер государственной пошлины по настоящему делу составляет 150 000 руб., которая в указанном размере уплачена истцом при обращении в суд с иском платежным поручением от 30.09.2025 № 187110.

Принимая во внимание результат рассмотрения дела, понесенные истцом расходы по уплате государственной пошлины в сумме 150 000 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда по настоящему делу осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств акционерного общества «Национальная башенная компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения от 18.10.2024, техническими условиями № 8000631589, в отношении объекта: «Базовая станция/оборудование сотовой связи», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Жилой район Солонцы-2, в районе ул. Утренняя, 4б, в границах кадастрового квартала 24:50:0300298»;

в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения от 30.01.2025, техническими условиями № 8000651541 в отношении объекта ««Базовая станция/оборудование сотовой связи», расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290109:00, Красноярский край, Емельяновский район, МО Солонцовский сельсовет, п. Солонцы, в границах кадастрового квартала 24:11:0290109»;

- в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения от 11.06.2025, техническими условиями № 8000677907 в отношении объекта «Базовая станция/оборудование сотовой связи», расположенного по адресу: Березовский муниципальный район, сельское поселение Есаульский сельсовет, 

<

...>».

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Национальная башенная компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 150 000 руб.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

Ю.А. Копейкина