ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09АП-762/2018

Дело № А40-136777/17

г. Москва

28 февраля 2018 года

Резолютивная часть постановления объявлена 22 февраля 2018 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 28 февраля 2018 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

Председательствующего судьи: Гончарова В.Я.,

Судей: Комарова А.А., Тетюка В.И., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу АО "ГУОВ" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.11.2017 по делу № А40-136777/17 принятое судьей Галиевой Р.Е. (52-1252) по иску ООО ТД "ЧелябТрейд" (ГРН 1067451072655, ИНН 

<

***>) 

к АО "ГУОВ" (ГРН 1097746390224, ИНН 

<

***>) 

третьи лица: 1. Минобороны РФ (ОГРН 

<

***>), 2. Временный управляющий ФИО2, 

о взыскании суммы задолженности в размере 18.106.285,78 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 865 962 руб. 29 коп., госпошлины,

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО3 по доверенности от 10.04.2017г.,

от ответчика: не явился, извещен,

от третьих лиц: 1) не явился, извещен, 2) не явился, извещен,

У С Т А Н О В И Л:

ООО ТД «ЧелябТрейд» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к АО «ГУОВ» (далее –  ответчик) о взыскании задолженности в размере 18 106 285,78 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 865 962,29 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму задолженности в размере 18 106 285,78 руб. по ключевой ставке Банка России, действующей в соответствующие периоды до момента фактического исполнения обязательства (с учетом принятых судом уточнений исковых требований в порядке, предусмотренном ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Минобороны Российской Федерации, временный управляющий ФИО2

Решением Арбитражного суда г. Москвы, объявленным в порядке ч. 2 ст. 176 АПК РФ 16.11.2017г., изготовленным в полном объеме 17.11.2017г. исковые требования удовлетворены. 

Не согласившись с принятым решением суда от 17.11.2017г., ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просит решение суда отменить и отказать в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на то, что срок оплаты работ по шифру ЦВО-Р-0851 не наступил. 

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы. 

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие ответчика, третьих лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Девятый арбитражный апелляционный суд, проверив в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность принятого по делу решения, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителя истца, считает, что оснований для отмены решения суда не имеется.

Судом установлено, что 02.03.2015 г. между истцом (подрядчиком) и ответчиком (генподрядчиком) был заключен Договор № 2015/2-86 на выполнение работ по ремонту объектов военных городков ЦВО Омская область г. Омск (шифр объекта: ЦВО-Р-0851) (далее - Договор), в соответствии с условиями которого, Истец является подрядчиком, Ответчик - генподрядчиком. 

В соответствии с пунктом 3.1 договора (в ред. дополнительного соглашения № 4) цена договора составляет 22 926 965,33 руб., в том числе НДС - 18 %. 

Согласно п. 5.1 договора дата начала выполнения работ – дата подписания сторонами договора; дата окончания выполнения работ – завершить за 39 недель, с даты заключения договора, согласно утвержденного заказчиком плана-графика производства работ. 

В соответствии с пунктом 11.1.1 договора сдача-приемка выполненных работ за текущий (отчетный) месяц осуществляется по журналу учета выполненных работ (форма КС-6а), Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленным после окончания работ на объекте в сметно-нормативной базе ФЕР-2001 года (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущие цены индексами изменения сметной стоимости строительства для всех субъектов РФ на дату заключения Договора. 

Приемка результата выполненных работ осуществляется в соответствии с условиями Договора и действующего законодательства, а также в соответствии с нормативными требованиями строительных норм и правил (СНиП), правил устройства электроустановок (ПУЭ), правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПУБЭЛ), правил пожарной безопасности, а также требований других нормативно- технических и санитарно-гигиенических документов. 

Согласно п. 11.1.2 договора Подрядчик представляет Генподрядчику Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 3 (трех) экземплярах, первичные учетные документы (заверенные копии счетов-фактур на оборудование и материалы, заверенные копии договоров по прочим затратам), оформленные надлежащим образом, с сопроводительным письмом. 

В соответствии с п. 11.1.4 договора Генподрядчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения указанных документов, рассматривает их и после согласования с районным представителем государственного Генподрядчика при отсутствии замечаний подписывает их со своей стороны и производит оплату выполненных работ или дает мотивированные замечания с перечнем необходимых к устранению недостатков и сроков их устранения.

Согласно п. 3.1 договора окончательная цена Договора определяется по результатам подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, а также подписанного на их основании между Генподрядчиком и Государственным Генподрядчиком Акта о приемке выполненных работ по установленной Государственным Генподрядчиком форме в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 1614. 

В силу п. 4.3 договора стороны согласовали следующие сроки оплаты выполненных Подрядчиком работ по ремонту объектов - в течение 180 (сто восемьдесят) рабочих дней после подписания Генподрядчиком оформленных Подрядчиком Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, передачи Подрядчиком оригиналов счета и счета-фактуры. 

В соответствии с пунктом 4.4 договора оплата выполненных Подрядчиком работ производится Генподрядчиком в порядке, установленном настоящим разделом Договора до предела, не превышающего 90 (девяносто) % от Цены Договора. Оставшаяся часть Цены Договора будет выплачена Подрядчику при окончательном расчете. 

На основании п. 4.5 договора окончательный расчет по Договору производится в течение 90 рабочих дней с момента подписания сторонами Итогового акта приемки выполненных работ по форме, установленной приложением № 3 к договору.

В соответствии с п. 11.2 договора подписание Генподрядчиком Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) подтверждает факт выполнения работ подрядчиком и определяет сумму промежуточного финансирования. 

Во исполнение условий договора истец выполнил работы по договору на сумму 22 926 965, 33 руб., что подтверждается представленными в материалы дела подписанными обеими сторонами формами КС-2, КС-3 № 25/1 от 03.08.2016г., № 26/1 от 03.08.2016г., № 44/1 от 28.04.2016г., № 45/1 от 28.04.2016г., № 46/1 от 28.04.2016г., № 49/1 от 03.08.2016г., № 50/1 от 03.08.2016г., № 51/1 от 22.07.2016г., № 59/1 от 03.08.2016г., № 59/1 от 03.08.2016г.

Итоговый акт приемки выполненных работ направлен Подрядчиком для рассмотрения и подписания Генподрядчиком 03.03.2017г. письмом исх. № 57/17 (получено АО «ГУОВ» 06.03.2017 г., о чем имеется отметка на письме) на сумму 22 926 965,33 руб.

В соответствии с пунктом 11.7 договора Генподрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Итогового акта рассматривает его, а также иные необходимые для окончательной приемки работ документы и направляет подписанный со своей стороны Итоговый акт приемки выполненных работ Подрядчику или предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки результата работ с перечнем необходимых к устранению Недостатков и сроков их устранения. 

В соответствии с п. 11.8 договора Генподрядчик после подписания итогового акта приемки выполненных работ производит окончательную оплату за выполненные работы. 

В сроки, установленные п. 11.7 договора, подписанный со стороны Ответчика, итоговый акт приемки выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания в адрес Истца не поступали.

11.04.2017г. истец в адрес ответчика направил претензию № 93/17 с требованием об оплате задолженности, однако претензия истца оставлена ответчиком без удовлетворения. 

Доказательств погашения задолженности в добровольном порядке ответчик не представил, доводы истца о нарушении сроков оплаты за выполненные истцом работы документально не опроверг. 

Поскольку требование истца об уплате основного долга, ответчиком добровольно не удовлетворено, задолженность в размере 18 106 285,78 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 865 962,29 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму задолженности в размере 18 106 285,78 руб. по ключевой ставке Банка России, действующей в соответствующие периоды до момента фактического исполнения обязательства, подлежат присуждению ко взысканию с него на основании ст.ст. 309, 310, 395, 702, 711 ГК РФ в судебном порядке.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что срок оплаты работ по шифру ЦВО-Р-0851 не наступил, отклоняется судом апелляционной инстанции, как необоснованный, на основании следующего.

 Сумма выполненных, предъявленных к приемке и принятых ответчиком работ по актам формы КС-2, справкам формы КС-3, итоговому акту приемки, по шифру ЦВО-Р-0851 составляет 22 926 965, 33 руб. 

Факт выполнения работ по договору на сумму 22 926 965, 33 руб. по шифру: ЦВО-Р-0851 подтверждается подписанными обеими сторонами формами КС-2, КС-3 № 25/1 от 03.08.2016г., № 26/1 от 03.08.2016г., № 44/1 от 28.04.2016г., № 45/1 от 28.04.2016г., № 46/1 от 28.04.2016г., № 49/1 от 03.08.2016г., № 50/1 от 03.08.2016г., № 51/1 от 22.07.2016г., № 59/1 от 03.08.2016г., № 59/1 от 03.08.2016г.

На основании п. 4.3 договора стороны согласовали следующие сроки оплаты выполненных Подрядчиком работ по ремонту объектов - в течение 180 (сто восемьдесят) рабочих дней после подписания Генподрядчиком оформленных Подрядчиком Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, передачи Подрядчиком оригиналов счета и счета-фактуры. В соответствии с пунктом 4.4. договора оплата выполненных Подрядчиком работ производится Генподрядчиком в порядке, установленном настоящим разделом Договора до предела, не превышающего 90 (девяносто) % от Цены Договора.

Оставшаяся часть Цены Договора будет выплачена Подрядчику при окончательном расчете. В соответствии с п. 11.2 договора подписание Генподрядчиком Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) подтверждает факт выполнения работ подрядчиком и определяет сумму промежуточного финансирования.

В соответствии с пунктом 4.5 договора окончательный расчет по Договору производится в течение 90 рабочих дней с момента подписания сторонами Итогового акта приемки выполненных работ по форме, установленной приложением № 3 к договору.

Как следует из материалов дела, итоговый акт приемки выполненных работ направлен Подрядчиком для рассмотрения и подписания Генподрядчиком 03.03.2017г. письмом исх. № 57/17 (получено АО «ГУОВ» 06.03.2017 г., о чем имеется отметка на письме) на сумму 22 926 965,33 руб.

В соответствии с пунктом 11.7 договора Генподрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Итогового акта рассматривает его, а также иные необходимые для окончательной приемки работ документы и направляет подписанный со своей стороны Итоговый акт приемки выполненных работ Подрядчику или предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки результата работ с перечнем необходимых к устранению Недостатков и сроков их устранения. 

В соответствии с п. 11.8 договора Генподрядчик после подписания итогового акта приемки выполненных работ производит окончательную оплату за выполненные работы.

В сроки, установленные п. 11.7 договора, подписанный со стороны Ответчика, итоговый акт приемки выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания в адрес Истца не поступали. Окончательный срок оплаты по итоговому акту наступил 31.07.2017 г.

Учитывая изложенное, Девятый арбитражный апелляционный суд считает, что при принятии обжалуемого решения правильно применены нормы процессуального и материального права, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, в связи с чем апелляционная жалоба по изложенным в ней доводам является необоснованной и удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь ст. ст. 110, 176, 266, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 17.11.2017 по делу № А40-136777/17 оставить без изменения, апелляционную жалобу  - без удовлетворения. 

Взыскать с АО "ГУОВ" в доход федерального бюджета  государственную пошлину по апелляционной жалобе в сумме 3000 рублей.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа. 

 

Председательствующий судья В.Я. Гончаров

 

Судьи А.А. Комаров

В.И. Тетюк

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.