Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48

http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело  №

А04-4091/2019

г. Благовещенск

14 августа 2019 года

В соответствии с частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение изготовлено 14.08.2019. Резолютивная часть решения объявлена 07.08.2019.

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи А.Г. Осадчего,

при ведении протокола и аудиопротоколирования секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании, проводимом с использованием систем видеоконференц-связи, исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Уралстройэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к

федеральному государственному унитарному предприятию «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 46 533 747 руб. 85 коп. и обязании исполнить обязательства,

третьи лица: акционерное общество «Завод «Пластмасс»; министерство промышленности и торговли Российской Федерации,

при участии в заседании: 

от истца: ФИО2, паспорт, по доверенности № 01-19/УСЭ от 09.01.2019;

от ответчика: ФИО3, паспорт, по доверенности № 10/2 от 10.01.2019;

АО «Завод «Пластмасс»: не явилось, извещено;

министерство промышленности и торговли Российской Федерации: не явилось, извещено,

установил:

в Арбитражный суд Амурской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Уралстройэнерго» (далее – ООО «Уралстройэнерго», истец) с исковым заявлением к федеральному государственному унитарному предприятию «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (далее – ФГУП «ГВСУ по специальным объектам», ответчик) о взыскании 46 533 747 руб. 85 коп. и обязании исполнить обязательства. 

Исковые требования обоснованы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по соглашению от 21.09.2018 о замене стороны договора (передаче договора) генерального подряда №643Р/25-УВ/13/1310-11-СМР объект: «Реконструкция и техническое перевооружение производств наполнения и сборки специзделий с проведением мероприятий по обеспечению безопасности предприятия», ОАО «Завод «Пластмасс» г. Копейск Челябинской области от 22.10.2013.

Определением суда от 14.06.2019 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: акционерное общество «Завод «Пластмасс»; министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Судебное заседание 07.08.2019 проводилось посредством использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Челябинской области.

Представитель ответчика в судебном заседании 07.08.2019 заявил ходатайство об отложении заседания, в связи с возможностью заключения с истцом мирового соглашения.

Представитель истца возражал против отложения судебного заседания, указал, что переговоры по заключению мирового соглашения с истцом не ведутся, поскольку истец не принимает условия ответчика; на исковых требованиях настаивал, просил рассмотреть дело в настоящем заседании по существу, несмотря на наличие арифметической ошибки в расчете.

Судом отказано в удовлетворении ходатайства об отложении заседания.

Третьи лица в настоящее судебное заседание не явились, о времени и месте проведения заседания извещены в порядке статей 121-123 АПК РФ, письменных отзывов на исковое заявление не представили.

Дело рассмотрено в судебном заседании в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствие третьих лиц.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей истца и ответчика, суд установил следующее.

22.10.2013 между акционерным обществом «Завод «Пластмасс» (заказчик) и ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» (генподрядчик) заключен договор генерального подряда №6431/25-УВ/13/1310-11-СМР согласно которому, генподрядчик обязуется в установленный договором срок по техническому заданию заказчика разработать рабочую документацию, выполнить строительно-монтажные, пуско-наладочные работы по объекту: «Реконструкция и техническое перевооружение производств наполнения и сборки специзделий с проведением мероприятий по обеспечению безопасности предприятия», ОАО «Завод пластмасс» г. Копейск Челябинской области, (далее – объект), согласно получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» проектной документации и передать результат работ заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями договора (пункт 2.1 договора).

Срок начала работ по договору – в течение пяти дней с даты подписания сторонами настоящего договора (пункт 5.2 договора).

Дата окончания работ по настоящему договору – 15 октября 2017 года (пункт 5.3 договора).

Согласно пункту 5.1 договора, работы, предусмотренные настоящим договором, выполняются в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 2 к настоящему договору)

Цена работ, подлежащих выполнению генподрядчиком по настоящему договору, составляет 1 089 281 850 руб., в том числе НДС – 166 161 638 руб. 14 коп., в соответствии со сводным сметным расчетом стоимости строительства № 1624, разработанным на его основе сметным расчетом (приложение № 3 к настоящему договору). Распределение финансирования работ по годам определяется сторонами в дополнительном соглашении к настоящему договору (пункт 4.1 договора).

Согласно пункту 4.3 договора заказчик в течение десяти банковских дней после поступления денежных средств на расчетный счет заказчика и вступления в силу договора перечисляет в качестве авансового платежа на расчетный счет генподрядчика 30% от суммы финансирования текущего года в соответствии с дополнительным соглашением к договору и на основании выставленного генподрядчиком счета на получение аванса. 

21.09.2018 между ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» (первоначальный генподрядчик), ООО «Уралстройэнерго» (новый генподрядчик) и АО «Завод «Пластмасс» (заказчик) заключено соглашение о замене стороны договора (перевода договора) от 22.10.2013 № 643Р/25-УВ/13/1310-11-СМР, согласно которому первоначальный генподрядчик передает, а новый генподрядчик принимает все права и обязанности первоначального генподрядчика по договору генерального подряда от 22.10.2013 №6431/25-УВ/13/1310-11-СМР на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ по объекту: «Реконструкция и техническое перевооружение производств наполнения и сборки специзделий с проведением мероприятий по обеспечению безопасности предприятия», ОАО «Завод пластмасс» г. Копейск Челябинской области, заключенному первоначальным генподрядчиком с заказчиком, в том объеме, который существует у первоначального генподрядчика на дату заключения соглашения, включая требования, срок исполнения которых еще не наступил и обязанности, которые могут возникнуть из договора в будущем (пункт 1.1 соглашения).

Согласно пункту 2.5 соглашения, в течение пяти рабочих дней с момента заключения соглашения первоначальный генподрядчик обязуется передать новому генподрядчику по акту приема-передачи (приложение № 2 к соглашению), подписанного первоначальным генподрядчиком и новым генподрядчиком, завизированного заказчиком следующее:

1) документы, которые удостоверяют уступаемые права и передаваемые обязанности;

2) техническую документацию, переписку (сообщения), иные документы, полученные от заказчика в рамках договора;

3) неизрасходованные материалы, в том числе те, которые предоставил заказчик первоначальному генподрядчику.

На момент заключения соглашения у первоначального генподрядчика имеется задолженность перед заказчиком в виде суммы неотработанного аванса по договору в размере 95 312 629 руб. 01 коп., в том числе НДС, что составляет 14 539 214 руб. 59 коп. (пункт 2.1 соглашения).

В силу пункта 2.3.2 соглашения новый генподрядчик и первоначальный генподрядчик пришли к соглашению, что в счет оплаты первоначальным генподрядчиком полученного от заказчика аванса по договору в размере суммы долга, указанного в п. 2.1 настоящего соглашения, произвести зачет задолженности нового генподрядчика перед первоначальным генподрядчиком в размере 40 533 991 руб. 91 коп., в том числе НДС 6 183 151 руб. 31 коп. Сумма в размере 54 778 637 руб. 10 коп., в том числе НДС, что составит 8 356 063 руб. 29 коп. первоначальный генподрядчик перечисляет новому генподрядчику в соответствии с приложением № 1 к соглашению (график выплат).

Как указывает истец, ответчик, в нарушении пункта 2.5 соглашения, не представил следующее: обязательства (отработанные/неотработанные) сторон в том объеме, который существовал на момент подписания сторонами соглашения, как признаваемы сторонами, так и спорные; правовые и финансовые документы, удостоверяющие передаваемые права ответчика, в том числе, договоры субподрядчиков, акты сверки, доказательства правомерного расходования средств целевого финансирования; процессуальное правопреемство по вступившим в законную силу требованиям ответчика; актуальную техническую документацию по договору - проектную, рабочую по состоянию на 21.09.2018; неизрасходованные материалы. 

Кроме того, ответчик обязательства в соответствии с п. 2.3.2 соглашения по перечислению денежных средств истцу исполнил не в полном объеме, в результате частичной оплаты на общую сумму 10 000 000 (платежное поручение № №16836 от 05.12.2018 на сумму 3 000 000 руб., платежное поручение №17324 от 12.12.2018 на сумму 2 000 000 руб., платежное поручение №18342 от 28.12.2018 на сумму 5 000 000 руб.), размер задолженности составил 44 778 637 руб. 10 коп.

Истец, в связи с нарушением условий графика выплат, установленных соглашением, направил в адрес ответчика претензии исх.№02-05/усэ-1150 от 22.10.2018, исх.№02-05/усэ-1440 от 26.12.2018 с требованиями об оплате образовавшейся задолженности и неустойки.

Поскольку ответчик образовавшуюся задолженность не оплатил, ответов на претензии не представил, истец обратился с настоящим иском в суд.

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором (пункт 2 статьи 740 Гражданского кодекса РФ).

Согласно статье 8 Гражданского кодекса РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

По правилам статей 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Как следует из материалов дела, ответчик в нарушение условий соглашения не выплатил истцу денежные средства.

В соответствии с условиями соглашения о замене стороны договора (перевода договора) от 21.09.2018  ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» обязалось перечислить ООО «Уралстройэнерго» полученный раннее от заказчика аванс по договору генерального подряда №6431/25-УВ/13/1310-11-СМР в размере 54 778 637 руб. 10 коп.

Согласно приложению № 1 к соглашению, сторонами предусмотрен следующий порядок выплат денежных средств: 6 847 329 руб. 64 коп. – до 05.10.2018; 6 847 329 руб. 64 коп – до 25.10.2018; 6 847 329 руб. 64 коп – до 05.11.2018; 6 847 329 руб. 64 коп. – до 05.12.2018; 6 847 329 руб. 64 коп. – до 15.01.2019; 6 847 329 руб. 64 коп. – до 05.02.2019; 6 847 329 руб. 64 коп. – 05.03.2019; 6 847 329 руб. 64 коп. – до 05.04.2019.

Как следует из материалов дела и представленных истцом документов, ответчик обязанность по перечислению полученного раннее от заказчика аванса в размере 54 778 637 руб. 10 коп. исполнил частично и с нарушением сроков, установленных графиком выплат. 

Согласно части 3 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований и возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. Признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Доказательства выплаты задолженности в сумме 44 778 637 руб. 10 коп., как и возражения, относительно данной суммы, ответчиком суду не представлены.

При таких обстоятельствах требование истца о взыскании с ответчик задолженности в размере 44 778 637 руб. 10 коп. является обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

Истец также просил взыскать с ответчика неустойку.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. 

В силу статьи 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

В соответствии с пунктом 3.5 соглашения, в случае нарушения первоначальным генподрядчиком сроков перечисления новому генподрядчику суммы долга, новый генподрядчик вправе требовать уплаты первоначальным генподрядчиком неустойки в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ, подлежащей перечислению, за каждый день просрочки.

Согласно расчету истца, неустойка за период с 05.10.2018 по 13.05.2018 составляет 1 755 110 руб. 73 коп.

Расчет пени судом проверен и признан неверным, поскольку истцом неверно определена начальная сумма задолженности, на которую начисляется неустойка, а также даты начала периода просрочки.

В соответствии со статьей 190 Гражданского кодекса РФ установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами.

Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

Из буквального толкования указанной нормы следует, что дата окончания исполнения обязательств включается в определенный срок. Использование предлогов «до», «по» при этом не имеет значение, поскольку имеется указание на конкретную дату.

Таким образом, учитывая, что в приложении № 1 к соглашению сторонами предусмотрен следующий порядок выплат денежных средств: до 05.10.2018; до 25.10.2018; до 05.11.2018; до 05.12.2018; до 15.01.2019; до 05.02.2019; до 05.03.2019; до 05.04.2019, последними днями срока а оплаты являются: 05.10.2018; 25.10.2018; 05.11.2018; 05.12.2018; 15.01.2019; 05.02.2019; 05.03.2019; 05.04.2019 включительно (статьи 190 - 192 Гражданского кодекса РФ).

Аналогичная позиция отражена в Определении Верховного Суда РФ от 02.08.2016 № 309-ЭС16-9152 по делу № А07-14123/2015.

По расчету суда размер неустойки за период с 06.10.2018 по 13.05.2019 составляет 1 539 255 руб. 99 коп.:

6 847 329 руб. 64 коп. х 20 (с 06.10.2018 по 25.10.2018) х 1/300 х 7,5% = 34 236 руб. 65 коп.

13 694 659 руб. 28 коп. х 12 (с 26.10.2018 по 06.11.2018) х 1/300 х 7,5% = 41 083 руб. 98 коп.

20 541 988 руб. 92 коп. х 29 (с 07.11.2018 по 05.12.2018) х 1/300 х 7,5% = 148 929 руб. 42 коп.

24 389 318 руб. 56 коп. х 7 (с 06.12.2018 по 12.12.2018) х 1/300 х 7,5% = 42 681 руб. 31 коп.

22 389 318 руб. 56 коп. х 4 (с 13.12.2018 по 16.12.2018) х 1/300 х 7,5% = 22 389 руб. 32 коп.

22 389 318 руб. 56 коп. х 12 (с 17.12.2018 по 28.12.2018) х 1/300 х 7,75% = 69 406 руб. 89 коп.

17 389 318 руб. 56 коп. х 18 (с 29.12.2018 по 15.01.2019) х 1/300 х 7,75% = 80 860 руб. 33 коп.

24 236 648 руб. 20 коп. х 21 (с 16.01.2019 по 05.02.2019) х 1/300 х 7,75% =131 483 руб. 82 коп.

31 083 977 руб. 84 коп. х 28 (с 06.02.2019 по 05.03.2019) х 1/300 х 7,75%=224 840 руб. 77 коп.

37 931 307 руб. 48 коп. х 31 (с 06.03.2019 по 05.04.2019) х 1/300 х 7,75% = 303 766 руб. 55 коп. 

44 778 637 руб. 12 коп. х 38 (с 06.04.2019 по 13.05.2019) х 1/300 х 7,75% = 439 576 руб. 95 коп.

Таким образом, с ответчика в пользу истца следует взыскать неустойку за период с 06.10.2018 по 13.05.2019 в размере 1 539 255 руб. 99 коп. В остальной части во взыскании неустойки следует отказать в связи с неверным расчетом.

Согласно условиям соглашения о замене стороны договора (перевода договора) от 21.09.2018  ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» обязалось передать ООО «Уралстройэнерго» документы, которые удостоверяют уступаемые права и передаваемые обязанности; техническую документацию, переписку (сообщения), иные документы, полученные от заказчика в рамках договора; неизрасходованные материалы, в том числе те, которые предоставил заказчик первоначальному генподрядчику.

Как указал истец, в нарушении своих обязательств, предусмотренных пунктом 2.5 соглашения, ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» не представили истцу необходимые документы и материалы.

С учетом изложенного, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие факт передачи ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» истцу документов и материалов, указанных в пункте 2.5 соглашения, суд считает обоснованными требования истца об обязании передать ООО «Уралстройэнерго» документы, удостоверяющие уступаемые права и передаваемые обязанности; техническую документацию, переписку (сообщения), иные документы, полученные от акционерного общества «Завод «Пластмасс» в рамках договора; неизрасходованные материалы, в том числе те, которые предоставило АО «Завод «Пластмасс» ФГУП «ГВСУ по специальным объектам».

Государственная пошлина по делу в силу части 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации составляет 206 000 руб. (6000 руб. – по требованию неимущественного характера и 200 000 руб. – по требованию имущественного характера).

При подаче иска истцу на основании статьи 333.41 Налогового кодекса Российской Федерации была предоставлена отсрочка уплаты госпошлины.

В связи с частичным удовлетворением исковых требований госпошлина в силу статьи 110 АПК РФ подлежит взысканию со сторон в доход федерального бюджета пропорционально удовлетворенным требованиям: с истца в размере 928 руб.; с ответчика в размере 205 072 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 и 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Уралстройэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) основной долг в размере 44 778 637 руб. 10 коп., пени за период с 06.10.2018 по 13.05.2019 в размере 1 539 255 руб. 99 коп. (всего – 46 317 893 руб. 09 коп.).

Обязать федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) исполнить пункт 2.5 соглашения о замене стороны договора (передаче договора) от 22.10.2013 №643Р/25-УВ/13/1310-11-СМР от 21.09.2018, а именно:

1) передать обществу с ограниченной ответственностью «Уралстройэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) документы, удостоверяющие уступаемые права и передаваемые обязанности;

2) передать обществу с ограниченной ответственностью «Уралстройэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) техническую документацию, переписку (сообщения), иные документы, полученные от акционерного общества «Завод «Пластмасс» в рамках договора;

3) передать обществу с ограниченной ответственностью «Уралстройэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неизрасходованные материалы, в том числе те, которые предоставило акционерное общество «Завод «Пластмасс» федеральному государственному унитарному предприятию «Главное военно-строительное управление по специальным объектам».

В остальной части иска отказать.

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 205 072 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Уралстройэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 928 руб. 

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья                                                        А.Г. Осадчий