10513_6043546  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А53-21612/2019

24 сентября 2019 года

город Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи О.М. Брагиной,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело, возбужденное по иску муниципального  казенного учреждения «Отдел заказчика» Кашарского района Ростовской области (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Новострой» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

об обязании устранить недостатки выполненных работ и о взыскании штрафа в размере  482 152 руб. 30 коп.,  

при участии в судебном заседании: 

от истца – начальник А.А. Говорущенко, распоряжение № 21Л от 03.10.2017 г.,  представитель ФИО2, по доверенности № 1 от 09.01.2019 г.,  

от ответчика – представитель не явился. 

 Руководствуясь статьями 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской  Федерации, статьями 65, 110, 121, 149, 156, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Оставить исковое заявление муниципального казенного учреждения «Отдел  заказчика» Кашарского района Ростовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), предъявленное к обществу с ограниченной ответственностью «Новострой»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в части взыскания взыскании штрафа в размере  482 152 руб. 30 коп., без рассмотрения.  

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «Новострой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение одного месяца с даты вступления судебного  акта в законную силу безвозмездно устранить недостатки, выявленные в пределах  гарантийного срока эксплуатации здания детского сада, капитальный ремонт которого  осуществлялся в рамках исполнения муниципального контракта № 44 от 21.06.2017 г., а  

именно: подсыпать грунт в цветнике в месте ввода водопровода в количестве 1,4 куб.м.,  восстановить плиточное покрытие на цоколе здания на площади 1,19 кв.м., закрепить  листы ограждения в количестве 18 шт. по периметру теневого навеса, на теневом навесе  демонтировать протекающую крышу, заменить протекающие прогоны из профтрубы  сечением 40*40 мм в количестве 31,2 пог.м., дополнительно усилить крушу прогонами  сечением 40*40 мм. в количестве 8,3 пог.м., а затем уложить профлисты; заменить  игровые комплексы «Кораблик» и диван садово-парковый; заменить пол в физкульткурно- музыкальном зале.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Новострой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход бюджета Российской Федерации 6 000 руб.  государственной пошлины.  

 Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

 Решение может быть обжаловано через суд, вынесший решение, в арбитражный  суд апелляционной инстанции в течение месяца с даты принятия решения, а также в  арбитражный суд кассационной инстанции в течение двух месяцев с даты вступления  решения по делу в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.М. Брагина