1189/2023-119141(3) 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 18 апреля 2023 года 

по делу А33-24103/2019 Красноярск

18 апреля 2023 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать акционерное общество «Фирма «Культбытстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, г. Красноярск) в срок 2 месяца с даты вступления решения в законную силу  выполнить следующие работы в целях устранения выявленных строительных недостатков  многоквартирного дома № 1 по ул. Годенко в г. Красноярске в следующем объеме  

 № п/п 

 

Наименование работ  

 

Объем работ 

 

1 подъезд  

 

2 подъезд 

 

3 подъезд  

 

4 подъезд  

 

5 подъезд  

 

Всего 

 

- поверхности стен 

 

1 

 

Окраска поверхности стен  

 

37,6+2,76  

 

52,0+0,05 

 

26,7+0,03  

 

25,1+0,1+  

 

4,84+0,015  

 

146,2+7,255= 

 

водоэмульсионной краской,  

 

+ 0,4+1,34  

 

+0,1+0,3+ 

 

+1,38 м2  

 

0,14+0,07  

 

+0,01 м2  

 

153,5 м2 

 

с расчисткой старой  

 

+0,01 м2  

 

0,01+0,07 

 

+0,27 м2 

 

краски более 35% 

 

+0,2 м2 

 

- поверхности потолка 

 

2 

 

Окраска поверхности  

 

2,2+0,008  

 

9,3+0,01+ 

 

8,3-1,38 м2  

 

1,7+0,05+  

 

1,0 м2 

 

22,5-1,144= 21,4 

 

потолка 

 

м2 

 

0,015 м2 

 

0,003+0,15  

 

м2 

 

водоэмульсионной краской,  

 

м2 

 

с расчисткой старой краски  

 

более 35% 

 

- поверхности пола 

 

3 

 

Заделка выбоин в полах  

 

24 шт. 

 

7 шт. 

 

10 шт. 

 

3 шт. 

 

3 шт. 

 

47 шт. 

 

цементных площадью до  

 

0,25 м2 

 

4 

 

Окраска поверхности  

 

3,3 м2 

 

3,8 м2 

 

8,4 м2 

 

9,0 м2 

 

4,9 м2 

 

29,4 м2 

 

масляной краской, с  

 

расчисткой старой краски  

 

более 35% 

 

5 

 

Разборка/ устройство  

 

0,72 м2 

 

0,72 м2 

 

керамической плитки на  

 

клею 

 

6 

 

Разборка/ устройство  

 

0,9 м.п. 

 

0,9 м.п. 

 

керамического плинтуса  

 

наклею 

 

- окна 

 

7 

Снятие/установка 

 

11,6 п.м.  

 

5,6 п.м. 

 

11,6 п.м.  

 

22,4 п.м.  

 

28,0 п.м.  

 

79,2 п.м. 

 

облицовки оконных  

 

откосов из уголков  

 

пластиковых, без замены  

 

8 

Снятие/установка 

 

2,4 м2 

 

1,2 м2 

 

2,4 м2 

 

4,8 м2 

 

6,0 м2 

 

16,8 м2 

 

облицовки откосами  

 

(внутренними) оконными  

 

ПВХ, без замены 

 

9 

Снятие/установка слива из  

 

2,66 п.м.  

 

1,33 п.м. 

 

2,66 п.м.  

 

5,32 п.м.  

 

6,65 п.м.  

 

18,62 п.м. 

 

оцинкованной стали, без  

 

замены 

 

10 

Демонтаж/установка  

 

3,92 м2 

 

1,96 м2 

 

3,92 м2 

 

7,84 м2 

 

9,8 м2 

 

27,44 м2 

 

оконного блока 

 

одностворчатого, без  

 

замены 

 

11 

Герметизация мест 

 

11,2 п.м.  

 

5,6 п.м. 

 

11,2 п.м.  

 

22,4 п.м.  

 

28,0 п.м.  

 

78,4 п.м. 

 

примыкания внутренних  

 

откосов к оконным блокам  

 

Взыскать с акционерного общества «Фирма «Культбытстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью  управляющая компания «Октябрьская-Красноярск» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, г. Красноярск) судебную неустойку в случае неисполнения решения суда в  размере 10 000 руб. за каждый день со дня истечения, установленного судом срока для  исполнения решения суда, и до дня фактического исполнения судебного акта, а также 6 000  руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины, 24 000 руб. расходов за  проведение судебной экспертизы, 173 328 руб. 60 коп. судебных расходов.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью управляющая компания  «Октябрьская-Красноярск» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) из  федерального бюджета 13 206 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному  поручению от 31.07.2019 № 290.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья С.А. Красовская