ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-52606/24-67-402

г. Москва

12 июля 2024 г.

Резолютивная часть решения оглашена 24 июня 2024 г.

Полный текст решения изготовлен 12 июля 2024 г.                                                                   

Арбитражный суд в составе:                                                                                                                                                    

Судья В.Г. Джиоев (единолично)

при ведении протокола помощником судьи Н.С. Будько, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011

дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОНОТЕКС" (141079, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОРОЛЁВ ГОРОД, ПИОНЕРСКАЯ 

<

...> ОФИС 53, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 16.07.2015, ИНН: 

<

***>) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНКИ КОНСТРАКШН" (127273, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТРАДНОЕ, НОВОВЛАДЫКИНСКИЙ ПР-Д, Д. 12А, ЭТАЖ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ МАНСАРДЫ, ПОМЕЩ. 35, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 05.07.2017, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 27 553 110,99 руб. 

при участии:

от истца:  ФИО1 по дов-ти от 27.02.2024

от ответчика: ФИО2 по дов-ти от 17.06.2024

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОНОТЕКС" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНКИ КОНСТРАКШН"  (далее – ответчик) о взыскании с учетом принятых судом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ задолженности по Договору субподряда №ТР-БР-ДВ-МОНТ-КВ от 06.07.2023 г. в размере 1 978 200 рублей 00 копеек,  пени по состоянию на 20 мая 2024 года в размере 197 820 рублей 00 копеек, задолженности по Договору субподряда № ГЗГ-Б-Д от 20.06.2022 г. в размере 23 413 722 рубля 93 копейки,  пени по состоянию на 20 мая 2024 года в размере 2 341 372 рубля 29 копеек, задолженности по Договору №ПС-ВО-10-2022-ДВ от 19.10.2022 г. в размере 243 217 рублей 55 копеек, процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 20 мая 2024 года в размере 15 205 рублей 00 копеек, за период с 21 мая 2024 г. по день фактической уплаты долга, задолженности по Договору №СП-ЖКТКорп.3/2021/Двери от 07.06.2021 г., в размере 698 399 рублей 75 копеек, пени по состоянию на 20 мая 2024 года в размере 69 839 рублей 98 копеек, задолженности по Договору субподряда №ТР5-БР-Д от 28.03.2023 г. в размере 1 199 570 рублей 76 копеек, пени по состоянию на 20 мая 2024 года в размере 119 957 рублей 08 копеек,  неосновательного обогащения в размере 322 680 рублей 00 копеек, процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 20 мая 2024 года в размере 13 400 рублей 92 копейки, за период с 21 мая 2024 г. по день фактической уплаты долга.

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме.

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований по доводам, изложенным в отзыве.

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению, на основании следующего.

Как усматривается из материалов дела, Между Истцом и Ответчиком были заключены Договоры, в соответствии с условиями которых Истец обязался выполнить работы либо поставку товара, а Ответчик обязался принять и оплатить выполненные работы либо поставленный товар.

Однако до настоящего времени Ответчик не полностью выполнил свои обязательства по Договорам, в связи с чем у него возникло денежное обязательство перед Истцом.

16 февраля 2024 года Истец направил в адрес Ответчика досудебную претензию с требованием оплатить возникшие задолженности, однако Ответчик до настоящего времени не исполнил указанное требование, и не представил ответ на настоящую досудебную претензию.

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 22.06.2021) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", если законом или соглашением сторон установлена неустойка за нарушение денежного обязательства, на которую распространяется правило абзаца первого пункта 1 статьи 394 ГК РФ, то положения пункта 1 статьи 395 ГК РФ не применяются. В этом случае взысканию подлежит неустойка, установленная законом или соглашением сторон, а не проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ (пункт 4 статьи 395 ГК РФ).

1. 06 июля 2023 года между Сторонами заключен Договор субподряда №ТР-БР-ДВ-МОНТ-КВ.

Истец свои обязательства по Договору выполнил на общую сумму 3 704 400 рублей 00 копеек, что подтверждается: справкой о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 30.11.2023; унифицированной формой КС-2 №1 от 30.11.2023 г.; счет-фактурой №182 от 30.11.2023 г.

При этом Ответчик произвел оплату по Договору на общую сумму 1 726 600 рублей 00 копеек, что подтверждается платежным поручением №5117 от 01.08.2023 г.; платежным поручением №6158 от 21.09.2023 г.

Согласно акту сверки по Договору субподряда №ТР-БР-ДВ-МОНТ-КВ от 06.07.2023 г. денежное обязательство Ответчика перед Истцом составляет 1 978 200 рублей 00 копеек и до настоящего времени не исполнено.

№ТР-БР-ДВ-МОНТ-КВ

Дебет

Кредит

02.08.23

Оплата(5117от01.08.2023)

1 249 920,00

21.09.23

Оплата (6158 от 21.09.2023)

476 280,00

30.11.23

Продажа(182      отЗО.11.2023)

3 704 400,00

Обороты по договору

3 704 400,00

1 726 200,00

Сальдо конечное

1 978 200,00

В соответствии с п.п. 3.4.1. п. 3 Договора, оплата выполненных работ производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок по форме КС-3.

Согласно п.п. 11.3. Договора, за просрочку оплаты работ, принятых Подрядчиком (Ответчик) путем подписания Акта КС-2 и Справки КС-3, Субподрядчик вправе требовать от Подрядчика оплаты неустойки в размере 0.1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченной задолженности.

Таким образом размер пеней по указанному Договору и по сумме задолженности, возникшей у Ответчика, на 20.05.2024 составляет 197 820 рублей 00 копеек.

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

1 978 200,00

29.12.2023

20.05.2024

144

1 978 200,00 х 144 х 0.1%

284 860,80 р.

Итого:

2&4-8-60ч«0.р-:

Сумма основного долга: 1 978 200,00 руб.

Сумма процентов по всем задолженностям; 197 820,00 руб.

2. 20 июня 2022 года между Сторонами заключен Договор субподряда №ГЗГ-Б-Д.

В соответствии с п.З Дополнительного соглашения №1 к Договору субподряда №ГЗГ-Б-Д от 20.06.2022 г. стоимость работ составляла 102 141 559 рублей 70 копеек.

Истец свои обязательства по Договору выполнил на общую сумму 100 513 170 рублей 71 копейка, что подтверждается: справкой о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 30.09.2022 г.; актом по унифицированной форме КС-2 №1 от 30.09.2022 г.; счет-фактурой №269 от 30.09.2022 г.; справкой о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 31.10.2022 г.; актом по унифицированной форме КС-2 №2 от 31.10.2022 г.; счет-фактурой №354 от 31.10.2022 г.; справкой о стоимости выполненных работ и затрат №3 от 30.11.2022 г.; актом по унифицированной форме КС-2 №3 от 30.11.2022 г.; счет-фактурой №423 от 30.11.2022 г.; справкой о стоимости выполненных работ и затрат №4 от 31.12.2022 г.; актом по унифицированной форме КС-2 №4 от 31.12.2022 г.; счет-фактурой №453 от 31.12.2022 г.; справкой о стоимости выполненных работ и затрат №5 от 31.03.2023 г.; актом по унифицированной форме КС-2 №5 от 31.03.2023 г.; счет-фактурой №88 от 31.03.2023 г.; справкой о стоимости выполненных работ и затрат №6 от 30.06.2023 г.; актом по унифицированной форме КС-2 №6 от 30.06.2023 г.; счет-фактурой №75 от 30.06.2023 г.; справкой о стоимости выполненных работ и затрат №7 от 31.07.2023 г.; актом по унифицированной форме КС-2 №7 от 31.07.2023 г.; счет-фактурой №175 от 31.07.2023 г.; справкой о стоимости выполненных работ и затрат №8 от 31.08.2023 г.; актом по унифицированной форме КС-2 №8 от 31.08.2023 г.; счет-фактурой №121 от 31.08.2023 г.; счет-фактурой №143 от 26.06.2023 г., гарантийным письмом от 12.12.2023 со сведениями о направлении оригиналов документов в адрес Ответчика.

При этом Ответчик произвел оплату по Договору на общую сумму 77 099 447 рублей 78 копеек, что подтверждается платежным поручением №6932 от 07.10.2022 г.; платежным поручением №7943 от 17.10.2022 г.; платежным поручением №8240 от 01.11.2022 г.; платежным поручением №8582 от 14.11.2022 г.; платежным поручением №9681 от 26.12.2022 г.; платежным поручением №109 от 16.01.2022 г.; платежным поручением №309 от 30.01.2023 г.; платежным поручением №360 от 01.02.2023 г.; платежным поручением №1038 от 03.03.2023 г.; платежным поручением №1312 от 15.03.2023 г.; платежным поручением №2368 от 19.04.2023 г.; платежным поручением №2597 от 02.05.2023 г.; платежным поручением №2942 от 16.05.2023 г.; платежным поручением №3657 от 07.06.2023 г.; платежным поручением №4182 от 23.06.2023 г.; платежным поручением №4351 от 30.06.2023 г.; платежным поручением №6414 от 04.10.2023 г.; платежным поручением №6714 от 24.10.2023 г.; платежным поручением №7384 от 08.11.2023 г.

Согласно акту сверки по Договору субподряда № ГЗГ-Б-Д от 20.06.2022 г. денежное обязательство Ответчика перед Истцом составляет 23 413 722 рубля 93 копейки и до настоящего времени не исполнено.

№ ГЗГ-Б-Д

Дебет

Кредит

Размер Задолженности

30.09.22

Продажа (269      от 30.09.2022)

1 593 057,00

10.10.22

Оплата (6932 от 07.10.2022)

15 000 000,00

18.10.22

Оплата (7943 от 17.10.2022)

1 513 404,15

31.10.22

Продажа (354      от 31.10.2022)

2 047 400,00

01.11.22

Оплата (8240 от 01.11.2022)

4 500 000,00

14.11.22

Оплата (8582 от 14.11.2022)

1 945 030,00

30.11.22

Продажа (423      от 30.11.2022)

1 433 180,00

26.12.22

Оплата (9618 от 26.12.2022)

1 361 521,00

31.12.22

Продажа (453      от 31.12.2022)

12 061 413,60

16.01.23

Оплата (109 от 16.01.2023)

6 000 000,00

31.01.23

Оплата (309 от 30.01.2023)

2 000 000,00

01.02.23

Оплата (360 от 01.02.2023)

1 000 000,00

03.03.23

Оплата (1038 от03.03.2023)

1 500 000,00

16.03.23

Оплата (1312 от 15.03.2023)

958 342,92

31.03.23

Продажа (88       от 31.03.2023)

19 396 221,00

19.04.23

Оплата (2368 от 19.04.2023)

10 000 000,00

02.05.23

Оплата (2597 от 02.05.2023)

3 000 000,00

16.05.23

Оплата (2942 от 16.05.2023)

2 000 000,00

07.06.23

Оплата (3657 от 07.06.2023)

1 726 409,95

23.06.23

Оплата (4182 от 23.06.2023)

52 400,00

26.06.23

Продажа (143      от 26.06.2023)

52 400,00

30.06.23

Продажа (75       от 30.06.2023)

31 779 499,00

03.07.23

Оплата (4351 от 30.06.2023)

15 542 339,76

263722,82

с 29.07.2023 по 29.08.2023

31.07.23

Продажа (175      от 31.07.2023)

18 620 770,78

18 884 493.60

с 29.08.2023 по 29.09.2023

31.08.23

Продажа (121      от 31.08.2023)

10 912 224,63

29 796 718,23

с 29.09.2023 по 04.10.2023

04.10.23

Оплата (6414 от 04.10.2023)

5 000 000,00

24 796 718,23

25.10.23

Оплата (6714 от 24.10.2023)

3 000 000,00

21 796 718,23

08.11.23

Оплата (7384 от 08.11.2023)

1 000 000,00

20 796 718,23

до 29.12.2023

30.11.23

Продажа (303      от 30.11.2023)

2 617 004,70

23 413 722,93

с 18.01.2024

Обороты по договору

100 513 170,71

77 099 447,78

Сальдо конечное

23 413 722,93

В соответствии с п.п. 3.4.1. Протокола разногласий №1 к Договору № ГЗГ-Б-Д от 20.06.2022 г., оплата выполненных работ производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок по форме КС-3.

Согласно п.п. 11.3. Договора, за просрочку оплаты работ, принятых Подрядчиком (Ответчик) путем подписания Акта КС-2 и Справки КС-3, Субподрядчик вправе требовать от Подрядчика оплаты неустойки в размере 0.1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченной задолженности.

Таким образом размер пеней по указанному Договору и по сумме задолженности, возникшей у Ответчика, на 20.05.2024 составляет 2 341 372 рубля 29 копеек.

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

23 413 722,93

18.01.2024

20.05.2024

124

23 413 722,93 х 124 * 0.1%

2 903 301,64 р.

Итого:

2 903 301,64 р.

но не более 10%

2 341 372,29 руб.

Сумма основного долга: 23 413 722,93 руб.

Сумма процентов по всем задолженностям: 2 341 372,29 руб.

3. 19 октября 2022 года между Сторонами заключен Договор №ПС-ВО-10-2022-ДВ.

В соответствии с п.п. 5.2. стоимость работ по Договору определена Спецификацией, в соответствии с Дополнительным соглашением №1 к Договору от 10.11.2023 г. составляла 24 296 487 рублей 60 копеек.

Истец свои обязательства по Договору выполнил на общую сумму 24 296 487 рублей 60 копеек, что подтверждается: универсальным передаточным документом №265 от 10 ноября 2023 года.

При этом Ответчик произвел оплату по Договору на общую сумму 24 053 270 рублей 05 копеек, что подтверждается Актом взаимозачета №36 от 31.12.2023 г.

Согласно акту сверки по Договору №ПС-ВО-10-2022-ДВ от 19.10.2022 г. денежное обязательство Ответчика перед Истцом составляет 243 217 рублей 55 копеек до настоящего времени не исполнено.

№ПС-ВО-10-2022-ДВ

Дебет

Кредит

Размер Задолженности

10.11.23

Продажа (265      от 10.11.2023)

24 296 487,60

31.12.23

Оплата (36 от 31.12.2023)

24 053 270,05

Обороты по договору

24 296 487,60

24 053 270,05

Сальдо конечное

243 217,55

В соответствии с п. 2 Дополнительного соглашения №2 от 22.12.2023 г. к Договору №ПС-ВО-10-2022-ДВ от 19.10.2022 г., Заказчик осуществляет авансовый платеж в размере 100% (Сто процентов) стоимости и доставки Изделий, указанной в Спецификации, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Дополнительного соглашения и получения счета от Исполнителя.

Дополнительное соглашение №2 к Договору подписано между сторонами 22.12.2023 г. + 5 рабочих дней = 30 декабря 2023 года.

Поскольку по Договору заключенному между сторонами не предусмотрена неустойка за нарушение денежного обязательства, в таком случае применяются положения пункта 1 статьи 395 ГК РФ.

Таким образом размер процентов за пользование чужими средствами по указанному Договору и по сумме задолженности, возникшей у Ответчика, на 20.05.2024 составляет 15 205 рублей 00 копеек.

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Проценты

с

по

дней

243 217,55 р.

30.12.2023

31.12.2023

2

16,00

243 217,55 х 2 х 16%/365

213,23 р.

243 217,55 р.

01.01.2024

20.05.2024

141

16,00

243 217,55 х 141 * 16%/366

14 991,77 р.

Сумма основного долга: 243 217,55 р.

Сумма процентов: 15 205,00 р.

4. 07 июня 2021 года между Сторонами заключен Договор субподряда №СП-ЖКТКорп.З/2021/Двери.

В соответствии с п.п. 3.1. п. 3 стоимость работ по Договору определена Сметой/Приложением№2 к Договору, согласованной сторонами и составляла 18 224 795 рублей 00 копеек.

Истец свои обязательства по Договору выполнил на общую сумму 18 111 795 рублей 00 копеек, что подтверждается: справкой о стоимости выполненных работ и затрат№1 от 31.07.2021; актом о приемке выполненных работ № 1 от31.07.2021 г.; счет-фактурой № 97/1 от 31.07.2021 г.; справкой о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 30.09.2021; актом о приемке выполненных работ №2 от 30.09.2021 г.; счет-фактурой № 97/2 от 30.09.2021 г.; справкой о стоимости выполненных работ и затрат №3 от 31.10.2021; актом о приемке выполненных работ №3 от 31.10.2021 г.; счет-фактурой № 97/3 от 31.10.2021 г.; справкой о стоимости выполненных работ и затрат №4 от 30.11.2021; актом о приемке выполненных работ №4 от 30.11.2021 г.; счет-фактурой № 97/4 от 30.11.2021 г.; справкой о стоимости выполненных работ и затрат №5 от 10.12.2021; актом о приемке выполненных работ №5 от 10.12.2021 г.; счет-фактурой № 256 от 10.12.2021 г.; счет-фактурой № 156 от 30.06.2022 г.

При этом Ответчик произвел оплату по Договору на общую сумму 17 413 395 рублей 25 копеек, что подтверждается платежным поручением №1767 от 08.06.2021 г.; платежным поручением №1802 от 10.06.2021 г.; платежным поручением №1903 от 15.06.2021 г.; платежным поручением №6496 от 18.11.2021 г.; платежным поручением №6494 от 18.11.2021 г.; платежным поручением №7413 от 30.12.2021 г.; платежным поручением №5119 от 21.06.2022 г.; платежным поручением №9237 от 14.12.2022 г.; платежным поручением №2739 от 10.05.2023 г.

Согласно акту сверки по Договору субподряда №СП-ЖКТКорп.3/2021 /Двери от 07.06.2021 г. денежное обязательство Ответчика перед Истцом составляет 698 399 рублей 75 копеек и до настоящего времени не исполнено.

№СП-ЖКТКорп.3/2021/Двери

Дебет

Кредит

Размер Задолженности

08.06.21

Оплата (1767 от 08.06.2021)

6 000 000,00

10.06.21

Оплата (1802 от 10.06.2021)

3 000 000,00

15.06.21

Оплата (1903 от 15.06.2021)

3 757 356,50

31.07.21

Продажа (97/1 от 31.07.2021)

5 436 042,00

30.09.21

Продажа (97/2 от 30.09.2021)

9 187 913,00

31.10.21

Продажа (97/3 ot31.10.2021)

2 097 140.00

1 866 598,50

с 31.10.2021 по 18.11.2021

19.11.21

Оплата (6496 от 18.11.2021)

164 599,25

19.11.21

Оплата (6494 от 18.11.2021)

1 135 400,75

566598,5

с 18.11.2021 по 30.11.2021

30.11.21

Продажа (97/4 от 30.11.2021)

746 750,00

2 663 738,50 (по продаже от 31.10.2021) по 30.12.2021

10.12.21

Продажа (256 от 10.12.2021)

500 150,00

30.12.21

Оплата (7413 от 30.12.2021)

1 000 000,00

2 410 488,50 (по продаже от 30.11.2021) по 10.01.2021

10.01.22

2 910 638.50 (по продаже от 10.12.2021)

22.06.22

Оплата (5119 от 21.06.2022)

143 800,00

2 766 838,50

по 31.07.2022

30.06.22

Продажа (156 от 30.06.2022)

143 800,00

2 910 638,50

с 31.07.2022 по 14.12.2022

14.12.22

Оплата (9237 от 14.12.2022)

2 012 238,75

898 399,75

по 10.05.2023

10.05.20 23

Оплата (2739 от 10.05.2023]

200 000,00

698 399,75

Обороты по договору

18 111

795,00

17413

395,25

Сальдо конечное

698 399,75

В соответствии с п.п. 3.4.1. п. 3 Договора, оплата выполненных работ производится, в течение 30 (Тридцати) дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 за расчетный месяц и выставленного счета на оплату.

Согласно п.п. 11.3. Договора, за просрочку оплаты работ, принятых Подрядчиком (Ответчик) путем подписания Акта КС-2 и Справки КС-3, Субподрядчик вправе требовать от Подрядчика оплаты неустойки в размере 0.1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченной задолженности.

Таким образом размер пеней по указанному Договору и по сумме задолженности, возникшей у Ответчика, на 20.05.2024 составляет 69 839 рублей 98 копеек.

Период просрочки

Задолженность

с

по

дней

Формула

Неустойка

698 399,75

10.05.2023

20.05.2024

377

698 399,75 х 377 х 0.1%

—Ш

263 296,71 р.

Итого:

363 296,71р.

но не более 10%

69 839,98 руб.

Сумма основного долга: 698 399,75 руб.

Сумма процентов по всем задолженностям: 69 839,98 руб.

5. 28 марта 2023 года между Сторонами заключен Договор субподряда №ТР5-БР-Д.

В соответствии с п.п. 3.1. п. 3 Договора и Дополнительным соглашением №1 от 05.07.2023 г. стоимость работ по Договору составляет 40 264 536 рублей 20 копеек.

Истец свои обязательства по Договору выполнил на общую сумму 34 251 218 рублей 65 копеек, что подтверждается: справкой о стоимости выполненных работ и затрат№1 от 30.09.2023; актом о приемке выполненных работ №1 от 30.09.2023 г.; счет-фактурой № 89 от 30.09.2023 г.; справкой о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 31.10.2023; актом о приемке выполненных работ №2 от 31.10.2023 г.; счет-фактурой № 132 от 31.10.2023 г.; справкой о стоимости выполненных работ и затрат №3 от 31.12.2023; актом о приемке выполненных работ №3 от 31.12.2023 г.; счет-фактурой № 171 от 31.12.2023 г.

При этом Ответчик произвел оплату по Договору на общую сумму 33 051 647 рублей 89 копеек, что подтверждается платежным поручением №2611 от 03.05.2023 г.; платежным поручением №4633 от 12.07.2023 г.; платежным поручением №6765 от 25.10.2023 г.; платежным поручением №7569 от 20.11.2023 г.

Согласно акту сверки по Договору субподряда №ТР5-БР-Д от 28.03.2023 г. денежное обязательство Ответчика перед Истцом составляет 1 199 570 рублей 76 копеек и до настоящего времени не исполнено.

№ТР5-БР-Д

Дебет

Кредит

Размер Задолженности

03.05.23

Оплата (2611 от 03.05.2023)

19 776 625,00

14.07.23

Оплата (4633 от 12.07.2023)

12 435 003,93

30.09.23

Продажа (89       от 30.09.2023)

3 294 192,00

30.10.23

Оплата (6765 от25.10.2023)

494 128,80

31.10.23

Продажа (132      от 31.10.2023)

2 305 934,40

20.11.23

Оплата (7569 от 20.11.2023)

345 890,16

31.12.23

Принято (36 от 31.12.2023)

24 053 270,05

31.12.23

Продажа (171      от 31.12.2023)

4 597 822,20

Обороты по договору

34 251 218,65

33 051 647,89

Сальдо конечное

1 199 570,76

В соответствии с п.п. 3.4.1. п. 3 Договора, оплата выполненных работ производится, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 за расчетный месяц и выставленного счета на оплату.

Согласно п.п. 11.3. Договора, за просрочку оплаты работ, принятых Подрядчиком (Ответчик) путем подписания Акта КС-2 и Справки КС-3, Субподрядчик вправе требовать от Подрядчика оплаты неустойки в размере 0.1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченной задолженности.

Таким образом размер пеней по указанному Договору и по сумме задолженности, возникшей у Ответчика, на 20.05.2024 составляет 119 957 рублей 08 копеек.

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

1 199 570,76

06.02.2024

20.05.2024

105

1 199 570,76 х 105 х 0.1%

125 954,93 р.

Итого:

125 954.93 р.

но не более 10%

119 957,08 руб.

Сумма основного долга: 1 199 570,76 руб.

Сумма процентов по всем задолженностям: 119 957,08 руб.

6. Согласно Акту сверки Истец поставил Товар Ответчику на общую сумму 1 196 073 рубля 10 копеек, без заключения Договора, что подтверждается: универсальным передаточным документом №101 от 28 апреля 2023 г. на сумму 127 560 рублей; универсальным передаточным документом №217 от 22 сентября 2023 г. на сумму 30 000 рублей; универсальным передаточным документом №213 от 13 сентября 371 300 рублей; универсальным передаточным документом №108 от 6 мая 2023 г. на сумму 63 460 рублей; универсальным передаточным документом №97 от 13 апреля 2023 г. на сумму 57 660 рублей; универсальным передаточным документом №32 от 01 февраля 2023 г. на сумму 214 000 рублей; универсальным передаточным документом №285/21-2 от 13 апреля 2022 г. на сумму 85 280 рублей; универсальным передаточным документом №285/1 от 30 декабря 2021 г. на сумму 102 666 рублей; универсальным передаточным документом №277 от 27 декабря 2021 г. на сумму 69 390 рублей; универсальным передаточным документом №94 от 8 июня 2021 г. на сумму 31 700 рублей.

Ответчик произвел оплату поставленного товара на общую сумму 873 393 рубля 10 копеек, что подтверждается: платежным поручением №1735 от 07.06.2021 г.; платежным поручением №7412 от 29.12.2021 г.; платежным поручением №7411 от 29.12.2021 г.; платежным поручением №4153 от 23.06.2023 г.; платежным поручением №5855 от 11.09.2023 г.; платежным поручением №6093 от 20.09.2023 г.; платежным поручением №6094 от 20.09.2023 г.

Однако ввиду того, что Ответчик не полностью оплатил поставленный товар, у последнего перед Истцом образовалось денежное обязательство на сумму 322 680 рублей, которое до настоящего времени не исполнено.

Сальдо начальное

Дебет

Кредит

07.06.21

Оплата (1735 от 07.06.2021)

31 700,00

08.06.21

Продажа (94       от 08.06.2021)

31 700,00

27.12.21

Продажа (277      от 27.12.2021)

69 390,00

29.12.21

Оплата (7412 от 29.12.2021)

69 390,00

29.12.21

Оплата (7411 от 29.12.2021)

187 946,00

30.12.21

Продажа (285/1     от 30.12.2021)

102 666,00

13.01.22

Продажа (285/21-2  от 13.01.2022)

85 280,00

01.02.23

Продажа (32       от 01.02.2023)

214 000,00

13.04.23

Продажа (97       от 13.04.2023)

57 660,00

28.04.23 06.05.23

Продажа (101      от 28.04.2023) Продажа (108      от 06.05.2023)

127 560,00 63 460,00

23.06.23

Оплата (4153 от 23.06.2023)

43 057,10

06.07.23

Продажа (156      от 06.07.2023)

43 057,10

11.09.23

Оплата (5855 от 11.09.2023)

371 300,00

13.09.23

Продажа (213      от 13.09.2023)

371 300,00

20.09.23

Оплата (6093 от 20.09.2023)

30 000,00

20.09.23

Оплата (6094 от 20.09.2023)

140 000,00

22.09.23

Продажа (217      от 22.09.2023)

30 000,00

Обороты по договору

1 196 073,10

873 393,10

Сальдо конечное

322 680,00

В соответствии со статьей 1103 ГК РФ, положения о неосновательном обогащении подлежат применению к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного, в связи с этим обязательством.

В силу пункта 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Согласно п. 1 ст. 1102, п. 2 ст. 1107, п. 1 ст. 395 ГКРФ Ответчик обязан возвратить сумму неосновательного обогащения и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами с того времени, когда он узнал или должен был узнать о неосновательности получения денежных средств. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Проценты за пользование чужими денежными средствами взыскиваются с момента просрочки исполнения денежного обязательства.

16 февраля 2024 года Истец направил ответчику досудебную претензию с требованием оплатить возникшую задолженность по неосновательному обогащению, однако Ответчик оставил данное требование без ответа.

Размер процентов за пользование чужими средствами на сумму 322 680 рублей 00 копеек в период с 16.02.2024 г. по 20.05.2024 (включительно) составляет 13 400 рублей 92 копейки.

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Проценты

с

по

дней

322 680,00 р.

16.02.2024

20.05.2024

95

16,00

322 680,00 х 95 х 16%/366

13 400,92 р.

Сумма основного долга: 322 680,00 р.

Сумма процентов: 13 400,92 р.

Вместе с тем, ответчиком заявлено о зачете встречных однородных требований.

1. Между Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНКИ КОНСТРАКШН» (далее - «Подрядчик») и Обществом с ограниченной ответственностью «БРОНОТЕКС» (далее - «Субподрядчик») заключен договор субподряда № ТР-БР-ДВ-МОНТ-КВ от «06» июля 2023 г. на выполнение работ по монтажу металлических дверных блоков (входных в квартиры) на объекте: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: 

<

...> (далее - «Объект»).

В соответствии с п. 2.1. Договора, Субподрядчик обязуется в установленные Договором сроки выполнить по заданию Подрядчика Работы по монтажу металлических дверных блоков (входных в квартиры) на Объекте в соответствии с проектно-сметной документацией (результат работ по Договору) собственными и (или) привлеченными силами с использованием своих материалов, а также материалов Подрядчика, указанных в Ведомости давальческого материала (Приложение № 4), а Подрядчик обязуется принять и оплатить результат работ в установленном настоящим Договоре порядке.

Согласно п. 3.1, Договора, стоимость Работ по договору определяется Сметой / Протоколом договорной цены (Приложение № 1 к Договору), согласно условиям Договора, которая составляет 6 249 600,00 (Шесть миллионов двести сорок девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек).

Пунктом 4.1. Договора указано, что сроки выполнения Работ по Договору, в том числе отдельных этапов (видов) работ, их объем, сроки начала и завершения, согласованы в Графике производства работ (Приложение № 2 к Договору), согласно которому: - начало выполнения работ - «06» июля 2023 г., - окончание работ - 35 (Тридцать пять) рабочих дней, т.е. до «10» августа 2023 г.

По состоянию на «23» апреля 2024 г. Субподрядчиком выполнено работ согласно Акту выполненных работ (форма № КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) № 1 от «30» ноября 2023 г. на общую сумму 3 704 400,00 (Три миллиона семьсот четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек).

Таким образом у Субподрядчика имеется просрочка выполненных работ на 257 (Двести пятьдесят семь) календарных дней.

В соответствии с п. 11.4.1. Договора, Подрядчик при наступлении нижеуказанных обстоятельств и / или нижеуказанных нарушениях Субподрядчиком обязательств по Договору вправе от Субподрядчика уплаты неустойки (пени) при нарушении сроков выполнения работ, определенных в Графике производства работ (в том числе нарушения сроков по отдельным этапам) 0,1 % от цены Договора (п. 3.1. договора) за каждый день просрочки.

Подрядчик рассчитал неустойку (пени), которая составляет - 1 606 147,20 (Один миллион шестьсот шесть тысяч сто сорок семь рублей 20 копеек). 

2. Между Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНКИ КОНСТРАКШН» (далее - «Подрядчик») и Обществом с ограниченной ответственностью «БРОНОТЕКС» (далее - «Субподрядчик») заключен договор субподряда № ТР5-БР-Д от «28» марта 2023 г. на выполнение работ по поставке и монтажу металлических дверных блоков (без входных в квартиры) на объекте: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: 

<

...> (далее - «Объект»).

В соответствии с п. 2.1. Договора, Субподрядчик обязуется в установленные Договором сроки выполнить по заданию Подрядчика Работы по поставке и монтажу металлических дверных блоков (без входных в квартиры) на Объекте в соответствии с проектно-сметной документацией (результат работ по Договору) собственными и (или) привлеченными силами, а Подрядчик обязуется принять и оплатить результат работ в установленном настоящим Договоре порядке.

Согласно п. 3.1. Договора, стоимость Работ по договору определяется Сметой / Протоколом договорной цены (Приложение № 1 к Договору), согласно условиям Договора, которая составляет 25 512 645,00 (Двадцать пять миллионов пятьсот двенадцать тысяч шестьсот сорок пять рублей 00 копеек).

Пунктом 4.1. Договора указано, что сроки выполнения Работ по Договору, в том числе отдельных этапов (видов) работ, их объем, сроки начала и завершения, согласованы в Графике производства работ (Приложение № 2 к Договору), согласно которому: - начало выполнения работ - «28» марта 2023 г., - окончание работ - 55 (Пятьдесят пять) рабочих дней, т.е. до «10» июня 2023 г.

По состоянию на «23» апреля 2024 г. Субподрядчиком выполнено работ согласно Акту выполненных работ (форма № КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) № 3 от «31» декабря 2023 г. на общую сумму 10 197 948,60 (Десять миллионов сто девяносто семь тысяч девятьсот сорок восемь рублей 60 копеек).

Таким образом у Субподрядчика имеется просрочка выполненных работ на 257 (Двести пятьдесят семь) календарных дней.

В соответствии с п. 11.4.1. Договора, Подрядчик при наступлении нижеуказанных обстоятельств и / или нижеуказанных нарушениях Субподрядчиком обязательств по Договору вправе от Субподрядчика уплаты неустойки (пени) при нарушении сроков выполнения работ, определенных в Графике производства работ (в том числе нарушения сроков по отдельным этапам) 0,1 % от цены Договора (п. 3.1. договора) за каждый день просрочки.

Подрядчик рассчитал неустойку (пени), которая составляет - 8 113 021,11 (Восемь миллионов сто тринадцать тысяч двадцать один рубль 11 копеек).

3. Между Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНКИ КОНСТРАКШН» (далее - «Подрядчик») и Обществом с ограниченной ответственностью «БРОНОТЕКС» (далее - «Субподрядчик») заключен договор субподряда № ГЗГ-Б-Д от «20» июня 2022 г. на выполнение работ по изготовлению и монтажу металлических дверных блоков на объекте: Многофункциональный жилой комплекс распложенный по адресу: г. Москва, ул. Газгольдерная, вл. 8 (далее - «Объект»).

В соответствии с п. 2.1. Договора, Субподрядчик обязуется в установленные Договором сроки выполнить по заданию Подрядчика Работы по изготовлению и монтажу металлических дверных блоков на Объекте в соответствии с проектно-сметной документацией (результат работ по Договору) собственными и (или) привлеченными силами, а Подрядчик обязуется принять и оплатить результат работ в установленном настоящим Договоре порядке.

Согласно п. 3.1. Договора, стоимость Работ по договору определяется Сметой / Протоколом договорной цены (Приложение № 1 к Договору), согласно условиям Договора, которая составляет 102 141 559,70 (Сто два миллиона сто сорок одна тысяча пятьсот пятьдесят девять рублей 70 копеек), в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «11» мая 2023 г.

Пунктом 4.1. Договора указано, что сроки выполнения Работ по Договору, в том числе отдельных этапов (видов) работ, их объем, сроки начала и завершения, согласованы в Графике производства работ (Приложение № 2 к Договору), согласно которому: - начало выполнения работ - «20» июня 2022 г., - окончание работ - 70 (Семьдесят) рабочих дней, т.е. до «12» сентября 2022 г.

По состоянию на «23» апреля 2024 г. Субподрядчиком выполнено работ согласно Акту выполненных работ (по форме № КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) № 9 от «30» ноября 2023 г. на общую сумму 100 460 770,71 (Сто миллионов четыреста шестьдесят тысяч семьсот семьдесят рублей 71 копейка).

Таким образом у Субподрядчика имеется просрочка выполненных работ на 257 (Двести пятьдесят семь) календарных дней.

В соответствии с п. 11.4.1. Договора, Подрядчик при наступлении нижеуказанных обстоятельств и / или нижеуказанных нарушениях Субподрядчиком обязательств по Договору вправе от Субподрядчика уплаты неустойки (пени) при нарушении сроков выполнения работ, определенных в Графике производства работ (в том числе нарушения сроков по отдельным этапам) 0,1 % от цены Договора (п. 3.1. договора) за каждый день просрочки.

Подрядчик рассчитал неустойку (пени), которая составляет - 60 161 378,66 (Шестьдесят миллионов сто шестьдесят одна тысяча триста семьдесят восемь рублей 66 копеек).

4. Между Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНКИ КОНСТРАКШН» (далее - «Подрядчик») и Обществом с ограниченной ответственностью «БРОНОТЕКС» (далее - «Субподрядчик») заключен договор субподряда № СП-ЖКТКорп.3/2021 /Двери от «07» июня 2021 г. на выполнение работ на объекте: Жилой комплекс с подземной автостоянкой, блоком общественных помещений и встроенно-пристроенным детским садом на 100 мест, распложенный по адресу: 

<

...> (далее - «Объект»).

В соответствии с п. 2.1. Договора, Субподрядчик обязуется в установленные Договором сроки выполнить по заданию Подрядчика Работы в соответствии с проектно-сметной документацией (результат работ по Договору) собственными и (или) привлеченными силами, а Подрядчик обязуется принять и оплатить результат работ в установленном настоящим Договоре порядке.

Согласно п. 3.1. Договора, стоимость Работ по договору определяется Сметой / Протоколом договорной цены (Приложение № 2 к Договору), согласно условиям Договора, которая составляет 18 224 795,00 (Восемнадцать миллионов двести двадцать четыре тысячи семьсот девяносто пять рублей 00 копеек).

Пунктом 4.1. Договора указано, что сроки выполнения Работ по Договору, в том числе отдельных этапов (видов) работ, их объем, сроки начала и завершения, согласованы в Графике производства работ (Приложение № 1 к Договору), согласно которому: - начало выполнения работ - «20» июня 2022 г., - окончание работ - 70 (Семьдесят) рабочих дней, т.е. до «12» сентября 2022 г.

По состоянию на «23» апреля 2024 г. Субподрядчиком выполнено работ согласно Акту выполненных работ (по форме № КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) № 5 от «10» декабря 2021 г. на общую сумму 17 967 995,00 (Семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот девяносто пять рублей 00 копеек).

Таким образом у Субподрядчика имеется просрочка выполненных работ на 954 (Девятьсот пятьдесят четыре) календарных дней.

В соответствии с п. 11.4.1. Договора, Подрядчик при наступлении нижеуказанных обстоятельств и / или нижеуказанных нарушениях Субподрядчиком обязательств по Договору вправе от Субподрядчика уплаты неустойки (пени) при нарушении сроков выполнения работ, определенных в Графике производства работ (в том числе нарушения сроков по отдельным этапам) 0,1 % от цены Договора (п. 3.1. договора) за каждый день просрочки.

Подрядчик рассчитал неустойку (пени), которая составляет - 17 386 454,43 (Семнадцать миллионов триста восемьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят четыре рубля 43 копейки).

Представленный ответчиком расчет неустойки, проверен судом, является правильным и не оспорен по существу истцом.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований, в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статьей 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Таким образом, по состоянию на «23» апреля 2024 г. у Подрядчика существует задолженность перед Субподрядчиком имеется задолженность:

по договору № ТР-БР-ДВ-МОНТ-КВ от «06» июля 2023 г. в размере 1 978 200,00 (Один миллион девятьсот семьдесят восемь тысяч двести рублей 00 копеек);

по договору № ТР-БР-ДВ-МОНТ-КВ от «06» июля 2023 г. пени в размере 197 820 (сто девяносто семь тысяч восемьсот двадцать) рублей;

по договору № ТР5-БР-Д от «28» марта 2023 г. в размере 1 199 570,76 (Один миллион сто девяносто девять тысяч пятьсот семьдесят рублей 76 копеек);

по договору № ТР5-БР-Д от «28» марта 2023 г. пени в размере 119 957 (Сто девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 08 копеек;

по договору № ГЗГ-Б-Д от «20» июня 2022 г. в размере 23 413 722,93 (Двадцать три миллиона четыреста тринадцать тысяч семьсот двадцать два рубля 93 копейки);

по договору № ГЗГ-Б-Д от «20» июня 2022 г. пени в размере 2 341 372 (Два миллиона триста сорок одна тысяча триста семьдесят два) рубля;

по договору № СП-ЖКТКорп.3/2021/Двери от «07» июня 2021 г. в размере 698 399,75 (Шестьсот девяносто восемь тысяч триста девяносто девять рублей 75 копеек);

по договору № СП-ЖКТКорп.З/2021/Двери от «07» июня 2021 г. пени в размере 69 839 (Шестьдесят девять тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 98 копеек;

неосновательное обогащение в размере 322 680 (Триста двадцать две тысячи шестьсот восемьдесят) рублей;

проценты за пользование чужими денежными средствами начисленные на сумму неосновательного обогащения в размере 13 400 (Тринадцать тысяч четыреста) рублей 92 копейки;

по договору № ПС-ВО-10-2022-ДВ от «19» октября 2022 г. в размере 243 217,55 (Двести сорок три тысячи двести семнадцать рублей 55 копеек),

по договору № ПС-ВО-10-2022-ДВ от «19» октября 2022 г. проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 15 205 (Пятнадцать тысяч двести пять) рублей;

что в общем размере составляет - 30 613 385 (Тридцать миллионов шестьсот тринадцать тысяч триста восемьдесят пять) рублей 05 копеек,

а у Субподрядчика имеется задолженность перед Подрядчиком задолженность:

по договору № ТР-БР-ДВ-МОНТ-КВ от «06» июля 2023 г. в размере 1 606 147,20 (Один миллион шестьсот шесть тысяч сто сорок семь рублей 20 копеек);

по договору № № ТР5-БР-Д от «28» марта 2023 г. в размере 8 113 021,11 (Восемь миллионов сто тринадцать тысяч двадцать один рубль 11 копеек);

по договору № ГЗГ-Б-Д от «20» июня 2022 г. в размере 60 161 378,66 (Шестьдесят миллионов сто шестьдесят одна тысяча триста семьдесят восемь рублей 66 копеек);

по договору № № СП-ЖКТКорп.3/2021 /Двери от «07» июня 2021 г. в размере 17 386 454,43 (Семнадцать миллионов триста восемьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят четыре рубля 43 копейки), что в общем размере составляет 87 267 001,40 (Восемьдесят семь миллионов двести шестьдесят семь тысяч один рубль 40 копеек).

До настоящего времени указанные обязательства по оплате сторонами не исполнены и у Подрядчика, и у Субподрядчика существуют встречные однородные требования в размере 30 613 385 (Тридцать миллионов шестьсот тринадцать тысяч триста восемьдесят пять) рублей 05 копеек.

В представленном отзыве, Подрядчик уведомляет Субподрядчика о том, что на основании ст. 410 ГК РФ Подрядчик осуществляет зачет взаимных однородных требований в размере 30 613 385 (Тридцать миллионов шестьсот тринадцать тысяч триста восемьдесят пять) рублей 05 копеек.

Согласно указанной статье для зачета достаточно заявления одной стороны. Взаимные обязательства сторон по оплате, вытекающие из указанных выше договоров прекращаются в 30 613 385 (Тридцать миллионов шестьсот тринадцать тысяч триста восемьдесят пять) рублей 05 копеек.

После проведения зачета на сумму 30 613 385 (Тридцать миллионов шестьсот тринадцать тысяч триста восемьдесят пять) рублей 05 копеек, по состоянию на «07» мая 2024 г. задолженность по вышеуказанным договорам Подрядчика перед Субподрядчиком прекращается в полном объеме, а задолженность последнего перед Подрядчиком по договору № ГЗГ-Б-Д от «20» июня 2022 г. составляет 56 653 616 (Пятьдесят шесть миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи шестьсот шестнадцать) рублей 35 копеек. Таким образом задолженность у Ответчика перед Истцом отсутствует полностью.

Согласно ст. 410 ГК РФ для прекращения обязательства зачетом необходимо не только наличие встречных однородных требований, срок исполнения которых наступил, но и заявление о зачете хотя бы одной из сторон.

Как следует из толкования норм права, изложенного в абзаце втором п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11.06.2020 №6 «О некоторых вопросах применения положений ГК РФ о прекращении обязательств» (далее - Постановление Пленума №6), обязательства могут быть прекращены зачетом после предъявления иска по одному из требований. В этом случае сторона по своему усмотрению вправе заявить о зачете как во встречном иске (статья 132 АПК РФ, так и в возражении на иск, юридические и фактические основания которых исследуются судом равным образом (ч. 1 ст. 64, части 1 - 3.1 статьи 65, ч. 7 ст. 71, ч. 1 ст. 168, ч. 3, 4 ст. 170 АПК РФ). В частности, также после предъявления иска ответчик вправе направить истцу заявление о зачете и указать в возражении на иск на прекращение требования, по которому предъявлен иск, зачетом.

Согласно пункту 20 Постановления Пленума №6 кроме того, зачет требований является допустимым и после вступления в законную силу судебных актов, подтвердивших наличие и размер соответствующих обязательств сторон, но без возбуждения по одному или обоим судебным актам исполнительного производства, а также после вступления в законную силу судебного акта по одному требованию и при отсутствии возражений должника по другому требованию.

 Из разъяснений, изложенных в пункте 12 Постановления Пленума №6 в целях применения статьи 410 ГК РФ предметы активного и пассивного требований, должны быть однородны, то есть стороны после осуществления зачета должны оказаться в том же положении, как если бы оба обязательства были прекращены исполнением. Статья 410 ГК РФ допускает в том числе зачет активного и пассивного требований, которые возникли из разных оснований. Критерий однородности соблюдается при зачете требования по уплате основного долга (например, покупной цены по договору купли-продажи) на требование об уплате неустойки, процентов или о возмещении убытков (например, в связи с просрочкой выполнения работ по договору подряда).

Данная правовая позиция отражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 25.08.2020 г. №310-ЭС20-2774.

Как следует из п. 14 Постановления Пленума №6, согласно ст. 410 ГК РФ для зачета необходимо и достаточно заявления одной стороны. 

Предъявленная к зачету Ответчиком сумма встречных требований к Истцу соответствует критериям, приведенным в ст. 410 ГК РФ и в разъяснениях п. 19 Постановления Пленума №6 от 11.06.2020 г., в связи с чем, основания для зачета встречного требования по оплате неустойки у Ответчика имеются.

При изложенных обстоятельствах, исковые требования удовлетворению не подлежат.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.     

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:                                                                                                              В.Г. Джиоев