РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

   03 июля 2024 года    по делу А33-18245/2023 Красноярск  

03 июля 2024 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в течение одного месяца со дня вступления в законную силу судебного акта  по настоящему делу исполнить обязательства по договору об осуществлении  технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.5841.21 от 06.10.2021,  осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя  объекта «Базовая станция/оборудование сотовой связи», расположенного (который будет  располагаться) по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, в границах  кадастрового квартала 24:50:0400204, в точке присоединения:  

I точка присоединения: максимальная мощность 15 кВт.  Линия (0,4) Проектируемая  

ЩР (0,4) ШР-1072-4-1 Ячейка ТП руб.4 Детский сад № 227 

ТП ТП-1072  

Ячейка ПС ф.26-14 РП 63 ПС ПС № 26 «Зеленая» 220/10/6кВ Основной источник питания: ПС № 26 «Зеленая» 220/10/6кВ ; 

Резервный источник питания: отсутствует, в том числе по обеспечению готовности  

объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство,  

реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию  

отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации)  

такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства  

(энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих  

характеристик: - максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; - категория надежности третья; 

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое  

присоединение 0,4 кВ; 

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств  

отсутствует; 

включая мероприятия согласно Техническим условиям № 8000471649:  

 - выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе  

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным  

постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласование со всеми  заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством;  

- строительство ЛЭП 0,4 кВ от точки, указанной в пункте № 7 настоящих ТУ, до точки  присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы,  установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и  сечение провода определить проектом;  

- определить проектом необходимость установки автоматического выключателя 0,4 кВ в  РУ 0,4 кВ ШР-1072- 4-1;  

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в  соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков  электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №  442).  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Инфраструктурные решения» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 103 054,66 руб.  неустойки за период с 02.10.2022 по 03.07.2024; с 04.07.2024 – неустойку по день  фактического исполнения обязательства из расчета 161,02 руб. за каждый день просрочки,  судебную неустойку в размере по 1 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения  суда по день его фактического исполнения, а также 8 000 руб. расходов по уплате  государственной пошлины.  

Во взыскании судебной неустойки в остальной сумме отказать. 

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме  2 092 руб.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья О.И. Медведева