АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  РЕШЕНИЕ  (резолютивная часть) г. Волгоград Дело № А12-21447/2017 «18» января 2018 года 

 Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Смагоринской Екатерины  Борисовны, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бондаревой  Н.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью «Специальные сварные металлоконструкции» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, 400066, 

<

...>) к  Федеральному бюджетному учреждению «Администрация Волго-Донского бассейна  внутренних водных путей» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 400082, 

<

...>), Федеральному агентству морского и речного транспорта (125993, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об изменении  договора,  

 при участии в судебном заседании: 

 от истца – ФИО1, представитель по доверенности от 01.06.2017 № 1/01.06.17,  ФИО2, представитель по доверенности от 10.11.2017 № 1/10.11.17,  

 от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности от 20.12.2016 № ЮО14-03-  108,  

 руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации,   

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить. 

 Изменить Государственный контракт № 0329100005915000189-к от 24.12.2015 на  выполнение работ по объекту: «Разработка и реализация комплексного проекта  реконструкции Волго-Донского судоходного канала. II этап» 1 (первый этап). Реконструкция  гидроузла № 8» в части продления сроков выполнения работ по Контракту с учетом срока  

проведения приемки Объекта и подписания Акта приемки законченного строительством  объекта Приемочной комиссией до 31 августа 2019 года, а именно:  

 - Пункт 10.4. Контракта изложить в следующей редакции: «Дата окончания выполнения  работ, с учетом срока проведения приемки Объекта и подписания Акта приемки  законченного строительством объекта Приемочной комиссией – 31 августа 2019 года».  

 - Календарный план – график на выполнение работ по объекту «Разработка и реализация  комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. II этап» 1  (первый этап). Реконструкция гидроузла № 8» (Приложение № 3 к Контракту) изложить в  следующей редакции:  

 Взыскать с Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волго-Донского  бассейна внутренних водных путей» (400082, город Волгоград, ул. Фадеева, 35, ОГРН  1023404365786, ИНН 3448009717) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Специальные сварные металлоконструкции» (ОГРН 1063459054834, ИНН 3442086730,  400066, г. Волгоград, ул. Переяславская, д. 20б) расходы по уплате государственной  пошлины в размере 6 000 руб.  

 Решение может быть обжаловано в порядке, установленном Арбитражным  процессуальным кодексом Российской Федерации через Арбитражный суд Волгоградской  области.  

 Решение в полном объеме будет изготовлено не позднее 25.01.2018. 

  Судья Е.Б. Смагоринская