АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, 

<

...>

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-7741/2025

г. Чебоксары

19 февраля 2026 года

Резолютивная часть решения оглашена 09 февраля 2026 года.

Полный текст решения изготовлен 19 февраля 2026 года.

Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в составе судьи Павловой О.Л., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гурьевой В.В., рассмотрев в заседании суда дело по исковому заявлению

Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Алатырское лесничество» Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, г. Алатырь к обществу с ограниченной ответственностью «Гарант», г. Чебоксары

о взыскании 1 120 046 руб. 43 коп. пени,

при участии: не участвовали, извещены надлежащим способом,

установил:

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Алатырское лесничество» Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики (далее – истец) обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Гарант» (далее – ответчик) о взыскании 1 120 046 руб. 43 коп. пени за неисполнение обязательств по контракту от 06.09.2024 № 7861 на выполнение работ по капитальному ремонту зданий «Бокс» и «Пожарное депо» БУ «Алатырское лесничество» Минприроды Чувашии, расположенных по адресу: 

<

...>.

Лица, участвующие в деле, о дате и месте проведения судебного заседания извещены надлежащим образом, явку своих представителей в суд не обеспечили.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление рассмотрено в их отсутствие.

Изучив материалы дела, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, 06.09.2024 между Бюджетным учреждением Чувашской Республики «Алатырское лесничество» Министерства природных

ресурсов и экологии Чувашской Республики (заказчиком) и обществом с ограниченной ответственностью «Гарант» (подрядчиком) заключен государственный контракт № 7861, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает обязательства на выполнение работ по капитальному ремонту зданий «Бокс» и «Пожарное депо» БУ «Алатырское лесничество» Минприроды Чувашии, расположенное по адресу: 

<

...> согласно Описанию объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему контракту), Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 3 к настоящему контракту), Сводным сметным расчетом и локальной сметой (Приложение № 4 к настоящему контракту), которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта (пункт 1.1 контракта).

Срок исполнения подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту: с момента заключения контракта по 30 ноября 2024 года (пункт 4.2 контракта).

Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ в сроки и в порядке предусмотренные настоящим контрактом (пункт 1.2 контракта).

Цена контракта составляет 6 899 670 руб. 00 коп., НДС не облагается в связи с установлением для подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (пункт 2.1 контракта).

Согласно пункту 2.4 контракта (с учетом дополнительного соглашения от 15.08.2025 к государственному контракту № 7861) оплата заказчиком стоимости работ подрядчику осуществляется с учетом Графика выполнения работ и фактически выполненных подрядчиком работ в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС-3 с приложением счета-фактуры (счета), путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

Обстоятельства дела свидетельствуют, что 21.07.2025 составлен акт о полном исполнении контракта. Из пункта 3 акта следует, что вышеуказанные работы согласно контракту фактически выполнены 21.07.2025 (л.д. 96 тома 1).

Сторонами подписаны справка стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 08.08.2025 на сумму 6 300 822 руб. 75 коп. и акты о приемке выполненных работ № 1 от 08.08.2025, № 2 от 08.08.2025, № 1 от 11.08.2025 на сумму 6 300 822 руб. 75 коп. (л.д. 97 – 124, 128-129 тома 1).

12.08.2025 составлен акт приемки выполненных работ по государственному контракту № 7861, согласно которому, проведя осмотр отремонтированных зданий «Бокс» и «Пожарное депо» БУ «Алатырское лесничество» Минприроды Чувашии, рассоложенных по адресу: 

<

...>, ознакомившись с представленной исполнительной документацией, комиссия решила, что выполненные работы по капитальному ремонту соответствуют требованиям договора, проектной документации, требованиям технических регламентов и нормативных правовых актов в области строительства. Законченные капитальные ремонтом зданий «Бокс» и «Пожарное депо» БУ «Алатырское лесничество» Минприроды Чувашии передаются в эксплуатацию с 13.08.2025 года (пункт 7 акта) (л.д. 125 – 127 тома 1).

Работы по капитальному ремонту выполнены в срок – 21.07.2025 (пункт 5 акта).

В соответствии с пунктом 6 акта приемки выполненных работ от 12.08.2025 по государственному контракту № 7861 стоимость предъявленных к приемке работ и услуг по капитальному ремонту составила 6 300 822 руб. 75 коп., в том числе:

ремонтно-строительные работы и услуги 6 188 655 руб. 00 коп.,

непредвиденные затраты: 112 167 руб. 75 коп.

Дополнительным соглашением от 23.09.2025 к государственному контракту № 7861 стороны пришли к соглашению о расторжении контракта. Оплата в размере 6 300 822 руб. 75 коп. производится за счет средств целевой субсидии 850513 «Целевая субсидия на проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества, включая разработку проектной документации и проведение строительного контроля, и особо ценного движимого имущества, закрепленных в установленном порядке за учреждением или приобретенных им за счет средств, выделенных учреждению учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду)» по коду БК 850 04 07 Ч340819210 КЦ 850513-99 (л.д. 30 тома 2).

Истцом произведена оплата ответчику за выполненные работы по капитальному ремонту зданий «Бокс» и «Пожарное депо» БУ «Алатырское лесничество» Минприроды Чувашии по государственному контракту № 7861 на сумму 6 300 822 руб. 75 коп., что подтверждается платежным поручением от 20.08.2025 № 252765 (л.д. 130 тома 1).

Требованием от 21.07.2025 истец просил в порядке пункта 7.4 контракта оплатить пени за неисполнение обязательств в установленный срок по контракту за период с 01.12.2024 по 21.07.2025 в сумме 1 120 046 руб. 43 коп.

В соответствии с пояснениями представителя ответчика, изложенных в названном требовании, ответчик признает пени и обязуется оплатить их в течение двух рабочих дней с момента поступления денежных средств.

Неисполнение ответчиком требования истца в добровольном порядке послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Пунктом 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Пунктом 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 1 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами, при отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

По смыслу указанных норм основанием для оплаты выполненных работ является фактическое выполнение предусмотренных договором подряда работ и их передача заказчику.

Факт выполнения ответчиком работ в рамках государственного контракта на сумму 6 300 822 руб. 75 коп. подтверждается актами о приемке выполненных работ от 08.08.2025 № 1, от 08.08.2025 № 2, от 11.08.2025 № 1, справкой стоимости выполненных работ и затрат от 08.08.2025 № 1 и истцом не оспаривается, в связи с чем платежным поручением от 20.08.2025 № 252765 истцом произведена оплата ответчику за выполненные работы на сумму 6 300 822 руб. 75 коп.

Согласно пункту 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В силу пункта 7.5 контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока

исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Частью 1 статьи 329 ГК РФ предусмотрено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, предусмотренной законом или договором.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Поскольку факт исполнения ответчиком обязательств по контракту – 21.07.2025 (при установленном сроке выполнения работ в соответствии с графиком производства работ – 30.11.2024) установлен, суд признает требования истца о взыскании неустойки, подлежащими удовлетворению.

Между тем, расчет истца судом проверен и признан произведенным арифметически неверно в соответствии с условиями контракта.

На основании пункта 7.5 контракта пеня подлежит начислению на сумму 6 300 822 руб. 75 коп.

При таких обстоятельствах суд производит начисление пени за период с 01.12.2024 по 21.07.2025 в размере 1 018 633 руб. 02 коп.

На основании части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине суд относит на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

При изготовлении полного текста решения по делу судом установлено, что в резолютивной части решения от 09.02.2026 судом были допущены описки, а именно во втором абзаце сумму пеней следует читать как 1 018 633 руб. 02 коп., в четвертом абзаце сумму государственной пошлины следует читать как 53 295 руб.

Суд считает необходимым исправить допущенные описки в резолютивной части решения от 09.02.2026 на основании статьи 179 Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации, и не учитывать их при изготовлении полного текста решения по настоящему делу.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гарант» (ОРГН 1162130056990, ИНН 

<

***>) в пользу бюджетного учреждения Чувашской Республики «Алатырское лесничество» Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 1 018 633 руб. 02 коп. (Один миллион восемнадцать тысяч шестьсот тридцать три рубля две копейки) пени за период с 01.12.2024 по 21.07.2025.

В остальной части в удовлетворении иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гарант» (ОРГН 1162130056990, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 53 295 руб. (Пятьдесят три тысячи двести девяносто пять рублей) государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья О.Л. Павлова