АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть  Дело № А43-15586/2024 

г.Нижний Новгород 04 сентября 2024 года Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Верховодова Е.В. (шифр дела 40259), при ведении протокола секретарем судебного заседания Балабиной Ю.С., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью ТД «Строймонтаж» (ИНН: 

<

***>) к МКУ «Управление капитального строительства Богородского муниципального округа Нижегородской области» (ИНН: 

<

***>) об обязании заключить дополнительное соглашение, 

при участии в предварительном судебном заседании: от истца: ФИО1 (доверенность от 19.01.2023); 

решил:

Требование общества с ограниченной ответственностью ТД «Строймонтаж» (ИНН:  

<

***>).  

Обязать МКУ «Управление капитального строительства Богородского муниципального  округа Нижегородской области» (ИНН: 

<

***>) заключить дополнительное соглашение с  обществом с ограниченной ответственностью ТД «Строймонтаж» (ИНН: 

<

***>) к  государственному контракту № 003 от 04.05.2021г. на следующих условиях:  

1.Изменить цену Контракта в связи с возникновением независящих от Сторон контракта  обстоятельств: существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие  использованию при исполнении Контракта.  

2. Сумма увеличения цены Контакта в связи с удорожанием составляет 6 700 549, 03  руб. (шесть миллионов семьсот тысяч пятьсот сорок девять рублей 03 копейки), в т.ч. НДС  20%.  

Изменение цены Контракта составляет 29,60% и не приведет к увеличению цены Контракта  более чем на 30 %.  

3. Изложить пункт 2.1. раздела 2 «Цена контракта» Контракта в новой редакции: «2.1. Общая цена Контракта составляет 29 336 969,00 (Двадцать девять миллионов 

триста тридцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят девять рублей 03 копейки), в т.ч. НДС по  ставке 20% - 5 867 393, 90 руб.».  

4. Заказчик обязуется оплатить сумму увеличения цены Контакта в связи с удорожанием в  размере 6 700 549, 03 руб. (шесть миллионов семьсот тысяч пятьсот сорок девять рублей 03  копейки), в т.ч. НДС 20%. в срок, установленный п. 7.2 части 7 Контракта.  

5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Контракта. Остальные условия  Контракта остаются без изменений».  

Взыскать с Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства  Богородского муниципального округа Нижегородской области» ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу ООО «Строймонтаж» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6000  руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.  

Исполнительные листы выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в  законную силу.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и  может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд города Владимира путем  подачи апелляционной жалобы в Арбитражный суд Нижегородской области. В таком же порядке  решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не  превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу настоящего решения при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья Е.В. Верховодов